10513_6382592  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-38162/2019

22 января 2020 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску Администрации  Куйбышевского сельского поселения (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДРСУ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился, от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 65, 110, 121, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДРСУ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты вступления судебного  акта в законную силу безвозмездно устранить следующие недостатки работ, выполненных  в рамках исполнения обязательств по муниципальному контракту №  0158300014918000011_233571/70 от 04.07.2018 г., а именно: устройство основания  толщиной 10 см. под тротуары из кирпичного или известнякового щебня – 151 м2;  устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 4 см.) – 605  м3; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (смесь  цементно-песчаная) (толщ. 4 см.) – 605 м3; устройство покрытий из тротуарной плитки,  толщиной 60 мм – 151,3 м2; установка бортовых камней бетонных при других видах  покрытий – 22 м; устройство основания толщиной 27 см. из щебня фракции 40-70 мм. при  укатке каменных материалов с переделом прочности при сжатии до 68,6 МПа (700  

устройство покрытия толщиной 6 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных  мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 – 550 м2.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДРСУ»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета Российской Федерации 6 000  руб. государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина