ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-27997/2023

Дело № А40-255262/22

г. Москва

22 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июня 2023 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Бодровой Е.В., 

судей: Семёновой А.Б., Кузнецовой Е.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассматривает в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «МИННЕФТЕГАЗСТРОЙ» на Решение Арбитражного суда г.Москвы от 16.03.2023 по делу №А40-255262/22, по иску ООО «ТН-АЗС-Запад» (ИНН 

<

***>) к ООО «МНГС» (ИНН 

<

***>) 

о взыскании денежных средств в размере 948 314 руб. 70 коп.

При участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 19.06.2023, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 17.03.2023.  

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ТН-АЗС-Запад» (далее – истец), с учетом принятых судом уточнений исковых требований, в предусмотренном положениями статьи 49 АПК РФ порядке, обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «МНГС» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в размере 2 042 067 руб. 23 коп., с последующим начислением процентов по статье 395 ГК РФ по дату фактического исполнения обязательства по оплате денежных средств. 

Решением суда от 16.03.2023 исковые требования удовлетворены частично.

Взыскана неустойка в размере 2 030 974 руб. 41 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 122 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

ООО «МНГС» не согласилось с решением суда по делу и обратилось с апелляционной жалобой.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители лиц, участвующих в деле представили мировое соглашение на утверждение суда, подписанное полномочными представителями истца и ответчика, следующего содержания: 

«1. Стороны пришли к соглашению об освобождении Истцом Ответчика от обязательств по оплате неустойки в размере 2 030 974 (два миллиона тридцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 41 коп. по договорам подряда №20400/2020/3023 от 11.12.2020г. и №20400/2021/0363 от 12.02.2021г., являющейся предметом исковых требований Истца по делу №А40-255262/2022, при условии соблюдения Ответчиком положений пункта 2 настоящего Мирового соглашения.

2.В срок до 26.06.2023г. во исполнение условий договора купли-продажи будущего земельного участка №20400/2020/3021  от 11.12.2020г. Ответчик обязуется передать Истцу земельный участок с кадастровым номером 35:25:0603074:1305, общей площадью 16 520 квадратных метров, с видом разрешенного использования: земли промышленности энергетики, транспорта,   связи,   радиовещания,   телевидения,   информатики,   земли   для   обеспечения космической  деятельности,   земли   обороны,   безопасности   и   земли   иного   специального назначения, с видом разрешенного использования: объекты дорожного сервиса. 

3. Ответчик передает, а Истец принимает в срок до 30.07.2023 года надлежащим образом выполненные и оформленные работы по Договору №20400/2020/3023 от 11.12.2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство МАЗС на земельном участке, расположенном на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога на 12 км, площадью 1 га с левой стороны трассы».

Ответчик передает, а Истец принимает в срок до 30.09.2023 года по Договору подряда №20400/2021/0363 от 12.02.2021 года фактическое выполнение СМР (выполнение комплектации оборудованием, его монтаж и пусконаладка) по объекту: «Строительство МАЗС на земельном участке, расположенном на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога на 12 км, площадью 1 га с левой стороны трассы» и производит окончательный расчет с учетом ранее принятых работ в установленный договором срок.

4.Не позднее 27.06.2023 г. Стороны подают в регистрирующий орган документы на регистрацию перехода к Истцу прав на земельный участок с кадастровым номером 35:25:0603074:1305, общей площадью 16 520 квадратных метров и заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке по, договору ипотеки (залоге недвижимости) №20400/2022/2956 от 08.09.2022 г., заключенному между Истцом и Ответчиком.

После подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по договору подряда №20400/2020/3023 от 11.12.2020 г. стороны направляют в регистрирующий орган заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке по договору ипотеки (залоге недвижимости) №1 от 11.12.2020 г., заключенному между Истцом и Ответчиком.

5.Окончательные расчеты по договору купли-продажи будущего земельного участка №20400/2020/3021 от 11.12.2020г. и договору №20400/2020/3023 от 11.12.2020г. на выполнение проектно-изыскательских работ производятся Сторонами в соответствии с условиями указанных договоров.

6.Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче искового заявления по делу №А40-255262/2022, не подлежащие возврату из федерального бюджета, Ответчик компенсирует Истцу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца.

7.Иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и относятся исключительно на ту Сторону, которая их понесла». 

Согласно статье 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса. В соответствии с частью 3 настоящей статьи, мировое соглашение не может нарушать интересы третьих лиц и противоречить закону.         Изучив материалы дела, проверив заключенное мировое соглашение на предмет соответствия требованиям статей 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что настоящее мировое соглашение не нарушает права других лиц, а также не противоречит закону, в связи с чем, подлежит утверждению.        

В соответствии частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения принятый по делу судебный акт подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 139-141, частью 2 ст. 150, статьями 176, 265, 266-268, пунктом 3 ст. 269, статьи 217 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2023 по делу №А40-255262/22 отменить. 

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции: «1. Стороны пришли к соглашению об освобождении Истцом Ответчика от обязательств по оплате неустойки в размере 2 030 974 (два миллиона тридцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 41 коп. по договорам подряда №20400/2020/3023 от 11.12.2020г. и №20400/2021/0363 от 12.02.2021г., являющейся предметом исковых требований Истца по делу №А40-255262/2022, при условии соблюдения Ответчиком положений пункта 2 настоящего Мирового соглашения.

2.В срок до 26.06.2023г. во исполнение условий договора купли-продажи будущего земельного участка №20400/2020/3021  от 11.12.2020г. Ответчик обязуется передать Истцу земельный участок с кадастровым номером 35:25:0603074:1305, общей площадью 16 520 квадратных метров, с видом разрешенного использования: земли промышленности энергетики, транспорта,   связи,   радиовещания,   телевидения,   информатики,   земли   для   обеспечения космической  деятельности,   земли   обороны,   безопасности   и   земли   иного   специального назначения, с видом разрешенного использования: объекты дорожного сервиса. 

3. Ответчик передает, а Истец принимает в срок до 30.07.2023 года надлежащим образом выполненные и оформленные работы по Договору №20400/2020/3023 от 11.12.2020 года на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство МАЗС на земельном участке, расположенном на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога на 12 км, площадью 1 га с левой стороны трассы».

Ответчик передает, а Истец принимает в срок до 30.09.2023 года по Договору подряда №20400/2021/0363 от 12.02.2021 года фактическое выполнение СМР (выполнение комплектации оборудованием, его монтаж и пусконаладка) по объекту: «Строительство МАЗС на земельном участке, расположенном на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога на 12 км, площадью 1 га с левой стороны трассы» и производит окончательный расчет с учетом ранее принятых работ в установленный договором срок.

4.Не позднее 27.06.2023г. Стороны подают в регистрирующий орган документы на регистрацию перехода к Истцу прав на земельный участок с кадастровым номером 35:25:0603074:1305, общей площадью 16 520 квадратных метров и заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке по, договору ипотеки (залоге недвижимости) №20400/2022/2956 от 08.09.2022 г., заключенному между Истцом и Ответчиком.

После подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по договору подряда №20400/2020/3023 от 11.12.2020г. стороны направляют в регистрирующий орган заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке по договору ипотеки (залоге недвижимости) №1 от 11.12.2020г., заключенному между Истцом и Ответчиком.

5.Окончательные расчеты по договору купли-продажи будущего земельного участка №20400/2020/3021 от 11.12.2020г. и договору №20400/2020/3023 от 11.12.2020г. на выполнение проектно-изыскательских работ производятся Сторонами в соответствии с условиями указанных договоров.

6.Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные Истцом при подаче искового заявления по делу №А40-255262/2022, не подлежащие возврату из федерального бюджета, Ответчик компенсирует Истцу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Истца.

7.Иные судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и относятся исключительно на ту Сторону, которая их понесла». 

Производство по делу №А40-255262/22  - прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья Е.В. Бодрова

СудьиЕ.Е. Кузнецова

А.Б. Семёнова