Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-7490/2023

г. Южно-Сахалинск

24 мая 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че  С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-7490/2023  

по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Смидовичского муниципального района Еврейской Автономной  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

 к обществу с ограниченной ответственностью «Эталон комфорта» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании со дня вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки по муниципальному контракту,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эталон комфорта»  устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту   № 01786000009220000030002 от 14.06.2022 на выполнение работ в рамках  реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке»  (благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ЕАО,  

<

...>), а именно:  

1.  Устранить недостатки по устройству спортивного комплекса  «Воркаут макси» и привести в соответствие с ГОСТ Р 52169-2012. Национальный  стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых  площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования:  

-  восстановить лакокрасочное покрытие в соответствии с п.п. 4.3.7- 4.3.8 ГОСТ Р 52169-2012;  

-  установить планку для фиксации ног согласно конструктивного  решения спортивного комплекса в соответствии с техническим заданием и  паспортом;  

-  установить заглушки, ручки в соответствии с п.п. 4.3.7 ГОСТ Р 52169- 2012;  

-  выполнить надежное закрепление спортивного комплекса в  

основании площадки в соответствии с п.п. 4.3.33 ГОСТ Р 52169-2012,  

2. Устранить недостатки по устройству качель «Гнездо» и привести в  соответствие с пунктом 5 ГОСТа Р 52167-2012 «Национальный стандарт  Российской Федерации»:  

-  выполнить усиление поперечной балки с подкраской в складских  условиях, закрепить подвес с учетом всех имеющихся проушин. После чего  установить качели на место.  

3. Устранить недостатки по устройству игрового комплекса  ««Обсерватория»» в соответствие ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт  Российской Федерации» и технической документацией:  

-  протянуть винтовые соединения, на фанере заделать отверстия,  провести прокрашивание сварных соединений, обеспечить 3 витка по резьбе на  распорных анкерах крепления к основанию;  

-  усилить низ горок от прогиба; -  обеспечить клепками по металлу там, где они отсутствуют; 

- закрыть крепежные элементы пластиковыми заглушками, пластиковые  поручни переставить к альпинистской стенке;  

-  горка «тоннель» - выполнить дополнительное усиление крепежными  элементами в складских условиях, после чего установить на место,  

4. Установить опоры освещения в соответствии пунктом 10 ГОСТ 329472014. Требования к автомобильным дорогам общего пользования и опорам  стационарного освещения.  

5. Установить информационный стенд. 

6. Закрепить стойки для сушки белья 2 шт. в соответствии с ГОСТ Р  57359-2016 «Конструкции бетонные. Правила изготовления», а также техническим  заданием к муниципальному контракту.  

7. Выполнить закрепление карусели на 6 сидений в соответствии с  п.п.4.3.2 п.4.3 ГОСТа Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской  Федерации», обеспечив устойчивость и надежность конструкции.  

8. Выполнить подкраску и протяжку болтовых соединений тренажера  спортивного «Жим», привести в соответствие с п.4.2.5, п.4.3.3 ГОСТа Р 57538-2017  «Национальный стандарт Российской Федерации» Тренажеры стационарные»  Оборудование для силовых тренировок», выполнить надежное закрепление на  площадке,  

9. В соответствии с п. 4.3.3 ГОСТа Р 57538-2017  выполнить  закрепление, ремонт (с протяжкой болтовых соединений) спортивного тренажера  «Лыжник», устранить отслоения лакокрасочного покрытия (имеется ржавчина).  

- Устранить недостатки по ограждению площадки: выполнить  закрепление с дополнительным бетонированием заглубленной части стоек в  соответствии пунктом 4.3.20, 4.3.22. ГОСТа Р 52169-2012 «Национальный стандарт  Российской Федерации».  

10. Устранить недостатки по установке МАФ «Трактор» без горки,  Машинка без горки», беседка «Белочка»: выполнить закрепление МАФ к  основанию площадки с внутренней стороны стоек для обеспечения безопасности и  в соответствии с п.4.3.33 ГОСТ Р 52169-2012».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эталон комфорта»  в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение  искового заявления в сумме 6 000 рублей.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную  силу.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном  порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу.  

Судья Т.С. Горбачева