2 5 

12/2019-69070(3) 

с е 

н 

 т я 

Арбитражный суд Рязанской области б 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108; р 

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru я 

Именем Российской Федерации 2 

 0

1 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

9 

г. Рязань Дело № А54-4869/2019  

г 

25 сентября 2019 года о 

 д 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 сентября 2019 года. а  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Сельдемировой В.А.,  руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования Управления благоустройства города администрации  

города Рязани удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "РязаньСтройСер- 

вис" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, пом/офис Н67/803)  

в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу  

устранить за свой счет и собственными силами недостатки, допущенные при вы- 

полнении работ по муниципальному контракту от 02.07.2018  

 № 0859200001118005558-0113639-01 по благоустройству парковочного простран- 

ства в рамках реализации проектов местных инициатив в Московском районе г.  

Рязани, а именно: 

1.1. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Костычева, д. 6,  

выполнив следующие виды работ: а) Демонтаж бортовых камней - 8 штук; б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 8 штук; в) Разборка а/бетонного покрытия - 292 м2 г) Устройство основания из щебня - 2 м3; д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 292 м2; 

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h=15см шириной  

1 метр - 76 м/п. 

1.2. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Юбилейной, д.  

1, к. 1:, выполнив следующие виды работ: а) Демонтаж бортовых камней - 21 штука; 

б) Установка бортовых камней БР 100.30.15-21 штука;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 292 м2  г) Устройство основания из щебня - 2 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 292 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h=15см шириной  1 метр - 76 м/п.  

1.3. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Крупской, д. 16,  выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 2 штуки;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 2 штуки;  

в) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2  г) Устройство основания из щебня - 2 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.4. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Юбилейной, д.  16, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней -18 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 18 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 146 м2  г) Устройство основания из щебня - 2 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.5. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Юбилейная, д.  16, к. 1, выполнив следующие виды работ:  

а) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2  б) Устройство основания из щебня - 2 м3;  в) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

г) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.6. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Юбилейная, д.  18, выполнив следующие виды работ:  

а) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 56 м/п.  

1.7. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Крупской, д. 14,  выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 1 штука;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 1 штука;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 40 м2  г) Устройство основания из щебня - 1 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 40 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.8. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Народный буль- вар, д. 14, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней -19 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 19 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 73 м2  г) Устройство основания из щебня - 3 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 73 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 19 м/п.  

1.9. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Крупской, д. 19,  выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 20 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 20 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2;  г) Устройство основания из щебня - 4 м3;   д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.10. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Староречен- 

ская, д. 2, к. 1, выполнив следующие виды работ:  а) Демонтаж бортовых камней - 32 штуки;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 32 штуки;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 292 м2  г) Устройство основания из щебня - 7 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 292 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 68 м/п.  

1.11. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Староречен- 

ская, д. 2, к.2, выполнив следующие виды работ:  а) Демонтаж бортовых камней -10 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 10 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 73 м2  г) Устройство основания из щебня - 4 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 73 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 19 м/п.  

1.12. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. 1-й Тракторный  

проезд, д. 8, выполнив следующие виды работ:  а) Демонтаж бортовых камней - 2 штуки;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 2 штуки;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 146 м2  г) Устройство основания из щебня - 2 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.13. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Крупской, д.  21, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 19 штук;  

б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 19 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2  г) Устройство основания из щебня - 5 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.14. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Станкозавод- 

ской, д. 25, выполнив следующие виды работ:  а) Демонтаж бортовых камней - 12 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 12 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 146 м2  г) Устройство основания из щебня - 3 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.15. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Станкозавод- ской, д. 32, к. 2, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 11 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 11 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2  г) Устройство основания из щебня - 3 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.16. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Интернацио- нальная, д. 13, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней -12 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 12 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия -146 м2  г) Устройство основания из щебня -4 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.17. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Интернацио- нальная, д. 13, к. 1, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней -12 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 12 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 146 м2  г) Устройство основания из щебня - 4 м3;  д) Устройство покрытия асфальтобетоном МIII тип В -146 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 38 м/п.  

1.18. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Бирюзова, д.  30, выполнив следующие виды работ:  

а) Демонтаж бортовых камней - 35 штук;  б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 35 штук;  

в) Разборка а/бетонного покрытия - 292 м2  

г) Устройство основания из щебня - 4 м3; 

д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 292 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 68 м/п.  

1.19. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Бирюзова, д.  

29, выполнив следующие виды работ: а) Демонтаж бортовых камней - 10 штук; 

б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 10 штук;  в) Разборка а/бетонного покрытия - 73 м2  

г) Устройство основания из щебня - 1 м3; д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 73 м2; 

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 19 м/п.  

1.20. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Бирюзова, д.  

31, выполнив следующие виды работ: а) Демонтаж бортовых камней - 38 штук; 

б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 38 штук;  в) Разборка а/бетонного покрытия - 292 м2  

г) Устройство основания из щебня - 4 м3; 

д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 292 м2;  

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 68 м/п.  

1.21. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Бирюзова, д.  

15, к. 2, выполнив следующие виды работ: 

а) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 30 м/п.  

1.22. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Интернацио- 

нальной, д. 1В, выполнив следующие виды работ: а) Демонтаж бортовых камней - 2 штуки; 

б) Установка бортовых камней БР 100.30.15 - 2 штуки;  в) Разборка а/бетонного покрытия - 3 м2  

г) Устройство основания из щебня -1 м3; д) Устройство покрытия асфальтобетоном М III тип В - 3 м2; 

е) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр -1 м/п.  

1.23. Произвести устранение недостатков на парковке на ул. Энгельса, д. 6,  

выполнив следующие виды работ: 

а) Засыпка грунтом пазух за бортовым камнем и засев трав h =15см шириной 1 метр - 12 м/п.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью РязаньСтройСер- 

вис" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, пом/офис Н67/803)  

в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6000 руб. 

Решение

 может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  

области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сро- ки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья В.А. Сельдемирова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.07.2019 10:25:43

Кому выдана Сельдемирова Валентина Андреевна