АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-16071/2022

г.Нижний Новгород                                                           «15» декабря 2022 года

Дата объявления резолютивной части решения «12» декабря 2022 года

Дата изготовления решения в полном объеме «15» декабря 2022 года   

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Щукина Сергея Юрьевича (шифр 25-439),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Караштиным Д.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Эксперт-Проект" 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

к ответчикам: публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» 

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

акционерному обществу «Россети Цифра» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)

при участии представителей

от истца: ФИО1 по доверенности;

от ответчика: ФИО2 по доверенности (до перерыва), ФИО3 по доверенности; 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Проект" (далее – ООО "Эксперт-Проект") обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье»), акционерного общества «Россети Цифра» (далее – АО «Россети Цифра») 1076826 руб. 17 коп. задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда от 03.06.2019 №522008031, соглашению о коллективном участии в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», Удмуртэнерго») от 29.01.2019.

Требование основано на статьях 309, 702, 711 ГК РФ и мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком договорного обязательства в части оплаты выполненных ООО "Эксперт-Проект" работ по договору подряда от 03.06.2019 №522008031.

В порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в процессе в качестве соответчика привлечено АО «Россети Цифра».

Ответчики иск не признали по основаниям, изложенным в отзывах наисковое заявление.

Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности, заслушав представителей сторон, (часть 2 статьи 64, статьи 71, 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между ООО "Эксперт-Проект" и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (в настоящее время - АО «Россети Цифра») заключено соглашение о коллективном участии в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», Удмуртэнерго») от 29.01.2019 (далее - соглашение), по условиям которого в целях объединения ресурсов для представления совместной заявки для участия в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго», «Удмуртэнерго», объявленном ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и в дальнейшем случае победы по результатам конкурса – для заключения и дальнейшего исполнения договора, участники создают коллективного участника (пункт 1.1. соглашения).

Лидером, представляющим в дальнейшем интересы каждого члена коллективного участника во взаимоотношениях с организатором конкурса и заказчиком, является АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Лидер от имени коллективного участника осуществляет права и обязанности участника закупочной процедуры в соответствии с положениями закупочной документации, в том числе осуществляет право на участие в объявляемых организатором конкурса переторжках с правом снижения цены, указанной в первоначальной заявке (пункт 1.4. соглашения).

Согласно пунктам 2.1.-2.1.2. соглашения лидер обеспечивает исполнение обязательств, как связанных с участием в конкурсе и подачей заявки, так и в рамках исполнения договора, в том числе: формирование и подачу заявки, оформленной в соответствии с требованиями документации конкурса, от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника, выплату обеспечительных и иных платежей (представление иного обеспечения) в рамках коллективного участия в конкурсе и в рамках договора.

Распределение объемов и стоимости работ/услуг внутри коллективного участника (между лидером и участником №2) приведено в Приложении №1 к настоящему соглашению. Стоимость выполняемого объема работ/услуг, указанная в Приложение №1 к настоящему соглашению, является условной и впоследствии, может быть изменена по результатам конкурса на основании поданной заявки. Стоимость выполняемого объема работ/услуг и дальнейшее процентное соотношение стоимости объемов работ/услуг, выполняемых каждым участником, может быть изменена только лишь по соглашению всех участников, путем подписания дополнительного соглашения (пункт 2.3. соглашения).

В силу пункта 2.4. соглашения (в редакции дополнительного соглашения №1 от 07.08.2019) все операции по исполнению договора в целом, включая сдачу приемку выполненных работ (этапов работ), оказанных услуг (этапов услуг), предоставление отчетных и иных документов, расчеты по договору, совершаются исключительно с лидером, если иная схема не будет предложена заказчиком. При этом лидер действует согласно плану распределения объемов выполнения работ между членами коллективного участника как от своего имени, так и от имени участника №2 (на основании полномочий, содержащихся в настоящем соглашении, в частности в п.1.4 и п.1.5.). При этом первичные документы, такие как акты сдачи приемки выполненных работ (этапов работ), счета-фактуры, оформляются от имени участника, который непосредственно выполнял соответствующий объем обязательств (выполнение работ) перед заказчиком и подписываются лидером (на основании полномочий, содержащихся в настоящем соглашении в частности п.1.4.-1.5.).

Настоящее соглашение не налагает на участников каких-либо имущественных и финансовых обязательств, за исключением прямо установленных соглашением и  обязательств, возникающих в случае победы в конкурсе, ответственности и операций по договору в целом, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности (пункт 1.7. соглашения).

Все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена. Полученные денежные средства лидер распределяет между участниками согласно Приложению №1 к соглашению. При этом лидер перечисляет участнику №2 причитающиеся ему денежные средства не позднее 20 рабочих дней с момента получения соответствующих платежей от заказчика на основании счета участника №2 (пункт 2.5.соглашения).

Согласно пункту 3.1.соглашения участники несут субсидиарную ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарную ответственность за несвоевременное и полное исполнение договора.

Сторонами подана заявка коллективного участника, по результатам конкурса коллективный участник признан победителем, между ним и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» заключен договор подряда от 03.06.2019 №522008031 (далее – договор), по условиям которого подрядчик обязуется в установленный срок по заданию заказчика выполнить поставку оборудования, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации/созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» («Нижновэнерго») и сдать результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим договором (пункт 1.1.договора).

В соответствии с пунктом 5.1.1. договора (в редакции дополнительного соглашения №1 от 30.11.2020) стоимость поставки оборудования 247428054 руб.28 коп., кроме того НДС 20% - 49485610 руб. 86 коп. Всего с НДС стоимость оборудования составляет 296913665 руб. 14 коп.

Стоимость проектно-изыскательских работ и услуг по монтажу и пуско-наладке оборудования составляет 42056918 руб. 75 коп., кроме того НДС 20% - 8411383 руб. 75 коп. Всего с НДС стоимость проектно-изыскательских работ и услуг по монтажу и пуско-наладке оборудования составляет 50468302 руб. 50 коп. (пункт 5.1.2. договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 30.11.2020). 

Общая стоимость работ и поставка оборудования составляет 347381967 руб.64 коп.

В силу пункта 6.4. договора оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

1-й платеж: заказчик на основании выставляемого подрядчиком счетов уплачивает подрядчику в течение 30 календарных дней со дня начала поставки оборудования (п.10.1) аванс в размере 30% от указанной в разделе 5.1.1. настоящего договора цены, но не ранее даты представления подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.

2-й платеж: заказчик уплачивает подрядчику оставшиеся 70% от указанной в разделе 5.1.1. настоящего договора цены поставки оборудования в течение 30 календарных дней после поставки оборудования и представления заказчику документов, предусмотренных в пункте 10.3.настоящего договора.

3-й платеж: заказчик уплачивает подрядчику стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу (пункт 10.2.) или после подписания актов о приемке выполненных работ по третьему этапу (пункт 10.3.) или после подписания актов о приемке выполненных работ по четвертому этапу (п.10.11.) и получения счетов-фактур.

Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: если условия оплаты по пункту 6.4. противоречат условиям в соответствии с графиком финансирования, стороны приняли решения руководствоваться графиком финансирования (пункт 6.11. договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 30.11.2020).  

Из позиции истца следует, что работы в рамках договора выполнены на общую сумму 348404466 руб. 87 коп., в подтверждение представлены первичные документы: товарные накладные на общую сумму 297936164 руб. 36 коп., акты о приемке выполненных работ на общую сумму 50468302 руб. 51 коп., подписанными со стороны заказчика без разногласий.

Согласно материалам дела и отзыва ПАО «Россети Центр и Приволжье» работы оплачены заказчиком на сумму 347332442 руб. 07 коп. (за поставку оборудования 297936164 руб. 36 коп., за выполненные работы 49396277 руб. 71 коп.).

Во исполнение условий соглашения АО «Россети Цифра» (49396277 руб. 71 коп.) платежными поручениями №254 от 21.01.2021 (6203105 руб. 99 коп.), №447 от 26.01.2021 (2392258 руб. 18 коп.), №448 от 26.01.2021 (8597417 руб. 40 коп.), №449 от 26.01.2021 (3802698 руб.89 коп.), №1725 от 18.03.2021 (7034010 руб. 24 коп.), №1726 от 18.03.2021 (974759 руб. 08 коп.), №1783 от 07.05.2020 (3031700 руб. 84 коп.), №1784 от 07.05.2020 (2038362 руб. 36 коп.), №2089 от 30.03.2021 (15317163 руб. 36 коп.), №2282 от 25.08.2020 (625743 руб. 61 коп.), №775 от 02.06.2020 (499677 руб. 60 коп.), №1473 от 06.08.2020 (162696 руб. 79 коп.), №1567 от 13.08.2020 (3696206 руб. 40 коп.), №1602 от 18.08.2020 (10114939 руб. 51 коп.), № 5887 от 06.10.2022 (4801 руб. 35 коп.) перечислило сумму за выполненные работы ООО "Эксперт-Проект".

Между ООО "Эксперт-Проект" и ПАО «Россети Центр и Приволжье» подписан акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2022 года, согласно которому сумма неоплаченных работ, выполненных силами истца и принятых заказчиком без разногласий, составляет 1072024 руб.80 коп.

Наличие задолженности  послужило основанием для обращения истца с претензией, а затем с иском в Арбитражный суд Нижегородской области.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд находит исковые требования обоснованными.

В силу пункта 1 статьи 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

По общему принципу, изложенному в пункте 1 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства, одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По правилу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование исковых требований ООО "Эксперт-Проект" представлены надлежащие доказательства, подтверждающие факт исполнения обязательства в рамках договора  подряда от 03.06.2019 №522008031 по выполнению работ. 

Договорные обязательства в части выполненных работ и поставки оборудования коллективный участник исполнил надлежащим образом (на сумму 50468302 руб. 51 коп. – выполненные работы, на сумму 297936164 руб. 36 коп. - поставка оборудования = 348404466 руб. 87 коп.), что подтверждается материалами дела и не оспорено ответчиком.

 ПАО «Россети Центр и Приволжье» перечислило АО «Россети Цифра» сумму 347332442 руб. 07 коп. (за поставку оборудования 297936164 руб. 36 коп., за выполненные работы 49396277 руб. 71 коп.) – платежные поручения №114484 от 26.09.2019 (92173958 руб. 91 коп.), №10567 от 04.02.2020 (2038362 руб. 36 коп.), №10571 от 04.02.2020 (5953191 руб. 99 коп.), №10568 от 04.02.2020 (3031700 руб. 84 коп.), №19019 от 27.02.2020 (1183448 руб. 01 коп.), №20735 от 03.03.2020 (452434 руб. 92 коп.), №20744 от 03.03.2020 (9912000 руб.), №20732 от 03.03.2020 (23985663 руб. 24 коп.), №20736 от 03.03.2020 (9257905 руб. 44 коп.), №20746 от 03.03.2020 (2787264 руб. 48 коп.), №20737 от 03.03.2020 (244357 руб. 01 коп.), №20729 от 03.03.2020 (2973600 руб.), №20796 от 03.03.2020 (42233 руб. 64 коп.), №20790 от 03.03.2020 (2478000 руб.), №20789 от 03.03.2020 (401721 руб. 60 коп.), №20797 от 03.03.2020 (795115 руб. 44 коп.), №20791 от 03.03.03.2020 (480035 руб.). №20793 от 03.03.2020 (327485 руб. 87 коп.), №20788 от 03.03.2020 (2180640 руб.), №20787 от 03.03.2020 (1766923 руб. 20 коп.), №20794 от 03.03.2020 (2180640 руб.), №20798 от 03.03.2020 (1667257 руб. 20 коп.), №20795 от 03.03.2020 (554224 руб. 02 коп.), №20792 от 03.03.2020 (2775360 руб.), №20799 от 03.03.2020 (787137руб. 88 коп.), №20741 от 03.03.2020 (2191118 руб. 16 коп.), №20731 от 03.03.2020 (8436154 руб. 44 коп.), №20734 от 03.03.2020 (8242131руб. 24 коп.), №20739 от 03.03.2020 (19824000 руб.), №20747 от 03.03.2020 (3835997 руб. 91 коп.), №20742 от 03.03.2020 (13975920 руб.), №20745 от 03.03.2020 (682605 руб. 76 коп.), №20740 от 03.03.2020 (9912000 руб.), №20730 от 03.03.2020 (20517840 руб.), №20733 от 03.03.2020 (6722923 руб. 20 коп.), №20738 от 03.03.2020 (5848080 руб.), №20743 от 03.03.2020 (10492493 руб. 76 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 02.07.2020 (3293275 руб. 26 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 24.07.2020 (415965 руб. 04 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 21.08.2020 (1104636 руб. 08 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 17.09.2020 (557495 руб. 54 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 20.10.2020 (800909 руб.70 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 24.11.2020 (2311644 руб. 38 коп.), уведомление о зачете встречных требований от 20.12.2020 (507602 руб. 33 коп.), №147848 от 25.12.2020 (4959810 руб. 24 коп.), №147841 от 25.12.2020 (301291 руб. 20 коп.), №147838 от 25.12.2020 (1784160 руб.), №147840 от 25.12.2020 (896366 руб.52 коп.), №147844 от 25.12.2020 (199192 руб. 56 коп.), №147839 от 25.12.2020 (991823 руб. 34 коп.), №147846 от 25.12.2020 (2431490 руб. 14 коп.), №147852 от 25.12.2020 (99596 руб. 28 коп.), №147850  от 25.12.2020 (6203105 руб. 99 коп.), №147843 от 25.12.2020 (443129 руб.69 коп.), №147845 от 25.12.2020 (398385 руб.12 коп.), №147842 от 25.12.2020 (200860 руб. 80 коп.), №147853 от 25.12.2020 (398385 руб.12 коп.), №148154 от 25.12.2020 (2392258 руб. 18 коп.), №148152 от 28.12.2020 (3802698 руб. 89 коп.), №148153 от 28.12.2020 (4207625 руб. 53 коп.), №148874 от 29.12.2020 (8597417 руб. 40 коп.), №21694 от 25.02.2021 (974759 руб. 08 коп.), №21771 от 25.02.2021 (7034010 руб. 24 коп.), №21772 от 25.02.2021 (10907820 руб. 55 коп.), №64653 от 27.05.2021 (4801 руб. 35 коп.).      

Во исполнение условий соглашения АО «Россети Цифра» платежными поручениями №254 от 21.01.2021 (6203105 руб. 99 коп.), №447 от 26.01.2021 (2392258 руб. 18 коп.), №448 от 26.01.2021 (8597417 руб. 40 коп.), №449 от 26.01.2021 (3802698 руб.89 коп.), №1725 от 18.03.2021 (7034010 руб. 24 коп.), №1726 от 18.03.2021 (974759 руб. 08 коп.), №1783 от 07.05.2020 (3031700 руб. 84 коп.), №1784 от 07.05.2020 (2038362 руб. 36 коп.), №2089 от 30.03.2021 (15317163 руб. 36 коп.), №2282 от 25.08.2020 (625743 руб. 61 коп.), №775 от 02.06.2020 (499677 руб. 60 коп.), №1473 от 06.08.2020 (162696 руб. 79 коп.), №1567 от 13.08.2020 (3696206 руб. 40 коп.), №1602 от 18.08.2020 (10114939 руб. 51 коп.), № 5887 от 06.10.2022 (4801 руб. 35 коп.) перечислило ООО "Эксперт-Проект" сумму в размере 49396277 руб. 71 коп. за выполненные работы.

Между ООО "Эксперт-Проект" и ПАО «Россети Центр и Приволжье» подписан акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2022 года, согласно которому сумма неоплаченных работ, выполненных силами истца и принятых заказчиком без разногласий, составляет 1072024 руб.80 коп.

Учитывая то обстоятельство, что фактически работы выполнены истцом и приняты заказчиком без разногласий, платеж заказчиком не перечислен АО «Россети Цифра», основания для уклонения заказчика от оплаты в полном объеме отсутствует.

Из пунктов 1.7., 2,4., 2.5. соглашения следует, что АО «Россети Цифра» (лидер) выступает в качестве связующего звена между ООО "Эксперт-Проект" (участник №2) и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (заказчик) при осуществлении финансово-расчетных операций за выполненные работы. При этом настоящее соглашение не налагает на участников каких-либо имущественных и финансовых обязательств, за исключением прямо установленных соглашением и  обязательств, возникающих в случае победы в конкурсе, ответственности и операций по договору в целом, а также не устанавливает каких-либо ограничений их самостоятельности автономности при осуществлении ими своей уставной деятельности. При этом лидер действует согласно плану распределения объемов выполнения работ между членами коллективного участника как от своего имени, так и от имени участника №2 (на основании полномочий, содержащихся в настоящем соглашении, в частности в п.1.4 и п.1.5.). При этом первичные документы, такие как акты сдачи приемки выполненных работ (этапов работ), счета-фактуры, оформляются от имени участника, который непосредственно выполнял соответствующий объем обязательств (выполнение работ) перед заказчиком и подписываются лидером (на основании полномочий, содержащихся в настоящем соглашении в частности п.1.4.-1.5.).

Спорная задолженность основана на доказательствах выполнения работ по договору подряда, выставленных заказчику от имени ООО "Эксперт-Проект".

При этом соглашение от 29.01.2019 предусматривает возможность изменения схемы исполнения договора по желанию заказчика или по его инициативе в части оплаты выполненных работ.

На стороне АО «Россети Цифра» отсутствует неисполненное договорное обязательство перед ООО "Эксперт-Проект" (ввиду отсутствия оплаты от ПАО «Россети Центр и Приволжье»), в связи с чем требование истца к АО «Россети Цифра» удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, требование о взыскании задолженности с ПАО «Россети Центр и Приволжье» в пользу ООО "Эксперт-Проект" не противоречит условиям соглашения, является обоснованным и подлежит удовлетворению в размере 1072024 руб. 80 коп. В остальной части следует отказать.

Иные возражения и доводы судом рассмотрены и отклонены как необоснованные.

Расходы по госпошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Истцу на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации следует возвратить сумму излишне уплаченной государственной пошлины в связи с уменьшением размера исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Эксперт-Проект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 1072024 руб. 82 коп. долга, а также 23662 руб. 02 коп. расходов по государственной пошлине.

В остальной части отказать.

В иске к акционерному обществу «Россети Цифра» отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

На основании настоящего судебного акта возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Эксперт-Проект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета 3818 руб. 25 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению №426 от 19.05.2022.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

 Судья                                                                                                                           С.Ю.Щукин