АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-59460/2021

г. Краснодар

08 апреля 2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Гамзатовой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального  образования город Краснодар Гимназия № 18 имени героя Советского ФИО1 (ИНН 

<

***>), г. Краснодар,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Юн-Инвест» (ИНН 

<

***>), г.  Краснодар,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, -  муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар  «Центр по обеспечению деятельности учреждений департамента образования  администрации муниципального образования город Краснодар» (ИНН 

<

***>), г.  Краснодар,  

об обязании в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу  устранить за свой счет некачественно выполненные строительные работы в рамках  муниципального контракта от 15.06.2021 № 0318300119421000719 по объекту:  «Капитальный ремонт кровли в МБОУ гимназия № 18»: произвести полный демонтаж  кровли (Блок 2, 3) муниципального автономного образовательного учреждения  муниципального образования г. Краснодар гимназия № 18 с последующим устройством  выравнивающего слоя с обеспечением уклона, произвести монтаж кровли, выполнить  жесткую фиксацию защитных элементов парапетов и примыканий в соответствии с  требованиями проектной и нормативной документации,  

- в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу устранить за свой  счет выявленные дефекты и повреждения в помещениях (согласно техническому  паспорту) муниципального автономного образовательного учреждения муниципального  образования г. Краснодар гимназия № 18 (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>):  

- потолки помещений 29 (часть коридора), 31, 311 , 30, 23 (часть коридора). 24, 25, 26, 27,  28;  

- демонтаж подвесного потолка (31м2), зачистка поврежденных покрытий, перетирка  штукатурки, антисептическая обработка поверхностей, грунтовка, окраска, монтаж  подвесного потолка (31м2). Итого: 305 кв.м.;  

- стены помещений 29 (часть коридора), 31, 311 , 30, 23 (часть коридора), 24, 25, 26, 27, 28,  зачистка поврежденных покрытий, перетирка штукатурки, антисептическая обработка  поверхностей, грунтовка, окраска. Итого: 417 кв.м.,  

о взыскании судебных расходов, 

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 82, 86, 87, 101, 106, 108-109, 110, 156, 163, 167170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Юн-Инвест» (ИНН  

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу  устранить за свой счет некачественно выполненные строительные работы в рамках  муниципального контракта от 15.06.2021 № 0318300119421000719 по объекту:  «Капитальный ремонт кровли в МБОУ гимназия № 18»:  

произвести полный демонтаж кровли (Блок 2, 3) муниципального автономного  образовательного учреждения муниципального образования г. Краснодар гимназия № 18  с последующим устройством выравнивающего слоя с обеспечением уклона, произвести  монтаж кровли, выполнить жесткую фиксацию защитных элементов парапетов и  примыканий в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации,  

- в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу устранить за  свой счет выявленные дефекты и повреждения в помещениях (согласно техническому  паспорту) муниципального автономного образовательного учреждения муниципального  образования г. Краснодар гимназия № 18 (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>):  

- потолки помещений 29 (часть коридора), 31, 311 , 30, 23 (часть коридора). 24, 25,  26, 27, 28;  

- демонтаж подвесного потолка (31м2), зачистка поврежденных покрытий,  перетирка штукатурки, антисептическая обработка поверхностей, грунтовка, окраска,  монтаж подвесного потолка (31м2). Итого: 305 кв.м.;  

- стены помещений 29 (часть коридора), 31, 311 , 30, 23 (часть коридора), 24, 25, 26,  27, 28, зачистка поврежденных покрытий, перетирка штукатурки, антисептическая  обработка поверхностей, грунтовка, окраска. Итого: 417 кв.м.,  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юн-Инвест» (ИНН  

<

***>) в пользу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  муниципального образования город Краснодар Гимназия № 18 имени героя Советского  ФИО1 (ИНН 

<

***>) в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины 6 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юн-Инвест» (ИНН  

<

***>) в пользу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  муниципального образования город Краснодар Гимназия № 18 имени героя Советского  ФИО1 (ИНН 

<

***>) в возмещение расходов на оплату  судебной экспертизы 225 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юн-Инвест» (ИНН  

<

***>) в пользу ООО ЭПО «Эталон» денежные средства за проведение экспертизы  в размере 20 000 руб.: Получатель: ООО ЭПО «Эталон»; ИНН: 

<

***>; КПП:  231101001; р/счет: 

<

***>; Банк получателя: филиал "Ростовский" АО  "АЛЬФА-БАНК", к/счет: 30101810500000000207; БИК 046015207; назначение платежа:  «Оплата за проведение судебной экспертизы по делу № А32-59460/2021».  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков