АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-7439/2019

г. Южно-Сахалинск

22 июня 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СПИРО»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о возложении обязанности  выполнить работы в рамках гарантийных обязательств по  государственному контракту № 0361200000214000009_73324 от  08.10.2014,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171, 174 и 176 АПК РФ, 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СПИРО» в  течение семи рабочих дней со дня вступления решения суда в законную  силу приступить к исполнению гарантийных обязательств по  государственному контракту № 0361200000214000009_73324 от 08.10.2014  и в течение одного месяца сдать результаты выполненных работ  государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации  Федеральной программы социально-экономического развития Курильских  островов Сахалинской области» с подписанием акта об устранении  недостатков (дефектов), в частности:  

- установить дополнительные нащельники из стального  оцинкованного листа на поперечные стыки существующих доборных  элементов в коньковом узле кровли здания АБК таким образом, чтобы  место стыка перекрывалось на 15..20мм в каждую сторону новым  

стальным нащельником. Монтаж новых нащельников выполнить по узлу 4  лист 13 проекта 250-2013-1-АР;  

- для ликвидации возможных протечек через продольные стыки  кровельных сэндвич-панелей, выполнить нащельники из оцинкованной  стали, вдоль всех продольных стыков сэндвич-панелей здания АБК и  здания гаража-стоянки. Нащельники должны перекрывать продольный  стык сэндвич-панелей на 150..200 мм в каждую сторону;  

- восстановить поврежденные фасонные элементы фасада здания  гаража-стоянки и здания склада хранения огнетушащих средств. При этом,  крепление отлива цоколя выполнить самонарезающими винтами  диаметром 4,2 мм с шагом 200 мм. Крепление угловых и карнизных  нащельников стеновых сэндвич-панелей выполнить самонарезающими  винтами диаметром 4,2мм с шагом 100 мм;  

- устранить неровность декоративного подвесного потолка в  помещении гардеробной здания АБК в осях Д-Е/8-9 путем перекладки  подвесной системы в соответствии с инструкцией по технологии монтажа  и отделке подвесных потолков индустриальными методами (ВСН 28-95) и  технологическим регламентом производства строительно-монтажных  работ при возведении зданий и сооружений (ТР 95.16-01);  

- выполнить работы по устранению зазоров между зданием и окном  на металлической облицовке оконных проемов;  

- демонтировать стальное решетчатое ограждение объекта на  поврежденном участке, восстановить вертикальность опор и смонтировать  стальное ограждение вновь;  

- восстановить сорванные светильники с осветительных опор; 

- выполнить работы по устранению зазоров между бордюрным  ограждением и дорожным покрытием или представить заключение  экспертизы о качестве используемых строительных материалов и  уплотнении грунта;  

- восстановить снегозадержатели кровли здания гаража-стоянки вдоль  ряда Ж по вертикальному проекту;  

- восстановить кровельное покрытие 4-х этажной тренировочной  башни на 2 дорожки для чего закрепить на существующих стальных  прогонах сплошной настил из антисептированных деревянных досок  толщиной 40 мм. Деревянные доски крепить к прогонам  самонарезающими винтами диаметром 5,5 мм с шагом 10 мм. Поверх  досок установить профилированный настил с креплением  самонарезающими винтами диаметром 5,5 мм с шагом 200 мм через одну  волну настила, либо обить верхнюю грань деревянного настила  оцинкованным стальным листом;  

- выполнить монтажный шов колонн 4-х этажной башни на отм.  +12.000 по типу шва С25 по ГОСТ 5264-80 с полным проваром. Варить  электродами Э42.  

- выполнить ремонт верхних граней подпорных стенок цементно- песчаным раствором по габариту конструкций.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПИРО» в  доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев