/

 

ТРЕТИЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело №

А33-17054/2018

г. Красноярск

23 января 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен         23 января 2019 года.

 

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Споткай Л.Е.,

судей: Бутиной И.Н., Хабибулиной Ю.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Каверзиной Т.П.,

при участии:

от истца - общества с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж»: Рассоленко С.В., представителя по доверенности  от 01.11.2018; Капустиной А.А., представителя по доверенности от 15.01.2018,

от ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж»:Гопонинко Д.Г.,  представителя по доверенности от 01.01.2019 № 1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж» (ИНН 2459012156, ОГРН 1032401735277)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от 13 сентября 2018 года по делу № А33-17054/2018, принятое судьёй Сысоевой О.В., 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергомонтаж» (далее – истец, ООО «Спецэнергомонтаж») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж» (далее – ответчик, ООО «Генэнергомонтаж») о взыскании задолженности в размере 5 280 149 рублей 72 копейки.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.06.2018 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.09.2018 исковые требования удовлетворены, с общества с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж» взыскано 5 280 149 рублей 72 копейки основного долга, 49 401 рубль судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт.

В апелляционной жалобе ответчик указал, что истцом не представлено доказательств выполнения условий договора по предоставлению ответчику необходимых документов для проведения выплаты резерва (предоставление гарантии на исполнение обязательств), в соответствии с требованиями пункта 6.5 договора. Полагает, что акт приемки законченного строительством объекта формы КС-11 применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности при их полной готовности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом). Таким образом, условие о возврате суммы резервного удержания после подписания акта КС-11, если такой акт обязателен для данного вида работ, не противоречит закону. Условие договора о резервировании денежных средств в качестве обеспечивающего гарантии исполнения обязательств, а также порядок их выплаты был известен истцу с момента подписания договора, каких-либо возражений относительно исполнения данного пункта договора при его заключении, а также в последующем при его исполнении от истца не поступало.

Судом первой инстанции контррасчет ответчика с возражениями относительно размера зарезервированной суммы оставлен без внимания. Также судом первой инстанции не принято во внимание обстоятельство, что истцом строительно-монтажные работы завершены 14.09.2017, и после окончания строительно-монтажных работ не истекли 24 месяца гарантийного срока, определенные сторонами по договору. Заявитель полагает, что поскольку отсутствует совокупность условий для выплаты резервного удержания, у ответчика не возникла обязанность по оплате выполненных работ в полном объеме (по выплате резерва гарантирования исполнения обязательств по договору).

Кроме того, судом первой инстанции не привлечено к участию в деле третье лицо (ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании») на объектах которого выполнялись строительно-монтажные работы.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу указал, что сторонами подписан акт приема-сдачи объекта № IV-02-03/642 без замечаний, который соответствует всем требованиям, применяемым к актам приемки законченного строительством объекта, закрепленным сторонами в разделе 14 договора подряда №00-12/12, установлено комиссионно, что работы выполнены в полном объеме.

Истец полагает, что довод ответчика об отсутствии к акту приема сдачи объекта № IV -02-03/642 заключений государственных органов надзора тоже не может быть принят, так как при подписании акта от 27.11.2017 генподрядчик не лишен был возможности пригласить представителей государственных органов надзора для дачи ими своих соответствующих заключений для подтверждения качества выполненных работ. Ответчиком также не предоставлено в материалы дела доказательств позволяющих сделать вывод об объемах выполняемых работ предусмотренных проектами ОАО «Ачинского HПЗ ВНК» на объекте: «Комбинированная установка гидрокрекинга», объемах выполненных работ, объемах финансирования, степени готовности, позволяющих достоверно установить неизбежность ввода в эксплуатацию ОАО «Ачинского НПЗ ВНК» объекта: «Комбинированная установка гидрокрекинга» в реальных сроках. Полагает, что в результате нарушается принцип неизбежности, где оплата выполненных работ истцом поставлена в зависимость от события - подписание акта ввода в эксплуатацию ОАО «Ачинским НПЗ ВНК», время подписания которого не возможно установить даже приблизительно, в связи с чем, нарушаются положения статьи 190 ГК РФ, поскольку срок окончательного расчета поставлен в зависимость от действий третьих лиц.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018апелляционная жалоба принята к производству.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» предусматривается возможность выполнения судебного акта в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Такой судебный акт направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Текст определения о принятии к производству апелляционной жалобы от 16.10.2018, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, опубликован в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) 17.10.2018 13:45:46 МСК.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В материалы дела от ответчика поступило ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании» (адрес: 6621 10 Красноярский край. Большеулуйский район, Промзона НПЗ).

Представитель ответчика в судебном заседании ходатайство о привлечении к участию в деле третьего лица поддержал, указав, что в суде первой инстанции указанное ходатайство не заявлялось. Поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить и принять по делу новый судебный акт.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства ответчика, поскольку в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о привлечении к участию в деле третьих лиц.

Представитель истца в судебном заседании поддержал возражения, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, Третий арбитражный апелляционный суд не находит правовых оснований для отмены данного судебного акта, исходя из следующего.

Между истцом и ответчиком 05.07.2012 заключен договор субподряда № 00-12/12 в редакции дополнительных соглашений №№ 1-13, согласно пункту 1.1. которого субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объектам «ОАО Ачинский НПЗ ВНК»: «Комбинированная установка гидрокрекинга, тит. 4012/2,3»; (Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА, тит. 4012/1,4»; «Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы, тит.4012/5»; находящихся по адресу Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно пункту 1.2. договора субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объектов, указанных в пункте 1.1. договора, собственными силами и силами привлеченных субсубподрядных организаций в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными  нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ генподрядчику.

Стоимость работ, выполняемых по договору, определена протоколом соглашения о договорной цене (приложение №1), подтверждается расчетом протокола соглашения о договорной цене (приложением №2-1) и составляет 33 563 860 рублей 62 копеек, в т. ч. НДС в сумме 5 119 910 рублей 94 копеек (пункт 3.1. договора).

В соответствии с пунктом 5.1.16 договора субподрядчик обязался представлять генподрядчику в срок не позднее 10 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы, подтверждающие выполнение работ по этапу: справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (тип. форма КС-3 (по этапу)); акт о приемке выполненных работ (тип. форма КС-2 (по этапу)); счета фактуры; акта приемки-передачи оборудования в монтаж (тип. форма ОС-15); акт приема-передачи смонтированного оборудования.

Согласно пунктам 6.1, 6.2. договора генподрядчик в течение 60 календарных дней с дата подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления субподрядчиком документов, указанных в пункте 5.1.16, оплачивает субподрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с «Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам» (приложение №6), «Графиком финансирования строительных работ» (приложением №5) и на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых генподрядчику в 3 экземплярах. Расчет за выполненные работы производится генподрядчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта.

На основании дополнительного соглашения  от 19.11.2014 № 7 стороны согласовали пункт 6.6 договора, согласно которому установили возможность оплаты работ по договору путем проведения взаиморасчетов, иными способами, не запрещёнными действующим законодательством РФ.

Дополнительным соглашением от 30.03.2017 № 12 к договору подряда от 05.07.2012 № 00-12/12 стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.1 договора от 05.07.2012 №00-12/12 и принять его в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ по настоящему договору: начало работ 01.04.2012, окончание работ 30.06.2017.

Дополнительным соглашением от 10.10.2017 № 13 к договору подряда от 05.07.2012 № 00-12/12, стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.1 договора от 05.07.2012 №00-12/12 и принять его в следующей редакции: Общая стоимость работ, выполняемых по договору, определена протоколом соглашения о договорной цене, подтверждается расчетом договорной цены и составляет 403 763 691 рублей 60 копеек.

Из искового заявления следует, что в 2012 году работы выполнены на сумму 41 138 295 рублей 16 копеек, оплачены в полном объеме, в 2013 году работы выполнены на сумму 98 220 412 рубля 84 копейки, оплачены в полном объеме, в 2014 году работы выполнены на сумму 77 264 457 рублей 72 копейки, оплачены в полном объеме.

В обоснование иска истец указал, что в 2015 году сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2015 год на сумму 90 008 517 рублей 90 копеек:

- по счету-фактуре от 16.01.2015 № 1 на сумму 5 173 822 рубля 10 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 16.01.2015 №1 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 5 173 822 рубля 10 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №76 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 996 026 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №77 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 119 568 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №78 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 625 375 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №79 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 1 364 602 рубля 74 копейки;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №80 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 965 004 рубля;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №81 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 13 112 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №82 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 705 201 рубль 04 копейки;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.01.2015 №83 за период с 16.12.2014 по 16.01.2015 на сумму 384 932 рубля 52 копейки.

- По счету-фактуре от 16.02.2015 № 2 на сумму 6 115 248 рублей 52 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 №2 от 16.02.2015 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 6 115 248 рублей 52 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №84 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 153 055 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №85 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 279 643 рублей 48 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №86 за период с  17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 884 026 рублей 50 копеек;

• Унифицированная  форма КС-2 от 16.02.2015 №87 за период с  17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 2 153 725 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №88 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 672 866 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №89 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 605 240 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №90 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 3409 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №91 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 308 636 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №92 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 857 520 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.02.2015 №93 за период с 17.01.2014 по 16.02.2015 на сумму 197 124 рублей 90 копеек;

- По счету-фактуре от 26.03.2015 № 3 на сумму 5 364 990 рублей 36 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 26.03.2015 №3 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 5 364 990 рублей 36 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 №94 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 717 638 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №95 от 26.03.2015 за период с  17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 114 133 рублей 14 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 № 96 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 360 336 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №97 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 5900 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 №98 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 469 717 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №99 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 297 847 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №100 от 26.03.2015 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 1012 840 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.03.2015 №101 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 585 184 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.03.2015 №102 за период с  17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 43 998 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.03.2015 №103 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 1 012 670 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.03.2015 №104 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 364 913 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.03.2015 №105 за период с 17.02.2015 по 26.03.2015 на сумму 379 810 рублей 14 копеек.

- По счету-фактуре от 24.04.2015 № 4 на сумму 3 736 158 рублей 48 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 №4 от 24.04.2015 за период с 27.03.2015 по 24.04.2015 на сумму 3 736 158 рублей 48 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 №106 от 24.04.2015 за период с 27.03.2015 по 24.04.2015 на сумму 2 605 499 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 №107 от 24.04.2015 за период с 27.03.2015 по 24.04.2015 на сумму 603 734 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №108 от 24.04.2015 за период с 27.03.2015 по 24.04.2015 на сумму 7286 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №109 от 24.04.2015 за период с 27.03.2015 по 24.04.2015 на сумму 519 638 рублей 96 копеек.

- По счету-фактуре от 25.05.2015 № 6 на сумму 11 650 989 рублей 60 копеек выполнение подтверждается формой КС-3  от 25.05.2015 №5 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 11 650 989 рублей 60 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №110 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 821 808 рублей 64 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №110/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 374 709 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №111 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 51 658 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №111/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 5109 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №112 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 748 112 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №112/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 569 845 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №113 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 761 236 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №113/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 107 002 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №114 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 366 119 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №115 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 834 583 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №115/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 299 663 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №116 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 238 460 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №116/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 383 540 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №117 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 299 105 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №117/1 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 6356 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №118 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 14 596 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №119 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 74 711 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №120 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 53 800 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №121 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 3414 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №122 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 32 245 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №123 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 1 884 203 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №124 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 3 469 228 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.05.2015 №125 за период с 25.04.2015 по 25.05.2015 на сумму 251 475 рублей 70 копеек;

- По счету-фактуре от 25.06.2015 № 7 на сумму 9 819 425 рублей 46 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 25.06.2015 № 6 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 9 819 425 рублей 46 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №126 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 768 254 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №128 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 184 489 рублей 46 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №129 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 436 477 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №130 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 365 252 рублей 48 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №131 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 177 621 рубля 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №132 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 17 119 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №133 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 1 547 652 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №135 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 13 970 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №136 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 270 369 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №138 за период с 26.05.2015 по25.06.2015 на сумму 249 152 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №139 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 1 905 718 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №140 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 17 875 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №141 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 17 079 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №142 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 523 483 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №134 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 1 187 391 рубля 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №137 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 1 164 079 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.06.2015 №127 за период с 26.05.2015 по 25.06.2015 на сумму 973 437 рублей 46 копеек;

- По счету-фактуре от 19.08.2015 № 8 на сумму 13 828 680 рублей 78 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 19.08.2015 № 7 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 13 828 680 рублей 78 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2, в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №143 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 358 705 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №144 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 768 026 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №145 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 228 591 рубля 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №146 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 508 876 рублей 18 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №147 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 262 076 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №148 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 1 277 654 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №149 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 298 953 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №150 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 37 588 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №151 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 20 247 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №152 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 167 196 рублей 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №153 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 336 541 рубля 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №154 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 1 193 874 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №155 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 372 642 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №156 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 875 131 рубля 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №157 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 592 775 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №158 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 353 217 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №159 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 770 237 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №160 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 11 966 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №161 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 38 469 рублей 18 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №162 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 10 242 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №163 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 231 941 рубля 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №164 за период с 25.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 121 283 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №165 за период с 25.07.2015 по 19.08.2015 на сумму 79 229 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №166 за период с 25.07.2015 по 19.08.2015 на сумму 26 298 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №167 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 1 051 577 рублей 06 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №168 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 31 759 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №169 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 1 143 022 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №170 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 639 518 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №171 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 2551 рубля 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №172 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 92 294 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №173 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 15 250 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №174 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 744 412 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №175 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 561 113 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №176 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 6456 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №177 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 18 490 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №178 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 13 828 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №179 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 26 639 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 19.08.2015 №180 за период с 26.06.2015 по 19.08.2015 на сумму 539 992 рублей 78 копеек.

- По счету-фактуре от 25.09.2015 № 9 на сумму 7 397 919 рублей 14 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 25.09.2015 №8 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 7 397 919 рублей 14 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №181 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 533 594 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №182 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 6241 рубля 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №183 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 647 228 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №184 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 637 720 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №185 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 25 800 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №186 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 892 318 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №187 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 36 929 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №188 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 1 206 427 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №189 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 86 112 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №190 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 20 157 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №191 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 75 938 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №192 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 61 358 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №193 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 44 458 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №194 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 12 361 рубля 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №195 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 50 702 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №196 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 20 362 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №197 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 8644 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №198 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 1 389 975 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №199 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 968 848 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №200 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 90 337 рублей 26 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №201 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 560 844 рублей 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №202 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 4481 рубля 64 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.09.2015 №203 за период с 20.08.2015 по 25.09.2015 на сумму 17 073 рублей 42 копеек.

- По счету-фактуре от 26.10.2015 № 10 на сумму 6 518 892 рублей 30 рублей выполнение подтверждается формой КС-3 от 26.10.2015 №9 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 6 518 892 рублей 30 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №203 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1 200 149 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №204 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 16 777 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №205 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1 222 128 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №206 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1 304 213 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №207 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 26 683 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №208 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1 113 951 рубля 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №209 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 117 974 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 №210 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1582 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 211 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1486 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 212 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 61 813 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 213 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 3295 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 214 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 1 115 406 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 215 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 230 094 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.10.2015 № 216 за период с 26.09.2015 по 26.10.2015 на сумму 103 334 рублей 96 копеек.

- По счету-фактуре от 10.11.2015 №11 на сумму 9 512 955 рублей 86 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 10.11.2015 №10 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 9 512 955 рублей 86 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №217 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 4 866 762 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №218 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 136 784 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №219 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 3 072 605 рублей 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №220 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 83 074 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №221 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 1720 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №222 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 18 526 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №223 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 31 904 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 10.11.2015 №224 за период с 27.10.2015 по 10.11.2015 на сумму 1 301 577 рублей 76 копеек.

- По счету-фактуре от 18.12.2015 № 14 на сумму 10 889 435 рублей 30 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 18.12.2015 №11 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 10 889 435 рублей 30 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №226 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 357 816 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №227 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 223 291 рубля 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №228 за период с  11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 737 108 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №229 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 1 998 512 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №230 за период с  11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 187 642 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №231 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 3 959 324 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №232 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 44 227 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №233 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 194 709 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №234 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 327 060 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №235 за период с  11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 212 895 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №236 за период с  11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 108 004 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №237 за период с  11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 2 169 779 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №238 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 29 055 рублей 14 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 18.12.2015 №239 за период с 11.11.2015 по 18.12.2015 на сумму 340 007 рублей 56 копеек.

Согласно расчету истца работы оплачены на сумму 89 708 410 рублей 39 копеек, в обоснование чего истец ссылается на соглашения о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2015 году на сумму 33 164 219 рублей 64 копеек:

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2015 по счету-фактуре от 16.01.2015 № 1 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 316 552 рублей 33 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 28.02.2015 по счету-фактуре от 16.02.2015№2 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 805 936 рублей 16 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2015 по счету-фактуре от 26.03.2015 №3 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 286 629 рублей 52 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2015 по счету-фактуре от 24.04.2015 №4 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 389 816 рублей 51 копейка;

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2015 по счету-фактуре от 25.05.2015 №6 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 792 085 рублей 10 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 30.06.2015 по счету-фактуре от 25.06.2015 №7 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 569 123 рублей 54 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2015 по счету-фактуре от 19.08.2015 №8 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 4 986 082 рублей 86 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2015 по счету-фактуре от 25.09.2015 №9 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 314 449 рублей 46 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2015 по счету-фактуре от 26.10.2015 №10 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 112 574 рублей 91 копейка;

• соглашение о проведении взаимозачета от 30.11.2015 по счету-фактуре от 10.11.2015 №11 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 4 734 290 рублей 67 копеек;

• соглашение о проведении взаимозачета от 31.12.2015 по счету-фактуре от 18.12.2015 №14 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 856 678 рублей 58 копеек.

Также, истец представил платёжные поручения об оплате  за выполненные работы в 2015 году на сумму 56 544 190 рублей 75 копеек:

• платёжное поручение от 17.03.2015 №774 на сумму 2 598 578 рублей 66 копеек, оплата по счету-фактуре от 16.01.2015 №1 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 28.05.2015 №539 на сумму 19 246 рублей 63 копеек оплата по счету-фактуре от 16.01.2015 №1 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 17.04.2015 №001139 на сумму 3 003 549 рублей 93 копеек оплата по счету-фактуре от 16.02.2015 №2 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 28.05.2015 №540 на сумму 9856 рублей 25 копеек, оплата по счету-фактуре от 16.02.2015 №2 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 10.06.2015 №696 на сумму 2 110 111 рублей 32 копеек, оплата по счету-фактуре  от 16.02.2015 №3 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 № 00-12/12;

• платёжное поручение от 28.05.2015 №541 на сумму 1 700 000 рублей, оплата по счету-фактуре от 26.03.2015 №3 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 23.06.2015 №001932 на сумму 2 185 515 рублей 99 копеек, оплата по счету-фактуре  от 24.04.2015 №4 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 23.06.2015 №002353 на сумму 7 288 928 рублей 81 копейка, оплата по счету-фактуре от 25.05.2015 №6 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 25.08.2015 №002870 на сумму 5 785 504 рубля 82 копейки, оплата по счету-фактуре от 25.06.2015 №7 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 15.06.2016 №002165 на сумму 1 999 198 рублей 95 копеек, оплата по счетам-фактурам: от 16.01.2015 №1, от 16.02.2015 №2, от 26.03.2015 №3, от 24.04.2015 №4, от 25.05.2015 №6, от 25.06.2015 №7 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 28.09.2015 №003394 на сумму 4 500 000 рублей, оплата по счету-фактуре №8 от 19.08.2015 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 30.10.2015 №003878 на сумму 3 678 163 рублей 52 копеек, оплата по счету-фактуре  от 25.09.2015 №8 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 30.11.2015 №004424 на сумму 3 713 573 рублей 72 копеек, оплата по счету-фактуре  от 25.09.2015 №9 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 16.12.2015 №004667 на сумму 4 080 372 рублей 78 копеек, оплата по счету-фактуре от 26.10.2015 №10 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 28.12.2015 №004907 на сумму 4 368 096 рублей 29 копеек, оплата по счету-фактуре от 10.11.2015 №11 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 16.02.2016 №000644 на сумму 7 502 692 рублей 06 копеек, оплата по счету-фактуре от 18.12.2015 №14 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платёжное поручение от 15.06.2016 №002166 на сумму 2 000 801 рубля 05 копеек, оплата по счетам-фактурам: от 19.08.2015 №8, от 25.09.2015 №9, от 26.10.2015 №10, от 10.11 2015 №11, от 18.12.2015 №14 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы в 2015 году составила 89 708 410 рублей 39 копеек, задолженность ответчика перед истцом за 2015 год составила 300 107 рублей 51 копейку.

Истец ссылался на то, что в 2016 году сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2016 год на общую сумму 64 394 307 рублей 46 копеек, в том числе:

- По счету-фактуре от 15.01.2016 №1 на сумму 4 155 528 рублей 12 копеек выполнены работы за период с 19.12.2016 по 25.01.2016 на сумму 4 155 528 рублей 12 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №240 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 1 505 088 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №241 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 187 924 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №242 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 1 975 407 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №243 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 39 153 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №244 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 527 рублей 46 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №245 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 39 744 рублей 76 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №246 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 152 293 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.01.2016 №247 за период с 19.12.2015 по 25.01.2016 на сумму 255 388 рублей 58 копеек.

- По счету-фактуре от 24.02.2016 № 2 на сумму 3 051 365 рублей 54 копеек выполнены работы за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 3 051 365 рублей 54 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2616 №248 за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016 на сумму 1 137 140 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №249 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 37 922 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №250 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 603 931 рубля 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №251 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 620 565 рублей 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №252 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 10 736 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №253 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 20 504 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №254 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 4322 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №256 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 579 184 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.02.2016 №255 за период с 26.01.2016 по 24.02.2016 на сумму 37 057 рублей 90 копеек;

- По счету-фактуре от 25.03.2016 № 3 на сумму 9 480 048 рублей 02 копеек выполнено работ за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 9 480 048 рублей 02 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 №257 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 1 114 910 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 №258 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 65 526 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 №259 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 130 019 рублей 48 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 260 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 42 188 рублей 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 261 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 15 646 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 262 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 30 612 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 263 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 64 292 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 264 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 153 776 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 265 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 44 371 рубля 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 266 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 208 091 рубля 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 268 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 7179 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 267 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 11 241 рубля 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 269 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 28 963 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 270 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 3 185 339 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.03.2016 № 271 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 3 566 574 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №272 от 25.03.2016 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 167 876 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №274 от 25.03.2016 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 522 926 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №273 от 25.03.2016 за период с 25.02.2016 по 25.03.2016 на сумму 120 511 рублей 04 копеек.

- По счету-фактуре от 22.04.2016 № 5 на сумму 5 967 975 рублей 08 копеек выполнены работы за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 5 967 975 рублей 08 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №275 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 1 120 976 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №276 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 42 281 рубля 76 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №277 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 416 177 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №278 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 876 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №279 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 9784 рублей 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №280 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 583 458 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №281 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 245 844 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №282 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 2 252 078 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №283 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 152 340 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №285 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 629 101 рубля 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.04.2016 №286 за период с 26.03.2016 по 22.04.2016 на сумму 515 054 рублей 66 копеек;

- По счету-фактуре от 23.05.2016 № 6 на сумму 3 283 849 рублей 14 копеек выполнены работы за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 3 283 849 рублей 14 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №287 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 187 704 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №288 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 788 642 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №289 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 6010 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №290 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 732 483 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №291 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 65 092 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №292 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 5124 рубля 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №293 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 151 123 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №294 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 72 330 рублей 46 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №295 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 18 472 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №296 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 191 995 рублей 44 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №297 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 139 151 рубля 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №298 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 280 769 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №299 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 554 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №300 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 10 590 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 23.05.2016 №301 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 403 176 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №302 от 23.05.2016 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 1791 рубля 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 №303 от 23.05.2016 за период с 23.04.2016 по 23.05.2016 на сумму 228 833 рублей 86 копеек.

- По счету-фактуре от 27.06.2016 № 8 на сумму 4 736 479 рублей 88 копеек выполнены работы за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 4 736 479 рублей 88 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №304 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 236 656 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №305 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 20 432 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №306 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 494 668 рублей 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №307 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 7648 рублей 76 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №308 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 359 497 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №309 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 8774 рублей 48 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №310 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 00 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №311 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 971 068 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №312 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 34 574 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №313 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 174 981 рубля 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №314 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 10 138 рублей 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №315 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 28 189 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №316 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 44 212 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №317 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 421 346 рублей 14 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №318 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 346 206 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №319 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 223 936 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №320 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 19 779 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №321 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 2 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №322 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 403 536 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №323 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 37 270 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №324 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 25 916 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №325 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 641 052 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 27.06.2016 №325 за период с 24.05.2016 по 27.06.2016 на сумму 226 591,86 руб.

- По счету-фактуре №10 на сумму 3 299 221,00 руб. от 25.07.2016 выполнены работы за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 3 299 221,00 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №327 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 254 436 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №328 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 227 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №329 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 79 117 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №330 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 4435 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07:2016 №331 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 62 783 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №332 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 94 879 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №333 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 355 382 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №334 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 00 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №335 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 241 188 рублей 46 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №336 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 18 330 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №338 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 1 472 940 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №339 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 38 791 рубля 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №340 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 61 403 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №341 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 37 526 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 № 343 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 4 рублей 72 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №342 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 551 208 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.07.2016 №344 за период с 28.06.2016 по 25.07.2016 на сумму 26 564 рублей 16 копеек.

- По счету-фактуре от 25.08.2016 № 13 на сумму 3 794 017 рублей 42 копеек выполнены работы за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 3 794 017 рублей 42 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016г. №345 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 38 060 рублей 90 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 № 346 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 14 372 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №347 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 392 712 рублей 26 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №348 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 10 537 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №349 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 1051 рубля 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №350 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 7278 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №351 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 803 668 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №352 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 33 211 рублей 10 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №353 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 1054 рублей 92 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №354 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 21 004 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №361 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 2526 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №362 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 00 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №363 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 5057,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №364за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 13 146 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №355 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 60 840 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №356 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 1 285 253 рублей 64 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №357 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 13 946 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №358 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 8485 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №359 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 688 058 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №360 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 167 867 рублей 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 25.08.2016 №365 за период с 26.07.2016 по 25.08.2016 на сумму 225 883 рублей 86 копеек.

- По счету-фактуре от 26.09.2016 № 16 выполнены работы за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 3 703 359 рублей 20 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 № 366 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 304 709 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №367 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 106 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №368 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 251 527 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №369 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 6619 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №370 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 14 930 рублей 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №371 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 226 589 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №372 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 1285 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №373 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 25 026 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №374 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 37 095 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №375 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 1149 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №376 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 19 602 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №377 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 26 335 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №378 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 59 762 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №379 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 13 732 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №380 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 1149 рублей 32 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №381 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 2 361 207 рублей 14 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №382 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 21 252 рублей 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №383 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 2100 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №384 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016 на сумму 101 759 рублей 66 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.09.2016 №385 за период с 26.08.2016 по 26.09.2016г. на сумму 227 417 рублей 86 копеек;

- По счету-фактуре от 20.10.2016 №19 на сумму 3 269 756 рублей 40 копеек выполнены работы за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 3 269 756 рублей 40 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №386 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 260 177 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №387 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 264 151 рубля 26 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №388 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 13 146 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №389 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 37 865 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №390 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 23 447 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №391 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 1 447 923 рублей 72 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №392 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 19 754 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №393 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 8637 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №394 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 18 255 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №395 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 55 637 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №396 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 247 938 рублей 06 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №397 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 8904 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №398 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 6619 рублей 80 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №399 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 462 130 рублей 48 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №400 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 155 713 рублей 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.10.2016 №401 за период с 27.09.2016 по 20.10.2016 на сумму 239 453 рублей 86 копеек.

- По счету-фактуре от 07.11.2016 №21 на сумму 2 367 786 рублей 82 копеек выполнены работы за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 2 367 786 рублей 82 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №402 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 112 433 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №404 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 407 904 рублей 76 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №403 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 61 966 рублей 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №405 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 26 231 рубля 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №406 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 11 496 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №407 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 18 726 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №408 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 21 619 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №409 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 6995 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №410 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 20 443 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №411 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 6524 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №412 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 9988 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №413 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 93 490 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №414 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 17 545 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №415 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 64 129 рублей 46 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №416 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 17 980 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №417 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 65 323 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №418 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 15 849 рублей 76 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №419 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 1318 рублей 06 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №420 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 903 634 рублей 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №422 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 234 261 рубль 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 07.11.2016 №421 за период с 21.10.2016 по 07.11.2016 на сумму 249 921 рубль 64 копейки.

- По счету-фактуре от 16.12.2016 № 25 выполнены работы за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 17 284 920 рублей 84 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №423 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 2 775 221 рубля 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №424 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 2793 рублей 06 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №425 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 9127 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №426 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 7 259 304 рублей 54 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №428 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 1 803 631 рубля 18 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №429 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 24 515 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №430 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 5 171 817 рублей 28 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 16.12.2016 №431 за период с 08.11.2016 по 16.12.2016 на сумму 238 509 рублей 86 копеек;

Согласно расчету истца, работы оплачены ответчиком в размере 61 067 507 рублей 02 копеек, в том числе соглашениями о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2016 году на сумму 14 150 229 рублей 38 копеек:

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2016 по счету-фактуре  от 25.01.2016№1 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 857 901 рубль 69 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 29.02.2016 по счету-фактуре  от 24.02.2016 №2 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 672 558 рублей 21 копейку.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2016 по счету-фактуре  от 25.03.2016 №3 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 095 800 рублей 48 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2016 по счету-фактуре от 25.04.2016 №5 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 528 021 рубль 86 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2016 по счету-фактуре  от 23.05.2016 №6 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 305 765 рублей 46 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.06.2016 по счету-фактуре от 27.06.2016 №8 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 774 051 рубль 76 копеек

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.07.2016 по счету-фактуре от 25.07.2016 №10 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 595 831 рубль 51 копейка.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2016 по счету-фактуре от 25.08.2016 №13 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 408 900 рублей 01 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2016 по счету-фактуре от 25.08.2016 №13 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 276 977 рублей 06 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2016 по счету-фактуре от 26.09.2016 №16 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 114 926 рублей 67 копеек

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2016 по счету-фактуре от 20.10.2016 №19 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 91 694 рублей 59 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2016 по счету-фактуре от 20.10.2016 №19 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 355 737 рублей 74 копейки.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.11.2016 по счету-фактуре от 07.11.2016 №21 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 173 044 рублей 26 копеек.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.12.2016 по счету-фактуре от 16.12.2016 №25 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 50 000 рублей.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.12.2016 по счету-фактуре от 16.12.2016 №25 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 849 018 рублей 08 копеек.

Также, представлены платежные поручения об оплате за выполненные работы в 2016г. на общую сумму 46 917 277 рублей 64 копеек, в том числе:

• Платёжное поручение от 15.03.2016 №001008 на сумму 3 089 850 рублей 02 копейки. Оплата по счету-фактуре от 25.01.2016 №1за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 19.04.2016 №001485 на сумму 2 255 198 рублей 26 копеек. Оплата по счету-фактуре от 24.02.2016 №2 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 17.05.2016 №001835 на сумму 5 936 391 рубль 46 копеек. Оплата по счету-фактуре от 25.03.2016 №3 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 23.06.2016 №002293 на сумму 4 145 482 рублей 85 копеек. Оплата по счету-фактуре от 25.04.2016 №5 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 19.07.2016 №002774 на сумму 2 825 332 рублей 92 копеек. Оплата по счету-фактуре от 23.05.2016 №6 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 12.08.2016 №003209 на сумму 1 900 000 рублей. Оплата по счету-фактуре от 27.06.2016 №8 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 15.08.2016 №3287 на сумму 1 836 933 рублей 72 копеек. Оплата по счету-фактуре от 27.06.2016 №8 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 13.09.2016 №003776 на сумму 2 538 428 рублей 44 копеек. Оплата по счету-фактуре от 25.07.2016 №10 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 24.10.2016 №004787 на сумму 929 733 рублей 67 копеек. Оплата по счету-фактуре от 26.08.2016 №13 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 25.10.2016 №004805 на сумму 1 276 977 рублей 06 копеек. Оплата по счету-фактуре от 26.09.2016 №16 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 17.11.2016 №005320 на сумму 1 536 540 рублей 78 копеек. Оплата по счету-фактуре от 26.09.2016 №16 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение от 21.12.2016 №005969 на сумму 1 000 000 рублей. Оплата по счету-фактуре от 20.10.2016 №19 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• Платёжное поручение №006015 от 28.12.2016 на сумму 2 026 546,68 руб. Оплата по счету-фактуре №19 от 20.10.2016 за выполненные работы по договору №00-12/12 от 05.07,2012;

• Платёжное поручение №006115 от 29.12.2016 на сумму 2 086 279,57 руб. Оплата по счету-фактуре №21 от 07.11.2016 за выполненные работы по договору №00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение от 08.02.2017 №000526 на сумму 13 533 582 рубля 21 копейки. Оплата по счету-фактуре от 16.12.2016 №25 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы за 2016 год составляет 61 067 507 рублей 02 копейки, задолженность ответчика перед истцом за 2016 год: 64 394 307 рублей 46 копеек (выполненные работы) - 61 067 507 рублей 02 копеек (оплата за выполненные работы) составляет 3 326 800 рублей 44 копеек.

Истец ссылался на то, что в 2017 году сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2017 год на сумму 32 737 700 рублей 52 копеек, согласно расчету:

- По счету-фактуре от 24.01.2017 № 1 на сумму 4 845 365 рублей 56 копеек выполнены работы за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 4 845 365 рублей 56 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №432 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 198 710 рублей 82 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №433 за период с  17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 745 424 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №434 за период с  17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 519 512 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №435 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 711 086 рублей 88 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №436 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 1 080 064 рублей 62 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №437 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 1 325 280 рублей 42 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №438 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 31 495 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.01.2017 №439 за период с 17.12.2016 по 24.01.2017 на сумму 233 789 рублей 86 копеек.

- По счету-фактуре от 20.02.2017 № 2 на сумму 4 963 695 рублей 96 копеек выполнены работы за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 4 963 695 рублей 96 копеек, которая сформирована на основании-унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017г. №440 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 338 763 рублей 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №441 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 7758 рублей 50 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №442за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 128 584 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №443 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 323 635 рублей 06 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №444 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 1346 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №445 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 3404 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №446 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 45 817 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №447 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 390 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №448 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 26 765 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №449 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 148 677 рублей 64 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №450 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 4028 рублей 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №451 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 185 799 рублей 26 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №452 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 6995 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №453 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 1997 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №454 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 153 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №455 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 2834 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №456 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 62 674 рублей 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №457 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 6995 рублей 04 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №458 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 2 652 251 рубля 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №459 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 768 624 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 20.02.2017 №460 за период с 25.01.2017 по 20.02.2017 на сумму 246 197 рублей 56 копеек;

- По счету-фактуре от 22.03.2017 № 4 на сумму 4 003 443 рублей 82 копеек выполнены работы за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 4 003 443 рублей 82 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №468 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 227 594 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №466 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 92 789 рублей 30 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №467за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 22 585 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №465 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 1 094 825 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №464 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 13 892 рублей 14 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №463 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 2 049 744 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №462 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 466 618 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 22.03.2017 №461 за период с 21.02.2017 по 22.03.2017 на сумму 35 394 рублей 10 копеек;

- По счету-фактуре от 24.04.2017 № 6 на сумму 5 808 948 рублей 84 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 24.04.2017 №4 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 5 808 948 рублей 84 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №468 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 3 001 404 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №469 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 1 350 158 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №472 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 29 240 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №471 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 148 505 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №473 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 153 667 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №474 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 163 268 рублей 34 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №470 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 235 315 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №475 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 2669 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №477 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 25 994 рублей 22 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №476 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 472 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 24,04.2017 №479 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 288 141 рубля 84 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №478 за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 380 574 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 24.04.2017 №467  за период с 23.03.2017 по 24.04.2017 на сумму 29 536 рублей 58 копеек.

- По счету-фактуре от 26.05.2017 №13 на сумму 5 052 807 рублей 20 копеек выполнены работы за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 5 052 807 рублей 20 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №480 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 00 рублей.

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №481 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 2 262 090 рублей 68 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №501 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 244 191 рубля 56 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №482 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 2 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №483 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 16 013 рублей 78 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №484 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 1 144 489 рублей 08 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №485 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 805 954 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №486 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 73 467 рублей 98 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №487  за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 61 612 рублей 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №488 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 00 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №489 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 41 748 рублей 40 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №490 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 65 587 рублей 94 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №491 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 71 312 рублей 12 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26:05.2017 №492 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 00 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №493 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 11 138 рублей 02 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №494 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 4212 рублей 60 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №495 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 16 652 рублей 16 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №496  за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 3502 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №497 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 53 687 рублей 64 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №498 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 164 138 рублей;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №499 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 10 715 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 26.05.2017 №500 за период с 25.04.2017 по 26.05.2017 на сумму 2290 рублей 38 копеек.

- По счету-фактуре от 04.08.2017 № 25 на сумму 101 968 рублей 52 копеек выполнение подтверждается формой КС-3 от 04.08.2017 № 6 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 101 968 рублей 52 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 04.08.2017 №506 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 94 908 рублей 58 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 04,08.2017 №502 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 2643 рублей 20 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 04.08.2017 №503 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 2526 рублей 38 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 04.08.2017 №504 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 00 рублей;

Унифицированная форма КС-2 от 04.08.2017 №505 за период с 27.05.2017 по 04.08.2017 на сумму 1890 рублей 36 копеек.

- По счету-фактуре от 14.09.2017 № 31 на сумму 7 961 470 рублей 62 копеек выполнены работы за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 7 961 470 рублей 62 копеек, которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №516 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 923 057 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №513/1 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 1890 рублей 36 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №514 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 33 065 рублей 96 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №515 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 5326 рублей 52 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №511/1 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 31 995 рублей 70 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №512/1 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 82 060 рублей 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №510 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 1761 рубля 74 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №507 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 2 335 487 рублей 86 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №509 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 3 476 773 рублей 24 копеек;

• Унифицированная форма КС-2 от 14.09.2017 №508 за период с 05.08.2017 по 14.09.2017 на сумму 1 070 051 рубля 14 копеек.

Согласно расчету истца работы оплачены ответчиком в размере 31 084 458 рублей 72 копеек, в том числе соглашениями о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2017 году на сумму 10 838 371 рубля 71 копейки:

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2017 по счету-фактуре от 24.01.2017 №1 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 581 537 рублей 90 копеек;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 28.02.2017 по счету-фактуре  от 20.02.2017 №2 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 620 142 рубля 53 копеек;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2017 по счету-фактуре  от 24.03.2017 №4 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 238 098 рублей 54 копеек;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2017 по счету-фактуре  от 24.04.2017 №6 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 542 073 рублей 51 копейки;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2017 по счету-фактуре от 26.05.2017 №13 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 895 641 рубль 69 копеек;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2017 по счету-фактуре от 04.08.2017 №25 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 96 870 рублей 09 копеек;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2017 по счету-фактуре от 14.09.2017 №31 сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 864 007 рублей 45 копеек.

Также истец ссылался на оплату работ платежными поручениями за выполненные работы в 2017 году на общую сумму - 20 246 087 рублей 01 копейки, в том числе:

• платежное поручение от 20.03.2017 №001216 на сумму 3 033 248 рублей 88 копеек. Оплата по счету-фактуре от 24.01.2017 №1 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платежное поручение от 21.03.2017 №1250 на сумму 3 107 678 рублей 51 копейки. Оплата по счету-фактуре от 20.02.2017 №2 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платежное поручение  от 19.04.2017 №1630 на сумму 2 574 816 рублей 94 копеек. Оплата по счету-фактуре от 24.03.2017 №4 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платежное поручение от 17.05.2017 №2044  на сумму 3 976 427 рублей 89 копеек. Оплата по счету-фактуре от 24.04.2017 №6 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платежное поручение от 03.07.2017 №2651 на сумму 3 904 525 рублей 15 копеек. Оплата по счету-фактуре от 26.05.2017 №13 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12;

• платежное поручение от 17.10.2017 № 4339 на сумму 3 649 389 рублей 64 копеек. Оплата по счету-фактуре от 14.09.2017 №31 за выполненные работы по договору от 05.07.2012 №00-12/12.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы за 2017 год составила 31 084 458 рублей 72 копейки, задолженность ответчика перед истцом за 2017 год: 32 737 700 рублей 52 копейки (выполненные работы) - 31 084 458 рублей 72 копейки (оплата за выполненные работы) - 1 653 241 рубль 80 копеек.

Истец ссылался на то, что работы на сумму 403 763 691 рубля 60 копеек выполнены в полном объеме, 14.09.2017 подписан последний акт по форме КС-2 № 508.

27.11.2017 сторонами подписан акт приема-сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, работы выполнены в полном объеме согласно договора подряда № 00-12/12, устранены замечания строительного и авторского надзора, предоставлена исполнительна документация.

Из искового заявления и представленного расчета следует, что задолженность за выполненные работы в 2015-2017 годах составила 5 280 149 рублей 72 копейки.

Истец обратился к ответчику с претензией об оплате денежных средств от 21.12.2017 исх. № 50. Ответчик оставил претензию без удовлетворения, заявив в письме исх. № 1974 о том, что сумма зарезервированных средств по договору составляет 4 984 769 рублей 84 копейки, акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 не подписан, выплата не может быть произведена.

На основании изложенного, в связи с отказом ответчика в оплате денежных средств по договору, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как верно установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, между сторонами заключен договор субподряда, который относится к договору строительного подряда и регулируется нормами главы 37 части II Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно пункту 6.1. договора, генподрядчик в течение 60 календарных дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления субподрядчиком документов, указанных в пункте 5.1.16, оплачивает субподрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с «Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам» (приложение №6), «Графиком финансирования строительных работ» (приложением №5) на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых генподрядчику в 3 экземплярах.

Таким образом, условием оплаты является подписание актов формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры.

Судом первой инстанции установлено, что сторонами по договору акты выполненных работ подписаны без замечаний на установленную стоимость работ по договору.

27.11.2017 сторонами подписан акт приема сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, работы выполнены в полном объеме согласно договору подряда № 00-12/12, устранены замечания строительного и авторского надзора, предоставлена исполнительная документация. При подписании акта качество выполненных работ не оспорено заказчиком.

При этом акт от 27.11.2017 подписан после составления предписания от 24.08.2017 № 141, что свидетельствует об отсутствии замечаний на дату подписания акта.

Материалами дела подтверждено, что задолженность за выполненные работы по договору в 2015-2017 годы составила 5 280 149 рублей 72 копейки, доказательств оплаты работ в полном объеме ответчиком не представлено, в связи с чем, суд первой инстанции признал подлежащими удовлетворению исковые требования в полном объеме.

Довод ответчика о том, что работы подлежат оплате в полном объеме только после сдачи объекта в эксплуатацию (из письма «Ачинского НПЗ ВНК» исх.248/04448 от 12.04.2018 следует срок ввода в эксплуатацию) и подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11, обоснованно отклонен судом первой инстанции, поскольку материалами дела установлено, что претензий о ненадлежащем качестве и объеме работ по договору субподряда ответчиком не заявлено. Работы выполнялись в период действия договора, который не оспорен, не признан недействительным, заявлений об отказе от договора либо его расторжении от ответчика не поступало. Документов, свидетельствующих о том, что результат выполненных истцом работ не представляет для ответчика интереса, не имеет потребительской ценности, фактически не использован и не может быть использован, в материалы дела не представлено.

Пунктом 6.2 договора установлено, что расчет за выполненные работы производится генподрядчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта. Однако довод ответчика о наличии не устраненных замечаний опровергается материалами дела. Ответчик ссылался на предписание от 24.08.2017 № 141, однако 27.11.2017 сторонами подписан акт приема сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, стороны указали, что устранены замечания строительного и авторского надзора. Ответчик не представил доказательств, опровергающих качество принятых без замечаний работ, ходатайство об экспертизе не заявил.

С учетом положений статьи 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Включение в текст договора соответствующего условия обеспечивает законный интерес кредитора на получение причитающегося ему возмещения в случае выявления факта ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанностей по договору (например, работ ненадлежащего качества) и может рассматриваться как непоименованный способ обеспечения исполнения обязательств (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Гарантийное удержание в договоре является непоименованным в ГК РФ способом обеспечения исполнения подрядчиком определенных обязанностей (как денежных, так и неденежных).

Следовательно, стороны договора строительного подряда вправе установить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, предусмотреть в нем оплату части стоимости выполненных работ по договору строительного подряда после выполнения всех работ подрядчиком и наступления поименованного в договоре обстоятельства (гарантийное удержание), что не противоречит положениям статьи 746 ГК РФ.

На основании пункта 6.5 договора генподрядчик резервирует 10% от стоимости выполненных работ. Зарезервированные 10% выплачиваются субподрядчику при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) с приложенными заключениями государственных органов надзора. Акт приемки должен быть оформлен в течение срока действия договора. Выплата зарезервированной суммы производится при условии предоставления гарантии на исполнение обязательств субподрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта.

Суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что при условии приемки выполненных работ заказчиком подрядчик вправе требовать оплаты работ в полном объеме, несмотря на отсутствие акта КС-11, поскольку строительные работы выполняются иными лицами. Истец на объекте не является единственным подрядчиком,  подписание акта законченного строительством объекта не является событием, наступление которого зависит от действий субподрядчика. Из буквального толкования вышеуказанного пункта договора следует, что условие о сроке оплаты выполненных работ в договоре поставлено в зависимость от действий неопределенного количества третьих лиц, но не от истца.

В связи с этим, как правильно указано судом первой инстанции, у сторон объективно отсутствует возможность подписания акта формы КС-11, что не может влечь отказ в полной оплате выполненных работ.

При указанных обстоятельствах, у заказчика наступило обязательство по оплате выполненных работ по актам КС-2.

Судебная коллегия также учитывает, что в соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации   денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (статья 328 ГК РФ). 

Вместе с тем ответчиком не доказано наличие требований, связанных с качеством выполненных истцом работ, результат которых уже передан заказчику.

Кроме того, договором не предусмотрено предоставление подрядчиком какого-либо обеспечения (гарантии), условиями для оплаты принятых работ по пункту 5.1.16, пункту 6.1 договора является передача документов и факт приемки работ.

С учетом изложенного, доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии надлежащей оценки контррасчета ответчика и условий для возврата  суммы резерва, подлежат отклонению.

На основании изложенного, судом первой инстанции правомерно в полном объеме удовлетворены исковые требования.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, у судебной коллегии не имеется.

Довод заявителя жалобы о том, что судом первой инстанции к участию в деле в качестве третьего лица не привлечено ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании» на объектах которого выполнялись строительно-монтажные работы, признается судом апелляционной инстанции не обоснованным.

В суде первой инстанции ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании», представители сторон ходатайство о привлечении  к участию в деле третьего лица не заявляли.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Таким образом, основанием для привлечения в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновение права на иск у третьего лица, что обусловлено взаимосвязанностью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом.

Из материалов дела, обжалуемого судебного акта не следует, что решение принято в отношении прав и обязанностей иных лиц. Обжалуемый судебный акт не содержит каких-либо выводов о правах ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод восточной нефтяной компании».

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал материалы дела, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и не допустил нарушения норм материального и процессуального права.

При указанных обстоятельствах, решение суда является законным и обоснованным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы подлежат отнесению на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 102, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 13 сентября 2018 года по делу № А33-17054/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж» (ИНН 2459012156, ОГРН 1032401735277) в доход федерального бюджета 3000 рублей государственной пошлины.

 

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

 

Председательствующий

 

Л.Е. Споткай

Судьи:

 

И.Н. Бутина

 

Ю.В. Хабибулина