Арбитражный суд Московской области

         107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-3950/24

27 апреля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2024 года

Полный текст решения изготовлен 27 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд в составе:

председательствующего – судьи Арешкиной И.Д.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леоновым С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест»

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КСК Строй»

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 4 062 549, 06 руб.,

при участии в заседании:

согласно протоколу, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (далее – ООО «Стройинвест», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КСК Строй» (далее – ООО «КСК Строй», ответчик) о взыскании денежных средств в размере 4 062 549,06 руб.

Истец направил в судебное заседание своего представителя, который поддержал требования иска.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, мотивированный отзыв, документальное обоснование возражений на иск, контррасчет не представил. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным проведение судебного заседания в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) заключен договор подряда от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14 (далее – договор от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 14 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14 в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2022 № 3 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 414 039,30 руб., в том числе НДС 20 % в размере 69 006,55 руб., согласно Смете (Приложение № 2 к договору).

В целях завершения строительства объекта жилой дом № 14 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, Стороны утвердили срок окончания Работ по договору не позднее 10.01.2022 без предоставления графика производства работ (пункт 3 дополнительного соглашения от 01.10.2022 № 3 к договору от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14).

Во исполнение условий договора от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14 истец выполнил работы на сумму 405 758,51 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 01.10.2022.

Между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) также заключен договор подряда от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС (далее – договор от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС) на выполнение подрядных работ по завершению строительства: - «Жилого комплекса по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Водозаборный узел. Завершение строительства»; - Жилого комплекса по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Завершение строительства», для комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово».

Пунктом 1.1 дополнительного соглашения от 26.09.2022 № 2 к договору от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС сторонами установлено, что Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы в рамках выполнения комплекса работ на объекте: «Жилой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Локальные очистные сооружения ливневых стоков. Завершение строительства.»; «Жилой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Водозаборный узел. Завершение строительства.»; «Жилой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Завершение строительства.».

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 26.09.2022 № 2 к договору от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС в редакции дополнительного соглашения от 10.01.2023 № 4 стоимость дополнительных работ составляет 81 338,44 руб., в том числе НДС 20 % 13 556,41 руб.

Во исполнение условий договора от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС истец выполнил работы на сумму 79 711,67 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 10.01.2023.

Судом также установлено, что между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) заключен договор подряда от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2 (далее – договор от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 7 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения от 31.03.2022 № 2 к договору от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2 Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательство выполнить дополнительные работы в рамках выполнения комплекса работ на объекте: «Жилого дом № 7 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово», в объеме, предусмотренном настоящим Соглашением, Приложениями к нему, и сдать Заказчику результат дополнительных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат дополнительных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и договором.

В силу пункта 2 дополнительного соглашения от 31.03.2022 № 2 к договору от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2 стоимость дополнительных работ составляет 1 613 394,84 руб., в том числе НДС 20 % 268 899,14 руб.

Во исполнение условий договора от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2 истец выполнил работы на сумму 1 581 126,94 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

Между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) также заключен договор подряда от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-3 (далее – договор от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-3) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 7 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-3 в редакции дополнительного соглашения от 09.01.2023 № 2 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 2 440 350,39 руб., в том числе НДС 20 % в размере 406 725,07 руб., согласно Смете (Приложение № 2 к договору).

Истцом выполнены работы по договору от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-3 на сумму 172 685,33 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

Из материалов дела также следует, что между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) заключен договор подряда от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-4 (далее – договор от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-4) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 7 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

В силу пункта 4.1 договора от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-4 в редакции дополнительного соглашения от 30.03.2022 № 1 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 1 714 135,79 руб., в том числе НДС 20 % в размере 285 689,30 руб., согласно Смете (Приложение № 2 к договору).

Во исполнение условий договора от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-4 истец выполнил работы на сумму 1 679 853,07 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

Кроме того, между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) также заключен договор подряда от 21.10.2021 № 211021/СИ/МТ8-1 (далее – договор от 21.10.2021 № 211021/СИ/МТ8-1) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 8 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

Согласно пункту 4.1 договора от 21.10.2021 № 211021/СИ/МТ8-1 в редакции дополнительного соглашения от 03.10.2022 № 1 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 1 115 200 руб., в том числе НДС 20 % в размере 185 866,67 руб., согласно Смете (Приложение № 2 к договору).

Истцом выполнены работы по договору от 21.10.2021 № 211021/СИ/МТ8-1 на сумму 196 492,91 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

Между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) также заключен договор подряда от 20.04.2022 № 200422/СИ/МТГС (далее – договор от 20.04.2022 № 200422/СИ/МТГС) на выполнение подрядных работ по завершению строительства объектов капитального строительства (головных сооружений): «Милой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Локальные очистительные сооружения ливневых стоков. Завершение строительства.»; «Жилой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Водозаборный узел. Завершение строительства.»; «Жилой комплекс по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово. Жилые дома № 6,7,8,9,10,11.1,11.2,13,14. Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Завершение строительства, для комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.».

Пунктом 3.1 договора от 20.04.2022 № 200422/СИ/МТГС предусмотрено, что стоимость работ является твердой и составляет  денежную сумму в размере 39 427,22 руб., в том числе НДС 20 % в размере 6 571,20 руб., согласно смете (Приложение № 2 к договору).

Во исполнение условий договора от 20.04.2022 № 200422/СИ/МТГС истец выполнил работы на сумму 37 455,86 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 01.10.2022.

Судом также установлено, что между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) заключен договор подряда от 28.09.2022 № 280922/КСК/СИ/МТ14 (далее – договор от 28.09.2022 № 280922/КСК/СИ/МТ14) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 14 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

В соответствии с пунктом 4.1 договора от 28.09.2022 № 280922/КСК/СИ/МТ14 в редакции дополнительного соглашения от 09.01.2023 № 1 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 2 830 204,40 руб., в т.ч. НДС 20 % в размере 471 700,73 руб., согласно смете Смете (Приложение № 2 к договору).

Истцом выполнены работы по договору от 28.09.2022 № 280922/КСК/СИ/МТ14 на сумму 912 457,90 руб., что подтверждается подписанными обеими сторонами актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

Между ООО «Стройинвест» (Подрядчик) и ООО «КСК Строй» (Заказчик) также заключен договор подряда от 30.09.2022 № 300922/КСК/СИ/МТ14 (далее – договор от 30.09.2022 № 300922/КСК/СИ/МТ14) на выполнение подрядных работ по завершению строительства жилого дома № 14 с подземной автостоянкой по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.

В силу пункта 4.1 договора от 30.09.2022 № 300922/КСК/СИ/МТ14 в редакции дополнительного соглашения от 09.01.2023 № 1 цена работ является твердой и составляет денежную сумму в размере 300 485,01 руб., в том числе НДС 20 % в размере 50 080 руб., согласно Смете (Приложение № 2 к договору).

Во исполнение условий договора от 30.09.2022 № 300922/КСК/СИ/МТ14 истец выполнил работы на сумму 57 602,98 руб., что подтверждается представленными в материалы дела актом приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от 09.01.2023.

В соответствии с пунктом 4.4.1 договоров от 05.07.2020 № 05072020/КСК/СИ/МТ14, от 31.07.2020 № 31072020/КСК/СИ/МТГС, от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-2, от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-3, от 18.10.2021 № 181021/СИ/МТ7-4, от 21.10.2021 № 211021/СИ/МТ8-1, от 28.09.2022 № 280922/КСК/СИ/МТ14, от 30.09.2022 № 300922/КСК/СИ/МТ14 и пунктом 3.3.1 договора от 20.04.2022 № 200422/СИ/МТГС оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком предоставленных Подрядчиком Акта КС-2, Справки КС-3 за отчетный месяц, в размере, указанном в Акте КС-2, Справке КС-3, оформленных на основании надлежаще оформленной Исполнительной документации, и предъявления счета и счета-фактуры за отчетный период, за вычетом суммы перечисленного Подрядчику авансового платежа, резервируемой суммы.

Вместе с тем, обязательства по оплате выполненных истцом работ на общую сумму 4 062 549,06 руб. в установленные договорами сроки обществом с ограниченной ответственностью «КСК Строй» не исполнены.

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в адрес ответчика направлена претензия от 23.11.2023 с требованием об оплате задолженности.

Поскольку требование, изложенное в претензии, ответчиком в добровольном порядке не исполнено, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Поскольку ответчиком возражений и доказательств оплаты выполненных истцом работ в размере 4 062 549,06 руб. в материалы дела не представлено, суд считает требование ООО «Стройинвест» подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Дополнительно к основному требованию истцом заявлено требования о взыскании почтовых расходов за отправку претензии в размере 266 руб.

В обосновании заявленного требования истец представил в материалы дела кассовый чек от23.11.2023 № 43249, а также опись документов в составе письма, направленного в адрес общества с ограниченной ответственностью «КСК Строй».

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Оценив представленные доказательства, суд находит доказанным факт несения обществом с ограниченной ответственностью «Стройинвест» почтовых расходов в заявленном размере в связи с рассмотрением настоящего дела.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 2, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «КСК Строй» в пользу ООО «Стройинвест» 4 062 549, 06 руб. задолженности, 43 313 руб. расходов по уплате государственной пошлины и 266 руб. почтовых расходов.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                                       И.Д. Арешкина