РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   29 октября 2024 года    

по делу А33-12364/2024 Красноярск  

«17» октября 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на  территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 60 дней  со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу, устранить недостатки  выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 1/9  микрорайон 2 в г. Шарыпово Красноярского края, а именно:  

 № п/п 

Наименование работ 

Количество  

1. Демонтажные работы 

1.1. 

Расчистка поверхностей от старого мастичного покрытия 

946,98 м2  

2. Строительно-монтажные работы 

2.1. Восстановление штукатурного слоя на вентшахтах 

2.1.1 

Ремонт штукатурки вентшахт 

25,92 м2  

2.1.2. 

Покрытие поверхностей вентшахт грунтовкой 

25,92 м2  

2.1.3. 

Окраска вентшахт поливинилацетатными водоэмульсионными  

25,92 м2  

составами 

2.2. Устройство гидроизоляционного покрытия концевых плит, примыкающих к  лоткам  

2.2.1. 

Обеспыливание поверхности 

138,24 м2  

2.2.2. 

Огрунтовка оснований кровли готовой эмульсией битумной -  

138,24 м2  

концевых кровельных плит примыкающим к лоткам  

2.2.3. 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два  

138,24 м2  

слоя вдоль лотка 

2.3. 

Устройство отдельными местами мастичного покрытия плит  

298,0 м2  

2.3.1. 

Обеспыливание поверхности 

298,0 м2  

2.3.2. 

Огрунтовка оснований кровли готовой эмульсией битумной 

298,0 м2  

2.3.3. 

Покрытие плит перекрытий мастикой 

298,0 м2  

2.4. 

Устройство гидроизоляционного слоя из наплавляемого 

265,0 м2  

материала -ложные люки 

2.4.1. 

Обеспыливание поверхности 

265,0 м2  

2.4.2. 

Огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной  

265,0 м2  

2.4.3. 

Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в один  

265,0 м2  

слой 

2.5. Устройство примыканий к парапету 

2.5.1 

Огрунтовка оснований по торцам здания готовой эмульсией 

8,4 м2 

битумной 

2.5.2. 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

13 м. п. 

стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков  

2.5.3. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0033м2  

2.6. Устройство примыканий к вентблокам и мусоропроводам, вытяжкам  

2.6.1. 

Огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной  

28,3 м2 

2.6.2. 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

57,6 м. п.  

стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  

2.6.3. 

Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов в  

2,38 м2 

один слой для усиления примыкания к вентблокам и  

мусоропроводам, вытяжкам 

2.6.4. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0063 м2  

2.7. Ремонт лотка 

2.7.1. 

Обеспыливание поверхности 

209,04 м2  

2.7.2. 

Огрунтовка оснований готовой эмульсией битумной  

209,04 м2  

2.7.3. 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два  

112,32 м2  

слоя 

2.7.4. 

Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов в  

11,7 м2 

один слой для усиления лотков 

2.7.5. 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к  

288 м. п.  

стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  

2.7.6. 

Устройство мелких покрытий (рейка прижимная алюминиевая)  

0,0276 м2  

Взыскать с Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на  

территории Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью Управляющей компании "Вера" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.А. Антропова