АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Казань Дело № А65-21985/2020  

Дата принятия решения – 09 июля 2024 года. Дата объявления резолютивной части – 25 июня 2024 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  А.Г. Абдуллаева,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.О. Кукушкиной,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Фаззура» к обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» и  обществу с ограниченной ответственностью «Юджин Групп» взыскании 97 223 114 руб.  65 коп.,  

с привлечением к участию в деле общества с ограниченной ответственностью  «Индортранс», общества с ограниченной ответственностью «Казторг», общества с  ограниченной ответственностью «Пальмира», общества с ограниченной  ответственностью «ППНГ-Октябрьский», общества с ограниченной ответственностью  «Возрождение М», общества с ограниченной ответственностью «Фасадмонтаж»,  общества с ограниченной ответственностью «СтройГрупп», Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан, общества с ограниченной  ответственностью «Консалтинг-А» (ООО «Фазура»), временного управляющего  общества с ограниченной ответственностью «Юджин Груп» ФИО1 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора,  

в отсутствие участвующих в деле лиц, 

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Республики Татарстан обратилось общество с ограниченной  ответственностью «Фаззура» (далее – ООО «Фаззура», истец) с иском к обществу с  ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – ООО «Вектор», первый ответчик) и к  обществу с ограниченной ответственностью «Юджин Групп» (далее – ООО «Юджин  Групп», второй ответчик) о взыскании в солидарном порядке 67 223 114 руб. 65 коп.  задолженности по договорам: на строительство объектов 220 КВ от 10.09.2017 №  10/09/17; поставки от 15.09.2016 № 15/09/16; на строительство объектов 220 КВ от  05.10.2016 № 05/10; на строительство объектов 220 КВ от 07.11.2016 № 07/11/16; на  строительство объектов 220 КВ от 10.08.2016 № 20/а, из которых: 56 055 788 руб. 96 коп.  задолженность; 11 167 325 руб. 69 коп. проценты за пользование чужими денежными  средствами в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной  ответственностью «Индортранс» (далее – ООО «Индортранс»), общество с ограниченной  ответственностью «Казторг» (далее – ООО «Казторг»), общество с ограниченной  ответственностью «Пальмира» (далее – ООО «Пальмира»), общество с ограниченной  ответственностью «ППНГ-Октябрьский» (далее – ООО «ППНГ-Октябрьский»), общество  с ограниченной ответственностью «Возрождение М» (далее – ООО «Возрождение М»),  общество с ограниченной ответственностью «Фасадмонтаж» (далее – ООО  «Фасадмонтаж»), общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее –  ООО «СтройГрупп»), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по  Республике Татарстан (далее – МИФНС № 9 по РТ), общества с ограниченной  ответственностью «Консалтинг-А» (ООО «Консалтинг-А»), временного управляющего  общества с ограниченной ответственностью «Юджин Груп» ФИО1 (в/у ООО «Юджин Груп»).  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.01.2021 иск  удовлетворен частично: с ООО «Вектор» и ООО «Юджин Групп» в пользу ООО  «Фаззура» взыскана задолженность в размере 30 000 000 руб.; с ООО «Вектор» в пользу  ООО «Фаззура» взысканы задолженность в размере 26 055 788 руб. 96 коп. и проценты в  размере 5 000 000 руб.; отказано в удовлетворении остальной части иска. Распределены  расходы по уплате государственной пошлины.  

Принятое судом решение обжаловано ООО «Вектор» в  апелляционном порядке.  

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.03.2021  жалоба возвращена заявителю на основании абзаца первого пункта 5 части 1 статьи 264  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с не  устранением в срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы без  движения.  

В дальнейшем решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.01.2021  не обжаловано, вступило в законную силу.  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике  Татарстан (далее – Налоговый орган, заинтересованное лицо) обратилась в арбитражный  суд с заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Республики Татарстан от  28.01.2021 по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.02.2022 отказано  в удовлетворении заявления заинтересованного лица.  

Определением от 02.03.2022 суд произвел процессуальное правопреемство по  настоящему делу в части присужденной решением Арбитражного суда Республики  Татарстан от 28.01.2021 денежной суммы, заменив взыскателя с ООО «Фаззура» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) на его правопреемника – общество с ограниченной  ответственностью «Фаззура» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), которое  впоследствии сменило наименование на общество с ограниченной ответственностью  «Консалтинг-А» (далее – ООО «Консалтинг-А», истец).  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от  24.05.2022 определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.02.2022 об  отказе в удовлетворении заявления заинтересованного лица о пересмотре решения  Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.01.2021 по вновь открывшимся  обстоятельствам оставлено без изменения.  

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 24.08.2022  определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 03.02.2022 и постановление  Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2022 отменены, дело  направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.  

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда Республики Татарстан от  06.12.2022, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного  апелляционного суда от 14.02.2023 и постановлением Арбитражного суда поволжского  округа от 26.04.2023, заявление Налогового органа удовлетворено, решение  

Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.01.2021 отменено по вновь  открывшимся обстоятельствам, к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан.  

В ходе рассмотрение дела истец уточнил размер иска до 22 849 695 руб. 81 коп.  долга и 10 246 639 руб. 89 коп. процентов.  

Уточнение иска и принято арбитражным судом на основании статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Кроме того, определением от 20.09.2023 исковое заявление в части требования к  ООО «Вектор» оставлено без рассмотрения в связи с включением требования ООО  «Фаззура» в состав третьей очереди реестр требований кредиторов ООО «Вектор» в  размере 22 849 695 руб. 81 коп. долга, 10 246 639 руб. 89 коп. процентов.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает следующее. 

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии  с условиями обязательства и требованиями закона и иных правовых актов.  Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением  случаев, предусмотренных законом или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного  подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию  заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену.  

Как следует из материалов дела и следует из определения Арбитражного суда  Республики Татарстан от 15.12.2023 по делу № А65-14230/2022, между ООО «Вектор»  (заказчик) и ООО «Индортранс» (подрядчик) был заключен договор на строительство  объектов 220 KB № 10/09/17 от 10.09.2017, по условиям которого подрядчик обязался  осуществить строительство воздушной линии ВЛ 220 кВ Щелково-Центральная на  территории Елабужского, Мамадышского, Рыбно-Слободского, Пестречинского  муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани в соответствии с  утвержденной проектной документацией и сдать результат заказчику, а заказчик, в свою  очередь, обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном  договором.  

Согласно пункту 17.6 договора на строительство объектов 220 KB № 10/09/17,  оплата выполненных подрядчиком работ по соответствующему акту КС-2 производится  

заказчиком ежемесячно, по завершении соответствующих работ за вычетом  авансового платежа в течении 30 банковских дней после подписания заказчиком и  предоставления подрядчиком подписанного акта о приемке выполненных работ КС-2 в  бухгалтерию заказчика на основании оригинала счета на оплату и счета-фактуры,  оформленной подрядчиком на основании: журнала учета выполненных работ (форма КС- ба), акта о приемке выполненных работ – принятый (подписанный) полномочным  сотрудником/работником представителя заказчика, справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки  Заказчика за отчетный месяц, в случае использования давальческих материалов.  

Во исполнение условий договора, подрядчиком выполнены работы на сумму  8 589 568 руб. 52 коп., что подтверждается подписанными с обеих сторон актом КС-2 № 1  от 31.12.2017, справкой КС-3 № 1 от 31.12. 2017, счетом-фактурой № 237 от 30.12.2017.  

Впоследствии между ООО «Вектор» и ООО «Индортранс» заключено  дополнительное соглашение № 1 от 01.07.2018 об устранении замечаний в рамках  гарантийных обязательств по договору подряда № 10/09/17 от 10.09.2017 и выполнению  работ по восстановлению 264 штук банкеток опор (366-553) и (700-777).  

Согласно акту № 157 от 30.09.2018, счета-фактуры № 157 от 30.09.2018 подрядчик  в полном объеме и надлежащего качества дополнительно выполнил работы на сумму  1 768 000 руб.  

Общая сумма выполненных работ составляет 10 357 568 руб. 52 коп. 

Между ООО «Индортранс» (цедент) и ООО «Казторг» (цессионарий) заключен  договор об уступке права требования от 15.02.2019, по условиям которого цедент  уступил цессионарию право требования к ООО «Вектор» в размере 10 357 568 руб. 52  коп., возникшего на основании нарушения условий договора на строительство объектов  220 KB № 10/09/17 от 10.09.2017.  

Между ООО «Казторг» (цедент) и ООО «Фаззура» (цессионарий) заключен  договор цессии от 01.04.2019, по условиям которого цедент уступил, а цессионарий  принял права (требования) в полном объеме по договору об уступке права требования от  15.02.2019, согласно которого уступает право требования к ООО «Вектор».  

Вместе с тем, между ООО «Вектор» (покупатель) и ООО «Пальмира»  (поставщик) был заключен договор поставки № 15/09/16 от 15.09.2016, по условиям  которого поставщик обязался передать в собственность покупателя, а покупатель  обязался принять и оплатить па условиях договора глину (грунт), песок.  

Во исполнение условий договора поставки поставщик поставил покупателю  товар на общую сумму 15 005 925 руб., что подтверждается подписанными сторонами  

договора товарными накладными № 22 от 31.10.2017, № 36 от 30.11.2017, № 44 от  31.12.2017.  

Между ООО «Пальмира» (Цедент) и ООО «Казторг» (Цессионарий) заключен  договор об уступке права требования от 12.03.2019, по условиям которого цедент  уступил цессионарию право требования к ООО «Вектор» в размере 15 005 925 руб.,  возникшего на основании нарушения условий договора поставки № 15/09 16 от  15.09.2016.  

Между ООО «Казторг» (цедент) и ООО «Фаззура» (цессионарий) был заключен  договор цессии от 01.04.2019, по условиям которою цедент уступил, а цессионарий  принял права (требования) в полном объеме по договору об уступке права требования от  12.03.2019, согласно которого уступает право требования к ООО «Вектор».  

Согласно пункту 5.4 договора поставки № 15/09/16 в редакции дополнительного  соглашения № 1 от 11.10.2016 оплата товара производится покупателем в течении 14  календарных дней с момента поступления покупателю удержанных заказчиком по  основному договору подряда денежных средств (гарантийные удержания), но не позднее  30.04.2019.  

Кроме того, между ООО «Вектор» (заказчик) и ООО «ППШ-Октябрьский»  (подрядчик) был заключен договор на строительство объектов 220 KB № 05/10 от  05.10.2016, по условиям которого подрядчик обязался осуществить строительство  воздушной линии ВЛ 220 кВ Щелково-Центральная на территории Елабужского,  Мамадышского Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов  Республики Татарстан и г. Казани в cooтветствии с утвержденной проектной  документацией и сдать результат заказчику, а заказчик обязался принять результат работ  и оплатить его в порядка предусмотренном договором.  

Согласно пункту 17.6 договора на строительство объектов 220 KB № 05/10,  оплата выполненных подрядчиком работ по соответствующему акту КС-2 производится  заказчиком ежемесячно, по завершении соответствующих работ за вычетом авансового  платежа в течении 30 банковских дней после подписания заказчиком и предоставления  подрядчиком подписанного акта о приемке выполненных рабой КС-2 в бухгалтерию  заказчика на основании оригинала счета на оплату и счета-фактуры, оформленной  подрядчиком на основании: журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), акта о  приемке выполненных работ – принятый (подписанный) полномочным сотрудником  работником представителя заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки заказчика» за  отчетный месяц, в случае использования давальческих материалов.  

Во исполнение условий договора подрядчик выполнил работы на общую  сумму 20 340 576 руб. 47 коп., что подтверждается подписанными с обеих сторон актом  КС-2 № 1 от 31.10.2016, справкой КС-3 № 1 от 31.10.2016, счетом-фактурой № Д/011 от  31.10.2016, актом КС-2 № 2 от 30.11.2016, справкой КС-3 № 2 от 30.11.2016, счетом- фактурой № Д/012 от 30.1 1.2016, актом КС-2 № 3 от 31.12.2016, справкой КС-3 № 3 от  31.12.2016, счетом-фактурой № Д/013 от 31.12.2016.  

Между ООО «ГПНГ-Октябрьский» (цедент) и ООО «Возрождение М»  (цессионарий) заключен договор об уступке права требования от 28.04.2017, по условиям  которого цедент уступил цессионарию право требования к ООО «Вектор» в размере  20 340 576 руб. 47 коп., возникшего на основании нарушения условий договора на  строительство объектов 220 KB № 05/10 от 05.10.2016.  

Между ООО «Возрождение М» (цедент) и ООО «Фаззура» (цессионарий)  заключен договор цессии от 30.12.2019, по условиям которого цедент уступил, а  цессионарий принял права (требования) задолженности к ООО «Вектор» на сумму  20 340 576 руб. 47 коп.  

Кроме того, между ООО «Вектор» (заказчик) и ООО «Фасадмонтаж»  (подрядчик) был заключен договор на строительство объектов 220 KB № 07/11/16 от  07.11.2016, по условиям которого подрядчик обязался осуществить строительство  воздушной линии ВЛ 220 кВ Щелково -Центральная на территории Елабужского,  Мамадышского Рыбно-Слободского, Пестречииского муниципальных районов  Республики Татарстан и г. Казани в соответствии с утвержденной проектной  документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязался принять результат работ  и оплатить его в порядке, предусмотренном договором.  

Согласно пункту 17.6 договора на строительство объектов 220 KB № 07/11/16,  оплата выполненных подрядчиком работ по соответствующему акту КС-2 производится  заказчиком ежемесячно, по завершении соответствующих работ за вычетом авансового  платежа в течении 30 банковских дней после подписания заказчиком и предоставления  подрядчиком подписанного акта о приемке выполненных работ КС-2 в бухгалтерию  заказчика на основании оригинала счета на оплату и счета-фактуры, оформленной  подрядчиком на основании: журнала учета выполненных работ (форма КС-ба), акта о  приемке выполненных работ – принятый (подписанный) полномочным  сотрудником/работником представителя заказчика, справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки  заказчика» за отчетный месяц, в случае использования давальческих материалов.  

Во исполнение условий договора подрядчик выполнил работы на общую  сумму 10 912 640 руб., что подтверждается подписанными с обеих сторон актом КС-2   № 1 от 31.10.2017, справкой КС-3 № 1 от 31.10.2017, счетом-фактурой № 737 от  31.10.2017.  

Между ООО «Фасадмонтаж» (цедент) и ООО «Казторг» (цессионарий) заключен  договор об уступке права требования от 15.02.2019, по условиям которого цедент  уступил цессионарию право требования к ООО «Вектор» в размере 4 421 390 руб.,  возникшего на основании нарушения условий договора на строительство объектов 220  KB № 07/11/16 от 07.11.2016.  

Между ООО «Казторг» (цедент) и ООО «Фаззура» (цессионарий) заключен  договор об уступке права требования от 01.10.2019, по условиям которого цедент  уступил, а цессионарий принял права (требования) задолженности к ООО «Вектор» в  размере 3 300 000 руб.  

Кроме того, между ООО «Вектор» (заказчик) и ООО «СтройГрупп» (подрядчик)  заключен договор па строительство объектов 220 KB № 20/а от 10.08.2016, по условиям  которого подрядчик обязался осуществить строительство воздушной линии ВЛ 220 кВ  Щелково-Центральная на территории Елабужского, Мамадышского, Рыбно-Слободского,  Пестречинского муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани в  соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать результат заказчику, а  заказчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном  договором.  

Согласно пункту 17.6 договора на строительство объектов 220 KB № 07 11 16,  оплата выполненных подрядчиком работ по соответствующему акту КС-2 производится  заказчиком ежемесячно, по завершении соответствующих работ за вычетом авансового  платежа в течении 30 банковских дней после подписания заказчиком и предоставления  подрядчиком подписанного акта о приемке выполненных работ КС-2 в бухгалтерию  заказчика на основании оригинала счета на оплату и счета-фак- туры, оформленной  подрядчиком на основании: журнала учета выполненных работ (форма КС-6а), акта о  приемке выполненных работ - принятый (подписанный) полномочным  сотрудником/работником представителя заказчика, справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма КС-3), ведомости переработки давальческих материалов поставки  заказчика за отчетный месяц, в случае использования давальческих материалов.  

Во исполнение условий договора подрядчик выполнил работы на общую сумму  7 750 892 руб. 30 коп., что подтверждается подписанными с обеих сторон актом КС-2 № 1  от 31.10.2016, справкой КС-3 № 1 от 31.10.2016, счетом-фактурой № 118 от 31.10.2016.  

Между ООО «СтройГрупп» (цедент) и ООО «Возрождение М»  (цессионарий) заключен договор уступки прав (цессии) от 03.04.2017, по условиям  которого цедент уступил цессионарию право требования к ООО «Вектор» в размере  7 750 892 руб. 30 коп., возникшего на основании нарушения условий договора на  строительство объектов 220 KB № 20/а от 10.08.2016.  

Между ООО «Возрождение М» (Ццедент) и ООО «Фаззура» (цессионарий)  заключен договор уступки прав (цессии) от 14.05.2020, по условиям которого цедент  уступил, а цессионарий принял права (требования) в полном объеме по договору на  строительство объектов 220 KB № 20/а от 10.08.2016, согласно которого уступает право  требования к ООО «Вектор» в размере 7 750 892 руб. 30 коп.  

Таким образом, общая сумма задолженности ООО «Вектор» перед ООО  «Фаззура» составляет 56 754 962 руб. 21 коп. долга.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного  подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию  заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик  обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену.  

В соответствии с пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения  обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ  заказчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

Результат работ по договорам подряда сдан и принят ответчиком ООО «Вектор»,  что подтверждается актами по форме №№ КС-2, КС-3 подписанными сторонами  договора. Работы приняты без замечаний по объему, стоимости и качеству.  

Указанные обстоятельства в ходе рассмотрения дела ООО «Вектор» не  оспаривались.  

На основании заключенного 25.05.2020 соглашения о рассрочке долга (далее – соглашение) ООО «Фаззура» предоставило ООО «Вектор» рассрочку по возврату  основной суммы задолженности. Согласно условиям соглашения, должник (ООО  «Вектор») обязуется погасить задолженность в размере, определенном в пункте 2  соглашения, в соответствии с предоставленным графиком.  

С целью защиты своих интересов ООО «Фаззура» заключило с ООО «Юджин  Груп» договор поручительства № 1 от 25.05.2020 (далее – договор поручительства),  согласно условиям которого ООО «Юджин Груп» приняло на себя обязательство  отвечать перед ООО «Фаззура» за исполнение ООО «Вектор» своих обязательств.  

Согласно пункту 1.3 договора поручительства, размер ответственности  поручителя по договору поручительства ограничивается суммой в 30 000 000 руб.  

Вследствие нарушения условий соглашения о рассрочке долга по оплате  задолженности и договора поручительства. ООО «Фаззура» обратилось к ООО «Вектор»  и ООО «Юджин Груп» с претензионными письмами с предложением в добровольном  порядке исполнить свои обязательства.  

Данные претензионные письма оставлены без удовлетворения, ООО «Вектор» и  ООО «Юджин Груп» не исполнили свои обязательства, так же не было предоставлен в  случаи не согласия с претензионным письмо какой-либо мотивированный ответ.  

В силу пункту 1 статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель  обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его  обязательства полностью или в части.  

Согласно пункту 1 статьи 363 ГК РФ обязанность поручителя и должника перед  кредитором является солидарной.  

В соответствии со статьей 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников  кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от  любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Солидарные  должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.  

В адрес ООО «Фаззуры» от должника было частичное исполнение в сумме  1 841 772 руб. 96 коп. в рамках исполнительного производства.  

От конкурсного управляющего поступили документы, согласно которых ООО  «Вектор» погасил задолженность перед ООО «Фаззурой» на общую сумму 3 400 000 руб.  

ООО «Фаззура» полученные 3 400 000 руб. списало с задолженности по ООО  «ППНГ Октябрьский» 20 340 576 руб. 47 коп. – 3 400 000 руб. = 16 940 576 руб. 47 коп.  

ООО «Фаззура» полученные 1 841 772 руб. 96 коп. списала с задолженности по  ООО «СтройГрупп» 7 750 892 руб. 30 коп. – 1 841 772 руб. 96 коп. = 5 909 119 руб. 34  коп.  

Итого задолженность ООО «Вектор» перед ООО «Фаззурой» (по ООО «ППНГ- Октябрьский» и ООО «Строй Групп») составила 22 849 695 руб. 81 коп.  

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.03.2023 в рамках дела   № А65-14230/2022 ООО «Вектор» признано несостоятельным (банкротом) по  

упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, открыта  процедура конкурсного производства сроком на три месяца.  

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.12.2023 по делу   № А65-14230/2022, оставленным без изменений постановлением Одиннадцатого  арбитражного апелляционного суда, требование ООО «Фаззура» в размере 22 849 695  руб. 81 коп. долга, 10 246 639 руб. 89 коп. процентов признано обоснованным и  включено в состав третьей очереди реестр требований кредиторов ООО «Вектор».  

Определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 15.12.2023 по делу   № А65-14230/2022 оставлено без изменений постановлением Одиннадцатого  арбитражного апелляционного суда от 08.04.2024 и вступило в законную силу.  Следовательно, согласно пункту 2 статьи 69 АПК РФ установленные этим решением  обстоятельства имеют преюдициальное значение и не подлежат повторному  доказыванию.  

Таким образом, является преюдициально установленным факт ненадлежащего  исполнения ООО «Вектор» обязанности по оплате работ перед ООО «Фаззура» на сумму  22 849 695 руб. 81 коп. долга, 10 246 639 руб. 89 коп. процентов.  

Согласно пункту 1 статьи 363 ГК РФ обязанность поручителя и должника перед  кредитором является солидарной.  

В соответствии со статьей 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников  кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от  любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Солидарные  должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.  

Поскольку ответчиком доказательств, подтверждающих полное погашение  задолженности, не представлено, требование истца о взыскании задолженности является  обоснованным и подлежащим удовлетворению в размере 30 000 000 руб. согласно  пункту 1.3 договора поручительства № 1 от 25.05.2020.  

Из содержания пункта 1.3 договора поручительства следует, что поручителем  обеспечивается исполнение должником всех обязательств по договору, включая  проценты. Следовательно, сумма 30 000 000 руб. включает в себя 22 849 695 руб. 81 коп.  долга и в остальной части (7 150 304 руб. 19 коп.) процентов.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих  требований и возражений.  

В силу статей 9 и 41 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде  осуществляется на основе состязательности. Следовательно, лица, участвующие в деле,  

несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими  процессуальных действий, в том числе в части представления (непредставления)  доказательств, заявления ходатайств о проверке достоверности сведений,  представленных иными участниками судебного разбирательства, а также имеющихся в  материалах дела.  

При изложенных обстоятельствах, исходя из установленных принципов  состязательности арбитражного процесса и равенства его участников, арбитражный суд  считает исковые требования подлежащими удовлетворению.  

На основании статьи 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит  взысканию государственная пошлина пропорционально размеру удовлетворённого  требования.  

Руководствуясь статьями 110, 167-177 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юджин Групп» в  

пользу общества с ограниченной ответственностью «Фаззура» 30 000 000 руб. долга. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юджин Групп» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 170 840 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фаззура» в доход  

федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 642 руб. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  

суд в месячный срок. 

Председательствующий судья А.Г. Абдуллаев