АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-11533/2021

г. Чебоксары

16 августа 2022 года

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в заседании суда дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Юристы ВТК", 

428008, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Текстильщиков д. 8, корп. К,  каб. 205 ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования", 

 630061, г. Новосибирск, Новосибирская область, ул. Тюленина, д. 16/1, кв.167, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании 343 745 руб. 10 коп.,

с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Комплекс Систем Безопасности", ООО «Центр машиностроения и металлообработки «Роден».

без участия сторон

установил:

общество с ограниченной ответственностью Юридическая фирма "Юристы ВТК"  (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (далее – ответчик) о взыскании 209 902 руб. 00 коп. пени за нарушение срока поставки товара за период с 29.05.2020 по 26.06.2020, 12 074 руб.10 коп. пени за период с 16.07.2020 по 30.12.2020 за нарушение срока выполнения шеф-монтажа, 27 675 руб.00 коп. убытков (с учетом уточнений).

Требование мотивировано ненадлежащим исполнением обязательств по договору №27/19 от 23.12.2019, право требования, по которому передано истцу в рамках договора цессии от 10.05.2021.

            В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв с 09.08.2022 по 16.08.2022.

Представитель истца до перерыва судебного заседания исковые требования поддержал, по основаниям, изложенным в иске.

Отзывом ответчик иск не признал.

Стороны и третьи лица, будучи надлежащим образом, извещены о времени и месте судебного заседания, после перерыва полномочного представителя в суд не направили.

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в их отсутствие.

Изучив материалы дела, суд установил следующее.

23.12.2019 между обществом с ограниченной ответственностью «Завод Строительного Оборудования» (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс Систем Безопасности (покупатель) заключен договор № 27/19, по условиям которого поставщик обязуется поставить оборудование и провести его пуско-наладку, а покупатель обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях настоящего договора.

Наименование оборудования, количество, стоимость и сроки производства указываются в Перечне поставляемого оборудования (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Характеристики оборудования оговариваются сторонами в Технических параметрах поставляемого оборудования (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (пункты 1.2., 1.3. договора).

После готовности оборудования к передаче, поставщик уведомляет об этом покупателя в письменной форме. Уведомление направляется по электронной почте, на адрес: ogradastroi@gmail.com. В ответ, покупатель в течение 3 рабочих -дней уведомляет поставщика, путем: отправки сообщения- на электронную почту: zakaz@zsordn.ru о направлений своего представителя для предварительной приемки оборудования на территории поставщика (пункт 2.2.договора).

Согласно пункта 2.3. договора поставка оборудования осуществляется при условии оплаты 90 % стоимости оборудования со склада поставщика, расположенного по адресу: 

<

...>. цех №10. Поставка осуществляется, силами и за счет поставщика до места эксплуатации оборудования по адресу: село Моргауши, Моргаушского района Чувашской Республики, ул. Красная площадь, 10а.

Моментом исполнения поставщиком обязанности по передаче оборудования является момент, когда оборудование вручено покупателю и подписаны товаросопроводительные документы. Распаковка и установка оборудования осуществляются в присутствии представителей поставщика, передача оборудования происходит по количеству отгружаемых мест, согласно товарно-транспортной накладной по форме 1-Т (пункт 2.4. договора).

В пункте 2.5. договора установлено, что шефмонтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет поставщика на основании Дополнительного соглашения №1 (Приложение №3) на месте эксплуатации оборудования по адресу: село Моргауши. Моргаушского района Чувашской Республики, ул. Красная площадь 10а. Не позднее 2 рабочих дней с даты прибытия оборудования на место эксплуатации, представители поставщика обязаны приступить к шеф-монтажным и пусконаладочным работам. Датой прибытия оборудования на место эксплуатации считается дата подписания товарно-транспортной накладной (форма 1-Т). Моментом исполнения поставщиком обязанности по проведению шеф-монтажных и пусконаладочных работ является момент, когда оборудование введено в эксплуатацию и подписан акт приема-передачи выполненных работ (форма акта - Приложение к Дополнительному соглашению №1).

Общая стоимость поставляемого оборудования и порядок расчетов определяются в Перечне поставляемого оборудования (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью данного договора (пункт 3.1. договора).

Согласно Приложения № 1 к договору поставщик обязуется изготовить, а покупатель принять и оплатить следующее оборудование: полуавтоматическая      линия сварки заборных секций WLF-3E, стоимостью составляет 7238000 руб.

Изготовление оборудования, указанного в п. 1.1. настоящего Приложения, производится поставщиком не позднее 88 рабочих дней с даты зачисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика, согласно п. 1.3 (пункт 1.2. Приложения № 1 к договору).            

Оплата Поставщику производится покупателем в следующем порядке:   

1.3.1.  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора покупатель оплачивает  поставщику авансовый платеж в размере 1 427 500 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 237 916руб. 67 коп.

1.3.2.  Не позднее 40 календарных дней после первого транша, по п.1.3.1. покупатель оплачивает поставщику сумму в размере 2000000 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 416 666 руб. 67коп.

1.3.3.  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после осмотра и предварительной приёмки покупателем полуавтоматической линии WLF-ЗБ в работе на складе поставщика, покупатель оплачивает поставщику сумму в размере 2 587 500 руб. 00 коп., в том числе НДС 20%- 431 250 руб.

1.3.4.  Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ покупатель оплачивает поставщику оставшуюся сумму в размере 723 000 руб., в том числе НДС 20% - 120 500 руб.

Дополнительным соглашением № 1 от 23.12.2019 к договору №27/18 от 23.12.2019 стороны установили, что исполнитель обязуется выполнить работы по шефмонтажу и пуско-наладке, а заказчик обязуется принять их.

Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности к шефмонтажу и ПНР определяет лиц и сроки их прибытия и уведомляет об этом заказчика. Заказчик со своей стороны обязуется организовать беспрепятственный доступ к месту размещения оборудования (пункт 3.3.            договора).

Согласно пункта 3.4. договора начало работ - день, следующий заднем прибытия представителей исполнителя.

Работы по шефмонгажу и ПНР выполняются представителями Исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента начала работ. Заказчик проводит монтаж оборудования в течение 5 рабочих дней. При увеличении сроков монтажа по вине заказчика исполнитель составляет соответствующий акт. который является основанием для увеличения стоимости работ (на 12 000 рублей за каждый дополнительный день нахождения представителей исполнителя на объекте заказчика) по настоящему соглашению в случае соразмерного увеличения общего срока выполнения работ. Оплата производится заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления соответствующего счета (пункт 3.5. договора).

За нарушение сроков шефмонтажа и ПНР, предусмотренных пункте 3.5 настоящего соглашения, заказчик вправе требовать с исполнителя уплаты нестойки (пени) в размере 0,01 процента от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки (пункт 4.1. договора).

19.03.2020 между ООО "Завод Строительного оборудования" и ООО "КСБ" заключено дополнительное соглашение к договору №27/19 от 23.12.2019, по условиям которого стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений и Приложение №1 к Договору: 

Пункт 1.3.3. Приложения № 1 первый абзац изложить в следующей редакции: 

«1.3.3. Покупатель оплачивает поставщику сумму 3 310 500 руб. 00 коп. включая НДС 20% за товар путем открытия в пользу поставщика безотзывного покрытого аккредитива, способ исполнения аккредитива: по иредое1авлении документов. Срок действия аккредитива: 90 календарных дней.

Комиссии по аккредитиву оплачиваются в следующем порядке: Комиссии банка - Эмитента - за счет покупателя; Комиссии исполняющего банка - за счет покупателя; Комиссии  банка получателя - за счет покупателя.

Оплата по аккредитиву производится в следующем порядке:

А) Платеж в сумме 2 587 500 руб. руб. 00 коп., в том числе НДС 431 250 руб. производится по представлении поставщиком в исполняющий банк следующих документов:

- 1 оригинал или I копия счета на оплату, выписанного и подписанного поставщиком, с указанием суммы, подлежащей оплате по аккредитиву, в т.ч. суммы НДС;

- 1 оригинал или 1 копия акта предварительной приёмки оборудования, содержащего подпись и печать покупателя и поставщика.

Б) Платеж в сумме 723 000 руб. в том числе НДС 20% - 120500 руб. производится по представлении поставщиком в исполняющий банк следующих документов:

- 1 оригинал или 1 копия счета на оплату, выписанного и подписанного поставщиком, с указанием суммы, подлежащей оплате по аккредитиву, в т.ч. суммы НДС:

- 1 оригинал или 1 копия акта приема-передачи выполненных работ, содержащего подпись и печать покупателя и поставщика.

Пунктом 2 дополнительного соглашения от 19.03.2020 пункт 1.3.4. Приложения 1 исключено.

Также 17.06.2020 между ООО "ЗСО и ООО "КСБ" заключено дополнительное соглашение № 1 к договору, согласно которого пункт 1.3.3. договора изложен в следующей редакции:

1.3.3. Предварительная приёмка полуавтоматической линии WLF-3E производится на складе Поставщика в присутствии представителя Покупатели. На испытание для предварительной приемки полуавтоматической линии WLF-3E поставщик обязуется предоставить оцинкованную проволоку стальную низкоуглеродистую общего назначения ГОСТ 3282-74, диаметрами 3 мм, 4мм. 5мм, 8мм. в достаточном количестве, для изготовления на данной линии сеток следующих товарным позиций (размер ячеек указал в осях): 1) 3100x2500 с ячейкой 50/155мм., с15мм - 3 шт. 2)  3100x2000 с ячейкой 50/50мм.. d 3мм и d 4мм - по 3 шт.

После изготовления указанных выше позиций предварительная приемка полуавтоматической линии WLF-3E считается выполненной и закрепляется актом предварительной приемки оборудования. После чего, не позднее 5 рабочих дней, покупатель оплачивает поставщику сумму в размере 2 587 500 руб. 00 коп., в том числе НДС 20% - 431 250 руб. 00 коп..

Также пункт 1.3.4. договора изложили в новой редакции:

1.3.4. По прибытии полуавтоматической линии WLF-3E на место эксплуатация (429530, 

<

...>.) Поставщик, в течение 10 дней, обязан предоставить покупателю паспорт на линию, с описанием алгоритма работы и настройки контроллера Omron, а также чертежи на все узлы линии (на бумажном носителе) и инструкцию переналадки станка на разные виды сетки, в которой расписан весь порядок работ по настройке в регулировке линии WLF-3E (регулировка размеров ячеек, настройка бункера и сбрасывателя, перенастройка линии с ширины сетки. 3100 (57 прутков) на 2500 (46 прутков), при размере ячейки в осях 55 мм., настройка длины сетки на размер 1000 мм. и т.д.).

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию, в том числе выпуска выше указанных сеток и подписания акта выполненных работ Покупатель оплачивает поставщику оставшуюся сумму в размере 723 000 руб., в том числе НДС 20% - 120 500 руб.

Как следует из материалов дела, авансовый платеж произведен покупателем платежным поручением от 27.12.2019 №434 на сумму 1427500 руб.  по договору №27/19 от 23.12.2019.

Поставка оборудования осуществлена по УПД №36 от 26.06.2020 согласно договору №27/19 от 23.12.2019.

В соответствии с актом приема-передачи оборудования от 30.12.2020 (л.д. 42) шеф-монтажные и пусконаладочные работы по указанным договорам завершены 30.12.2020.

Платежными поручениями от 18.11.2020 №127249 на сумму 10000 руб., от 23.06.2020 №300037 на сумму 5175 руб., от 07.10.2020 №671864 на сумму 2500 руб., от 19.06.2020 №720246 на сумму 10000 руб. (л.д. 45-48) ООО "Комплекс Систем Безопасности" произвел платежи в сумме 27675 руб. по оплате комиссии ПАО Сбербанк за открытие безотзывного покрытого аккредитива.

10.05.2021 общество с ограниченной ответственностью "Комплекс систем безопасности" (цедент) и общество с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Юристы ВТК" (цессионарий) заключили договор уступки требования (цессии), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает следующие принадлежащие цеденту права требования:

должник: общество с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" (630061, г. Новосибирск, Новосибирская область, ул. Тюленина, д. 16/1, кв.167, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

требование: право требования убытков, неустойки (штрафа, пени), любых иных мер гражданско-правовой ответственности, основанное на неисполнении должником любых обязательств:

- по договору №27/19 от 23.12.2019, заключенному между цедентом (покупателем) и должником (поставщиком), предмет договора - поставка оборудования: полуавтоматическая линия сварки заборных секций WLF-3Е.

Заверенные цедентом копии документов, подтверждающие возникновение уступленных требований получены цессионарием от цедента в момент подписания настоящего договора (пункт 1.2 договора цессии).

Согласно пункту 1.3 договора цессии стоимость каждого уступленного права (требования) определена по соглашению сторон настоящего договора и составляет 50 % от суммы, полученной от каждого из должников в добровольном порядке и/или взысканной по решению суда. Стоимость уступленных требований оплачивается цессионарием цеденту путем перечисления денежных средств на банковский счет цедента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от любого из должников любой суммы во исполнение уступленного требования - в размере 50 % от полученной суммы.

В соответствии с пунктом 1.4 договора цессии уступленные права (требования) переходят к цессионарию в момент заключения настоящего договора.

Права (требования) цедента к должникам переходят к цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода прав (требований).

Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков поставки оборудования и выполнения шеф-монтажа и пуско-наладочных работ по договору №27/19 от 23.12.2019, а также возникших в связи с эти убытков, связанных с оплатой комиссии банку ввиду открытия безотзывного покрытого аккредитива и его неоднократного продления, истец направил в адрес ответчика претензионное письмо от 07.09.2021 №06 (л.д. 49-50) с требованием о погашении 316070 руб. 10 коп. неустойки по договору №27/19 от 23.12.2019 и возмещении убытков за перечисление комиссии по аккредитиву. 

Оставление данной претензии без ответа явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения дела истец отказался от требования в части взыскания 12 074 руб.10 коп. пени за период с 16.07.2020 по 30.12.2020 за нарушение срока выполнения шеф-монтажа. 

В части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено право истца до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает такой отказ в случае, если он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.

Поскольку из материалов дела не усматривается наличие обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд полагает возможным принять частичный отказ истца от искового заявления.

Пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что отказ от иска является основанием для прекращения производства по делу.

На основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по исковому заявлению в части взыскания 12 074 руб.10 коп. пени за период с 16.07.2020 по 30.12.2020 за нарушение срока выполнения шеф-монтажа подлежит прекращению.

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона; для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Из положений статьи 384 ГК РФ следует, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Условия договора уступки требования (цессии) от 10.05.2021 соответствуют требованиям главы 24 ГК РФ.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В статье 506 ГК РФ предусмотрено, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ). 

Согласно части 1 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 

На основании статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу части 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что сроки изготовления и поставки оборудования, шеф-монтажа и ПНР нарушены.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив представленные расчет неустойки, суд признает требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки оборудования по договору №27/19 от 23.12.2019 в размере 209902 руб. за период с 29.05.2020 по 26.06.2020, 27675 руб. убытков обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины суд в соответствии со статьей 110 АПК РФ взыскивает с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Юристы ВТК" 209`902 (Двести девять тысяч девятьсот два) руб. неустойки, 27`675 (Двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. убытков, 6`825 (Шесть тысяч восемьсот двадцать пять) руб. расходов по государственной пошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Юристы ВТК" из федерального бюджета 3`050 (Три тысячи пятьдесят) руб. государственную пошлину, излишне уплаченную платежным поручением №20619 от 20.12.2021.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

Н.В. Кисапова