Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-127076/23-14-997

г. Москва

25 октября 2023 года

Резолютивная часть объявлена 02 октября 2023 г.

Дата изготовления решения в полном объеме             25 октября 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. 

Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи 

рассмотрел дело по исковому заявлению АО "ГУОВ" (ОГРН 

<

***>) 

к ответчику ООО "ПС - ГРУПП" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 964 992,40 руб. 

в судебное заседание явились: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 27.07.2023г. 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 07.08.2023г.

УСТАНОВИЛ:

АО «ГУОВ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ПС-ГРУПП» о взыскании суммы задолженности (неосновательного обогащения) по договору от 12.04.2017 г. № 1617187375352554164000000/2017-1204/3.2 в размере 964 992,40 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты вынесения решения арбитражного суда по день поступления денежных средств от ответчика на счёт истца включительно.

В судебном заседании представитель истца огласил пояснения по иску, поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал по доводам истца, огласил отзыв на иск, просил в удовлетворении исковых требований отказать. 

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, считает, что заявленные требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

В обоснование заявленных требований истец указал, что между АО «ГУОВ» (правопреемник АО «ОСП») (заказчик) и ООО «ПС-Групп» (подрядчик) был заключен договор строительного подряда от 12.04.2017 г. № 1617187375352554164000000/2017-1204/3.2 (шифр объекта 500/ДЭС-43).

В соответствии с п. 1.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение № 1 к договору), проектной документацией, требованиями СНиП и других нормативно-правовых актов, собственными или привлеченными силами, в установленный договором срок, выполнить работы по объекту: Реконструкция стационарной дизельной электрической станции системы гарантийного электропитания войсковой части 14056, пл. 43». Шифр 500/ДЭС-43, а именно6 выполнение работ по изготовлению, поставке и монтажу металлоконструкций и стеновых сэндвич-панелей.

Общая стоимость работ по договору составляет 3 437 630,33 руб. (п. 2.1 договора).

В п. 4.1 договора стороны согласовали следующие сроки выполнения работ – начало работ – дата перечисления аванса, окончание работ – 3 недели с даты перечисления.

Истец ссылается, что работы, предусмотренные договором, подрядчиком в установленные сроки в полном объеме не выполнены и для приемки заказчику не переданы.

По мнению истца, подрядчиком допущено существенное нарушение условий договора.

Согласно п. 9.2 договора, заказчик в одностороннем внесудебном порядке имеет право отказаться от исполнения договора, направив подрядчику соответствующее уведомление, в случае существенного нарушения подрядчиком условий договора. Существенным условием, в том числе, является отставание от сроков, установленных договором на срок более чем 7 (семь) дней.

Истец отмечает, что во исполнение обязательств по договору заказчик перечислил подрядчику денежные средства в размере 2 725 382,75 руб., в том числе, НДС.

Полагает, что подрядчик выполнил, а заказчик принял работы на сумму 1 760 390,35 руб., в том числе, НДС.

Таким образом, по расчету истца, задолженность подрядчика перед заказчиком по договору составляет 964 992,40 руб., в том числе, НДС.

АО «ГУОВ» письмом от 19.06.2020 г. № исх-6465 уведомило подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора, потребовав вернуть сумму задолженности по договору.

Уведомление направлено 19.06.2020 г. по адресу его местонахождения, по состоянию на 06.06.2023 г. сумма задолженности/неосновательного обогащения в размере 964 992,40 руб. подрядчиком не возвращена в АО «ГУОВ».

Кроме того, истцом заявлено о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты вынесения решения арбитражного суда по день поступления денежных средств от ответчика на счёт истца включительно.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно ч. 3 ст. 1103 ГК РФ, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиком доказательств, подтверждающих возврат денежных средств, суду не представлено.

Согласно ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Не согласившись с заявленными требованиям ответчиком представлен отзыв, из которого следует, что помимо работ, признанных истцом на сумму 1 760 390,35 руб., работы по данному договору подрядчиком выполнены в полном объеме, представлялись заказчику для приемки, однако без уважительной причины частично им не приняты, но представлены для приёмки в составе завершенного объекта своему генеральному заказчику – Министерству обороны РФ.

Также, в обоснование своей позиции ответчик ссылается на то, что, согласно акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14 от 26.10.2021 г. объект строительства введен в эксплуатацию.

Указания на иных лиц, кроме ответчика, которые бы выполняли монтаж металлоконструкций, данный акт не содержит.

Кроме того, с момента подписания акта ввода в эксплуатацию от 26.10.2021 г. до обращения с данным иском в суд, никаких претензий со стороны АО «ГУОВ» в адрес ответчика по спорному договору заявлено не было.

При вышеуказанных обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения требования о взыскании 964 992,40 руб. неосновательного обогащения.

Что касается требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами начисленных по ст. 395 ГК РФ, то оно также удовлетворению не подлежит, поскольку в удовлетворении требования о взыскании неосновательного обогащения отказано, тогда как проценты начисляются на вышеуказанную сумму.

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований отказано, то судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья: О.В. Лихачева