Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о назначении судебного заседания

Дело № А73-12439/2024

г. Хабаровск

19 декабря 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,

ознакомившись с ходатайством некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о наложении судебного штрафа и замене экспертной организации по делу № А73-12439/2024

по иску некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680030, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Строй-ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, г. Хабаровск,

ул. Синельникова, д. 20, оф. 301)

об обязании устранить недостатки выполненных работ,

У С Т А Н О В И Л :

Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее – Фонд) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс Строй-ДВ» (далее – ООО «Комплекс Строй-ДВ») о возложении обязанности в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу устранить недостатки выполненных работ по договору от 15.06.2020 № 202250000012000082 при проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома, расположенной по адресу: 

<

...>, а именно:

1.1.Произвести демонтаж покрытия из оцинкованного профилированного листа НС 21, толщ. 0,5 мм в объеме 593,84 м2.

1.2.Демонтаж металлических элементов (конек, примыкания к вентиляционным шахтам, слуховым окнам, ендовы, карнизная планка) из стали оцинкованной с полимерным покрытием 0,5 мм в объеме 115,60 м2.

1.3.Произвести демонтаж металлических фартуков с полимерным покрытием, толщ. 0,5 мм к вентшахтам в объеме 25 м2.

1.4.Произвести демонтаж металлических фартуков с полимерным покрытием, толщ. 0,5 мм к слуховым окнам в объеме 9,85 м2.

1.5.Произвести демонтаж стропильных ног, диагональных ног, подкосов, подкосов прогонов в объеме 0,56 м3.

1.6.Произвести демонтаж кобылок, брусок 50*70 мм в объеме 0,256 м3.

1.7.Произвести демонтаж мауэрлата, брус 150*150 в объеме 0,045 м3.

1.8.Произвести демонтаж разряженной обрешетки, доска 150*25 в объеме 463,15 м2.

1.9.Произвести демонтаж сплошной обрешетки, доска 150*50 в объеме 150,09 м2.

1.10.Произвести демонтаж контробрешетки, брус 50*50 в объеме 1,828 м3.

1.11.Произвести демонтаж ветроизоляционной мембраны, марки Ондутис А100 в объеме 593,84 м2.

1.12.Произвести демонтаж зонтов и креплений к ним количестве 6 штук.

1.13.Произвести демонтаж стремянки выхода на кровлю количестве 2 штук.

1.14.Произвести демонтаж обшивки вентиляционных шахт из профилированного листа НС 21 толщ. 0,5 в объеме 70,14 м2.

1.15.Произвести демонтаж облицовки вентиляционных шахт (углов) в объеме 17,38 м2.

1.16.Произвести демонтаж деревянного каркаса в объеме 0,497 м3.

1.17.Произвести демонтаж облицовки слуховых окон в объеме 11,348 м2.

1.18.Произвести демонтаж устройства проходки из ЭПДМ резины в количестве 8 штук.

1.19.Произвести демонтаж кровельного ограждения в объеме 83.32 п.м.

1.20.Произвести работы устройству гидроизоляции по сплошной обрешетке по карнизу в соответствии с Рабочей документацией, в объеме 102,94 м2.

1.21.Произвести работы по замене гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой в соответствии рабочей документацией, СП 64.13330.2017, СП 452.1325800.2019, в объеме 0,30 м.

1.22.Произвести работы по замене ветровлагозащитной мембраны с соблюдением технологии производства работ по монтажу данного материала в соответствии с рабочей документацией, ГОСТ Р 58739-2019.

СП 17.1330.2017, в объеме 593,84 м2.

1.23.Произвести смену зонтов над вентшахтами, в соответствии с проектной документацией и обшивке вентшахт оцинкованной сталью толщ. 0,5 мм в соответствии с рабочей документацией в количестве 8 штук.

1.24.Произвести работы по обшивке слуховых окон оцинкованной сталью толщ. 0,5 мм в соответствии с рабочей документацией в количестве 2 штук.

1.25.Стремянку выхода на кровлю выполнить в соответствии с рабочей документацией в количестве 2 штук.

1.26.Кровельное ограждение выполнить в соответствии с рабочей документацией, огрунтовку и окраску произвести с соблюдением технологии производства работ, в объеме 83,32 п.м.

1.27.Крепление стропильных ног выполнить в соответствии с рабочей документацией в объеме 0,56 м3.

1.28.Произвести смену кобылок, сечение кобылок должно соответствовать рабочей документации в количестве 61 штуки.

1.29.Произвести вывод двух вентиляционных шахт, расположенных по вальмам, за пределы чердачного помещения в соответствии рабочей документации.

1.30.Произвести монтаж стропильных ног, диагональных ног, подкосов, подкосов прогонов в объеме 0,56 м3.

1.31.Произвести монтаж кобылок, доска 50*100 мм в объеме 0,305 м3.

1.32.Произвести монтаж мауэрлатного бруса 150*150, L=2000M в объеме 0,045 м3.

1.33.Произвести монтаж контробрешетки, брус 50*50 мм в объеме 1,828 м3.

1.34.Произвести монтаж разряженной обрешетки, доска 150*50 мм в объеме 463,152 м2.

1.35.Произвести монтаж сплошной обрешетки, доска 150*50 мм в объеме 150,094 м2.

1.36.Произвести устройство гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой, из рубероида в объеме 0,3 м2.

1.37.Произвести устройство гидроизоляции по карнизному свесу и накосным ногам, из рубероида в объеме 102,94 м2.

1.38.Произвести монтаж покрытия из оцинкованного профилированного листа НС 21, толщ. 0,5 в объеме 593,84 м2.

1.39.Произвести устройство гидроветрозащитной мембраны «Изоспан А» в объеме 593,84 м2.

1.40.Произвести монтаж металлических элементов (конек, примыкания к вентиляционным шахтам, слуховым окнам, ендовы, карнизная планка) из стали оцинкованной с полимерным покрытием 0,5 мм в объеме 115,60 м2.

1.41.Произвести устройство кирпичной кладки 2х вентиляционных шахт в объеме 1,76 м3.

1.42.Произвести устройство деревянного каркаса 2х вентиляционных шахт, брусок 50*50 в объеме 1,28 м3.

1.43.Произвести облицовку вентиляционных шахт от уровня пола чердачного помещения, сталью листовой с полимерным покрытием толщ. 0,5 мм в объеме 167,62 м2.

1.44.Произвести монтаж фартуков из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,5 мм к вентиляционным шахтам в объеме 33,28 м2.

1.45.Произвести монтаж фартуков из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,5 мм к слуховым окнам в объеме 9,85 м2.

1.46.Произвести монтаж облицовки вентиляционных шахт (углов) в объеме 46,34 м2.

1.47.Произвести облицовку слуховых окон в объеме 11,35 м2.

1.48.Произвести монтаж зонтов из оцинкованной стали толщ. 0,7 и креплений к ним в количестве 8 штук.

1.49.Произвести устройство стремянки выхода на крышу в соответствии с проектной документацией, доска 50*200, брусок 50*50 в объеме 0,19 м3.

1.50.Произвести монтаж кровельного ограждения в соответствии с требованиями проектной документации в объеме 83,32 п.м.

1.51.Произвести устройство проходки из ЭПДМ резины в количестве 8 штук.

1.52.Произвести огнебиозащитную обработку древесины составом «Пирилакс» в объеме 1109,72 м2.

Определением суда от 19.07.2024 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

Определением суда от 06.11.2024 в рамках настоящего спора назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено ФИО1 (ИНН 

<

***>), в связи с чем, производство по делу приостановлено.

Определением суда от 06.03.2025 назначено к рассмотрению ходатайство истца о наложении на эксперта судебного штрафа за нарушение срока проведения экспертизы и о его замене.

21.03.2025 от экспертной организации поступило ходатайство о продлении срока производства экспертизы до 30.04.2025.

Определением суда от 27.03.2025 в удовлетворении ходатайства некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о наложении судебного штрафа и замене экспертной организации по делу № А73-12439/2024 отказано.

Ходатайство ФИО1 удовлетворено, продлен срок проведения экспертизы по делу до 30.04.2025.

Определением суда от 26.06.2025 назначено к рассмотрению ходатайство истца о наложении на эксперта судебного штрафа за нарушение срока проведения экспертизы и о его замене.

21.07.2025 от экспертной организации поступило ходатайство о продлении срока производства экспертизы до 01.09.2025.

Определением суда от 30.07.2025 в удовлетворении ходатайства некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о наложении судебного штрафа и замене экспертной организации по делу № А73-12439/2024 отказано.

Ходатайство ФИО1 удовлетворено, продлен срок проведения экспертизы по делу до 01.09.2025.

18.12.2025 некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» обратилась в арбитражный суд с ходатайством о наложении штрафа на эксперта ФИО1 за невыполнение требований

арбитражного суда о предоставлении заключения эксперта в суд в срок, установленный в определении от 30.07.2025, замене эксперта ФИО1 и поручении проведения строительно-технической экспертизы АНО «Амурская комплексная судебная экспертиза», экспертам ФИО2, ФИО3 (адрес: 681032, 

<

...>; электронная почта: strehaas@list.ru, 8-909-828-11-87), либо поручить проведение экспертизы ИП ФИО4 (адрес: 

<

...>, электронная почта: zilberv@indox.ru, тел 8-924-105-24-07).

Руководствуясь статьями 55, 120, 184 – 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Рассмотрение ходатайства некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о наложении штрафа и замене экспертной организации по делу № А73-12439/2024 в судебном заседании назначить

на «29» января 2026 года в 09 часов 10 минут в помещении суда по адресу: 

<

...>, зал № 202, 2 этаж.

2. Сторонам, эксперту представить в письменном виде пояснения по заявленному ходатайству.

Адрес для корреспонденции: 680030, 

<

...>, телефон: 

<

***>, факс: 

<

***>. Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис «Мой арбитр» по адресу https://my.arbitr.ru/.

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.

Помощник судьи Могильников Максим Всеволодович, тел. 

<

***>.

Судья К.А. Полегкий