44/2018-151524(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  13 декабря 2018 года А46-16700/2018  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной Л.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление автономного учреждения Омской  области «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского  района» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Энергостройкомплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании устранить недостатки работ  

при участии в заседании суда:  

от истца – ФИО2 по доверенности от 21.06.2018 № 50 сроком по 31.12.2018  (личность удостоверена паспортом); ФИО3 по доверенности от 19.11.2018 № 56  сроком по 31.12.2018 (личность удостоверена паспортом);  

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 05.12.2018 б/н сроком на один год  (личность удостоверена паспортом).  

РЕШИЛ:

Исковые требования автономного учреждения Омской области «Комплексный центр  социального обслуживания населения Исилькульского района» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до 01.05.2019 года устранить своими силами и  средствами следующие дефекты и недостатки работ по договору подряда от 07.08.2013 г. №  2013.126463:  

- Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой в объеме 335,7 м2;  

- Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной  мастике в один слой в объеме 335,7 м2;  

- Утепление покрытий: керамзитом в объеме 26,01675; 

- Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм в объеме  335,7 м2;  

- Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм. изменения толщины добавлять  или исключать к норме 12-01-017-01 в объеме 335,7 м2;  

- Армирование подстилающих слоев и набетонок в объеме 1,138023 м2; 

- Комплекс работ по направляемым рулонным материалам в два слоя для зданий  шириной от 12 до 24 метров в объеме 335,7 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергостройкомплекс» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу автономного учреждения Омской области  «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной  пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и может  быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Л.Н. Распутина