Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-36076/2022

27 июня 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения изготовлена 07.06.2022

Мотивированное решение изготовлено 27.06.2022

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

общества с ограниченной ответственностью "СК ТЕКТОНИКА" (ОГРН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО " (ОГРН: 

<

***>)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СК ТЕКТОНИКА" (далее - ООО "СК ТЕКТОНИКА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО " (далее – ООО "СТС") о взыскании 372863,47 руб. задолженности по договору от 19.03.2020 № 19-03/2020 (далее – Договор).

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определение от 12.04.2022 о принятии искового заявления к производству направлено сторонам по адресам, указанным в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (РПО № 190854471406399 и 19085471406405) 

Решением в виде резолютивной части от 07.06.2022 с ООО "СТС" взыскано в пользу ООО "СК ТЕКТОНИКА" 335363,47 руб. задолженности, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

ООО "СТС" подало апелляционную жалобу на решение, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между ООО "СК ТЕКТОНИКА" (исполнителем)  и ООО "СТС" (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами и средствами в установленный Договором срок выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству и реконструкции сетей канализации по Петровскому острову с переключением выпусков», (далее-Объект), получить все необходимые согласования и положительное заключение геолого-геодезической службы комитета по архитектуре и градостроительству Санкт-Петербурга (далее - ГГС КГА СПб) (далее - «Работы»), а Заказчик обязуется принять готовый результат Работ и оплатить за него установленную Договором цену.

По п. 2.1. Договора стоимость Работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с п. 1.1. Договора, определяется Сводной Сметой на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (Приложение №2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет 3145726,53 руб. 

Согласно п. 2.2. Договора окончательная стоимость работ определяется по фактически выполненным объёмам работ на основании исполнительной сметы, согласованной в ГУП «Водоканал СПб» и утверждённой в ООО «СТС», но не может быть больше цены, установленной в пункте 2.1. Договора.

В силу п. 3.2. Договора сроки выполнения Работ по Договору: 60 рабочих дней с даты перечисления авансового платежа согласно п.4.1.1. Договора и передачи плана трассы объекта М 1:500 п. 6.1.2. Договора.

В соответствии с п. 4.1.1. Договора в течение 3 (трех) банковских дней, с даты подписания Сторонами настоящего Договора, на основании выставленного счета на аванс, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю первый аванс в размере 25% от стоимости Работ согласно п. 2.1. Договора, что составляет 786431,53 руб.

По п. 4.1.2. Договора второй аванс в размере 25% от стоимости Работ согласно п. 2.1. Договора, что составляет 786431,53 руб. Заказчик перечисляет Исполнителю через 14 календарных дней после перечисления первого авансового платежа.

Согласно пункту 4.1.3. Договора окончательный расчёт за выполненные Исполнителем в полном объеме и принятыми Заказчиком Работы в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Работ согласно п. 2.1. Договора Заказчик перечисляет в течение 35 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ с приложением документации согласно п. 4.2. Договора посредством перечисления по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя, указанному в Договоре.

В силу пункта 4.2. Договора основанием для оплаты выполненных Исполнителем Работ является подписанный уполномоченными представителями Сторон Акт сдачи-приемки выполненных Работ, с приложением к нему оформленных надлежащим образом результатов инженерных изысканий согласно пунктам 14, 16 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и предоставлением счёта на оплату. 

Стороны Договора подписали акт сдачи-приемки выполненных работ от 27.04.2021 № 1 на сумму 3 145 726,53 руб.  

ООО "СК ТЕКТОНИКА" направило ООО "СТС" претензию от 28.01.2022 с требованием оплаты задолженности. 

Отказ ООО "СТС" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "СК ТЕКТОНИКА" в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу абзацев 1 – 4 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии с абзацами 1 – 2 ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

По п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства суд не установил, исходя из следующего.

Факт сдачи-приемки работ по Договору стоимостью 3145726,53 руб.  подтверждается подписанным заказчиком без возражений по объему и качеству работ актом сдачи-приемки выполненных работ от 27.04.2021 № 1.

Ответчик считает, что работы по Договору не выполнены, поскольку Исполнителем в нарушение условий п. 1.1. Договора и п.п. 16 и 17 Технического задания не получены все необходимые согласования и положительное заключение ГГС КГА СПб. 

Кроме того, заказчик ссылается на то, что Исполнитель нарушил сроки окончания выполнения работ на 215 дней.

Поскольку ООО "СТС" представило оплату работ на общую сумму 2810363,06 руб. по платежным поручениям от 08.02.2022 № 482, от 15.10.2021 № 3500, от 30.06.2021 № 1856, от 27.05.2021 № 1303, от 21.07.2020 № 1563, от 26.06.2020 № 1326, по расчету суда задолженность составила 335363,47 руб.

Исходя из пунктов 4.1.3 и 4.2 договора основанием окончательного расчета за выполненные исполнителем и принятые заказчиком работы являются подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему оформленных надлежащим образом результатов инженерных изысканий согласно пунктам 14 и 16 Технического задания.

Как установлено в пункте 4.4 договора работы, выполненные исполнителем с отклонениями от требований Технического задания и условий договора, не подлежат приемке заказчиком.  

Между тем в пункте 2 акта от 27.04.2021 № 1 заказчик подтвердил, что работы выполнены качественно, в полном объеме, в соответствии с требованиями Технического задания и договора, и в надлежащем порядке оформлены. Претензий к результату работ со стороны заказчика нет. Стоимость выполненных работ составляет 3 145 726,53 руб.

При этом условиями договора и Технического задания не возложена на исполнителя обязанность по проведению государственной экспертизы. Доказательств выдачи исполнителю соответствующей доверенности ответчик не представил.

Встречный иск по встречным требованиям ООО "СТС" не заявило.

На основании изложенного, суд отказывает ответчику в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, удовлетворяет исковые требования в размере 335363,47 руб., в удовлетворении остальной части иска отказывает.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

в удовлетворении ходатайства о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО " отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОННЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО " в пользу общества с ограниченной ответственностью "СК ТЕКТОНИКА" 335363,47 руб. задолженности, 9405 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СК ТЕКТОНИКА" из федерального бюджета 0,27 руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 30.03.2022 № 155. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.