АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28,  

тел. 460-903, Факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

город Южно-Сахалинск 

«13» августа 2020 года Дело № А59-1463/2020 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Ким С.И., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Костык А.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской  области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 693010, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Альтаирпроект» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес регистрации: 680011, 

<

...>),  

третье лицо – общество с ограниченной ответственностью «Трак-Сервис»,  о понуждении безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в  период гарантийного срока, в рамках контракта № 0361200015017004703 от  01.09.2017 и о взыскании судебной неустойки,  

 Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Альтаирпроект»  (ИНН

<

***>, ОГРН

<

***>) в течение двух месяцев с момента  вступления решения суда по настоящему делу в законную силу  безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные в период  гарантийного срока:  

 - внести в комплект Ве4703/010917-В-Эм отсутствующие и  необходимые решения по электроподключению вытяжной системы В9;  

 - внести изменения в комплект Ве4703/010917-В-Эм ЛСР 02-01-03  (система В3), учесть 2 шкафа управления установками с резервными  вентиляторами;  

 - внести в архитектурно-строительное решение Ве4703/010917-В-АС  изменения по обходу существующих балок перекрытия, (высота  подвесного потолка на отметке +2,400 м. указана неверно, не  соответствует фактическому значению. В графических изображениях не  отображены существующие балки перекрытия);  

 - внести изменения в архитектурное решение Ве4703/010917-В-АС и  Ве4703/010917-В-ОВ (лист 6) в помещениях № 28 и № 29, которые смогут  предусмотреть техническую возможность установки подвесного потолка;  

 - внести изменения в разделы Ве4703/010917-В-АС и Ве4703/010917- В-Эм, которые предусматривают монтаж новой системы освещения по  смонтированным подвесным потолкам;  

 - внести изменения в раздел пожарная сигнализация и  Ве4703/010917-В-СМ, которые учтут нужное количество оборудования  для монтажа пожарной сигнализации;  

 - внести изменения в раздел Ве4703/010917-В-АС и разработать  решение по обустройству шахт на чердаке для врезки воздуховодов;  

 - внести изменения в раздел Ве4703/010917-В-АС и разработать  решение по обеспечению доступа к вентиляционным установкам.  

 В случае не устранения недостатков выполненных работ в  указанный срок, взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Альтаирпроект» (ИНН

<

***>, ОГРН

<

***>) в пользу  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской  области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку начиная со дня,  следующего за истечением 60 дневного срока для исполнения судебного  акта в размере 5 000 руб. в день за первые 30 календарных дней и в  размере 10 000 руб. за каждый день просрочки до даты фактического  исполнения, но не более цены контракта.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Альтаирпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской  области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 6 000 (Шесть тысяч) руб.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном  объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.И. Ким