12/2017-37649(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-2578/2017

г. Петрозаводск

04 июля 2017 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. 

2. Внести изменения в договор аренды лесного участка от 18.12.07, условный  номер 20 (запись о государственной регистрации 10-10-04/008/2007-556),  заключенный между Министерством по природопользованию и экологии  Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью  «Лесная даль», изложив приложение № 6 к договору «Объёмы и сроки  исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и  лесоразведению на лесном участке, переданном в аренду ООО «Лесная  даль», в 2017 году» в следующей редакции:  

- Устройство противопожарных мин. полос и(или) противопожарных  разрывов – 2 км – по 20 июня 2017 года;  

- Уход за минерализованными полосами и(или) противопожарными  разрывами – 4 км – по 20 июня 2017 года;  

- Установка информационных противопожарных аншлагов с ежегодным  подновлением – 1 штука – до 20 июня 2017 года;  

- Ремонт дорог противопожарного назначения (реконструкция) – 0,6 км – до  1 октября 2017 года;  

- Строительство дорог противопожарного назначения – 1 км – до 1 октября  2017 года;  

- Строительство подъездов к водоемам с обустройством специальных  площадок для забора воды – 0,25 км – до 1 октября 2017 года;  

- Посадка лесных культур – 9,2 га – по 20 июня 2017 года;  

 Внести изменения в договор аренды лесного участка от 18.12.07, условный  номер 21 (запись о государственной регистрации 10-10-04/008/2007-557),  заключенный между Министерством по природопользованию и экологии  Республики Карелия и обществом с ограниченной ответственностью  «Лесная даль», изложив приложение № 6 к договору «Объёмы и сроки  исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и  

лесоразведению на лесном участке, переданном в аренду ООО «Лесная  даль», в 2017 году» в следующей редакции:  

- Устройство противопожарных мин. полос и(или) противопожарных  разрывов – 5,3 км – по 20 июня 2017 года;  

- Уход за минерализованными полосами и(или) противопожарными  разрывами – 10,8 км – по 20 июня 2017 года;  

- Установка информационных противопожарных аншлагов с ежегодным  подновлением – 1 штука – до 20 июня 2017 года;  

- Строительство подъездов к водоемам с обустройством специальных  площадок для забора воды – 0,03 км – до 1 октября 2017 года;  

- Обработка почвы под лесные культуры будущего года – 15 га – до 1  октября 2017 года;  

- Посадка лесных культур – 9,2 га – по 20 июня 2017 года; - Дополнение лесных культур – 17,9 га – по 15 сентября 2017 года; 

- Содействие естественному лесовосстановлению – 12 га – до 1 октября 2017  года.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лесная даль" (ИНН:  

<

***>) в бюджет Российской Федерации 12 000 руб. госпошлины.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Шалапаева И.В.