АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-12339/22  20.10.2022 г.  

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Липатовой Ю.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"  (665393, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗИМА ГОРОД, АНГАРСКАЯ УЛИЦА, 6, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2012, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТА" (664007,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ГОРНАЯ 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2014, ИНН: 

<

***>)  

об обязании исполнить гарантийные обязательства 

руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНТА» в  течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу за счет собственных  средств исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от  30.06.2020 № 3381401761920000001 по объекту: здание МБУК «Историко-краеведческий  музей» по адресу: 

<

...>, а именно:  

I - фасад 1) Снятие отслоившейся штукатурки стен фасадов - 341,54 м2; 

2) Обеспыливание поверхности стен фасадов - 341,54 м2;  

3) Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения - 341,54 м2;  

4) Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором - 341,54 м2;  5) Снятие отслоившейся штукатурки оконных и дверных откосов - 6,68 м2;  

6) Обеспыливание поверхности оконных и дверных откосов - 6,68 м2; 7) Обработка поверхности оконных и дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения -6,68 м2; 8) Штукатурка оконных и дверных откосов - 6,68 м2; 

9) Окраска оконных и дверных откосов кремнеогрганическая - 6,68 м2;  10) Окраска поверхности фасадов с подготовкой поверхности кремнеорганическая -  

269,32 м2; 

11) Снятие отслоившейся керамогранитной плитки с клеевым раствором цоколя - 78,9 м2;  12) Обеспыливание поверхности цоколя фасада - 78,9 м2;  

13) Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения -78,9 м2;  14) Облицовка цоколя керамогранитными плитками - 78,9 м2  

II - крыльцо главного входа в осях 2-3 

1) Снятие отслоившейся керамогранитной плитки с клеевым раствором -63 м2;  2) Обеспыливание поверхности цоколя фасада - 63 м2;  

3) Обработка поверхностей крыльца грунтовкой бетоноконтакт -63 м2;  4) Облицовка поверхностей крыльца керамогранитными плитками - 63 м2  

 III - кровля в осях 4-6 (примыкание к парапету в районе границы жилого дома)  

1) Демонтаж фартуков из оцинкованной стали примыканий кровли - 6 м2;  2) Разборка примыканий кровли из наплавляемых материалов «Техноэлоаст» - 22 м.п.;  

3) Разборка выравнивающих стяжек из цементного раствора примыканий - 15 м2;  4) Устройство выравнивающих стяжек из цементного раствора примыканий - 15 м2;  

5) Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов «Техноэлоаст» - 22 м.п.;  

6) Установка фартуков из оцинкованной стали примыканий кровли - 6 м2;  7) Герметизация стыков фартуков герметиками - 19 м.п.  

IV- подвальные помещения  Помещения 1, 2, 4,,5, 6, 11:  1) Очистка отслоившейся краски со стен - 34 м2;  

2) Обработка стен грунтовками глубокого проникновения - 34 м2; 

3) Окраска стен водоэмульсионной краской 34 м2 

V- первый этаж  

Помещение 11: 1) Замена входной уличной металлической двери ДГ21-10 - 1 шт.; 2) Снятие штукатурки, огрунтовка поверхности, восстановление штукатурки цементным раствором - 2,5 м2; 3) Выполнение окрасочных отделочных работ - 2,5 м2 Помещение 14: 1) Устранение промерзания оконных блоков, выполнение регулировки створок, замена уплотнительных резинок – 4 окна. 

 Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНТА»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

 Судья Ю.В. Липатова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 20.04.2022 7:18:00

 Кому выдана Липатова Юлия Валерьевна