Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-154342/2018

20 февраля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  08 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  20 февраля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью  "Корпорация Р-Индустрия" (адрес:  Россия 197342, 

<

...>, корп/лит 1/А, пом/ком 27-Н/2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.04.2008, ИНН: 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Темп" (адрес:  Россия 105082, 

<

...>, пом/эт/ком IV/3/3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2006, ИНН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 05.01.2019;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 23.01.2019;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью  "Корпорация Р-Индустрия" (далее – ООО "Корпорация Р-Индустрия") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточенным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, о взыскании с Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Темп" (далее – ООО "СК "Темп") 963 018 руб. 38 коп. задолженности по договору от 14.06.2011 № 17/11, 96 301 руб. 84 коп. пеней; 631 397 руб. 60 коп. задолженности по договору от 15.09.2011 № 20/11, 44 197 руб. 83 коп. пеней; 5 647 567 руб. 80 коп. задолженности по договору от   № 22/12, 564 756 руб. 78 коп. пеней.

Исходя из положений ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительной предмета спора, Акционерного общества "РЖДстрой. 

Арбитражный суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании в порядке ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ

В судебном заседании представитель ООО "Корпорация Р-Индустрия" исковые требования поддержала в полном объёме, представитель  ООО "СК "Темп" возражала против удовлетворения иска.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал исковые требования подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,  между ООО «ПраймГрупп» (Подрядчик) и ПКС «Андреевский флаг» (Заказчик) были заключены:

- Договор субподряда № 17/11 от 14 июня 2011 года по объекту «Внедрение АСОКУПЭ на станции Зеленогорск Октябрьской ж.д.» (далее по тексту Договор Субподряда № 17/1 1);

- Договор подряда № 20/11 от 15.09.2011 г. на комплекс работ по объекту «Реконструкция вокзала Зеленогорск» (далее по тексту - Договор подряда № 20/11);

- Договор подряда № 22/12 от 01.02.2012 г. на комплекс работ по объекту «Реконструкция вокзала Зеленогорск». (далее по тексту - Договор подряда № 22/12. 

По Договору субподряда № 17/11 ООО «Корпорация Р-Индустрия» выполнило, а ООО «СК «Темп» приняло работы на общую сумму 19 260 367 руб. 69 коп., что подтверждается подписанными между сторонами Актами выполненных работ по форме КС-2, а также Справками о стоимости выполненных работ КС-3.

В соответствии с п. 8.4 Договора Субподряда № 17/11 оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится до 95% от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.

Акт № 1/ДПО-2015 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией был Утвержден Заместителем начальника Октябрьской железной дороги по строительству ФИО4 20.11.2015 года.

Таким образом, ООО «СК «Темп» должно было произвести выплату оставшихся 5% в срок не позднее 20.12.2015 года.

Однако в нарушение принятых на себя обязательств ООО «Строительная компания «Темп» до настоящего времени не оплатило выполненные ООО «Корпорация Р-Индустрия» работы по Договору субподряда № 17/11 в сумме 963 018 руб. 38 коп.

В соответствии с п. 12.3 Договора субподряда № 17/11 за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы Подрядчик выплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с 31 дня после подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

Сумма задолженности ООО «СК «Темп» перед ООО «Корпорация Р-Индустрия» по оплате выполненных по Договору субподряда № 17/11 работ на 30.11.2018 г. составляет 963 018 руб. 38 коп.

ООО «СК «Темп» сумму задолженности признает, о чем имеется подписанный между Сторонами Акт сверки взаимных расчетов от сентября 2016 года.

Период просрочки окончательного расчета с 21 декабря 2015 года по 30.11.2018 года составляет 1075 дня.

Сумма пени за 1075 дней составляет: 963 018,38 руб. х 0,01% х 1075 дн. = 103 524 руб. 48 коп. С учетом ограничений, установленных пунктом 12.3. Договора субподряда № 17/11 сумма пени за нарушение срока оплаты выполненных работ на дату составления иска составляет: 963 018,38 х 10% = 96 301 руб. 84 коп.

По Договору подряда № 20/11 ООО «Корпорация Р-Индустрия» выполнило, а ООО «СК «Темп» приняло работы на общую сумму 78 912 485 руб. 90 коп., что подтверждается подписанными между сторонами Актами выполненных работ по форме КС-2, а также Справками о стоимости выполненных работ КС-3.

В соответствии с п. 9.6 Договора подряда № 20/11 оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится до 95% от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.

Акт № 2/ДПО-2015 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией был Утвержден Заместителем начальника Октябрьской железной дороги по строительству ФИО5 31.12.2015 года.

Таким образом, ООО «СК «Темп» должно было произвести выплату оставшихся 5% в срок не позднее 30.01.2016 года. 

Однако в нарушение принятых на себя обязательств ООО «Строительная компания «Темп» своих обязательств по оплате выполненных ООО «Корпорация Р-Индустрия» работ по Договору подряда № 20/11 не выполнило.

Сумму задолженности в размере 5 631 397 руб. 60 коп. Ответчик признал путем подписания Акта сверки взаимных расчетов в сентябре 2016 года.

После подписания указанного Акта сверки ООО «СК «Темп» производило частичную оплату платежным поручением № 626 от 25.04.2017 года в сумме 3 000 000 руб. 00 коп. и платежным поручением № 725 от 24.05.2017 г. в сумме 2 000 000 руб. 00 коп. 

Таким образом, сумма задолженности ООО «СК «Темп» перед ООО «Корпорация Р-Индустрия» на 30.11.2018 года составляет 631 397 руб. 60 коп.

В соответствии с п. 13.3 Договора подряда № 20/11 за просрочку оплаты выполненной работы Субподрядчик вправе потребовать от Подрядчика выплатить пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 7% от просроченной суммы.

Период просрочки окончательного расчета с 31.01.2016 года 24.04.2017 года составил 449 дней.

Пени за 449 дней составили 5 631 397,60 х 0,1% х 449 дн. = 283 497 руб. 52 коп.

25 апреля 2017 года сумма долга уменьшилась на 3 000 000 руб. 00 коп. и составила 2 631 397 руб. 60 коп.

Период просрочки оплаты с 25.04.2017 года по 23.05.2017 года составил 28 дней. Пени за 28 дней составили: 2 631 397,60 руб. х 0,1% х 28 дней = 73 679 руб. 13 коп.

24.05.2017 года сумма долга уменьшилась на 200 000 руб. 00 коп. и составила 631 397 руб. 60 коп. 

Период просрочки оплаты с 24.05.2017 года по 30.11.2018 года составляет 555 дней. Пени за 555 дней составляют: 631 397,60 руб. х 0,1% х 555 дн. = 350 425 руб. 67 коп.

Общая сумма пени за нарушение срока оплаты выполненных работ составляет: 283 497,52 руб. + 73 679,13 руб. + 350 425,67 руб. =707 602 руб. 32 коп.

 С учетом ограничений, установленных пунктом 13.3 Договора подряда № 20/11 сумма пени за нарушение срока оплаты выполненных работ составляет: 631 397,60 руб. х 7% = 44 197 руб. 83 коп.

По Договору субподряда № 22/12 ООО «Корпорация Р-Индустрия» выполнило, а ООО «СК «Темп» приняло работы на общую сумму 140 887 225 руб. 24 коп., что подтверждается подписанными между сторонами Актами выполненных работ по форме КС-2, а также Справками о стоимости выполненных работ КС-3.

В соответствии с п. 3.1.15 Договора Субподряда № 22/12 оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится до 95% от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию.

Акт № 2/ДПО-2015 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией был Утвержден Заместителем начальника Октябрьской железной дороги по строительству ФИО4 31.12.2015 года.

Таким образом, ООО «СК «Темп» должно было произвести выплату оставшихся 5% в срок не позднее 30.01.2016 года.

Однако «ООО «СК «Темп» своих обязательств по оплате выполненных ООО «Корпорация Р-Индустрия» работ по Договору субподряда № 22/12 не выполнило.

Сумма задолженности ООО «CK «Темп» перед ООО «Корпорация Р-Индустрия» на 30.11.2018 года составляет 5 647 567 руб. 80 коп.

ООО «СК «Темп» сумму задолженности признает, о чем имеется подписанный между Сторонами Акт сверки взаимных расчетов от сентября 2016 года.

В соответствии с п. 7.3 Договора субподряда № 22/12 за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы Подрядчик выплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки ... но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

Период просрочки окончательного расчета с 31.01.2016 года по 30.11.2018 года составляет 1034 дня.

Сумма пени за нарушение срока оплаты выполненных работ за указанный период составляет: 5 647 567,80 руб. х 0,01% х 1034 дня = 583 958 руб. 51 коп.

С учетом ограничений, установленных пунктом 7.3 Договора подряда № 22/12 сумма пени за нарушение срока оплаты выполненных работ составляет: 5 647 567,80 руб х 10% = 564 756 руб. 78 коп.

26 сентября 2018 года ООО «Корпорация Р-Индустрия» в адрес ООО «СК «Темп» направило Претензию исх. №А/0002/0349 от 25.09.2018 г. с требованием об оплате задолженности в срок до 31 октября 2018 года.

В ответ на полученную Претензию ООО «СК «Темп» письмом исх. № 678 от 29 октября 2018 года отказалось от исполнения предъявленного требования.

ООО «Корпорация Р-Индустрия» выполнило свои обязательства по Договору Субподряда № 17/11, Договору подряда № 20/11 и Договору субподряда №22/12 в полном объеме.

Поскольку доказательств оплаты долга не представлено, иск на основании ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса РФ подлежит удовлетворению. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд признал исковые требования доказанными. 

Возражая против удовлетворения требований, ответчик сослался на наличие недостатков в выполненных  работах.

Вместе с тем доводы ответчика в указанной части не опровергают факт наступления срока для выплаты спорных сумм.  

Кроме того,  в соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.03.2012 N 12888/11, сам факт наличия некоторых недостатков в выполненных работах не может являться безусловным основанием для отказа заказчика от подписания актов и оплаты работ.

При наличии у него претензий или замечаний по качеству выполненных работ вправе, если иное не установлено законом или договором, заказчик по своему выбору требовать от подрядчика совершения определенных действий, предусмотренных статьей 723 ГК РФ, а именно: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Между тем, доказательств того, что ответчик обращался к истцу с требованиями, предусмотренными статьей 723 ГК РФ, материалы дела не содержат.

С учётом изложенного иск подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Темп" в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Корпорация Р-Индустрия" долг на общую сумму 7 241 983 руб. 78 коп., неустойку на общую сумму 705 256 руб. 45 коп., а также 62 736 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Коросташов А.А.