Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-1574/2025

г. Хабаровск

30 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 30 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Д.Л. Малашкина

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.А. Паликовым,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 682730, Хабаровский край, 

<

...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; адрес: 681034, 

<

...>)

об обязании выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 14.04.2022 № 0122300022922000002-1,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились,

от ответчика (в режиме онлайн-заседания) – ФИО1 представитель по доверенности от 14.04.2025,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края (далее – истец, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль» (далее – ответчик, ООО «Магистраль») об обязании выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 14.04.2022 № 0122300022922000002-1 путем восстановления асфальтового покрытия проезжей части дороги по улице Клубная поселка Хурмули Солнечного района Хабаровского края в следующих местах и размерах (согласно акту осмотра от 30.05.2024 года):

-   устранить разрушения проезжей части дороги вдоль парковочного кармана, напротив торгово-общественного центра, в виде углублений (ям) глубиной от 6 см до 9 см на площадях размерами 0,6м x 0,5м, 0,8м x 0,7м и 0,9м x 0,7м;

-   устранить вспучивание (подъем) и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги напротив дома № 20 по ул. Школьной на площадях размерами 0,9м x 0,6м и 0,9м x 1,3м;

- устранить вспучивание и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги в месте примыкания проезжей части дороги ул. Клубная к проезжей части дороги ул. Нагорная на площадях размерами 4,9м x 3,1м и 6,3м x 3,2м.

Определением суда от 06.02.2025 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу № А73-1574/2025, назначено предварительное судебное заседание на 03.03.2025 в 10 часов 40 минут.

Определением от 03.03.2025 дело назначено к судебному разбирательству на  17.04.2025 в 10 часов 40 минут.

Истец в судебное заседание явку своего представителя не обеспечил, извещен о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании в соответствии с правилами статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе путем размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие истца.

Судебное заседание проведено с использованием системы веб-конференции информационного сервиса «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) в целях участия представителя ответчика в судебном заседании.

В судебном заседании представитель ответчика поддержала доводы отзыва на исковое заявление, просила установить срок для устранения недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту от 14.04.2022 №0122300022922000002-1 не позднее 30.06. 2025, исходя из климатических особенностей места расположения объекта.

Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Между Администрацией Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края (заказчик) и  ООО «Магистраль» (подрядчик) 14.04.2022 заключен муниципальный контракт №0122300022922000002-1, по которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту дороги и парковочного кармана ул. Клубная, пос. Хурмули в соответствии с техническим заданием (приложение к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, в сроки, установленные в настоящем контракте, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке  и на условиях, предусмотренных контрактом.

Пунктом 2.1 контракта определено, что  цена контракта составляет 8 212 224 руб. 00 коп.

Срок выполнения (завершения) работ установлен в пункте 5.1 контракта: с момента заключения контракта до 01.09.2022.

Согласно пункту 7.1 контракта подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ условиям контракта. Гарантийный срок для результата работ и используемые материалы составляет 3 года с  даты подписания сторонами  документа о приемке, подписанного с использованием единой информационной системы. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющие результата работ.

Если в период гарантийной эксплуатации  объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных работ, использования материалов ненадлежащего качества, то подрядчик обязан устранить их  своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации объекта/результата выполненных работ в этом случае продлевается соответственно на период  устранения недостатков (дефектов) (пункт 7.3 контракта).

Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом,  а в случае неявки подрядчика – односторонним (пункт 7.4 контракта).

Работы по контракту ответчиком выполнены и приняты заказчиком по акту приема-передачи выполненных работ от 06.09.2022 № 29.

В период гарантийного срока в мае 2023 были обнаружены разрушения асфальтового покрытия, а также водопропускных лотков, а именно: 

- ул. Клубная, пос. Хурмули: разрушения проезжей части дороги вдоль парковочного кармана, напротив торгово-общественного центра, в виде углублений (ям) глубиной от 6 см до 9 см на площадях размерами 0,6м x 0,5м, 0,8м x 0,7м и 0,9м x 0,7м;

-   ул. Клубная, пос. Хурмули: вспучивание (подъем) и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги напротив дома № 20 по ул. Школьной на площадях размерами 0,9м x 0,6м и 0,9м x 1,3м;

- ул. Клубная, пос. Хурмули: вспучивание и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги в месте примыкания проезжей части дороги ул. Клубная к проезжей части дороги ул. Нагорная на площадях размерами 4,9м x 3,1м и 6,3м x 3,2м.

Письмом от 17.05.2023 исх. №232/5-39 заказчик предлагал подрядчику направить своего представителя 19.05.2023 в 10 часов 00 минут для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.

По причине неявки представителя подрядчика в указанное в уведомлении время, заказчик письмом от 22.05.2023 исх. № 243/5-39 повторно уведомил подрядчика о необходимости явки представителя 29.05.2023 в 10 часов 00 минут для участия в осмотре выявленных дефектов и составлении акта.

Представитель подрядчика прибыл в п. Хурмули для осмотра дефектов только в сентябре 2023 года. Заказчиком был оформлен акт осмотра дороги, в котором отражены выявленные дефекты. Данный акт направлен заказчиком 19.09.2023 в адрес подрядчика для подписания.

Подрядчик подписанный акт не возвратил.

Уведомлением от 17.04.2024 исх. № 250/5-22 заказчик в очередной раз сообщил подрядчику о необходимости направления последним своего представителя 23.04.2024 в 10 часов 00 минут для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.

От подрядчика ответ на данное уведомление не поступил.

Письмом от 14.05.2024 исх. № 302/5-22 истец вновь уведомил ответчика о необходимости направления представителя 23.05.2024 в 11 часов 00 минут для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.

Однако, ответчик, получив уведомление истца, своего представителя для участия в осмотре и составлении акта не направил.

В связи с неявкой представителя подрядчика, заказчик 30.05.2024 составил односторонний акт осмотра состояния и качества ремонта дороги, в котором зафиксировал имеющиеся недостатки (дефекты).

Претензией от 10.06.2024, направленной в адрес ответчика, истец требовал устранить выявленные недостатки.

ООО «Магистраль» претензию оставило без удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения Администрации Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства и оценив их по правилам статьи 71 АПК РФ, считает исковые требования  подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Правоотношения сторон по муниципальному контракту от 14.04.2022 №0122300022922000002-1 регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.        

В силу пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

На основании пункта 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 722 ГК РФ гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Пунктами 1, 2 статьи 755 ГК РФ установлено, что подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. По общему правилу подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если только не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

Данные нормы регулируют обязательства сторон по качеству исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда.     

Последствия выполнения работ с недостатками установлены в статье 723 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 724 ГК РФ установлено, что заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Бремя доказывания наличия обстоятельств, исключающих ответственность подрядчика за недостатки результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, лежит на подрядчике.

Как следует из материалов дела, выполненные ответчиком работы по контракту, приняты истцом, что подтверждается актом приема-передачи выполненных работ от 06.09.2022 № 29.                                                                                                                             В пункте 7.1 контракта установлен гарантийный срок  на выполненные работы, который составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.                                                                                                                             В пределах гарантийного срока истцом - заказчиком выявлены недостатки качества выполненных подрядчиком работ, что подтверждается актом о выявлении дефектов от 30.05.2024.

В акте от 30.05.2024 зафиксированы следующие недостатки (дефекты):

- ул. Клубная, пос. Хурмули: разрушения проезжей части дороги вдоль парковочного кармана, напротив торгово-общественного центра, в виде углублений (ям) глубиной от 6 см до 9 см на площадях размерами 0,6м x 0,5м, 0,8м x 0,7м и 0,9м x 0,7м;

-   ул. Клубная, пос. Хурмули: вспучивание (подъем) и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги напротив дома № 20 по ул. Школьной на площадях размерами 0,9м x 0,6м и 0,9м x 1,3м;

- ул. Клубная, пос. Хурмули: вспучивание и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги в месте примыкания проезжей части дороги ул. Клубная к проезжей части дороги ул. Нагорная на площадях размерами 4,9м x 3,1м и 6,3м x 3,2м.

Пунктом 7.3 контракта предусмотрено, что если в период гарантийной эксплуатации  объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных работ, использования материалов ненадлежащего качества, то подрядчик обязан устранить их  своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации объекта/результата выполненных работ в этом случае продлевается соответственно на период  устранения недостатков (дефектов).                     Наличие недостатков результата работ, выполненных ответчиком, истцом доказано, недостатки выявлены и требование об их устранении предъявлено в пределах гарантийного срока.

В силу приведенных условий контракта и норм права ответчик обязан устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки, либо доказать, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.                        Таких доказательств ответчик суду не представил, ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы не заявил.                                                                                Поскольку за выявленные недостатки ответственен подрядчик, он обязан в рамках гарантийных обязательств по контракту от 14.04.2022 № 0122300022922000002-1 устранить выявленные недостатки, факт наличия которых установлен в ходе судебного разбирательства.                                                                                                                                 На основании изложенного исковые требования Администрации Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края об обязании ответчика выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 14.04.2022 № 0122300022922000002-1 подлежат удовлетворению, ответчика следует обязать восстановить асфальтовое покрытие проезжей части дороги по улице Клубная поселка Хурмули Солнечного района Хабаровского края в следующих местах и размерах (согласно акту осмотра от 30.05.2024 года):

-   устранить разрушения проезжей части дороги вдоль парковочного кармана, напротив торгово-общественного центра, в виде углублений (ям) глубиной от 6 см до 9 см на площадях размерами 0,6м x 0,5м, 0,8м x 0,7м и 0,9м x 0,7м;

-   устранить вспучивание (подъем) и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги напротив дома № 20 по ул. Школьной на площадях размерами 0,9м x 0,6м и 0,9м x 1,3м;

- устранить вспучивание и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги в месте примыкания проезжей части дороги ул. Клубная к проезжей части дороги ул. Нагорная на площадях размерами 4,9м x 3,1м и 6,3м x 3,2м.

Согласно части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Срок для устранения недостатков (дефектов) суд считает необходимым установить до 30.06.2025, учитывая объем и виды подлежащих выполнению работ для устранения недостатков (дефектов), а также природно-климатические особенности места расположения объекта выполнения работ.

Поскольку исковые требования удовлетворены, а истец от уплаты государственной пошлины освобожден, на основании части 3 статьи 110 АПК РФ государственная пошлина в сумме 50 000 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в бюджет.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 30.06.2025 выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 14.04.2022 № 0122300022922000002-1 путем восстановления асфальтового покрытия проезжей части дороги по улице Клубная поселка Хурмули Солнечного района Хабаровского края в следующих местах и размерах (согласно акту осмотра от 30.05.2024 года):

-   устранить разрушения проезжей части дороги вдоль парковочного кармана, напротив торгово-общественного центра, в виде углублений (ям) глубиной от 6 см до 9 см на площадях размерами 0,6м x 0,5м, 0,8м x 0,7м и 0,9м x 0,7м;

-   устранить вспучивание (подъем) и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги напротив дома № 20 по ул. Школьной на площадях размерами 0,9м x 0,6м и 0,9м x 1,3м;

- устранить вспучивание и растрескивание асфальтового покрытия на проезжей части дороги в месте примыкания проезжей части дороги ул. Клубная к проезжей части дороги ул. Нагорная на площадях размерами 4,9м x 3,1м и 6,3м x 3,2м.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 000 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                            Д.Л. Малашкин