АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001

https://irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-597/2025

19.02.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  11.02.2025 года.

Решение  в полном объеме изготовлено   19.02.2025  года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Хромцовой Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Глотовой А.А., рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ "ВЕСТЛАЙН" (664025, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ. СУРИКОВА, Д. 6, ОФИС 2, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 380801001) 

к ОТДЕЛУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОХАНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (669311, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БОХАНСКИЙ, П БОХАН, УЛ ЛЕНИНА, ЗД. 79, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 850301001)

о взыскании 3 800 000  рублей 00 копеек,

при участии в заседании:

от истца: представитель ФИО1 по доверенности № б/н от 09.12.2024; паспорт;

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ "ВЕСТЛАЙН" (далее – ООО "ЦПИСРР "ВЕСТЛАЙН", истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ОТДЕЛУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОХАНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – ОКС АДМИНИСТРАЦИИ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН", ответчик) с требованием о взыскании 3 800 000 рублей – задолженности по муниципальному контракту №014-ОК-20 от 15.12.2020.

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на надлежащее выполнение им работ по спорному контракту, тогда как ответчиком не произведена их оплата.

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, о дате, месте и времени предварительного судебного заседания извещен надлежаще в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исследовав материалы дела, суд с учетом мнения истца, в отсутствие возражений ответчика признал подготовку дела к судебному разбирательству оконченной, на основании части 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное заседание и открыл судебное разбирательство в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, о времени и месте проведения которого стороны извещены.

Дело рассматривается в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие ответчика по имеющимся материалам.

Исследовав имеющиеся по делу доказательства, заслушав пояснения истца, суд установил следующее. 

Между ОКС АДМИНИСТРАЦИИ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН" (заказчиком) и ООО "ЦПИСРР "ВЕСТЛАЙН" (исполнителем) заключен муниципальный контракт №014-ОК-20 от 15.12.2020, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по разработке проектной документации для строительства детской школы искусств по адресу: Иркутская обл., Боханский р-н, п. Бохан, в соответствии с заданием на проектирование, а заказчик обязуется принять результат работ выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом (пункт 1.1 договора).

Цена контракта по пункту 2.2 контракта составляет 3 800 000 рублей.

Согласно пункту 3.1 контракта в редакции дополнительного соглашения от 15.12.2020 срок выполнения работ в полном объеме: в течение 230 календарных дней с момента заключения контракта.

Работы по контракту №014-ОК-20 от 15.12.2020 выполнены подрядчиком в полном объеме и приняты заказчиком, что подтверждается подписанным сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ №014-ОК-20-1 от 29.12.2023, а также накладной на передачу документации №595-23 от 19.12.2023.

Спорные работы ОКС АДМИНИСТРАЦИИ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН" не оплачены, задолженность по контракту составила 3 800 000 рублей.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию №222 от 05.07.2024 с требованием погасить имеющуюся задолженность, оставленную ответчиком без ответа и удовлетворения.

Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для обращения истца  в суд с иском о принудительном взыскании суммы основного долга.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, заслушав доводы истца, суд пришел к следующим выводам.

Проанализировав представленный в материалы дела контракт №014-ОК-20 от 15.12.2020, суд считает, что по своей природе он является договором подряда на выполнение проектно- изыскательских работ.

Следовательно, правоотношения сторон в рассматриваемом случае регулируются положениями параграфов 1, 4 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В силу требований статей 702, 708, 758 ГК РФ к существенным условиям договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ относится техническое задание, начальный и конечный сроки выполнения подрядных работ.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Оценив условия спорного контракта, суд пришел к выводу о согласовании сторонами его существенных условий, в связи с чем суд считает его заключенным.

Из материалов дела усматривается, что спорные работы выполнены истцом и приняты ответчиком.

В силу требований статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Учитывая, что факт выполнения работ подтвержден материалами дела, суд в отсутствие доказательств оплаты задолженности полагает исковые требования ООО "ЦПИСРР "ВЕСТЛАЙН" о взыскании с ОКС АДМИНИСТРАЦИИ МО "БОХАНСКИЙ РАЙОН" 3 800 000 рублей – основного долга по контракту №014-ОК-20 от 15.12.2020 обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в сумме 139 000 рубля, которая взыскивается в его пользу со стороны ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования  удовлетворить;

взыскать с ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОХАНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   в пользу   ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ "ВЕСТЛАЙН" 3 800 000  рублей – основного долга; 139 000 рублей – судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья                                                                                                            Н.В. Хромцова