РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-92825/21-126-638

г. Москва

18 июня 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 июня 2021года

Полный текст решения изготовлен 18 июня 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО "МИЛДТ РЕЙ" (630027 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2016, ИНН: 

<

***>) 

к ООО "УРАЛСТРОЙНЕФТЬ" (115114, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/КАБ 1/25.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.08.2013, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности, неустойки

В судебном заседании приняли участие:  

от истца: ФИО1, доверенность от 12.05.2021.

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "МИЛДТ РЕЙ" обратилось с исковым заявлением к ООО "УРАЛСТРОЙНЕФТЬ" о взыскании суммы основного долга в размере 3 889 545,39 руб., а также неустойки в размере 388 954,53 руб.

В судебное заседание не явился ответчик, извещен судом о времени и месте судебного заседания с соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие ответчика и непредставлении отзыва на заявление.

Представитель истца поддержал заявление по изложенным в нем доводам.

Выслушав представителя истца, исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как следует из материала дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» («Истец», «Субподрядчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «УралСтройНефть» («Ответчик», «Подрядчик») заключен Договор подряда № УСН-141/18-Б от 01 октября 2018 года.

Согласно ст. 702 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1.1. Договора, Субподрядчик в установленные Договором сроки и в счет договорной цены выполнит за свой риск, своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном настоящим Договором, Приложениями №1,2 к нему, Рабочей документацией и выполнит все иные требования, установленные Договором.

Пунктом 2.1. Договора подряда, определено, что общая стоимость работ, подлежащая оплате субподрядчику, составляет 4 943 975,35 рублей.

Дополнительным соглашением № 4 от 25 марта 2019 года к Договору подряда № УСН-141/18-Б от 01 октября 2018 года определена окончательная стоимость работ, подлежащая оплате субподрядчику в размере 6 523 886,97 руб.

Согласно п.2 Дополнительного соглашения №1 от 02 октября 2018 года, окончательная оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ осуществляется Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченных представителями Сторон:

-Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-Счет-фактура;

-Счет на оплату, с учетом выплаченного аванса.

Общество с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» надлежащим образом и в срок исполнило свои обязательства по договору, что подтверждается актами о приемке выполненных работ:

-№ 1 от 30 ноября 2018 года на сумму 1 148 348,81 рублей;

-№ 2 от 21 декабря 2018 года на сумму 506 493,82 рубля;

-№ 3 от 31 января 2019 года на сумму 2 261 711,96 рублей;

-№ 4 от 11 февраля 2019 года на сумму 1 027 388,16 рублей;

-№ 5 от 25 марта 2019 года на сумму 1 579 911,62 рублей.

Вышеуказанные акты подписаны обеими сторонами без замечаний, претензий со стороны Ответчика предъявлено не было. Однако на 27 апреля 2021 года выполненные работы оплачены лишь частично в сумме 6 230 254,59 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями:

№ 27447 от 24 октября 2018 года на сумму 494 397,53 рублей;

№ 31130 от 10 декабря 2018 года на сумму 494 397,53 рублей;

№ 350 от 16 января 2019 года на сумму 494 397,53 рублей;

№ 1785 от 05 февраля 2019 года на сумму 1 943 943 рубля;

№ 5030 от 20 марта 2019 года на сумму 976 019 рублей; № 10739 от 06 июня 2019 года на сумму 1 579 911 рублей; № 22988 от 13 декабря 2019 года на сумму 247 198 рублей.

Таким образом, на дату 27 апреля 2021 года задолженность ООО «УралСтройНефть» перед ООО «Милдт Рей» по договору № УСН-141/18-Б от 01 октября 2018 года составляет 293 599,78 руб.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.16 Договора подряда, за нарушение сроков оплаты Субподрядчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

Так, последний акт выполненных работ был подписан сторонами 25 марта 2019 года, следовательно, оплата должна была быть произведена не позднее 09 апреля 2019 года, с 10 апреля 2019 года подлежит начислению неустойка:

293 599,78 руб. * 0,1% * 749 дней (10.04.19-27.04.21) = 219 906,23 рублей.

С учетом установленного ограничения сумма неустойки составляет 29 359,97 руб.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» и Обществом с ограниченной ответственностью «УралСтройНефть» заключен Договор подряда № УСН-05/19-Б от 31 января 2019 года.

Согласно ст. 702 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1.1. Договора, Субподрядчик в установленные Договором сроки и в счет договорной цены выполнит за свой риск, своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном настоящим Договором, Приложениями №1,2 к нему, Рабочей документацией и выполнит все иные требования, установленные Договором.

Пунктом 2.1. Договора подряда, определено, что общая стоимость работ, подлежащая оплате субподрядчику, составляет 35 930 964,17 рублей.

Дополнительным соглашением № 2 от 10 июля 2019 года к Договору подряда № УСН-05/19-Б от 31 января 2019 года определена окончательная стоимость работ, подлежащая оплате субподрядчику в размере 32 546 508,99 (тридцать два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот восемь рублей 99 копеек).

Согласно п.2.8 Договора подряда, оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченных представителями Сторон:

-Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-Счет-фактура;

-Счет на оплату, с учетом выплаченного аванса.

Общество с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» надлежащим образом и в срок исполнило свои обязательства по договору, что подтверждается актами о приемке выполненных работ:

-№ 1 от 25 марта 2019 года на сумму 3 909 484,45 рубля;

-№ 2 от 10 апреля 2019 года на сумму 4 473 826,40 рублей;

-№ 3 от 31 мая 2019 года на сумму 6 287 778,76 рублей;

-№ 4 от 10 июля 2019 года на сумму 572 255,09 рублей;

-№ 5 от 30 сентября 2019 года на сумму 2 662 201,82 рубль;

-№ 6 от 29 февраля 2020 года на сумму 1 239 495,48 рублей;

-№ 7 от 31 марта 2020 года на сумму 2 163 186,29 рублей.

Вышеуказанные акты подписаны обеими сторонами без замечаний, претензий со стороны Ответчика предъявлено не было. Однако на 27 апреля 2021 года выполненные работы оплачены лишь частично в сумме 18 046 894,32 рублей, что подтверждается следующими документами:

№ 3025 от 21 февраля 2019 года на сумму 3 593 096,40 рублей;

№ 6565 от 1 2 апреля 2019 года на сумму 500 000 рублей;

№ 6726 от 16 апреля 2019 года на сумму 1 127 588 рублей;

№ 7964 от 29 апреля 2019 года на сумму 1 000 000 рублей;

Акт взаимозачета № 260 от 30 апреля 2019 года на сумму 291 060 рублей;

№ 9026 от 17 мая 2019 года на сумму 3 116 926,72 рублей;

№ 10737 от 06 июня 2019 года на сумму 671 074 рублей;

№ 13489 от 11 июля 2019 года на сумму 1 000 000 рублей;

№ 13589 от 16 июля 2019 года на сумму 1 030 223 рубля;

№ 14564 от 31 июля 2019 года на сумму 2 000 000 рублей;

Акт взаимозачета № 380 от 31 июля 2019 года на сумму 47 025 рублей;

№ 16289 от 26 августа 2019 года на сумму 1 410 779 рублей;

Акт взаимозачета № 454 от 30 сентября 2019 года на сумму 19 800 рублей;

№ 21671 от 20 ноября 2019 года на сумму 400 000 рублей;

№ 22380 от 03 декабря 2019 года на сумму 400 000 рублей;

№ 22990 от 13 декабря 2019 года на сумму 1 309 961 рубль;

Акт взаимозачета № 11 от 29 февраля 2020 года на сумму 129 361,20 рублей;

Таким образом, на дату 27 апреля 2021 года задолженность ООО «УралСтройНефть» перед ООО «Милдт Рей» по договору № УСН-05/18-Б от 31 января 2019 года составляет 3 261 333,97 руб.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.20 Договора подряда, за нарушение сроков оплаты Субподрядчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

Так, последний акт выполненных работ был подписан сторонами 29 февраля 2020 года, следовательно, оплата должна была быть произведена не позднее 30 марта 2020 года, с 31 марта 2020 года подлежит начислению неустойка:

3 261 333,97 руб. * 0,1% * 393 дней (31.03.20-27.04.21) = 1 128 704,25 рублей.

С учетом установленного ограничения сумма неустойки составляет 326 133,40 руб.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» и Обществом с ограниченной ответственностью «УралСтройНефть» заключен Договор подряда № УСН-190/19-Б от 02 декабря 2019 года.

Согласно ст. 702 Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.1.1. Договора, Субподрядчик в установленные Договором сроки и в счет договорной цены выполнит за свой риск, своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном настоящим Договором, Приложениями №1,2 к нему, Рабочей документацией и выполнит все иные требования, установленные Договором.

Пунктом 2.1. Договора подряда, определено, что общая стоимость работ, подлежащая оплате субподрядчику, составляет 7 353 165,59 рублей.

Согласно п.2.8 Договора подряда, оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании подписанных уполномоченных представителями Сторон:

-Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-Счет-фактура;

-Счет на оплату, с учетом выплаченного аванса.

Общество с ограниченной ответственностью «Милдт Рей» надлежащим образом и в срок исполнило свои обязательства по договору, что подтверждается актами о приемке выполненных работ:

-№ 1 от 31 января 2020 года на сумму 55 999,81 рублей;

-№ 2 от 10 февраля 2020 года на сумму 479 498,41 рублей;

-№ 1 от 10 февраля 2020 года на сумму 403 299,98 рублей;

-№ 3 от 29 февраля 2020 года на сумму 112 155,18 рублей;

-№ 1 от 29 февраля 2020 года на сумму 789 999,97 рублей;

-№ 2 от 29 февраля 2020 года на сумму 1 284 145,74 рублей;

-№ 4 от 10 марта 2020 года на сумму 385 348,73 рублей;

-№ 3 от 10 марта 2020 года на сумму 698 945,69 рублей;

-№ 4 от 25 марта 2020 года на сумму 352 682,17 рублей;

-№ 2 от 25 марта 2020 года на сумму 1 180 196,09 рублей;

-№ 5 от 30 апреля 2020 года на сумму 729 486,06 рублей;

-№ 5 от 30 апреля 2020 года на сумму 37 378,68 рублей;

-№ 3 от 30 апреля 2020 года на сумму 183 090,68 рублей.

Вышеуказанные акты подписаны обеими сторонами без замечаний, претензий со стороны Ответчика предъявлено не было. Однако на 27 апреля 2021 года выполненные работы оплачены лишь частично в сумме 6 357 617,55 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями:

№ 23975 от 27 декабря 2019 года на сумму 735 316,55 рублей;

№ 776 от 22 января 2020 года на сумму 1 470 633 рублей;

№ 1983 от 13 февраля 2020 года на сумму 1 000 000 рублей;

№ 3330 от 12 марта 2020 года на сумму 500 000 рублей;

№ 9331 от 29 июля 2020 года на сумму 2 651 668 рублей.

Таким образом, на дату 27 апреля 2021 года задолженность ООО «УралСтройНефть» перед ООО «Милдт Рей» по договору № УСН-190/19-Б от 31 января 2019 года составляет 334 611,64 руб.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.16 Договоров подряда, за нарушение сроков оплаты Субподрядчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

Так, последний акт выполненных работ был подписан сторонами 30 апреля 2020 года, следовательно, оплата должна была быть произведена не позднее 30 мая 2020 года, с 31 мая 2020 года подлежит начислению неустойка:

334 611,64 руб. * 0,1% * 331 день (31.05.20-27.04.21) = 110 756,45 рублей.

С учетом установленного ограничения сумма неустойки составляет 33 461,16 руб.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Судом установлено, что ответчик письменно не отказывался от работ истца, работы были оказаны в полном объеме, срок предъявления претензий со стороны ответчика (по оказанным работам) истек.

В соответствии со статьей 783 Гражданского кодекса к договору возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (статьи 702 - 729 Кодекса), если это не противоречит статьям 779 - 782 Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле. 

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В связи с чем требования истца о взыскании суммы задолженности в размере 3 889 545 руб. 39 коп.  руб. подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 7.16 Договоров подряда, за нарушение сроков оплаты Субподрядчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

Общая сумма неустойки по всем договорам составляет 388 954,53 руб.

Расчёт неустойки судом проверен и признан верным.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании ст. ст. 8, 12, 15, 309, 310 ГК РФ,   руководствуясь ст. ст. 41, 65, 70, 110, 123, 156, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "УРАЛСТРОЙНЕФТЬ" (115114, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/КАБ 1/25.1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.08.2013, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "МИЛДТ РЕЙ" (630027 

<

...> ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2016, ИНН: 

<

***>) 3 889 545 (три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок пять) руб. 39 коп. задолженности, 388 954 (триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 53 коп. неустойки, а также 44 393 (сорок четыре тысячи триста девяносто три) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков