Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-74226/19-126-626

09 июля 2019 г.

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена                                27 июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен                                          09 июля 2019 года

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С.

протокол судебного заседания вел помощник судьи Филиппова О.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОЛАНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 26 584 755 руб. 17 коп.

по встречному иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕОЛАНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 656 358,79 руб. 

В судебное заседание явились:

от истца: ФИО1 по доверенности от 22.11.2018 года;

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 03.07.2018 года; 

 

У С Т А Н О В И Л:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕОЛАНТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" о взыскании задолженности в сумме 18 944 755,18 руб. и неустойки в сумме 7 640 000 руб.

В судебном заседании 21.06.2017г. встречный иск АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НЕОЛАНТ" о взыскании неустойки в сумме 656 358,79  руб., принят судом к производству в порядке ст. 132 АПК РФ.

Истец (по первоначальному иску) в судебное заседание явился, первоначальный иск поддержал согласно исковому заявлению, встречное исковое заявление не признал по доводам, изложенным в отзыве.

Ответчик (по первоначальному иску) в судебное заседание явился, первоначальный иск не признал по доводам, изложенным в отзыве, заявил о несоразмерно суммы неустойки по первоначальному иску, встречное исковое заявление  поддержал в полном объеме.

Выслушав представителей истца и ответчика, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что первоначальные исковые требования истца заявлены обоснованно, но подлежат частичному удовлетворению, встречное исковое заявление обоснованно и подлежит удовлетворению в полном объеме,  по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 01.04.2015г. между АО "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (далее - Ответчик, Заказчик) и АО «НЕОЛАНТ» (далее - Истец, Исполнитель) был заключен Договор № 01-ГСП_15, а 01.10.2015г. к Договору было заключено Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2015г. (далее - ДС).

В соответствии с Договором № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. в редакции ДС (далее - Договор) АО «НЕОЛАНТ» обязалось выполнить работы по разработке электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 978 - км 1231» Участок км 1028 - км 1182» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», а АО "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" принять и оплатить их в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором. Содержание этапов работ, сроки их выполнения определялись Календарным планом (Приложение № 2 к Договору и его неотъемлемая часть). При этом устанавливается: начало работ - апрель 2015г., окончание - июнь 2016г.

Цена Договора определена в Приложении № 2 к Договору и составила 76 400 000,00 руб. (Семьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) руб., в том числе НДС 18 % в размере 11 616 101,70 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто один) руб. 70 копеек и включала в себя:

- стоимость согласованных сторонами Работ, в размере 76 150 000,00 (Семьдесят шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) руб., в том числе НДС 18 % в размере 11 616 101,70 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч сто один) руб. 70 коп.;

- стоимость права использования программ, в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) руб., НДС не облагается в соответствии с п.п.26, п.2, ст.149 НК РФ.

Приложение № 1 (Техническое задание) к Договору изложено в редакции Приложения № 1 к ДС, являющимся его неотъемлемой частью.

Приложение № 2 (Календарный план) к Договору изложено в редакции Приложения № 2 к ДС, являющимся его неотъемлемой частью.

В соответствии с п. 3.2 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные и принятые работы соответствующего этапа Договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа.

В соответствии с Актом № 225 от 02.12.2015г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 3 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям Договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 15 797 939 (Пятнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот тридцать девять) руб. 97 коп., кроме того, НДС 18% - 2 843 629 (Два миллиона восемьсот сорок три тысячи шестьсот двадцать девять) руб. 20 коп., всего: 18 641 569 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) руб. 17 коп.

В соответствии с Актом № 59/1 от 30.06.2015г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям Договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 16 765 159 (Шестнадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять) руб. 36 коп., кроме того, НДС 18% - 3 017 728 (Три миллиона семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 69 коп.; всего: 19 782 888 (Девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) руб. 05 коп.

В соответствии с Актом № 60 ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА МАТЕРИАЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ от 30.06.2015г. Стороны закрепили факт приемки-передачи от АО «НЕОЛАНТ» к АО «Газстройпроект» объекта интеллектуальной собственности на материальном носителе по Приложению № 3 «Лицензионный договор» к Договору № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. В соответствии с Договором Лицензиар (АО «НЕОЛАНТ») передал Объект интеллектуальной собственности на материальном носителе в виде неисключительной лицензии Interview в количестве 10 (десять) экземпляров, а Лицензиат (АО «Газстройпроект») принял Объект интеллектуальной собственности на материальном носителе. Стоимость переданных неисключительных прав на программное обеспечение Interview составила 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб., НДС не облагается. Материальный носитель Объекта интеллектуальной собственности осмотрен Лицензиатом и принят в состоянии пригодном для воспроизведения Объекта интеллектуальной собственности.

В соответствии с Актом № 61 от 30.06.2015г. сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа по Договору № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям Договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 5 746 430 (Пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста тридцать) руб. 17 коп.,  кроме того, НДС 18% -1 034 357 (Один миллион тридцать четыре тысячи триста пятьдесят семь) руб. 43 коп.; всего: 6 780 787 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 60 коп.

В соответствии с Актом № 15 от 28.01.2016г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 4 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 3 101 444 (Три миллиона сто одна тысяча четыреста сорок четыре) руб. 08 коп., кроме того, НДС 18% - 558 259 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят девять) руб. 93 коп., всего: 3 659 704 (Три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот четыре) руб. 01 коп.

В соответствии с Актом № 113 от 13.05.2016г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 5 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 17 560 562 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) руб. 13 коп., кроме того НДС 18% - 3 160 901 (Три миллиона сто шестьдесят тысяч девятьсот один) руб. 18 коп., всего: 20 721 463 (Двадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят три) руб. 31 коп.

В соответствии с Актом № 285/3 от 22.12.2016г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 6 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке. К оплате следует - 3 810 167 (Три миллиона восемьсот десять тысяч сто шестьдесят семь) руб. 78 коп., кроме того, НДС 18% - 685 830 (Шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 20 коп., всего: 4 495 997 (Четыре миллиона четыреста девяносто пять тысяч девятьсот девяносто семь) руб. 98 коп.

В соответствии с Актом № № 285/4 от 22.12.2016г. сдачи-приемки выполненных работ по этапу 7 Договора № 01-ГСП_15 от 01.04.2015г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2015г. «Разработка электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Магистральный газопровод. Участок «Починки-Анапа», 1080-1182 км» Стороны определили, что перечисленные в акте работы удовлетворяют условиям договора и технического задания и оформлены в надлежащем порядке; к оплате следует - 1 752 194 (Один миллион семьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто четыре) руб. 81 коп., кроме того НДС 18% - 315 395 (Триста пятнадцать тысяч триста девяносто пять) руб. 07 коп., всего: 2 067 589 (Два миллиона шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) руб. 88 коп.

Таким образом, Истец свои обязательства по Договору исполнил в полном объёме.

Ответчик произвёл следующие оплаты по Договору:

- 16.10.2015г. - 1 500 000 руб.;

- 09.12.2015г. - 2 000 000 руб.;

- 03.03.2016г. - 2 000 000 руб.;

- 01.04.2016г. - 10 000 000 руб.;

- 05.04.2016г. - 5 000 000 руб.;

- 15.04.2016г. - 5 000 000 руб.;

- 17.06.2016г. - 5 000 000 руб.;

- 20.06.2016г. - 7 000 000 руб.;

- 22.07.2016г. - 1 000 000 руб.;

- 11.08.2016г. - 1 000 000 руб.;

- 01.12.2016г. - 1 050 000 руб.;

- 26.12.2016г. - 4 905 244,82 руб.;

- 03.05.2017г. - 3 000 000 руб.;

- 15.05.2017г. - 1 000 000 руб.;

- 09.10.2017г. - 3 000 000 руб.;

- 22.12.2017г. - 5 000 000 руб.;

Таким образом, всего перечислено - 57 455 244 (Пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч двести сорок четыре) руб. 82 коп.

Следовательно, за Ответчиком образовалась задолженность в сумме 18 944 755 (Восемнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 18 коп.

Истец в адрес Ответчика направил Претензию об оплате задолженности за выполненные работы, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления в Арбитражный суд г. Москвы.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты выполненных по договору работ либо доказательств наличия обстоятельств, освобождающих его от исполнения обязательств по оплате выполненных работ, а также сумма задолженности Ответчиком не оспорена в Отзыве на первоначальный иск, в связи с чем, требование истца по первоначальному иску о взыскании задолженности в размере 18 944  755 (восемнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 18 коп., признаны судом заявленными правомерно и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

В соответствии с п. 1.1 Договора Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке электронной исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 978 - км 1231» Участок км 1080 км 1182 в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», а Заказчик принять и оплатить их в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

В соответствии с п. 2.1 Договора Исполнитель вправе:

б)   Требовать   полной   и   своевременной   оплаты  на   условиях настоящего Договора.

В соответствии с п. 2.4 Договора Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты Работ в соответствии с Договором или направить мотивированный отказ в приемке выполненных Работ;

В соответствии с п. 3.2 Договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные и принятые работы соответствующего этапа Договора в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа.

В соответствии с п. 3.3 Договора датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В соответствии с п. 3.4 Договора оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

В соответствии с п. 5.3 Договора за нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.

Истец начислил неустойку в размере 7 640 000 руб. за период с 01.07.2016г. по 27.02.2019г., представил расчет, который судом проверен и признан верным, поскольку расчет неустойки произведен с учетом ограничения не более 10% от цены Договора.

Доводы ответчика о том, что размер неустойки должна быть ограничен 10% от суммы неисполненного обязательства, судом отклоняется, поскольку противоречит условиям заключенного сторонами договора.

Между тем, учитывая заявление ответчика, суд считает возможным снизить неустойку в порядке ст. 333 ГК РФ.

Согласно разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации, содержащимся в определении № 277-0 от 21.12.2000г., именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации). Это касается и свободы договора.

В определениях Конституционного суда РФ от 22.03.2012 № 424-0-0 и от 26.05.2011 г. № 683-0-0 указано, что п. 1 ст. 333 ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер подлежащей уплате неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в статье 333 ГК РФ идет речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

При разрешении вопроса о снижение неустойки судом учтены фактические обстоятельства данного дела. В частности явная несоразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательств.

Таким образом, взысканию с ответчика подлежит сумма неустойки в размере 3 656 358 (три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 79 коп.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В обоснование встречного иска Ответчик по первоначальному иску указывает на следующее.

В соответствии с условиями Договора АО «НЕОЛАНТ» (Исполнитель) приняло на себя обязательства выполнить работы по разработке исполнительной документации и электронного технического паспорта объекта «Южно-Европейский газопровод «Починки-Анапа», км 978-км 1231» Участок км 1080 - км 1182 в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», а АО «Газстройпроект» (Заказчик) принять и оплатить их.

Согласно п. 1.3. Договора содержание этапов работ, сроки их выполнения определяется Календарным планом (Приложение №2 к Договору), при этом установлены срок начала и окончания работ: начало работ - апрель 2015г., окончание работ - июнь 2016г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2015г.).

Таким образом, стороны предусмотрели поэтапное выполнение работ по Договору с окончанием всех работ 30.06.2016г.

Между тем, АО «НЕОЛАНТ» допустил нарушение срока выполнения работ.

Работы по 6 и 7 этапам выполнены и сданы АО «Газстройпроект» по актам 22.12.2016г. Факт просрочки исполнения обязательств подтверждается подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ № 285/3 от 22.12.2016г. и №285/4 от 22.12.2016г.

За просрочку исполнения обязательств Исполнителем пунктом 5.2 Договора предусмотрена ответственность Исполнителя в виде пени в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

Принимая во внимание позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о неправомочности начисления неустойки на общую сумму договора без учета надлежащего исполнения части работ АО «Газстройпроект» произвел расчет неустойки исходя из размера пени 0,1% от суммы невыполненного в срок обязательства, применив лимит ответственности 10% от суммы невыполненного в срок обязательства.

Таким образом, суд считает встречный иск о взыскании с АО «НЕОЛАНТ» в пользу АО «Газстройпроект» неустойки за просрочку выполнения работ в сумме 656 358 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 79 коп. заявленным правомерно, документально подтвержденным, в связи с чем подлежащим удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

На основании  изложенного, в соответствии со  ст.ст. 8, 12, 307, 309, 310, 330, 333, 702, 715, 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации, и руководствуясь ст. 28, 9, 65, 70, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОЛАНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 18 944  755 (восемнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 18 коп. задолженности, 3 656 358 (три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 79 коп. неустойки, а также 155 924 (сто пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОЛАНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 656 358 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 79 коп. неустойки, а также 16 127 (шестнадцать тысяч сто двадцать семь) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Произвести взаимозачет первоначальных и встречных исковых требований.

С учетом произведенного зачета встречных исковых требований взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕОЛАНТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 18 944 755 (восемнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 18 коп. задолженности, 3 000 000 (три миллиона) руб. неустойки, а также 139 797 (сто тридцать девять тысяч семьсот девяносто семь) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                М.С. Новиков