95/2018-75330(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982  

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-7804/2018

30 августа 2018 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 23 августа 2018 года, полный  текст решения изготовлен 30 августа 2018 года.  

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  

заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью «Прораб»  

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

к муниципальному учреждению «Централизованная клубная система»  

муниципального образования городского округа «Ухта» (ИНН: 

<

***>,  

ОГРН: 

<

***>) о взыскании долга, неустойки, штрафа при участии третьего лица: ФИО2 при участии в судебном заседании: от истца: ФИО3 – по доверенности; установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Прораб» (далее – истец,  ООО «Прораб») обратилось в Арбитражный суд Республики Коми к  муниципальному учреждению «Централизованная клубная система»  муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – ответчик,  МУ «Централизованная клубная система» МО ГО «Ухта») о взыскании  2 909 620 руб. 05 коп. задолженности и 59 356 руб. 24 коп. неустойки по  договору № 0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016, 531 302 руб.  69 коп. задолженности и 10 838 руб. 57 коп. неустойки по договору № 04/10Д  от 15.08.2016, 189 475 руб. 43 коп. задолженности и 3 637 руб. 92 коп.  неустойки по договору № 04/08Д от 08.08.2016, 103 991 руб. 00 коп.  задолженности и 1 996 руб. 62 коп. неустойки по договору № 02/09Д  

от 01.09.2016, 70 712 руб. 59 коп. штрафа по договору   № 0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016.  

23.03.2017 от МУ «Централизованная клубная система» МОГО «Ухта»  поступил встречный иск, согласно которому ответчик просит взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Прораб» 2 479 428 руб. 43 коп.  неустойки: в том числе 176 781 руб. 47 коп. штрафа и 2 142 591 руб. 39 коп.  неустойки, 109 706 руб. 27 коп. неустойки по договору 04/08 Д от 08.08.2016,  50 349 руб. 10 коп. неустойки по договору 02/09Д от 01.09.2016.  

Определением от 03.04.2017 по делу № А29-1649/2017 выделены в  отдельное производство первоначальные исковые требования, в рамках  данного дела рассматриваются требования ООО «Прораб» о взыскании с МУ  «Централизованная клубная система» МО ГО - 2 909 620 руб. 05 коп.  задолженности и 59 356 руб. 24 коп. неустойки по договору   № 0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016 и штрафа по договору   № 0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016 в размере 70 712 руб.  59 коп.  

Определением от 24.04.2017 по делу в рамках дела № А29-1649/2017  выделены в отдельное производство встречные исковые требования, в  рамках данного дела рассматриваются требования МУ «Централизованная  клубная система» МО ГО «Ухта» о взыскании с ООО «Прораб» - 176 781  руб. 47 коп. штрафа и 2 142 591 руб. 39 коп. неустойки.  

Определением суда от 24.04.2017 встречное исковое заявление принято  судом к производству по делу № А29-1649/2017 для совместного  рассмотрения с первоначальным иском.  

Определением суда от 13.06.2018 по делу № А29-1649/2017 выделены в  отдельное производство требования ООО «Прораб» о взыскании с МУ  «Централизованная клубная система» МО ГО - 2 909 620 руб. 05 коп.  задолженности и 59 356 руб. 24 коп. неустойки по договору №  0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016 и штрафа по договору №  0107300001216000110-0125837-02 от 11.07.2016 в размере 70 712 руб. 59 коп.  с присвоением данному делу  № А29-7804/2018.  

Производство по делу № А29-1649/2017 по встречному иску  приостановлено до даты признания общества с ограниченной  ответственностью «Прораб» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  несостоятельным (банкротом) или прекращения производства по делу №  А29-18059/2017.  

Определением суда рассмотрение настоящего дела отложено на  23.08.2018.  

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации неоднократно уточнял исковые требования. Согласно  последнему уточнению от 07.12.2017 (штамп Арбитражного суда Республики  Коми) истец просит взыскать с ответчика задолженность в сумме  

1 876 288 руб. 46 коп., 242 158 руб. 79 коп. неустойки и 70 712 руб. 59 коп.  штрафа.  

Заявленные уточнения приняты судом к рассмотрению. 

Ответчик во встречном иске возражал против удовлетворения  первоначального иска. Возражения ответчика сводятся к тому, что работы  выполнены некачественно, с нарушением предусмотренных договором  сроков, часть работ не выполнена вообще, о чем неоднократно извещался  истец, однако в соответствие с условиями договора результат работ не  приведен.  

Представитель истца в судебном заседании настаивал на  удовлетворении исковых требований в полном объеме.  

Ответчик и третье лицо, явку своих представителей не обеспечили,  заявив ходатайство о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя истца,  арбитражный суд установил следующее.  

Как следует из дела, 11.07.2016 между МУ «Централизованная клубная  система» МО ГО «Ухта» (заказчиком) и ООО «Прораб» (подрядчиком)  заключен договор № 0107300001216000110-0125837-02 на выполнение работ  по капитальному ремонту здания клуба пос. Подгорный.  

В соответствии с пунктом 1.1 договора подрядчик принимает на себя  обязательство выполнить работы по капитальному ремонту здания клуба пос.  Подгорный (далее по тексту «Объект») в объеме в соответствии со сметной  документацией (Приложение № 1 к договору), с использованием для  выполнения работ указанных в Приложении № 2 к договору товаров, а  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для  выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную  договором цену.  

Согласно пункту 1.3 договора виды и объемы работ устанавливаются  сметной документацией (Приложение № 1 к договору), являющейся  неотъемлемой частью договора.  

Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что цена договора составляет  3 535 629 руб. 36 коп., НДС не облагается.  

В силу пунктов 2.3, 2.5 договора цена выполненных работ,  определяется на основании актов приема-сдачи выполненных работ и  справок о стоимости выполненных работ (формы № КС-2, № КС-3),  подписанных заказчиком и подрядчиком. Оплата выполненных работ по  договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных  средств на расчётный счёт подрядчика в течение 30 дней со дня подписания  заказчиком документов, являющихся основанием для оплаты выполненных  работ, а именно: счета-фактуры (счёта), акта приема-сдачи выполненных  работ (форма КС № 2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС   № 3).  

В соответствии с пунктами 9.2-9.4 договора в случае просрочки  исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в  иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать  уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  

договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  неуплаченной в срок суммы. За ненадлежащее исполнение заказчиком  обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения  обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 2  процента цены настоящего договора и составляет 70 712 руб. 59 коп.  

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ: со дня  заключения договора по 28.08.2016 г.  

Дополнительным соглашением № 2 от 05.09.2016 стороны решили, что  ввиду утраты интереса к выполнению части работ стороны расторгают  договор. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания  сторонами, а в части оплаты, со дня выполнения заказчиком обязательств по  оплате. Стороны определили, что цена фактически выполненных работ по  договору составляет 3 004 239 руб. 30 коп.  

Истец в иске указывает, что в целях выполнения взятых на себя  обязательств им выполнены и сданы заказчику работы на общую сумму  2 909 620 руб. 05 коп.  

В обоснование заявленных требований истцом представлены акты КС- 2 №№ 1-6 от 26.08.2016 и от 05.09.2016 на сумму 2 909 620 руб. 05 коп.,  подписанные и заверенные печатями сторон по договору без возражений по  объему и качеству выполненных работ.  

Представленные акты оставлены заказчиком без оплаты.  

Направленная в адрес ответчика претензия от 14.12.2016 с требованием  произвести оплату фактически выполненных работ к положительному  результату не привела.  

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в  арбитражный суд с требованием о взыскании задолженности в сумме  1 876 288 руб. 46 коп., 242 158 руб. 79 коп. неустойки и 70 712 руб. 59 коп.  штрафа (с учетом последнего уточнения).  

Поскольку в ходе судебного разбирательства между лицами,  участвующими в деле, возник спор по объему и качеству выполненных работ  и вопросы, возникшие при рассмотрении настоящего дела, требуют  специальных знаний, арбитражный суд определением от 23.08.2017 назначил  судебную экспертизу, проведение которой поручил эксперту ООО  «Кировская Экспертно-Строительная Организация» ФИО4.  

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:  

1) Соответствуют ли выполненные работы, указанные в актах приемки   № 1-6 от 26.08.2016, по видам и объему фактически выполненным работам  на объекте, условиям договора № 0107300001216000110-0125837-02 от  11.07.2016, локальной смете, по качеству действующим техническим нормам  и правилам в строительстве?  

2) Имеют ли работы, указанные в актах приемки № 1-6 от 26.08.2016,  недостатки и какие?  

3) Что является причиной имеющихся недостатков – отступления от  действующих норм и правил в строительстве либо ненадлежащая  эксплуатация объекта?  

4) Являются ли выявленные отступления от действующих норм и  правил в выполненных подрядных работах существенными и  неустранимыми?  

5) Какова стоимость некачественно выполненных работ? (по видам  работ и общая стоимость некачественно выполненных работ, с указанием  суммы на которую подлежит снижение общей стоимости работ по  договору)?  

В заключении эксперта от 25.09.2017 сформулированы выводы о том,  что в целом, работы указанные в спорных актах, не соответствуют либо по  объемам, либо по видам работ фактически выполненным работам и  локальной смете. По качеству работы не соответствуют требованиям  нормативно-технической документации. Причиной имеющихся недостатков  является отступление от действующих норм и правил в строительстве.  Стоимость некачественно выполненных работ составляет 1 316 883 руб.  

85 коп., стоимость невыполненных работ составляет 342 457 руб. 05 коп. 

Не согласившись с содержанием и выводами эксперта, истец заявил  ходатайство о вызове эксперта для дачи пояснений. При этом истец  гарантировал возмещение расходов эксперта, связанных с проездом к месту  проведения судебного заседания, в случае предъявления данных расходов к  возмещению.  

По ходатайству истца эксперт был вызван в судебные заседания для  дачи пояснений по сделанным выводам в представленном заключении.  

Эксперт дал устные и письменные дополнительные пояснения  относительно ранее сделанных выводов в экспертном заключении.  

Согласно дополнению № 1 к заключению эксперта № ЭЗ-527/2509  общая стоимость некачественно выполненных работ составляет  

1 285 559 руб. 98 коп., стоимость невыполненных работ 334 119 руб. 06 коп. 

Исследовав экспертное заключение с учетом дополнительных  пояснений эксперта в судебном заседании, суд признает, что представленное  суду экспертное заключение сделано на основании исследований.  Заключение содержит выводы, изложенные полно, четко и понято. В связи с  чем, основания подвергать правильность данного заключения у суда  отсутствуют.  

Оценив представленные по делу доказательства, правовые позиции  сторон по спору, а также результаты судебной экспертизы, арбитражный суд  признает, что требования истца подлежат частичному удовлетворению в силу  следующих обстоятельств.  

Заключенный сторонами договор по своей правовой природе является  договором подряда. Правоотношения сторон по указанному договору  регулируются общими положениями гражданского законодательства об  

обязательствах, а также специальными нормами в области законодательства  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд.  

В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации по государственному или муниципальному контракту на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных  нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие  связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик  обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их  оплату.  

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный  договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо  выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и уплатить обусловленную цену. Правила о договоре  строительного подряда применяются также к работам по капитальному  ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями  делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской  Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно  соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам  соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными  правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в  момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах  разумного срока быть пригодным для установленного договором  использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для  обычного использования результата работы такого рода.  

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской  Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за  допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической  документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах,  а также за недостижение указанных в технической документации  

показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная  мощность предприятия.  

На основании статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или  обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы  гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного  срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721  Гражданского кодекса Российской Федерации). Гарантия качества результата  работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется  на все, составляющее результат работы.  

В пункте 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с  иными недостатками, которые делают его не пригодным для  предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре  соответствующего условия непригодности для обычного использования,  заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему  выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков  в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены;  возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право  заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Частью 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что, если отступления в работе от условий договора подряда  или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком  разумный срок не были устранены либо являются существенными и  неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и  потребовать возмещения причиненных убытков.  

Представленная в материалы дела переписка свидетельствуют о  неоднократном обращении ответчика к истцу с требованием устранить  выявленные недостатки в работе.  

Требования ответчика к положительным результатам не привели, что  зафиксировано в заключении эксперта.  

В заключении экспертизы сделан вывод, что стоимость некачественно  выполненных работ составляет 1 285 559 руб. 98 коп., стоимость  невыполненных работ составляет 334 119 руб. 06 коп.  

Поскольку доказательства устранения недостатков работ в порядке,  установленном статьей 65 Кодекса, истцом не представлены, намерение об  устранении выявленных недостатков не выражено, следует признать, что  требования истца подлежат удовлетворению только в части работ  надлежащего качества, имеющего потребительскую ценность в размере  1 289 941 руб. 01 коп. (2 909 620 руб. 05 коп. – 1 285 559 руб. 98 коп. -  334 119 руб. 06 коп.).  

Доводы истца относительно того, что работы им выполнены в строгом  соответствии с условиями договора, а качество выполненных работ  

напрямую зависит от полного износа самого здания (ветхости), в связи с чем  работы подлежат оплате в полном объеме судом отклоняются, поскольку  являясь профессиональным участником на рынке подряда, истец должен был  проявить предельную осторожность и осмотрительность, и при  необходимости приостановить работы либо отказаться от их выполнения, в  целях недопущения такой ситуации, когда заказчик может не получить  ожидаемый результат по окончанию производства работ.  

При этом доводы истца относительно экспертного заключения со  ссылкой на представленные в материалы дела возражения на заключение  эксперта, признаются судом несостоятельными, поскольку не исключают  установленный в ходе рассмотрения дела факт наличия нарушений со  стороны истца в работе.  

Арбитражный суд признает, что представленные в материалы дела  замечания к заключению эксперта свидетельствуют лишь о несогласии истца  с выводами эксперта и направлены на переоценку обстоятельств, по которым  имеется заключение судебной экспертизы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса  Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться, в  том числе неустойкой (штрафом, пеней).  

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской  Федерации неустойкой признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в  случае просрочки исполнения.  

В соответствии с пунктами 9.2-9.4 договора в случае просрочки  исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в  иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать  уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от  неуплаченной в срок суммы. За ненадлежащее исполнение заказчиком  обязательств по настоящему договору, за исключением просрочки  исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде  фиксированной суммы 2 процента цены настоящего договора и составляет  70 712 руб. 59 коп.  

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по  оплате выполненных работ истцом в порядке и на условиях,  предусмотренных пунктами 9.2-9.4 договора, на сумму задолженности  начислена неустойка за просрочку платежа в период с 29.08.2016 по  19.12.2017 в размере 242 158 руб. 79 коп.  

Расчет неустойки ответчиком не оспаривается. 

Проверив расчет истца, суд признает его необоснованным. 

Произведя перерасчет неустойки исходя из периода просрочки начиная  с 06.10.2016 (согласно условиям договора в части оплаты) по 19.12.2017,  стоимости фактически выполненных работ качественно (1 289 941 руб. 01  коп.), ключевой ставки, действующей на момент вынесения решения суда  (7,25), суд определил, что размер неустойки за просрочку оплаты работ,  подлежащий взысканию с ответчика составляет 135 908 руб. 18 коп.  

При этом суд не находит правовых оснований для удовлетворения  исковых требований в части штрафа в размере 70 712 руб. 59 коп.  

Нормативно-правовое обоснование данных требований истцом в иске  не указано. Принимая во внимание предмет исковых требований – взыскание  задолженности по оплате выполненных работ и санкций за просрочку  оплаты, суд признает, что в данном случае применение такой  ответственности как штраф не правомерно, поскольку из содержания пункта  9.4 договора следует, что за ненадлежащее исполнение заказчиком  обязательств по настоящему договору, за исключением просрочки  исполнения обязательств, подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа,  размер которого устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 2  процентов от цены договора.  

В рассматриваемом случае речь идет о просрочке оплаты, что в силу  прямого указания пункта 9.4 договора исключает применение такой  ответственности как штраф.  

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, в том числе  расходы по уплате государственной пошлины и расходы на проведение  судебной экспертизы, относятся на стороны пропорционально размеру  заявленных и удовлетворенных исковых требований.  

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в  арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате  экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с  проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг  адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь  (представителей), расходы юридического лица на уведомление о  корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена  обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.  

С целью проведения экспертизы МУ «Централизованная клубная  система» МО ГО «Ухта» внесло на депозитный счет Арбитражного суда  Республики Коми платежным поручением № 50423 от 01.06.2017 денежные  средства в сумме 129 600 руб.  

При этом определением суда стоимость судебной экспертизы  установлена в сумме 107 320 руб., на эту же сумму экспертной организацией  выставлен счет.  

Учитывая, что исковые требования удовлетворены судом частично,  судебные расходы по оплате экспертизы в сумме 37 347 руб. 36 коп.  подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.  

В связи с проведением экспертизы ООО «Кировская Экспертно- Строительная Организация» надлежит перечислить с депозитного счета суда  107 320 руб.  

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат  распределению между сторонами пропорционально удовлетворенным  требования с учетом предоставляемой истцу отсрочки и освобождения  ответчика от уплаты государственной пошлины в силу закона.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального учреждения «Централизованная клубная  система» муниципального образования городского округа «Ухта»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Прораб» (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) задолженность в сумме 1 289 941 руб. 01 коп.,  неустойку в сумме 135 908 руб. 18 коп., расходы по оплате судебной  экспертизы в сумме 69 972 руб. 64 коп.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прораб»  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 11 836 руб. 20 коп.  

Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми произвести  перечисление ООО «Кировская Экспертно-Строительная Организация»  денежных средств за проведение судебной экспертизы по делу в сумме  

107 320 руб., по реквизитам, представленным ООО «Кировская Экспертно- Строительная Организация».  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную  силу.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в  апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд  (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья Е.Н. Вахричев