Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, 

<

...> тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дело № А58-8075/2025

10 декабря 2025 года

город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Табунановой Л.П., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 27.08.2025 № 11/9 к акционерному обществу «Труд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению гарантийных обязательств в рамках государственного контракта от 24.07.2017 № 01- 17/СМР, а именно в месячный срок со дня вступления в законную силу решения суда устранить разрушения моста через реку Ольдогой км 78+486 автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск с восстановлением земляного полотна и дорожной одежды в зоне разрушения,

с участием третьего лица, самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральное казенное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

Руководствуясь статьями 82, 83, 144, 159, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

удовлетворить ходатайство ответчика о назначении судебной строительно-технической экспертизы.

Назначить по делу № А58-8075/2025 судебную строительно-техническую экспертизу, проведение которой поручить экспертам общества с ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий «Лестер» ФИО1, ФИО2, ФИО3,

ФИО4, ФИО5, поставив перед экспертами следующие вопросы:

1. Каковы причины возникновения разрушения конструкции арочного моста через реку Средний Ольдогой на км 78+486 автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск;

2. Были ли допущены АО «Труд» при выполнении работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги М-56 «Лена» - от Невера до Якутска км 63-км 93, Амурская область» отступления от требований, предусмотренных в государственном контракте № 01-17/СМР от 24.07.2017; в проектной документации и в обязательных при выполнении работ строительных нормах и правилах, которые стали или могли стать причиной разрушения конструкции арочного моста через реку Средний Ольдогой на км 78+486 автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск. Если да, то в чем заключаются таковые отступления со стороны Подрядчика?

3. При выявлении недостатков установить: могло ли явиться причиной их возникновения некачественное выполнение работ подрядчиком?

4. Являются ли разрушения конструкции арочного моста через реку Средний Ольдогой на км 78+486 автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер - Якутск, следствием нормального износа участков автомобильной дороги, при условии их надлежащей эксплуатации?

Разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные статьей 55 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предупредить экспертов об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

В распоряжение эксперта предоставить копии материалов дела № А58-8075/2025: государственный контракт на выполнение дорожных работ по реконструкции автомобильной дороги № 01-17/СМР от 24.07.2017, гарантийный паспорт объекта строительства от 30.10.2020, акт приемочной комиссии, акт № 1 обследования грунтозасыпного моста от 10.08.2025, фотографии 2 шт., проектная документация (2252-118(17)/РД-ТКР.МП.5 Том 4 Книга 6 Искусственные сооружения. Грунтозасыпной мост из металлической гофрированной конструкции через р. Ср. Ольдогой на ПК155+50), акт передачи объекта на содержание участка федеральной автомобильной дороги общего пользования от 12.11.2020, акты освидетельствования скрытых работ, ведомости, пояснительные записки, планы участка (ов), рабочая документация, представленные с ходатайством АО «Труд», поступившим 09.12.2025.

Разрешить присутствие представителей Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства» и акционерного общества «Труд» при проведении экспертизы. Экспертам известить истца и ответчика о дате обследования объекта.

Срок проведения экспертизы установить до 30.04.2026.

Разъяснить экспертам, что при необходимости дополнительные документы для проведения экспертизы возможно истребовать путем направления соответствующего запроса в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Разъяснить, что если эксперты в ходе исследования обнаружат важные для дела обстоятельства, относительно которых вопросы не были поставлены судом, они вправе по своей инициативе сделать соответствующие выводы, снабдив их специальной оговоркой.

Производство по делу № А58-8075/2025 приостановить до поступления заключения судебной экспертизы.

Определение в части приостановления производства по делу может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Определение в части назначения экспертизы обжалованию не подлежит, возражения в отношении назначения по делу экспертизы могут быть заявлены только при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Судья В.С.Терских