Арбитражный суд Краснодарского края

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции

Дело № А32-37241/2017

г. Краснодар

14 ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 9 ноября 2017 года. Полный текст решения изготовлен 14 ноября 2017 года. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Непранова Г.Г., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП 313236418200052 

к Обществу с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРФИНСТРОЙ", 350020,

<

...>, ОГРН 

<

***>

о взыскании 23 634 532 руб. 85 коп. неустойки,   

при участии: ФИО3 – представитель истца по доверенности от 06.10.2017,

ФИО4 – представитель ответчика по доверенности от 04.09.2017,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРФИНСТРОЙ" (далее – ответчик) о взыскании 23 634 532 руб. 85 коп. неустойки. 

Представитель ответчика заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела и об отложении предварительного судебного заседания. В удовлетворении ходатайства отказано, определение занесено в протокол.

Представитель ответчика заявил ходатайство о перерыве в предварительном судебном заседании. В удовлетворении ходатайства отказано, определение занесено в протокол. 

Каких-либо объективных причин или обстоятельств, препятствовавших ответчику ознакомиться с материалами дела до начала предварительного судебного заседания и своевременно представить мотивированный отзыв на иск ранее даты проведения предварительного судебного заседания, ответчик не указал. При таких обстоятельствах суд считает, что правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом ходатайств не имеется.

Арбитражный суд в соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Представитель истца настаивал на удовлетворении иска в полном объеме. 

Требования истца мотивированы тем, что 01 июля 2013 года между ООО «КраснодарФинСтрой» и ООО «Биомаркет» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2/4-1 от 01.07.2017г., согласно которому ООО «КраснодарФинСтрой» приняло на себя обязательство в установленный договором срок построить многоэтажный жилой дом литер «2» со встроенно-пристроенными помещениями (три 16-эт. 3-х секционных жилых корпуса («2/1», «2/2», «2/3»), 2-эт. Корпус встроенно-пристроенных помещений «2/4») по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская д. 208. Согласно п. 1.4. договора объект строительства - нежилые помещения 1 этажа общей проектной площадью 739,15 кв. м., корпус 2/4, строительный код №№ 7-8 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3, 4.  Цена договора согласно п. 3.3. составляет 35 935 670  рублей.

По договору уступки прав требования от 15 декабря 2014 года, заключенному между ООО «Биомаркет» и ФИО2 (Цессионарий), ФИО2 приобрел права (требования) по договору № 2/4-1 от 01.07.2013г. на нежилые помещения 1 этажа общей проектной площадью 739,15 кв. м., корпус 2/4, строительный код №№ 7-8 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3, 4.

Согласно п. 6.1. заключенного между сторонами договора передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Предполагаемый срок получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - 1 квартал 2015 г. (до 31.03.2015 г.). Согласно акту приема-передачи от 09.02.2016 вышеуказанный объект долевого строительства передан ФИО2 09 февраля 2016 года.

14 февраля 2014 года между ООО «КраснодарФинСтрой» и ООО «Биомаркет» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2/4-4 от 14.02.2014г., согласно которому ООО «КраснодарФинСтрой» приняло на себя обязательство в установленный договором срок построить многоэтажный жилой дом литер «2» со встроенно-пристроенными помещениями (4 этап строительства - 2-3 этажный корпус 2/4 (в осях 2-4, А-Ш) встроенно-пристроенных помещений) по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская д. 208. Согласно п. 1.4. договора объект строительства - нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, А-Ш), 4 этап) общей проектной площадью 302,05 кв. м., расположенные на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.3 - номера в экспликации помещений №№ 1-4. Цена договора согласно п. 3.3. составляет 12 988 150 рублей.

По договору уступки прав требования от 15 декабря 2014 года, заключенному между ООО «Биомаркет» и ФИО2 (Цессионарий), ФИО2 приобрел права требования по договору № 2/4-4 от 14.02.2014г. на нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, А-Ш), 4 этап) общей проектной площадью 302,05 кв. м., расположенные на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.3 - номера в экспликации помещений №№ 1-4.

Согласно п. 6.1. заключенного между сторонами договора передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Предполагаемый срок получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - 1 квартал 2015 г. (до 31.03.2015 г.). Согласно акту приема-передачи от 09.02.2016 вышеуказанный объект долевого строительства передан ФИО2 09 февраля 2016 года.

14 февраля 2014 года между ООО «КраснодарФинСтрой» и ООО «Биомаркет» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2/4-5 от 14.02.2014г., согласно которому ООО «КраснодарФинСтрой» приняло на себя обязательство в установленный договором срок построить многоэтажный жилой дом литер «2» со встроенно-пристроенными помещениями (4 этап строительства - 2-3 этажный корпус 2/4 (в осях 2-4, А-Ш) встроенно-пристроенных помещений) по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская д. 208. Согласно п. 1.4. договора объект строительства - нежилые помещения (корпус 2/4 («осях 2-4. Л-111). 4 этап):

1.4.1. Нежилое помещение общей проектной площадью 452,6 кв. м., расположенное на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3 ли. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.4 - номер в экспликации помещений № 1.

1.4.2. Нежилые помещения общей проектной площадью 437,51 кв. м. (включая площадь террасы 273,03 кв.м.), расположенные на 3 этаже, корпус 2/4 (2-3 ли. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 3.4 - номера в экспликации помещений №№1-6. Всего: объект долевого строительства - 2 (два) нежилых помещения общей проектной площадью 890,11 кв. м.

Цена договора согласно п. 3.3. составляет 26 534 440 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок) рублей и подразделяется в связи со множественностью объекта долевого строительства на цены передаваемых прав на конкретное нежилое помещение:

- 19 461 800 руб. - нежилое помещение, указанное в п.1 4.1 договора;

- 7 072 640 руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.2 договора площадью 164,48 кв. м. 

Стороны пришли к соглашению, что за террасу 273,03 кв. м. оплата не производится.

По договору уступки прав требования от 15 декабря 2014 года, заключенному между ООО «Биомаркет» и ФИО2 (Цессионарий) ФИО2 приобрел права требования по договору № 2/4-5 от 14.02.2014г. на нежилые помещения (корпус 2/4 («осях 2-4. Л-111). 4 этап):

1.4.1. Нежилое помещение общей проектной площадью 452,6 кв. м., расположенное на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3 ли. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.4 - номер в экспликации помещений № 1.

1.4.2. Нежилые помещения общей проектной площадью 437,51 кв. м. (включая площадь террасы 273,03 кв.м.), расположенные на 3 этаже, корпус 2/4 (2-3 ли. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 3.4 - номера в экспликации помещений №№1-6. Всего: объект долевого строительства - 2 (два) нежилых помещений общей проектной площадью 890,11 кв. м.

Согласно п. 6.1. заключенного между сторонами договора передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Предполагаемый срок получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - 1 квартал 2015 г. (до 31.03.2015 г.). Согласно акту приема-передачи от 09.02.2016 вышеуказанный объект долевого строительства передан ФИО2 09 февраля 2016 года. 

28 августа 2013 года между ООО «КраснодарФинСтрой» и ООО «Строительно-монтажное управление-5» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2/4-2 от 28.08.2013г., согласно которому ООО «КраснодарФинСтрой» приняло на себя обязательство в установленный договором срок построить многоэтажный жилой дом литер «2» со встроенно-пристроенными помещениями (5 этап строительства - 2-3 этажный корпус 2/4 (в осях 2-4, Э-ЖЖ) встроенно-пристроенных помещений) по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, д. 208.

Согласно п. 1.4. договора объект строительства - нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, Э-ЖЖ): 

1.4.1.  Нежилые помещения подвала общей проектной площадью 299, 63 кв. м., корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код №9 0.1 - в экспликации помещений № 1.

1.4.2. Нежилые помещения 1 этажа общей проектной площадью 392,53 кв. м., корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код М 1.1 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3, 4.

1.4.3. Нежилые помещения 2 этажа общей проектной площадью 298,17 кв. м., корпус 2/4 (2-Зэт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код №2.1 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3.

Всего: объект долевого строительства - 3 (три) нежилых помещения общей проектной площадью 990,33 кв. м.

Цена договора согласно п. 3.3. составляет 38 622 870 рублей и подразделяется в связи со множественностью объекта долевого строительства на цены передаваемых прав на конкретное нежилое помещение:

-11 685 570руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.1 договора;

-15 308 670руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.2 договора;

-11 628 630руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.3 договора.

По договору уступки прав требования от 14 февраля 2014 года, заключенному между ООО «Строительно-монтажное управление-5» и ООО  «Биомаркет» (Цессионарий) последнее приобрело права требования по договору № 2/4-2 от 28.08.2013г. на нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, Э-ЖЖ): -1.4.2. Нежилые помещения 1 этажа общей проектной площадью 392,53 кв. м., корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 1.1 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3, 4. 1.4.3.  Нежилые помещения 2 этажа общей проектной площадью 298,17 кв. м., корпус 2/4 (2-3эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.1- в экспликации помещений №№ 1, 2, 3.

По договору уступки прав требования от 15 декабря 2014 года, заключенному между ООО «Биомаркет» и ФИО2 (Цессионарий), ФИО2 приобрел права требования по договору № 2/4-2 от 28.08.2013г. на нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, Э-ЖЖ): 

- 1.4.2.  Нежилые помещения 1 этажа общей проектной площадью 392,53 кв. м., корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код М 1.1 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3, 4.

1.4.3. Нежилые помещения 2 этажа общей проектной площадью 298,17 кв. м., корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код №2.1 - в экспликации помещений №№ 1, 2, 3.

Согласно п. 6.1. заключенного договора передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Предполагаемый срок получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - 3 квартал 2015 г. (до 30.09.2015 г.). Условия договора №2/4-2 от 28.08.2013г. по передаче объекта участнику долевого строительства до настоящего времени не исполнены, объекты долевого строительства в собственность ФИО2 не переданы.

14 февраля 2014 года между ООО «КраснодарФинСтрой» и ООО «Биомаркет» был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 2/4-3 от 14.02.2014г., согласно которому ООО «КраснодарФинСтрой» приняло на себя обязательство в установленный договором срок построить многоэтажный жилой дом литер «2» со встроенно-пристроенными помещениями (5 этап строительства - 2-3 этажный корпус 2/4 (в осях 2-4, Э-ЖЖ) встроенно-пристроенных помещений) по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская д. 208. 

Согласно п. 1.4. договора объект строительства-нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, Э-ЖЖ, 5 этап):

1.4.1. Нежилые помещения общей проектной площадью 323,6 кв. м, расположенные на 1 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 1.2 - номера в экспликации помещений №№ 1,2.

1.4.2. Нежилое помещение общей проектной площадью 427,45 кв. м., расположенное на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код №2.2 - номер в экспликации помещений №№ 1.

1.4.3. Нежилые помещения общей проектной площадью 438,79 кв. м. (включая площадь террасы 272,73 кв. м.), расположенные на 3 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 3.2 - номера в экспликации помещений №№ 1-6.

Всего: объект долевого строительства - 3 (три) нежилых помещения общей проектной площадью 1189, 84 кв. м.

Цена договора согласно п. 3.3. составляет 39 435 730  рублей и подразделяется в связи со множественностью объекта долевого строительства на цены передаваемых прав на конкретное нежилое помещение:

- 13 914 800 руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.1 договора:

- 18 380 350 руб. - нежилое помещение, указанные в п. 1.4.2 договора:

- 7 140 580 руб. - нежилые помещения, указанные в п. 1.4.3 договора.

По договору уступки прав требования от 15 декабря 2014 года, заключенному между ООО «Биомаркет» и ФИО2 (Цессионарий), ФИО2 приобрел права требования по договору № 2/4-3 от 14.02.2014г. на нежилые помещения (корпус 2/4 в осях 2-4, Э-ЖЖ, 5 этап):

1.4.1. Нежилые помещения общей проектной площадью 323,6 кв. м., расположенные на l этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроен но-пристроенных помещений), строительный код № 1.2 - номера в экспликации помещений №№ 1,2.

1.4.2. Нежилое помещение общей проектной площадью 427,45 кв. м., расположенное на 2 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 2.2 - номер в экспликации помещений №№ 1.

1.4.3. Нежилые помещения общей проектной площадью 438,79 кв. м. (включая площадь террасы 272,73 кв. м.), расположенные на 3 этаже, корпус 2/4 (2-3 эт. корпус встроенно-пристроенных помещений), строительный код № 3.2 - номера в экспликации помещений №№ 1-6.

Всего: объект долевого строительства - 3 (три) нежилых помещения общей проектной площадью 1189, 84 кв. м.

Согласно п. 6.1. заключенного между сторонами договора передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Предполагаемый срок получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства - 3 квартал 2015 г. (до 30.09.2015 г.). Условия договора №2/4-3 от 28.08.2013г. по передаче объекта участнику долевого строительства до настоящего времени не исполнены, объекты долевого строительства в собственность ФИО2 не переданы.

В соответствии с п. 2.1. вышеуказанных договоров участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта недвижимости, при условии выполнения участником долевого строительства условия об оплате цены договора, передать объект долевого строительства участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить цену договора в порядке и сроки согласно условиям договора и принять объект долевого строительства при условии получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Условия, предусмотренные п. 2.1. указанных договоров, в части оплаты обусловленных цен участником долевого строительства в данном случае соблюдены, что подтверждается представленными в дело копиями платежных поручений. Ответчик данное обстоятельство не оспаривает. Оплата по договорам цессии истцом также произведена, что подтверждается представленными в дело копиями квитанций к приходным кассовым ордерам.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств из указанных договоров долевого участия в строительстве истец направил в адрес ответчика претензию с требованием уплатить неустойку. Ссылаясь на то, что претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу. 

По итогам рассмотрения материалов дела суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 7.1. вышеуказанных договоров долевого участия в строительстве, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Согласно положениям ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере. В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства вследствие уклонения участника долевого строительства от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого строительства неустойки (пени) при условии надлежащего исполнения застройщиком своих обязательств по такому договору. В случае, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договорам подтверждается материалами дела. Согласно расчету истца общая сумма неустоек составляет 23 634 532 руб. 85 коп., в том числе:

- 3 231 515 руб. 12 коп. по договору № 2/4-1 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.07.2013г. за период с 01.04.2015 г. по 08.02.2016 г.;

- 1 167 959 руб. 39 коп. по договору № 2/4-4 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 14.02.2014г. за период с 01.04.2015 г. по 08.02.2016 г.;

- 2 386 109 руб. 52 коп. по договору № 2/4-5 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 14.02.2014г. за период с 01.04.2015г. по 08.02.2016г.;

- 8 336 746 руб. 50 коп. по договору № 2/4-2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 14.02.2014г. за период с 01.10.2015г. по 10.07.2017г.;

- 8 512 202 руб. 32 коп. по договору № 2/4-3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 14.02.2014г. за период с 01.10.2015 г. по 10.07.2017г. 

Судом проверен расчет истца и признан правильным. Ответчик не заявил об уменьшении размера неустойки, доказательств, свидетельствующих о несоразмерности неустойки нарушенному обязательству, не представил. В связи с этим судом не рассматривается вопрос об уменьшении размера неустойки, неустойка подлежит взысканию в заявленном размере.

Истцом также заявлено требование о возмещении 50 000 руб. расходов на оплату юридических услуг. 

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу частей 1, 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (п. 10).

В обоснование судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела, истцом представлен договор от 17.07.2017 и квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.07.2017 на сумму 50 000 рублей. 

Оценив представленные доказательства по правилам статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признал доказанным наличие судебных расходов истца в заявленной сумме. Данные расходы фактически понесены, относятся к настоящему делу.

В силу п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Доказательств, свидетельствующих о неразумности (чрезмерности) определенной к возмещению суммы судебных расходов не представлено, в связи с чем суд не усматривает обстоятельств, свидетельствующих о необходимости снижения размера компенсации судебных расходов. Учитывая, что решение принято в пользу истца, судебные расходы последнего должны быть возмещены за счет ответчика в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца на уплату государственной пошлины также должны быть возмещены за счет ответчика.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 148, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

Р  Е  Ш  И  Л  :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРФИНСТРОЙ" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 23 634 532 рубля 85 копеек неустойки, 141 173 рубля компенсации расходов на уплату государственной пошлины и 50 000 рублей компенсации судебных издержек.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня вынесения.

Судья                           Непранов Г.Г.