АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-14178/2024

город Вологда

26 августа 2025 года

Резолютивная часть решения вынесена «04» августа 2025 года.

Полный текст решения изготовлен «26» августа 2025 года.

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Курпановой Н.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дербиным Ю.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Эффект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 25 396 рублей пени,

у с т а н о в и л:

Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области (далее - Администрация) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Эффект» (далее - Общество) о взыскании 25 396 рублей пени за просрочку исполнения обязательств по концессионному соглашению от 12.11.2018, за период с 10.01.2024 по 22.11.2024.

Рассмотрение дела назначено в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Определением от 26 мая 2025 года суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебное заседание представители сторон, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела представителей не направили, ответчик отзыв на исковое заявление не предоставил.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 137, 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд считает, что исковые требования Администрации подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Администрацией (концедент) и Обществом (концессионер) заключено концессионное соглашение (далее - Соглашение) от 12.11.2018, по условиям которого концессионер обязался за свой счет реконструировать тепловые сети, расположенные по адресу: Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий рн, 

<

...> в сроки, указанные в разделе 10 Соглашения.

Передача концедентом концессионеру имущества, указанного в Соглашении осуществлена по акту приема-передачи от 12.11.2018.

Согласно пункту 10.1 Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2028 года. Срок реконструкции объекта Соглашения – пять лет, срок ввода в эксплуатацию объектов, подлежащих реконструкции - 31.12.2020, срок использования (эксплуатации) объекта соглашения – 10 лет со дня подписания акта приема-передачи.

Приложением № 4 к Соглашению предусмотрены подлежащие выполнению концессионером мероприятия и срок их выполнения, в том числе «Установка на тепловых вводах зданий балансировочных клапанов для гидравлической накладки ТС ф65-2 шт, ф50-2 шт.», срок исполнения до 31.12.2023.

Поскольку мероприятия в данной части в установленный срок выполнены не были, истец начислил предусмотренную Соглашением неустойку и обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон № 115-ФЗ) по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением (пункт 6 части 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 3 Закона № 115-ФЗ концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения.

В соответствии с частью 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Частью 1 статьи 16 Закона № 115-ФЗ установлено, что стороны концессионного соглашения несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению, предусмотренную настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и концессионным соглашением.

Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 13.7 концессионного соглашения концессионер обязуется уплатить в пользу концедента пени за нарушение сроков исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Истец предъявляет пени за период с 10.01.2024 по 22.11.2024.

Факт нарушения обязательства ответчиком не опровергнут, расчет неустойки не оспорен, контррасчет не предоставлен.

При таких обстоятельствах, неустойка в размере 25 936 рублей подлежит взысканию с ответчика.

Учитывая изложенное, заявленные требования истца подлежат удовлетворению.

В связи с удовлетворением исковых требований, по правилам статьи 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Эффект» в пользу Администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области 25 396 рублей пени.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Эффект» в федеральный бюджет государственную пошли ну в размере 10 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Судья

Н.Ю. Курпанова