Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-105748/2023

28 мая 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  28 мая 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Среброва Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукиной А.Д. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (адрес:  Россия, Псковская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.03.2017, ИНН: 

<

***>);

ответчик:  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (адрес:  Россия, Ленинградская область, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 30.08.2004, ИНН: 

<

***>);

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО1 (онлайн заседание) 

- от ответчика: ФИО2, доверенность от 25.10.2022,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ответчик) о взыскании 993783,76 руб. задолженности по договору № 00-0324/2022 РДПДР от 13.07.2022.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве.

Дело рассмотрено по правилам ст. 156 АПК РФ в отсутствие истца. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, суд установил следующие обстоятельства.

13.07.2022 года между истцом и ответчиком заключен договор подряда                           № 00-0324/2022 РДПДР, согласно которому, ООО «Псковсельхозэнерго» обязуется выполнить комплекс работ по объектам строительства в Кировском, Тосненском, Рахьиском и Морозовском городских поселений Всеволожского района Ленинградской области, входящих в зону обслуживания филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети». При заключении договора согласно п.1.1, сторонами установлены конкретные Этапы работ по объектам:

-Этап 1 - выполнение изыскательных работ и обеспечении получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту;

-Этап 2 - разработка проектно-сметной документации;

-Этап 3 - выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной заказчиком (АО «ЛОЭСК») проектно-сметной документацией.

Конкретные объекты работ определялись заявками заказчика согласно условиям рамочного договора.

Согласно п. 7.2 договора заказчик оплачивает подрядчику выполненные и принятые работы по Этапу № 1 в течении 7   рабочих дней с даты получения счета и подписания акта приемки выполненных работ. 

03.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-1 на объект: «Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №6 ВЛ-6кВ ф.52-19 до проектируемой КТП-6/0,4кВ (ТП-83) в г.Никольское Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1254)»; «Строительство КТП-6/0,4кВ (ТП-83) в г.Никольское Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1255)»; «Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ (ТП-83) до проектируемого КК-0,4кВ на границе участка заявителя в г.Никольское Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1256). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 5459053, 61 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-1 от 03.08.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 55549,76 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей:  по объекту строительства  «ВЛ-6 кВ от опоры №6 ВЛ-6кВ ф.52-19 до проектируемой КТП-6/0,4кВ (ТП-83) в г.Никольское Тосненского района ЛО»; по объекту строительства «КТП-6/0,4кВ (ТП-83) в г.Никольское Тосненского района ЛО»; по объекту строительства  «КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ (ТП-83) до проектируемого КК-0,4кВ на границе участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО» на сумму 55549,  76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 326 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 562 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 645 от 03.10.2022 года. 

            Однако ответчиком, как указывает истец,  задолженность по указанным работам, на общую сумму 55549 рублей 76 копеек, до настоящего времени не оплачена.

            03.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-2 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой КТП 6/0,4кВ (ТП-84) до проектируемого КК-0,4кВ на границе участка заявителя в г. Никольское Тосненского района ЛО», « Строительство КТП 6/0,4кВ (ТП-84) в г. Никольское Тосненского района ЛО», « Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 17 ВЛ-6 кВ ф.52-19 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ (ТП-84) в г. Никольское Тосненского района ЛО». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 5459053, 61 руб.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке  №00-0324/2022 РДПДР-2 от 03.08.2022 определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 55549, 76 руб., величина договорной цены за выполнение дополнительной топографической съемки, а именно 38760,00 руб., величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 5100,00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

 выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 55549, 76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 325 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 561 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 644 от 03.10.2023 года. 

- Дополнительная топографическая  съемка земельного участка на сумму 38760,  00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 434 от 25.11.2022 года, счет-фактурой № 698 от 25.11.2022 года и счетом на оплату № 809 от 25.11.2022 года.

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 5100, 00 руб, что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 42 от 31.01.2023 года, счет-фактурой № 50 от 31.01.2023 года и счетом на оплату № 103 от 31.01.2023 года.

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 13.10.2022 года, по выполнению дополнительной топографической съемки – 07.12.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  10.02.2023 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 99409,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

03.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-3 на объект: «Строительство КЛ-10 кВ от опоры № 9 ВЛЗ-10 кВ ф.500-37 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ТП-274) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО», « Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-274) в п. Красный Бор Тосненского района ЛО». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 5499666 рублей 41 копейка.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке №00-0324/2022 РДПДР-3 от 03.08.2022 г. определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 55549,76 руб., и величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 5100,00 рублей.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

 выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 55549,76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 325 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 561 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 644 от 03.10.2023 года. 

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 5100,00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 43 от 31.01.2023 года, счет-фактурой № 62 от 31.01.2023 года и счетом на оплату № 114 от 31.01.2023 года.

Срок оплаты по Этапу 1 договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 13.10.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  10.02.2023 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 60649,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

03.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-4 на объект: «Строительство ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ (ТП-259) до границы земельного участка заявителя ИП ФИО3 в п.Красный Бор Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1293). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 1732174, 77 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-4 от 03.08.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 55549,76 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ (ТП-259) до границы земельного участка заявителя ИП ФИО3 в п.Красный Бор Тосненского района ЛО» на сумму 55549,76 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 327 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 563 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 646 от 03.10.2022 года. 

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 13.10.2022 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 55549,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-5 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-31 до проектируемого КК-0,4кВ (ИП ФИО4) в г.Шлиссельбург Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1433)». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 1970388, 96 руб.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке №00-0324/2022 РДПДР-5 от 05.08.2022 г. определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 38760, 00 руб., и величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 10200,00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

1. выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 38760, 00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 293 от 13.09.2022 года, счет-фактурой № 503 от 13.09.2022 года и счетом на оплату № 584 от 13.09.2022 года. 

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 10200,00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 429 от 24.11.2022 года, счет-фактурой № 687 от 24.11.2022 года и счетом на оплату № 793 от 24.11.2022 года.

2. разработка и согласование проектно-сметную документацию в соответствии с условиями Договора, что подтверждается Согласованием рабочей документации (письмо №10-03/5329 от 03.11.22 г.). В связи с окончанием работ по разработке проектно-сметной документации Истцом и Ответчиком был подписан акт выполненных работ №451 от 12.12.2022 года, согласно которому этап 2 работ был выполнен в полном объеме без замечаний и в установленные Договором сроки. Согласно акту работы были выполнены на сумму 98677,74 руб. В связи с подписанием акта, Ответчику в тот же день были выставлены счет на оплату (№852 от 12.12.2022 года) и счет-фактура (№742 от 12.12.2022 г). 

Срок оплаты по Этапу 2 Договора для Заказчика наступил 22.12.2022 года.

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 23.09.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  06.12.2022 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 147637,74 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-6 на объект: «Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-34 до границы участков заявителя в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1251). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 3373603, 97 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-6 от 05.08.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 38760, 00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «ВЛИ-0,4кВ от ТП-34 до границы участков заявителя в г. Шлиссельбург Кировского р-на ЛО» на сумму 38760,00 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 294 от 13.09.2022 года, счет-фактурой № 511 от 13.09.2022 года и счетом на оплату № 586 от 13.09.2022 года. 

Однако данные работы Заказчиком оплачены не были.

            Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 23.09.2022 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 38760,00 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-7 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от КК-0,4кВ от ТП-64 (инв №100001825) до проектируемого КК-0,4кВ в д. Пустынка Тосненского р-на ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1281). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 2773547,48 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-7 от 05.08.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 94309, 76 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «КЛ-0,4кВ от КК-0,4кВ от ТП-64 (инв №100001825) до проектируемого КК-0,4кВ в д. Пустынка Тосненского р-на ЛО» на сумму 94309, 76 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 331 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 560 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 643 от 03.10.2022 года.

Однако данные работы Заказчиком оплачены не были.

            Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 13.10.2022 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 94309,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-8 на объект: «Строительство КТП 6/0,4 кВ (ТП-116) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО», «Строительство ВЛЗ-10 от опоры № 12 ВЛЗ-6 кВ ф.52-12 до проектируемой КТП 6/0,4 кВ (ТП-116) в п. Ульяновка Тосненского района ЛО», «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП 6/0,4 кВ (ТП-116) до границ участков заявителей в п. Ульяновка Тосненского района ЛО». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 14239287,71 руб.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке №00-0324/2022 РДПДР-8 от 05.08.2022 г. определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 133069, 76 руб., и величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 10200,00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

 выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 133069,76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 348 от 18.10.2022 года, счет-фактурой № 587 от 18.10.2022 года и счетом на оплату № 669 от 18.10.2023 года. 

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 10200,00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 15 от 16.01.2023 года, счет-фактурой № 18 от 16.01.2022 года и счетом на оплату № 28 от 16.01.2023 года.

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 28.10.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  26.01.2023 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 143269,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-9 на объект: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ТП-117) в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО», «Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ (ТП-117) до проектируемого КК-0,4 кВ в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО», «Строительство КТП-10/0,4 кВ (ТП-117) в п. Ульяновка Тосненского р-на ЛО». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 9063515, 37 руб.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке №00-0324/2022 РДПДР-9 от 05.08.2022 г. определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 82681,76 руб., и величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 10200,00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

 выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 82681,76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 323 от 03.10.2022 года, счет-фактурой № 549 от 03.10.2022 года и счетом на оплату № 632 от 03.10.2023 года. 

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 10200 рублей 00 копеек, что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 16 от 16.01.2023 года, счет-фактурой № 17 от 16.01.2023 года и счетом на оплату № 27 от 16.01.2023 года.

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 13.10.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  26.01.2023 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 92881,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

18.08.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-10 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-56 до проектируемого КК-0,4кВ (ХМН Групп) в г. Никольское Тосненского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1461). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 1203000,60 руб.

Истец – ООО «Псковсельхозэнерго» разработал и согласовал проектно-сметную документацию в соответствии с условиями Договора, что подтверждается Согласованием рабочей документации (письмо вх. №10-03/5327 от 03.11.2022 года). В связи с окончанием работ по разработке проектно-сметной документации Истцом и Ответчиком был подписан акт выполненных работ №452 от 12.12.2022 года, согласно которому этап 2 работ был выполнен в полном объеме без замечаний и в установленные Договором сроки. Согласно акту работы были выполнены на сумму 23735,94 руб. В связи с подписанием акта, Ответчику в тот же день были выставлены счет на оплату (№853 от 12.12.2022 года) и счет-фактура (№452 от 12.12.2022 г). 

Срок оплаты по Этапу 2 Договора для Заказчика наступил 22.12.2022 года. 

13.09.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-11 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-47 до проектируемого КК-0,4кВ в районе участка ФИО5 в г.Шлиссельбург ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1576). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 1427650, 71 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-11 от 13.09.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 38760, 00 руб. 

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «КЛ-0,4кВ от ТП-47 до проектируемого КК-0,4кВ в районе участка ФИО5 в г.Шлиссельбург ЛО» на сумму 38760,00 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 444 от 30.11.2022 года, счет-фактурой № 716 от 30.11.2022 года и счетом на оплату № 825 от 30.11.2022 года.

Однако данные работы Заказчиком оплачены не были.

            Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 12.12.2022 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 38760,00 руб., до настоящего времени не оплачены.

05.10.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-12 на объект: «Строительство ТП мощностью 0,16 МВА, ЛЭП-10кВ -0,15 км по договору ТП №10-2581/005-ПСФ-22 в п. Ульяновка Тосненский р-н ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1705». Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 5173082, 89 руб.

Протоколами согласования договорной цены по Заявке №00-0324/2022 РДПДР-12 от 05.10.2022 г. определена величина договорной цены за выполнение топографической съемки земельного участка, а именно 55549,76 руб., и величина договорной цены за работы по оформлению схемы границ земель, а именно 10200,00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора были выполнены данные работы, однако Заказчиком оплачены не были:

 выполнение изыскательных работ и обеспечение получения разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по объекту (этап 1), а именно:

- Топографическая  съемка земельного участка на сумму 55549,76 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ № 432 от 21.11.2022 года, счет-фактурой № 691 от 21.11.2022 года и счетом на оплату № 797 от 21.11.2023 года. 

- Оформление схемы границ земель, предполагаемых к использованию под размещение объекта на сумму 10200,00 руб., что подтверждается актом приемки-сдачи выполненных работ №14 от 16.01.2023 года, счет-фактурой № 16 от 16.01.2023 года и счетом на оплату № 26 от 16.01.2023 года.

Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) по выполнению топографической съемки  для Заказчика наступил 01.12.2022 года, по оформлению схемы границ земель -  26.01.2023 года соответственно.

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 65749,76 руб., до настоящего времени не оплачены.

12.10.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-13 на объект: «Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-7 от ТП-36 до границы участка заявителя ФИО6 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1559). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 1745865,00 руб.

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-13 от 12.10.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 38760, 00 руб.

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «ВЛИ-0,4кВ от опоры №5 ВЛИ-0,4кВ Л-7 от ТП-36 до границы участка заявителя ФИО6 в г. Шлиссельбург Кировского района ЛО» на сумму 38760,00 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 393 от 07.11.2022 года, счет-фактурой № 647 от  07.11.2022 года и счетом на оплату № 755 от 07.11.2022 года.

Однако данные работы Заказчиком оплачены не были.

            Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 17.11.2022 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 38760,00 руб., до настоящего времени не оплачены.

02.12.2022 года была получена и согласована Заявка № 00-0324/2022 РДПДР-15 на объект: «Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой Тп-231 до проектируемого КК-0,4кВ 10-1155/005-ПСФ-22 в г.Кировск Кировского района ЛО (22-1-10-1-08-06-0-1821). Согласно Заявке стоимость работ по различным этапам строительства  составляла 2972745,77 руб. 

Стоимость топографической съемки по заявке №00-0324/2022 РДПДР-15 от 02.12.2022 г. определена протоколом согласования договорной цены к Заявке и составляет 38760,00 руб. 

Подрядчиком по указанной заявке в рамках исполнения данного Договора была выполнена топографическая съемка земельного участка, горизонтальная и вертикальная съемка территории в масштабе 1:500, съемка наземных и подземных сооружений, инженерных коммуникаций, составление совмещенного плана в объеме до 1,0 га, с учетом затрат по согласованию инженерных сетей  по объекту строительства «КЛ-0,4кВ от проектируемой Тп-231 до проектируемого КК-0,4кВ 10-1155/005-ПСФ-22 в г.Кировск Кировского района ЛО» на сумму 38760, 00 руб., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 19 от 23.01.2023 года, счет-фактурой № 20 от  23.01.2023 года и счетом на оплату № 30 от 23.01.2023 года.

Однако данные работы Заказчиком оплачены не были.

            Срок оплаты по Этапу 1 Договора (изыскательные и разрешительные работы) для Заказчика наступил 02.02.2023 года. 

            Денежные средства по указанным работам, на общую сумму 38760,00 руб., до настоящего времени не оплачены.

Как указывает истец, наличие указанной задолженности по всем Заявкам так же подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года подписанным сторонами.

До 01.04.2023 года оплата, по указанным работам, заказчиком произведена не была, в связи с чем 10.04.2023, Истец направил в адрес Заказчика претензию о необходимости оплаты задолженности по Договору Исх. 199 от 10.04.2022 года.

Таким образом, в настоящий момент сумма основного долга АО "ЛОЭСК-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"  перед ООО «Псковсельхозэнерго»» за выполненные работы по Договору подряда № 00-0324/2022 РДПДР от 13.07.2022 года составляет 993783,76 руб.

Истец, ссылаясь на то обстоятельство, что ответчиком обязательства по оплате работ в заявленном размере не исполнены, обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик в представленном в материалы дела  отзыве на иск указал, что истцом  неверно указаны обстоятельства исполнения заявок по договора,  в связи с чем неверно определены сроки оплаты. 

Так, пунктом 6 договора стороны согласовали, что требования к результатам инженерных изысканий и перечень документации, подлежащим оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании выполнения работ по Этапу 1, определяются Заданием на проведение работ по получению разрешительной документации.

В соответствии с п. 5 Задания на проведение работ по получению разрешительной документации (приложение № 1) к заявкам к Договору в работы по этапу 1 входило выполнение 11 отдельных видов работ, в том числе получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора) и оформление акта приёмки законченных строительством Объектов (форма КС-11), а также иные работы  по данному этапу. 

Как следует из отзыва ответчика, Подрядчиком выполнена только топографическая съемка, что является лишь частью работ по этапу 1.

Стороны согласовали порядок расчетов по Договору разделом 7 Договора.

Так, в соответствии с п. 7.2 Договора  Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные  и принятые работы по Этапу 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

-заключенного обеими Сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1 (а не об установлении стоимости отдельного вида работ по этапу 1);

-подписанного в соответствии с п.п. 6.3.4, 6.3.5 Договора обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

-выставленного Подрядчиком счета-фактуры.

Согласно п. 7.8 Договора по условиям настоящего Договора авансирование работ не предусмотрено. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

Также не предусмотрена частичная оплата отдельных выполненных работ по этапу 1.

Однако на текущую дату все работы по этапам 1 по следующим заявкам: № 00-0324/2022 РДПДР-1 от 03.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-2 от 03.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-3 от 03.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-4 от 03.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-6 от 05.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-7 от 05.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-8 от 05.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-9 от 05.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-10 от 18.08.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-11 от 13.09.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-12  от 05.10.2022, № 00-0324/2022 РДПДР-13 от 12.10.2022 и № 00-0324/2022 РДПДР-15  от 02.12.2022 не выполнены подрядчиком. 

Все вышеперечисленные заявки к рамочному договору не расторгнуты сторонами и являются действующими, а, следовательно, последствия ст. 729 ГК РФ не распространяются на взаимоотношения сторон и у АО «ЛОЭСК» отсутствуют основания для оплаты отдельных видов работ по этапам 1  данных заявок, по актам сдачи-приемки выполненных работ, приложенных Истцом к исковому заявлению по всем перечисленным Заявкам.

Также ответчик указал, что   полагает возможным осуществить зачет денежного требования - пени (неустойки) за нарушение сторонами исполнений обязательств по заявке № 00-0324/2022 РДПДР-5 от 05.08.2022, а именно, за просрочку ООО «Псковсельхозэнерго» выполнения работ по Заявке 5. 

АО «ЛОЭСК» имеет право предъявить Истцу неустойку в размере 193098,12 руб., исходя из следующего.

Согласно п. 5.2 договора Сроки выполнения работ по каждой Заявке – не более 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Заявки обеими Сторонами, если иной срок не установлен в Заявке.

Таким образом, согласно доводов ответчика, истец должен был выполнить работы по Заявке 5 не позднее 14.10.2022.

Однако в вышеуказанную дату работы подрядчиком по заявке 5 не были выполнены. Заявка расторгнута сторонами 28.04.2023.

Таким образом, прострочка выполнения работ по Заявке 5 составляет 196 дней. 

В соответствии с положениями статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу приведенной нормы, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Как следует из материалов дела истец просит взыскать задолженность в общем размере 993783,76 руб., в том числе по заявке № 00-0324/2022 РДПДР-5 (расторгнута  сторонами 28.04.2023)  в размере 147637,74 руб.   

Ответчик, возражая против удовлетворения иска в полном объеме, также указал на наличие оснований для проведения зачета однородных требований, а именно зачета неустойки за просрочку выполнения работ в счет задолженности за выполненные  работы по заявке 5. 

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования; для зачета достаточно заявления одной стороны.

Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" если обязательства были прекращены зачетом, однако одна из сторон обратилась в суд с иском об исполнении прекращенного обязательства либо о взыскании убытков или иных санкций в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательства, ответчик вправе заявить о состоявшемся зачете в возражении на иск; сторона по своему усмотрению вправе заявить о зачете как во встречном иске, так и в возражении на иск, юридические и фактические основания которых исследуются судом равным образом; в частности, также после предъявления иска ответчик вправе направить истцу заявление о зачете и указать в возражении на иск на прекращение требования, по которому предъявлен иск, зачетом.

В соответствии с п. 9.1 Договора 1 за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (этапа работ), установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,05% от предельной цены Договора 1, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки.  

Согласно расчету ответчика, приложенному к отзыву на иск, сумма неустойки за просрочку сроков выполнения работ по договору за период с 15.10.2022 по 28.04.2023 составляет 193098,12 руб. 

Суд, проверив расчет неустойки, представленный ответчиком, с учетом доводов истца,  считает заявление ответчика о зачете встречных однородных требований  соответствует статье 410 ГК РФ, в связи с чем требование о взыскании 147637,74 руб.   задолженности по заявке 5 подлежит прекращению. 

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ, снижения размера неустойки, с учетом условий пункта 9.1 договора, суд не усматривает. 

В соответствии с пунктом 7.1 договора, оплата осуществляется за выполненные по заявкам работы по объекту в указанном в договоре порядке, определяющим порядок оплаты работ за отдельные этапы работ по объекту, которым стороны руководствуются в случае наличия такого этапа выполнения работ по объекту в соответствии с заявкой.

Пунктами 7.2 договора  заказчик оплачивает подрядчику выполненные  и принятые работы по Этапу 1 в течение 30   календарных дней с даты получения соответствующего счета Подрядчика на основании следующих одновременно представленных документов:

-заключенного обеими сторонами дополнительного соглашения об установлении стоимости работ по Этапу 1 (а не об установлении стоимости отдельного вида работ по этапу 1);

-подписанного в соответствии с п.п. 6.3.4, 6.3.5 договора обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу 1;

-выставленного подрядчиком счета-фактуры.

Оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, изучив доводы сторон, суд, принимая во внимание произведенный зачет встречных однородных требований по заявке 5, а также учитывая положения пунктов 7.1, 7.2 договора, считает заявленные истцом требования о взыскании задолженности по заявкам 1 Этапа договора (за исключением заявки 5)  преждевременны, подлежат отклонению,  поскольку как усматривается из материалов дела,  подрядчиком исполнены обязательства только в части работ по топографической съемке, что в силу условий договора является лишь частью работ Этапа 1, в то время как договором оплата частично выполненных работ не предусмотрена. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине остаются на истце. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

В иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Среброва Т.А.