Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-199/2021

20 апреля 2021 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 13.04.2021

Решение изготовлено в полном объеме 20.04.2021

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Терских В. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Дмитриевой К.М., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации муниципального образования «Город Нерюнгри» (ИНН 1434031483, ОГРН 1061434000011) от 12.01.2021 № 30-07.1 к обществу с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ИНН 1435093877, ОГРН 1021401060328) об обязании устранить выявленные строительные недостатки,

без участия представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Администрация муниципального образования «Город Нерюнгри» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилась в суд с иском от 12.01.2021 № 30-07.1 к обществу с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании в течение тридцати дней с  момента вступления в законную силу судебного акта устранить выявленные недостатки в жилом доме №2 корпус 2 по улице Лужников города Нерюнгри:

- около 1-го подъезда на покрытии тротуара устранить разрушение из бетона на площади 17 кв.м в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- около 1-го подъезда произвести ремонт отмостки из бетона на площади 43,44 кв.м в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- в 1-м подъезде на 1-м этаже произвести ремонт плинтуса из кафельной плитки, на 5-м этаже произвести ремонт напольной кафельной плитки в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  в 1-м подъезде на площадке крыльца 1-го подъезда выполнить укладку кафельной плитки в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- в 1-м подъезде произвести ремонт штукатурно-окрасочного слоя на стеновой панели между 2 и 3 этажами лестничного марша, произвести ремонт штукатурно-окрасочного слоя 5 этажа и стеновой панели 1-го этажа в районе входного портала лифта в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- около 1-го подъезда произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку бетона произвести в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- во 2-м подъезде на 1-м этаже произвести укладку кафельной напольной плитки, в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- около 2-го подъезда произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку произвести в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- во 2-м подъезде произвести восстановление штукатурно-окрасочного слоя стеновой панели в районе входного портала лифта 1-го этажа, произвести восстановление штукатурно-окрасочного слоя плиты перекрытия в межквартирном холле 5-го этажа в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

В силу части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Определение суда о принятии искового заявления от 25.01.2021 получено ответчиком 04.02.2021 согласно почтовому уведомлению №67799955047141.

С учетом изложенного, суд считает ответчика извещенным о месте и времени судебного заседания.

23.03.2021 от истца поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствии представителя истца.

Судом объявлен перерыв в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 09 час. 00 мин. 13 апреля 2021 года. О перерыве сделано публичное извещение на сайте Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): http:// yakutsk.arbitr.ru.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Судом установлены обстоятельства дела.

01.02.2016 между истцом (участник) и ответчиком (застройщик) заключен договор  № 0116300000315000529-0083312-02/001А на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Согласно пункту 1.1. договора застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории, по строительному адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, микрорайон «Сосновый», поз. 8 на земельном участке с кадастровым номером 14:19:102018:2616 по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, с юго-восточной стороны от пересечения ул. Чурапчинской и ул. Сосновой и после получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию передать участнику объекты строительства, указанные в пункте 1.2 договора, а участник обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять указанные объекты строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

Цена договора составляет 79 912 542,15 руб. (пункт 3.1. договора).

29.04.2016 Администрацией муниципального образования "город Нерюнгри" выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU14-509101-06-2016, согласно которому 60-квартирный пятиэтажный монолитный жилой дом в микрорайоне «Сосновый» (позиция 5) г. Нерюнгри, расположенный по адресу: РС (Я), 

<

...>, на земельном участке номером: 14:19:102018:2616, введен в эксплуатацию.

28.09.2020 составлен акт осмотра жилого помещения, из которого следует, что в 1 подъезде многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, на покрытии тротуара выполненного из бетона имеются разрушения на площади 17 м2, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», или уложена не соответствующая марка бетона; отмостка выполненная из бетона имеет следы разрушения на площади 43,44 м2, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», или уложена не соответствующая марка бетона; лавочки и урны установлены управляющей организацией; озеленение произведено некачественно и не в полном объеме, все посаженные деревья высохли. С учетом изложенного ООО «Алькор-7» предложено произвести работы по восстановлению отмостки, тротуара, произвести повторное озеленение.

28.09.2020 составлен акт осмотра жилого помещения, из которого следует, что в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлено следующее:

в 1 подъезде:

- отслоение плинтуса из кафельной плитки 1 этаж, половой кафельной плитки 5 этаж, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- разбита кафельная плитка на площадке крыльца, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4. СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- наличие трещин штукатурно-окрасочного слоя на стеновой панели между 2 и 3 этажами лестничного марша, 5 этажа и стеновой панели 1 этажа в районе входного портала лифта, что является нарушением СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- разрушение защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

во 2 подъезде:

- разрушение кафельной половой плитки 1 этаж, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- разрушение  защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- отслоение штукатурно-окрасочного слоя стеновой панели в районе входного портала лифта 1 этажами, отслоение штукатурно-окрасочного плиты перекрытия в межквартирном холле 5 этажа, что является нарушением СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Выводы комиссии: застройщику ООО «Алькор-7» необходимо произвести ремонт и отделку стен и потолков в соответствии с нормами, а именно произвести штукатурку, затирку и покраску стен и плиты перекрытия, укладку и ремонт половой кафельной плитки в местах общего пользования, восстановить защитный слой бетона закладных деталей ограждения пандуса, закрепить дверной блок тамбурной двери.

15.10.2020 истец направил ответчику претензию с требованием в течение 20 календарных дней с момента получения настоящей претензии устранить выявленные недостатки, в том числе в многоквартирном доме, расположенном по адресу: РС (Я), 

<

...>.

В связи с тем, что указанные требования остались без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

По правовой природе заключенный сторонами договор квалифицируется как договор долевого участия в строительстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон №214-ФЗ) по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В статье 8 Закона №214-ФЗ закреплено, что передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. Обязательства застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (статья 12 Закона о долевом строительстве).

Из материалов дела следует, что объект долевого строительства передан истцу не ранее апреля 2016 года, что свидетельствует из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию №RU14-509101-06-2016 от 29.04.2016.

Согласно части 1 статьи 7 N 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами (часть 7 статьи 7 Закона                 N 214-ФЗ).

В силу части 2 статьи 7 Закона N 214-ФЗ в случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения цены договора; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Гарантийный срок для объекта долевого строительства не может составлять менее чем пять лет (часть 5 статьи 7 Закона N 214-ФЗ).

Пунктом 6.1. договора предусмотрено, что гарантийный срок на объекты долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объектов долевого строительства, составляет 5 лет со дня передачи объектов долевого строительства участнику долевого строительства по передаточным актам.

Указанный гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приема передачи на объект долевого строительства. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объектов долевого строительства при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока.

Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объектов долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в случае, если они произошли вследствие нормального износа таких объектов долевого строительства или их частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу их эксплуатации либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами (пункт 6.2. договора).

Согласно ч. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ под гарантийными обязательствами понимаются требования заказчика к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Действующим законодательством в пределах гарантийного срока установлена презумпция вины застройщика в недостатках (дефектах) объекта долевого строительства, в связи с чем, бремя доказывания указанных в приведенной норме обстоятельств лежит на застройщике.

Истец обратился с иском в пределах гарантийного срока.

Пунктом 5.4. договора предусмотрено, что при обнаружении участником долевого строительства недостатков объектов долевого строительства сторонами составляется акт обнаружения недостатков, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения застройщиком. Для составления акта обнаружения недостатков стороны совместно или любая из сторон вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. При отказе (уклонении) застройщика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается участником долевого строительства и экспертной организацией.

Застройщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте обнаружения недостатков, обеспечив при этом сохранность объектов долевого строительства или их части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу (пункт 5.5. договора).

Как следует из материалов дела, в процессе эксплуатации дома, расположенного по адресу: РС (Я), 

<

...>, выявлено, что на покрытии тротуара, выполненного из бетона, имеются разрушения на площади 17 м2, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», или уложена не соответствующая марка бетона; отмостка выполненная из бетона имеет следы разрушения на площади 43,44 м2, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», или уложена не соответствующая марка бетона; лавочки и урны установлены управляющей организацией; озеленение произведено некачественно и не в полном объеме, все посаженные деревья высохли; в 1 подъезде: отслоение плинтуса из кафельной плитки 1 этаж, половой кафельной плитки 5 этаж, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; разбита кафельная плитка на площадке крыльца, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4. СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; наличие трещин штукатурно-окрасочного слоя на стеновой панели между 2 и 3 этажами лестничного марша, 5 этажа и стеновой панели 1 этажа в районе входного портала лифта, что является нарушением СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; разрушение защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; во 2 подъезде: разрушение кафельной половой плитки 1 этаж, укладка произведена с нарушениями инструкции по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; разрушение  защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладка бетона произведена с нарушением СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; отслоение штукатурно-окрасочного слоя стеновой панели в районе входного портала лифта 1 этажами, отслоение штукатурно-окрасочного плиты перекрытия в межквартирном холле 5 этажа, что является нарушением СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Письмом от 10.09.2020 № 4182-03 участник долевого строительства известил застройщика о том, что будет проводиться комиссионное обследование 28.09.2020, в связи с чем, предложил направить представителя застройщика на обследование. Указанное извещение направлено по электронной почте.

Между тем застройщик своего представителя на обследование не направил.

По результатам произведенного осмотра 28.09.2020 комиссией выявлены недостатки выполненных работ, о чем составлены акты осмотра жилого помещения.

Ответчиком факт наличия недостатков, указанных в акте, не оспорен.

В нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не доказал соответствие объекта строительства установленным требованиям, а также не подтвердил наличие в настоящем случае обстоятельств, являющихся основанием для освобождения его от ответственности (п. 2 ст. 471 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 7 ст. 7 Закона N 214-ФЗ).

Ходатайство о назначении строительно-технической экспертизы ответчиком также не заявлено.

В соответствии со ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

С учетом изложенного, исследовав и оценив представленные в материалы дела документы в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

Истец от уплаты государственной пошлины освобожден.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

С учетом результатов рассмотрения дела госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-7» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение тридцати дней с  момента вступления в законную силу судебного акта устранить выявленные недостатки в жилом доме №2 корпус 2 по улице Лужников города Нерюнгри:

- устранить разрешения бетона на покрытии тротуара на площади 17 кв.м около 1-го подъезда в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- произвести ремонт отмостки из бетона на площади 43,44 кв.м около 1-го подъезда в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- в 1-м подъезде на 1-м этаже произвести ремонт плинтуса из кафельной плитки, на 5-м этаже произвести ремонт напольной кафельной плитки в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  в 1-м подъезде на площадке крыльца 1-го подъезда выполнить укладку кафельной плитки в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- в 1-м подъезде произвести ремонт штукатурно-окрасочного слоя на стеновой панели между 2 и 3 этажами лестничного марша, произвести ремонт штукатурно-окрасочного слоя 5 этажа и стеновой панели 1-го этажа в районе входного портала лифта в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- около 1-го подъезда произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку бетона произвести в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- во 2-м подъезде на 1-м этаже произвести укладку кафельной напольной плитки, в соответствии с Инструкцией по облицовке керамическими и полимерными плитками на клеях и клеящих мастиках ВСН 50-96 и п.7.4 СП 71.13330.2017, актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- около 2-го подъезда произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку произвести восстановление защитного слоя бетона закладных деталей поручня пандуса, укладку произвести в соответствии с СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- во 2-м подъезде произвести восстановление штукатурно-окрасочного слоя стеновой панели в районе входного портала лифта 1-го этажа, произвести восстановление штукатурно-окрасочного слоя плиты перекрытия в межквартирном холле 5-го этажа в соответствии с СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алькор-7» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

                     В.С.Терских