Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-29689/2023

23 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  06 октября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  23 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Техномир" (адрес: 197374, 

<

...>, литер А, этаж 1, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания" (адрес: 600005, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 3 902 539,2 руб. 

 

при участии 

- от истца: ФИО2 (доверенность от 10.07.2023)                     

- от ответчика: не явился (извещен)  

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Техномир" (далее – ООО "Техномир") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания" (далее – ООО "ОСК") и с учетом принятого судом уменьшения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) просило взыскать с ответчика 3 430 100 руб. задолженности по договору от 18.04.2022 № 2022-0082-3 (далее – Договор) и 472 439,2 руб. неустойки за период с 19.08.2022 по 14.07.2023.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражает против удовлетворения иска.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд  установил следующее.

На основании Договора ООО "Техномир" (подрядчик) выполнило работы по шефмонтажу и пуско-наладке системы холодоснабжения мультитемпературного и среднетемпературного складов и сдало результат выполненных работ заказчику, а ООО "ОСК"  (заказчик) – приняло выполненные работы по актам о приемке выполненных работ от 09.06.2022 № 40, от 21.07.2022 № 53, от 16.09.2022 № 55, от 21.11.2022 № 70, от 22.09.2022 № 60 и обязалось оплатить их в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта и направления счёта на оплату (пункт 2.3 Договора).

Работы частично оплачены ответчиком, вместе с тем доказательств оплаты работ в полном объеме ответчиком суду не представлено, задолженность составляет 3 430 100 руб., в связи с чем иск на основании пункта 1 статьи 330, статьи 702, пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению в части взыскания 3 430 100 руб. задолженности и 472 439,2 руб. неустойки, начисленной в соответствии с пунктом 6.2 Договора в размере 0,1% стоимости не вовремя оплаченной работы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ и/или суммы задержанного платежа.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Объединенная строительная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Техномир" 3 430 100 руб. задолженности, 472 439,2 руб. неустойки и 44 747 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Яценко О.В.