Арбитражный суд Республики Тыва

Кочетова ул., д. 91, г. Кызыл, 667000, тел. (39422) 2-11-96 (факс) 

http://www.tyva.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Кызыл

Дело № А69-3231/2019

Резолютивная часть решения объявлена «09» сентября 2020 года. 

Полный текст решения изготовлен «14» сентября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Тыва в составе: судьи Чигжита Ш.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии г. Кызыла (дата регистрации: 24.03.2009, ИНН 

<

***>, адрес: 667005, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью "СИБПРОЕКТ" (дата регистрации: 06.04.2016, ИНН 

<

***>, адрес: 630110, 

<

...>, каб. 7)

о взыскании 120230 руб. 83 коп.;

установил:

Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла (далее – истец)  обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СИБПРОЕКТ" (далее – ответчик) о  взыскании 120230 руб. 83 коп. пени по контракту № Ф.2017.453747 от 23.10.2017 за период с 22.12.2017 по 13.11.2019.

 Дело рассмотрено в отсутствие сторон.

Представители ответчика ни разу не являлись ни в одно из судебных заседаний арбитражного суда, извещались надлежащим образом. Свою процессуальную обязанность по представлению отзыва на исковое заявление также не исполнил. Ответчик несёт риск наступления последствий совершения или несовершения процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, арбитражный суд признает требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон № 44-ФЗ) 22.04.2019 по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме № Ф.2017.453747 от 23.10.2017 между Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла (Заказчик) и ООО «Сибпроект» (Исполнитель) заключен муниципальный контракт на выполнение работ: «Корректировка генерального плана городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» и «Корректировка Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» в объёме, установленном Техническим заданием в соответствии с условиями которого исполнитель принял на себя обязательства в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта завершить работы.

Цена контракта составляет 700000 руб.

В нарушение положений контракта, работы в установленный срок не выполнены.

Согласно пункту 26 контракта, в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (пункт 27 контракта).

За просрочку исполнения обязательств Обществу начислены пени в размере 120230 руб. 83 коп. за период с 22.12.2017 по 13.11.2019.

Заказчиком в адрес Общества было направлено требования об уплате неустойки № 03-12-19/1773 от 28.03.2019, № 03-12-19/3471 от 04.07.2019.

Поскольку в добровольном порядке требование не исполнено, истец обратился с настоящим иском в суд.

Согласно пункту 40 Контракта, претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 10 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Тыва, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора.

Между сторонами возникли правоотношения по подряду, которые регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии со статьёй 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Материалами дела подтверждается, что между Департаментом архитектуры, градостроительства и земельных отношений Мэрии г. Кызыла и ООО «Сибпроект» заключён муниципальный контракт на выполнение работ: «Корректировка генерального плана городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» и «Корректировка Правил землепользования и застройки городского округа «Город Кызыл Республики Тыва».

Цена контракта составила 700000 руб.

В соответствии с пунктом 9 контракта сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: со дня заключения контракта в течении 60 календарных дней.

Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или этапа работ (пункт 10 контракта).

За 5 дней до окончания срока выполнения работ (этапа работ) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности выполненных работ (этапа работ) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности выполненных работ (этапа работ) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом). Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) в трех экземплярах. К акту сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ. При сдаче результата выполнения работ Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполнения работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований (пункт 11 контракта).

По состоянию на 13.11.2019 работы не выполнены.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса  Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Судом проверен представленный истцом расчет неустойки и признаётся неверным.

Согласно расчёту суда, размер пени составляет 120050 руб. за период с 23.12.2017 по 13.11.2019.

Учитывая отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих своевременное исполнение ответчиком обязательств по контракту, суд удовлетворяет требование истца о взыскании неустойки (пени) частично в размере 120050 руб.

Возражения ответчика судом не принимаются во внимание, поскольку доказательства своевременного исполнения своих обязательств (акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) или мотивированный отказ заказчика от приемки работ, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта) ответчик не представил.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Уплату государственной пошлины следует отнести на ответчика в размере 4596 руб. пропорционально (99,76%) размеру удовлетворенных исковых требований.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Тыва 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект» (дата регистрации: 06.04.2016, ИНН 

<

***>, адрес: 630110, 

<

...>, каб. 7) в пользу Департамента архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии г. Кызыла (дата регистрации: 24.03.2009, ИНН 

<

***>, адрес: 667005, 

<

...>)  пени по контракту № Ф.2017.453747 от 23.10.2017 за период с 23.12.2017 по 13.11.2019 в размере 120050 руб.

В остальной части пени в размере 180 руб. 83 коп. в удовлетворении отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибпроект» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4596 руб.

Решение может быть обжаловано в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия путём подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Тыва.

СудьяШ.С.Чигжит