Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

16 декабря 2019 годаДело № А56-112303/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФАБИЗНЕСГРУПП" (119361, Москва город, улица Очаковская Б, дом 47А, строение 1, эт. 6, помещение 10,11,12,13. ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ВСЕ ОСТЕКЛЕНИЕ" (194044, Санкт-Петербург город, улица Менделеевская, дом 2, литер А, помещение 7-Н, К. 15 (ОФ. 208). ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 440 000 руб. неосновательного обогащения по договору подряда от 27.06.2018 № 27/06/18;

Цена договора составляет 580 688 руб. (приложение № 1 к договору).

Признавая выполнение исполнителем работ по спорному договору в сумме 387 125,33 руб. и считая, что неотработанный аванс составляет 52 874,66 руб., истец исходит из того, что в пункте 1 таблицы приложения № 1 к договору определена поставка 6 стекол.

Как следует из указанного пункта, поставке подлежало 28 кв.м стекла стоимостью 1 кв.м в сумме 6590 руб., итого на общую сумму 184 520 руб.

При этом, исходя из второго листа приложения № 1 к договору на чертеже отражено 4 стекла (2 шт. одного размера, 2 шт. другого размера).

Истец произвел расчет выполненных работ по приложенным ответчиком акту от 14.07.2018 № 32, от 25.07.2018 № 770, универсальному передаточному документу от 25.07.2018 № 180725, согласно которым поставлено 4 стекла.

Как следует из акта от 14.07.2018 № 32, произведена поставка и монтаж 4-х стекол, общей площадью 28,4316 кв.м (2094 мм * 3800 мм * 2 шт + 1647 мм * 3800 мм * 2 шт), что соответствует условиям договора.

Учитывая условие пункта 3.3 договора и фактическое условие по поставке и монтажу 4-х стекол, исполнитель выполнил договор в указанной части, стоимость которой превышает размер перечисленного заказчиком аванса (440 000 руб.), учитывая, что у истца остались возражения по невыполнению исполнителем подготовки рабочей документации (20 000 руб.), в связи с чем доводы истца о том, что аванс не отработан, не подтвержден материалами дела.

Поскольку истцу была представлена отсрочка по оплате государственной пошлины, с него подлежит взысканию 11800 руб. в доход федерального бюджета.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФАБИЗНЕСГРУПП" в доход федерального бюджета 11800 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.