РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

16.02.2018 года                                                           Дело № А40-190736/17-110-1753

Резолютивная часть решения объявлена 09.02.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 16.02.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МСО" (ОГРН 

<

***>, 307150, область Курская, район Железногорский, слобода Михайловка, улица Строительная, 3А) к акционерному обществу "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" (ОГРН 

<

***>, 141207, 

<

...>), третье лицо: ФИО2 (400002, г. Волгоград, а/я 1658).

о взыскании 10 480 274,61 рублей,

при участии:

от истца – ФИО3 по дов. от 11.07.2017,

от ответчика - не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МСО" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к акционерному обществу "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" о взыскании 10 038 163 руб.задолженности, 442 111 руб. 32 коп. процентов, о расторжении договоров  № СМР-946/16 от 05.10.16, №СМР-925/16 от 27.10.2016, СМР-926/16  от 21.11.2016.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

При этом ответчик заявил ходатайство ответчик об оставлении искового заявление без рассмотрения, в связи  с тем что требование должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Рассмотрев ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения, поскольку  заявление о признании должника принято  не позднее 15.09.2016, обязательства по оплате возникли после 31.12.2016, то есть платежи являются текущими.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Акционерным обществом «МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» (далее по тексту - АО «МКХ») и Обществом с ограниченной ответственностью «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МСО» (далее -по тексту ООО «ЖМСО») был заключен Договор подряда № СМР-946/16 на строительства жилого дома по адресу: 

<

...> от «05» октября 2016 года (далее - по тексту «Договор подряда - 1»).

По условиям Договора подряда ООО «ЖМСО» обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами полный комплекс работ по строительству Объекта инженерных коммуникаций и сооружений к нему, сдать результат работ, исполнительную документацию и участвовать во вводе Объекта в эксплуатацию, выполнять установленные в Договоре подряда - 1 обязательства в течении Гарантийного периода на Объекте, а АО «МКХ» принять и оплатить Работы, выполненные ООО «ЖМСО» в соответствии с требованиям Договора. Подробный состав работ и сроки производства работ согласованны Сторонами и изложены на документах «График производства работ», что подтверждается копией Графика производства работ  и «График продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ», что подтверждается копией Графика продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ.

Стоимость работ по Договору подряда - 1 установлена Сметами, являющимися неотъемлемой частью Договора подряда - 1. Договорная цена остается неизменной на весь период строительства.

Сроки выполнения работ определены п. 4.1. Договора подряда - 1 которые составляют: дата начала выполнения работ - «05» октября 2016 года; дата окончания выполнения работ - «30» марта 2017 года;

Срок действия: Договор подряда - 1 вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору подряда - 1.

«01» декабря 2016 года между Сторонами Договора подряда - 1 было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда - 1, в соответствии с которым были изменены п. 6.4. и п. 6.9. Договора подряда - 1, а именно при осуществлении оплаты в соответствии с п. 6.4. АО «МКХ» уменьшает каждую подлежащую уплате сумму денежных средств на 20 %, данная сумма является удержанием, обеспечивающим исполнение ООО «ЖМСО» обязательств по Договору подряда - 1, что подтверждается копией Дополнительного соглашения № 1 от «01» декабря 2016 года.

Часть работ в соответствии с условиями Договора подряда - 1 были выполнены надлежащим образом и сданы в срок, каких либо претензий к качеству работ со стороны АО «МКХ» к ООО «ЖМСО» предъявлено не было, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 6.1. Договора подряда - 1 факт выполнения ООО «ЖМСО» работ, а также их цена подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п. 6.4. Договора подряда - 1 АО «МКХ» оплачивает ООО «ЖМСО» выполненные по Договору подряду - 1 работы за отчетный месяц, оформленные актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течении 90 (Девяносто) календарных дней с даты их подписания АО «МКХ».

Таким образом, задолженность по выполненным работам к Договору подряда и подписанным КС-2 и КС-3 составляет:

— Подписаны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от «31» декабря 2016 года, номера документов: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016,

— Подписана Справка стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от «31» декабря 2016 года, номер документа: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016.

Сумма задолженности по Договору подряда - 1 составляет 3 056 976,00 руб. 

Данная задолженность также подтверждается подписанной сторонами Счет-фактурой № 313 от «31» декабря 2016 года.

Между АО «МКХ» и ООО «ЖМСО» был заключен Договор подряда № СМР-925/16 на строительства жилого дома по адресу: 

<

...>, корп. 5.2 от «27» октября 2016 года (далее - по тексту «Договор подряда - 2»).

По условиям Договора подряда ООО «ЖМСО» обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами полный комплекс работ по строительству Объекта инженерных коммуникаций и сооружений к нему, сдать результат работ, исполнительную документацию и участвовать во вводе Объекта в эксплуатацию, выполнять установленные в Договоре подряда - 2 обязательства в течении Гарантийного периода на Объекте, а АО «МКХ» принять и оплатить Работы, выполненные ООО «ЖМСО» в соответствии с требованиям Договора. Подробный состав работ и сроки производства работ согласованны Сторонами и изложены на документах «График производства работ», что подтверждается копией Графика производства работ и «График продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ», что подтверждается копией Графика продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ.

Стоимость работ по Договору подряда - 2 установлена Сметами, являющимися неотъемлемой частью Договора подряда - 2. Договорная цена остается неизменной на весь период строительства.

Сроки выполнения работ определены п. 4.1. Договора подряда - 2 которые составляют: дата начала выполнения работ - «27» октября 2016 года; дата окончания выполнения работ - «30» ноября 2016 года;

Срок действия: Договор подряда - 2 вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору подряда - 2.

«01» декабря 2016 года между Сторонами Договора подряда - 2 было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда - 2, в соответствии с которым были изменены п. 6.4. и п. 6.9. Договора подряда - 2, а именно при осуществлении оплаты в соответствии с п. 6.4. АО «МКХ» уменьшает каждую подлежащую уплате сумму денежных средств на 20 %, данная сумма является удержанием, обеспечивающим исполнение ООО «ЖМСО» обязательств по Договору подряда - 2, что подтверждается копией Дополнительного соглашения № 1 от «01» декабря 2016 года.

Часть работ в соответствии с условиями Договора подряда - 2 были выполнены надлежащим образом и сданы в срок, каких либо претензий к качеству работ со стороны АО «МКХ» к ООО «ЖМСО» предъявлено не было, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 6.1. Договора подряда - 2 факт выполнения ООО «ЖМСО» работ, а также их цена подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п. 6.4. Договора подряда - 2 АО «МКХ» оплачивает ООО «ЖМСО» выполненные по Договору подряду - 2 работы за отчетный месяц, оформленные актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течении 90 (Девяносто) календарных дней с даты их подписания АО «МКХ».

Таким образом, задолженность по выполненным работам к Договору подряда и подписанным КС-2 и КС-3 составляет:

—Подписаны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от «31» декабря 2016 года, номера документов: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016,

—Подписана Справка стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от «31» декабря 2016 года, номер документа: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016.

Сумма задолженности по Договору подряда - 2 составляет 6 030 314,00 руб. 

Данная задолженность также подтверждается подписанной сторонами Счет-фактурой № 314 от «31» декабря 2016 года.

Между АО «МКХ» и ООО «ЖМСО» был заключен Договор подряда № СМР-926/16 на строительства жилого дома по адресу: 

<

...> от «21» ноября 2016 года (далее - по тексту «Договор подряда - 3»).

По условиям Договора подряда ООО «ЖМСО» обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами полный комплекс работ по строительству Объекта инженерных коммуникаций и сооружений к нему, сдать результат работ, исполнительную документацию и участвовать во вводе Объекта в эксплуатацию, выполнять установленные в Договоре подряда - 3 обязательства в течении Гарантийного периода на Объекте, а АО «МКХ» принять и оплатить Работы, выполненные ООО «ЖМСО» в соответствии с требованиям Договора. Подробный состав работ и сроки производства работ согласованны Сторонами и изложены на документах «График производства работ», что подтверждается копией Графика производства работ и «График продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ», что подтверждается копией Графика продолжительности выполнения работ и стоимости выполняемых работ.

Стоимость работ по Договору подряда - 3 установлена Сметами, являющимися неотъемлемой частью Договора подряда - 3. Договорная цена остается неизменной на весь период строительства.

Сроки выполнения работ определены п. 4.1. Договора подряда - 3, которые составляют: дата начала выполнения работ - «21» ноября 2016 года; дата окончания выполнения работ - «25» декабря 2016 года;

Срок действия: Договор подряда - 3 вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору подряда - 3.

«01» декабря 2016 года между Сторонами Договора подряда - 3 было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору подряда - 3, в соответствии с которым были изменены п. 6.4. и п. 6.9. Договора подряда - 3, а именно при осуществлении оплаты в соответствии с п. 6.4. АО «МКХ» уменьшает каждую подлежащую уплате сумму денежных средств на 20 %, данная сумма является удержанием, обеспечивающим исполнение ООО «ЖМСО» обязательств по Договору подряда - 3, что подтверждается копией Дополнительного соглашения № 1 от «01» декабря 2016 года.

«10» декабря 2016 года между Сторонами Договора подряда - 3 было заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда - 3, в соответствии с которым были согласованы дополнительные работы к Договору подряду - 3, на сумму в размере 150 446,00 руб.

Работы в соответствии с условиями Договора подряда - 3 были выполнены надлежащим образом и сданы в срок, каких либо претензий к качеству работ со стороны АО «МКХ» к ООО «ЖМСО» предъявлено не было, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справками стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Согласно п. 6.1. Договора подряда - 3 факт выполнения ООО «ЖМСО» работ, а также их цена подтверждаются Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п. 6.4. Договора подряда - 3 АО «МКХ» оплачивает ООО «ЖМСО» выполненные по Договору подряду - 3 работы за отчетный месяц, оформленные актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течении 90 (Девяносто) календарных дней с даты их подписания АО «МКХ».

Таким образом, задолженность по выполненным работам к Договору подряда и подписанным КС-2 и КС-3 составляет:

Подписаны Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от «31» декабря 2016 года, номера документов: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 2 отчетный период с 01.01.2017 по 31.01.2017.

Подписана Справка стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от «31» декабря 2016 года, номер документа: № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 1 отчетный период с 01.12.2016 по 31.12.2016, № 2 отчетный период с 01.01.2017 по 31.01.2017 что подтверждается копией Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Сумма задолженности по Договору подряда - 3 составляла 2 728 083,29 руб. 

Однако «20» января 2017 года АО «МКХ» частично оплатило задолженность по Договору подряда - 3 в размере 1 777 210,00 руб. 

После частичной оплаты, сумма задолженности по Договору подряда - 3 составила 950 873,29 руб. 

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Ответчик свои обязательства не исполнил, работы в срок в общем размере 10 038 163 руб. не оплатил, доказательств погашения задолженности не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, поскольку оплата работ ответчиком в установленный договором срок не произведена, с него на основании ст. 395 ГК РФ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, что по расчету истца за период по состоянию на 04.10.2017г., проверенному судом, составляет 442 111,32 руб. 

Кроме того, истцом заявлено о расторжении договоров № СМР-946/16 от 05.10.16, №СМР-925/16 от 27.10.2016, СМР-926/16 от 21.11.2016, заключенных между истцом и ответчиком.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 450 ГК РФ  изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Учитывая размер задолженности ответчика, отсутствие со стороны ответчика действий свидетельствующих о намерении исполнить обязательства по договорам и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, учитывая период просрочки и требование истца о расторжении спорных договоров, суд считает правомерным и подлежащим удовлетворению требование истца о расторжении договоров №СМР-946/16 от 05.10.16, №СМР-925/16 от 27.10.2016, СМР-926/16 от 21.11.2016.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ответчика об оставлении искового заявление без рассмотрения по указанным им основаниям отказать.

Расторгнуть договоры № СМР-946/16 от 05.10.16, №СМР-925/16 от 27.10.2016, СМР-926/16 от 21.11.2016

Взыскать с акционерного общества "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МСО" 10 038 163 руб. задолженности, 442 111 руб. 32 коп. процентов, 81 116 руб. в возмещение расходов по госпошлине. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко