307/2022-121290(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-6714/2022

город Вологда

19 октября 2022 года

 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести изменения в муниципальный контракт от 13.12.2021 № К-117/2021  между обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-градостроительный центр города Вологды» и муниципальным казенным  учреждением «Градостроительный центр города Вологды»:  

пункт 3.1. Контракта раздела 3 «Сроки выполнения работ» изложить в  следующей редакции: «начальный срок выполнения работ по контракту –  15 декабря 2021 года, конечный срок выполнения работ по контракту –  15 ноября 2022 года».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Н.Ю. Курпанова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.09.2021 8:09:00

Кому выдана Курпанова Наталья Юрьевна