Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-21439/2017

17 ноября 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  09 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен  17 ноября 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика" (адрес:  Россия 195009, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб АРСЕНАЛЬНАЯ 11/ЛИТЕР А, ОГРН:  1024700871711);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Строй-Трейд" (адрес:  Россия 607661, г КСТОВО, НИЖЕГОРОДСКАЯ обл КСТОВСКИЙ р-н, ул ШОХИНА НА БАЗЕ СМУ-1, ОГРН:  1065250028205);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Стройпромсервис" (адрес:  Россия 172790, РАЙОН ПЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ОХВАТ, ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ, УЛ. Л.ЧАЙКИНОЙ, 5, ОГРН:  1096913000777)

о взыскании 5 085 044 руб. 99 коп.

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 08.12.2016

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 03.07.2017

- от третьего лица: не явился, извещен

установил:

ООО "Транснефть - Балтика" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "Строй-Трейд" 8 644 576 руб. 48 коп. неустойки по контракту № 572/100-03-01-02/16 от 09.03.2016 по состоянию на 21.12.2016.

Ответчик в отзыве признал факт нарушения срока выполнения работ. Просит уменьшить неустойку до двукратной ставки рефинансирования Банка России – 1 574 604 руб. 10 коп. 

Судом установлено: 

Между сторонами был заключен контракт № 572/100-03-01-02/16 от 09.03.2016 на выполнение работ по обустройству трассы магистрального трубопровода в охранной зоне. 

Срок выполнения работ – 31.10.2016. 

В указанный срок ответчик-подрядчик работы истцу-заказчику не сдал. 

В соответствии с п.27.1.2 контракта  в случае задержки подрядчиком завершения работ по объекту, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,3% договорной цены за каждый день просрочки, но не более 20% от договорной цены, а также компенсировать заказчику дополнительные затраты, связанные с задержкой завершения работ. По состоянию на 21.12.2016 размер неустойки составляет 8 644 576 руб. 48 коп. 

Суд считает, что подлежащая взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств и на основании ст.333 ГК РФ с учетом ходатайства ответчика уменьшает ее до 2 000 000 руб. 00 коп. 

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй-Трейд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Балтика" 2 000 000 руб. 00 коп. неустойки и 48 425 руб. 23 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.