/

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

22 мая 2018 года

 

Дело № А33-32442/2017

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15.05.2018.

В полном объёме решение изготовлено 22.05.2018.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Шевцовой Т.В., рассмотрев дело по иску публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, г. Красноярск)

к акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» (ИНН 2460087269, ОГРН 1152468001773, г. Красноярск)

о взыскании неустойки за невыполнение мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

при участии в судебном заседании:

от ответчика – Измайловой Е.А., представителя по доверенности от 29.12.2017,

при составлении протокола и ведении аудиозаписи судебного заседания секретарем Гореловой Е.С. 

 

установил:

публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «Красноярская региональная энергетическая компания» о взыскании неустойки за невыполнение мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016 № 20.2400.5247.16 за период с 28.07.2016 по 08.11.2017 в размере 32 695 руб. 76 коп.

Определением арбитражного суда от 26.01.2018 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощённого производства.

Определением от 26.03.2018 осуществлен переход дела по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 15.05.2018 в 10 час. 40 мин.  и судебное заседание назначено на 15.05.2018  в 10 час. 45 мин.

В предварительное судебное заседание явился представитель ответчика. Истец, извещённый надлежащим образом, своего представителя в предварительное судебное заседание не направил.  Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителя истца.

От сторон возражения относительно возможности завершения предварительного судебного заседания и продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в материалы дела не поступили.

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание завершено, рассмотрение  дела продолжено в судебном заседании.

В судебном заседании присутствует тот же представитель ответчика. Истец извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, для участия в судебное заседание своего представителя не направил. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие представителя истца.

В судебном заседании представитель ответчика против удовлетворения иска возражал, мотивируя доводами, изложенными в отзыве на иск и дополнительных пояснениях к отзыву от 15.05.2018.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства:

акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» сетевой организации публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» направлена заявка от 01.06.2016 № 017/4002 (принята 09.06.2016 за номером № 11000307168) на осуществление технологического присоединения Ф. 3-09, Линейное ответвление от опоры А 1 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опорыА-86 А-95, Линейное ответвление от опоры А 3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опоры А 3-2 А-50, Линейное ответвление от опоры А 3-3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 251 А-50, Линейное ответвление от опоры А 8ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 196 А-35, Линейное ответвление от опоры А 49 ВЛ-ЮкВ Ф -3-09 до опоры 49-1 А-50, Линейное ответвление от опоры А 84 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09  до опоры А 84-1 А-35, Линейное ответвление от опоры А 86 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 дополнительного разъединителя ЛР 3-09-13 А-95, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск.

Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (сетевой организацией) и акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» (заявителем) заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016 № 20.2400.5247.16, в силу пункта 1.1 которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя –  Ф. 3-09, Линейное ответвление от опоры А 1 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опорыА-86 А-95, Линейное ответвление от опоры А 3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опоры А 3-2 А-50, Линейное ответвление от опоры А 3-3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 251 А-50, Линейное ответвление от опоры А 8ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 196 А-35, Линейное ответвление от опоры А 49 ВЛ-ЮкВ Ф -3-09 до опоры 49-1 А-50, Линейное ответвление от опоры А 84 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09  до опоры А 84-1 А-35, Линейное ответвление от опоры А 86 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 дополнительного разъединителя ЛР 3-09-13 А-95, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск со следующими характеристиками:

-            максимальная мощность 580 кВт;

-            категория надежности  третья;

-            класс напряжения в точках присоединения 10,00кВ;

-            максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 1610 кВт, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принимающих им энергопринимающих устройств. Заявитель обязался оплатить расходы (плату) на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

В пункте 1.2 договора указано, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 1 года с даты заключения договора (пункт 1.3 договора).

В соответствии с пунктом 1.5 договора по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению (этапа при поэтапном вводе) стороны составляют акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и (или) авариной брони (при необходимости).

Обязанности сетевой организации по договору указаны в пункте 2.1, а именно:

- надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по договору, при условии надлежащего исполнения заявителем своих обязательств по договору (пункт 2.1.1 договора);

- в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникнет необходимость частичного отсутствия от технических условий, в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовать частичное отсутствие от технических условий (пункт 2.1.2);

- в течение 5 дней со дня получения уведомления о выполнении заявителем технических условий принять участие в проверке выполнения заявителем технических условий (пункт 2.1.3);

- в согласованный сторонами срок принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа Федерального государственного энергетического надзора (пункт 2.1.4);

- не позднее 15 рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа Федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с соблюдением срока, установленного пунктом 1.3 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и фактический приём (подачу) напряжения и мощности, осуществляемый путём включения коммутационного аппарата (пункт 2.1.5);

- не позднее 2 рабочих дней с момента фактического присоединения подписать и направить заявителю способом, подтверждающим отправку и получение уведомления оригиналы акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, подписанных со стороны сетевой организации (пункт 2.1.6);

- не позднее 10 рабочих дней со дня получения от заявителя 2 подписанных экземпляров проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони рассмотреть, подписать и направить 1 экземпляр акта заявителю (пункт 2.1.7).

Согласно пункту 2.3 заявитель принял на себя следующие обязательства:

- принять к исполнению утверждённые технические условия (пункт 2.3.1);

- надлежащим образом и своевременно исполнять свои обязательства по договору (пункт 2.3.2 договора);

- в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса сетевой организации предоставить сведения, необходимые для выполнения сетевой организацией своих обязательств по договору (пункт 2.3.3);

- своевременно осуществить разработку проектной документации в рамках исполнения своих обязательств по техническим условиям (в том числе по этапам) и своевременно (не позднее чем за 10 рабочих дней до направления уведомления о выполнении технических условий) направить её в сетевую организацию для проверки соответствия проекта требованиям технических условий (пункт 2.3.4);

- в течение 1 рабочего дня после выполнения мероприятий, указанных в технических условиях, направить в адрес сетевой организации уведомление об исполнении технических условий со стороны заявителя способом, подтверждающим отправку и получение уведомления (пункт 2.3.5);

- обеспечить возможность сетевой организации проводить проверку выполнения технических условий заявителем (пункт 2.3.6).

В разделе 3.1 договора согласовано, что размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.12.2015 № 648-п, от 29.12.2015 № 649-п и составляет 32 940 руб. 29 коп., а также предусмотрены сроки внесения платежей.

В соответствии с пунктом 4.2 договора сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Пунктом 6.1 договора установлено, что он вступает в силу с даты получения сетевой организацией подписанного с обеих сторон экземпляра договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Приложение № 1 к договору содержит технические условия № 8000279635 для присоединения энергопринимающих устройств заявителя Ф. 3-09, Линейное ответвление от опоры А 1 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опоры А-86 А-95, Линейное ответвление от опоры А 3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до опоры А 3-2 А-50, Линейное ответвление от опоры А 3-3 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 251 А-50, Линейное ответвление от опоры А 8ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 до ТП 196 А-35, Линейное ответвление от опоры А 49 ВЛ-ЮкВ Ф -3-09 до опоры 49-1 А-50, Линейное ответвление от опоры А 84 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09  до опоры А 84-1 А-35, Линейное ответвление от опоры А 86 ВЛ-ЮкВ Ф 3-09 дополнительного разъединителя ЛР 3-09-13 А-95, расположенные по адресу: Россия, Красноярский край, г. Канск.

В силу пункта 10 технических условий единственным мероприятием, которое осуществляет сетевая организация, является фактическое присоединение объекта после выполнения заявителем технических условий.

В пункте 11 технических условий указаны мероприятия, которые осуществляет заявитель, в том числе:

- проверить существующее оборудование на пропускную способность и соответствие требованиям НТД с учетом увеличения нагрузки электроустановок и в случае необходимости выполнить их замену. Определить проектом необходимость выполнения дополнительных мероприятий;

- на границе балансовой принадлежности электрических сетей обеспечить поддержание качества электрической энергии и установку приборов контроля качества электрической энергии в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;

- выполнить проект электроснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Российской Федерации;

- выполнить расчет релейной защиты и токов короткого замыкания всоответствии с мероприятиями, предусмотренными п. п. 11  настоящих технических условий. На основании расчетов произвести выбор устройств РЗА и согласовать его с ПО Восточные э/с филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»

- определить проектом необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для поддержания tg q в точках присоединения кэлектрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэиерго» не выше 0,4;

- cоздать автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) приборов учета;

- обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ПАО «МРСК Сибири» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения;

- разработать проектную документацию по электроснабжению электроустановок заявителя по присоединению к электрическим сетям, согласовать проектную документацию с сетевой организацией;

- согласовать проектную документацию с сетевой организацией и со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством, представить заключения экспертных организаций по проектной документации и разрешения уполномоченных органов федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в сетевую организацию.

Срок действия технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 12 технических условий).

Истец указывает, что ответчиком не исполнены обязательства по выполнению мероприятий, указанных в технических условиях, что ответчиком не опровергнуто.

В соответствии с пунктом 4.2 договора истцом ответчику начислена неустойка из расчёта 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере 10,5 % за неосуществление ответчиком мероприятий, возложенных на него в целях осуществления технологического присоединения, за период с 28.07.2016 по 08.11.2017 (103 дней) в размере 32 695 руб. 76 коп.

Письмом от 28.09.2017 № 1.3/20/23166-исх истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием оплатить неустойку по договору технологического присоединения, в том числе начисленную в связи с нарушением условий договора в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Направление претензии подтверждается списком внутренних почтовых отправлений от 15.11.2017 № 1.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что начисление неустойки на предусмотренные договором платежи, которые по своей правовой природе являются авансовыми, не соответствует нормам действующего законодательства, кроме того истцом не представлено доказательств выполнения работ по технологическому присоединению со стороны сетевой организации. В дополнениях к отзыву на иск ответчик ссылается на то, что письмом от 18.07.2017 ответчик обращался к истцу с требованием о выдаче акта об осуществлении технологического присоединения, следовательно, неустойка подлежит начислению до указанной даты. Кроме того, по мнению ответчика, расчет неустойки следует производить с учетом ставки рефинансирования 7,25%, действующей в настоящий период.

Исследовав представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам:

в соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Сторонами заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016 № 20.2400.5247.16, который по своей правовой природе является договором технологического присоединения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.07.2012 № 2551/12 в рамках рассмотрения дела № А56-66569/2010 указано, что нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергитке) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» и Методических указаний по определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 №365-э/5.

В силу статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее -технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила № 861), которые регламентируют процедуру такого присоединения, предусматривают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также требования к выдаче индивидуальных технических условий для присоединения к электрическим сетям. Любые юридические и физические лица имеют право на технологическое присоединение  своих энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям при наличии технической возможности для этого и соблюдении ими установленных правил такого присоединения.

В соответствии с пунктом 18 Правил № 861 технологическое присоединение включает в себя последовательность следующих действий:

- подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором;

- разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

- проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

- осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Завершает указанный процесс фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, под которым понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») (подпункт «г.1» пункта 7 Правил № 861).

Согласно пункту 19 Правил № 861 акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения составляются по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны.

Статьёй 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», установлено, что подключение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям осуществляется при условии выполнения всех мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности технологического присоединения и недопущение ухудшения условий электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу частей 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 32 695 руб. 76 коп. неустойки за период с 28.07.2016 (спустя год с даты заключения договора, то есть по окончании срока технологического присоединения, установленного пунктом 1.3 договора) по 08.11.2017 в соответствии с пунктом 4.2 заключённого сторонами договора за невыполнение ответчиком мероприятий, возложенных на него в целях осуществления технологического присоединения.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа – пени.

В пункте 4.2 договора  предусмотрена ответственность сторон за просрочку исполнения обязательств в виде начисления  неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Из постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 и указания Банка России от 11.12.2015 № 3984-у следует, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, с 01.01.2016 вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.

В соответствии с информацией Центрального банка Российской Федерации от 10.06.2016 (опубликованной в источнике «Вестник Банка России» от 16.06.2016 № 56) ключевая ставка Банка России  с 14.06.2016 (действовала на дату заключения договора) составляет 10,5 % годовых.

Произведённый истцом расчёт пени проверен судом, является верным.

Многочисленные возражения ответчика против начисления неустойки на сумму оплаты по договору не принимаются судом, поскольку в рамках настоящего спора рассматривается требование о взыскании неустойки, начисленной в связи с невыполнением ответчиком возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению, а не в связи с просрочкой внесения оплаты по договору.

Доводы ответчика о том, что истцом не представлено доказательств выполнения мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны, также являются необоснованными, поскольку в соответствии с техническими условиями на сетевую организацию возложена обязанность только по фактическому присоединению объекта, которая поставлена в зависимость от исполнения заявителем возложенных на него обязательств по выполнению мероприятий, указанный в пункте 11 технических условий.

Срок действия технических условий № 8000279635 (приложение № 1 к договору от 27.07.2016 № 20.2400.5247.16) на дату рассмотрения иска не истёк.

Доводы ответчика о том, что начисление неустойки следует производить до 18.07.2017, то есть до даты обращения ответчика к истцу с заявлением о выдаче акта об осуществлении технологического присоединения, не принимаются судом. Обращение ответчика с заявлением о выдаче акта об осуществлении технологического присоединения само по себе не является безусловным доказательством выполнения ответчиком предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению в полном объеме.

Доводы ответчика о том, что начисление неустойки следует производить исходя из действующей ставки рефинансирования 7,25% годовых, отклоняются судом, поскольку в силу пункта 4.1 договора стороны согласовали применение ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора. Указанный порядок применения ставки рефинансирования также предусмотрен действующим законодательством.

С учётом изложенного требование истца о взыскании с ответчика 32 695 руб. 76 коп. неустойки с 28.07.2016 по 08.11.2017, начисленной за неисполнение мероприятий по договору на технологическое присоединение, является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объёме.

Пунктом 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» предусмотрено, что применительно к пункту 6 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации сумма государственной пошлины исчисляется в полных рублях: сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.

С учётом размера исковых требований 32 695 руб. 76 коп. размер госпошлины по настоящему иску составляет 2 000 руб.

При подаче искового заявления истцом уплачена госпошлина в сумме 2 000 руб. по платёжному поручению от 17.11.2017 № 44480.

Статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  определено, что судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований.

С учётом результатов рассмотрения дела расходы по уплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая компания» (ИНН 2460087269, ОГРН 1152468001773, г. Красноярск) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 2460069527, ОГРН 1052460054327, г. Красноярск) 32 695 руб. 76 коп. неустойки за невыполнение мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2016 № 20.2400.5247.16 за период с 28.07.2017 по 08.11.2017 и 2 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

Т.В. Шевцова