АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, 

<

...>

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru   

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А29-2669/2025

10 июня 2025 года

г. Сыктывкар

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2025 года, полный текст решения изготовлен 10 июня 2025 года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кирьянова Д.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Минеевой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело иску

некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Коми региональная энергетическая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании неустойки,

при участии:

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 02.06.2025,

установил:

некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд, истец) обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Коми региональная энергетическая компания» (далее – Общество, ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 26.04.2024 № ЭА-СМР/8-79/2024 в сумме 954 812 руб. 01 коп. (л.д. 2-3).

Истец заявлением от 09.04.2025 (л.д. 96) уточнил исковые требования и просил взыскать с Общества неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 26.04.2024 № ЭА-СМР/8-79/2024 в сумме 937 130 руб. 31 коп.

Данные уточнённые исковые требования приняты судом к рассмотрению с учётом положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в отзыве от 17.04.2025 (л.д. 100) указал на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, выразил несогласие с расчётом неустойки в связи с наличием просрочки со стороны Фонда, ходатайствовал о снижении неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Фонд в пояснениях от 25.04.2025 (л.д. 110) указал на правомерность требований о взыскании неустойки в период с 17.09.2024 по 08.11.2024, в удовлетворении ходатайства о снижении неустойки просил отказать.

В заявлении от 09.06.2025 (л.д. 115) Общество сняло возражения относительно просрочки со стороны Фонда, заявило о признании иска и просило снизить неустойку по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец, надлежащим образом извещённый о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, явку своих представителя не обеспечил.

В предварительном судебном заседании ответчик поддержал заявление о признании иска и ходатайство о снижении неустойки.

При отсутствии возражений сторон суд на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешёл к рассмотрению иска по существу.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Между Фондом (заказчик) и Обществом (подрядчик) был заключён договор               подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 26.04.2024 № ЭА-СМР/8-79/2024 (л.д. 6-10), по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Республика Коми, МР «Усть-Вымский», 

<

...>, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой к договору, утверждённой заказчиком, техническим заданием, и сдать результат работ заказчику в порядке, предусмотренном разделом 10 договора, а заказчик принять надлежащим образом выполненные подрядчиком работы и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

Согласно пункту 3.1 договора цена договора определена по результатам электронного аукциона и составляет 9 069 790 рублей 16 копеек, в том числе НДС.

В силу пункта 5.1 договора дата начала выполнения работ – 03.05.2024; дата окончания выполнения работ – 15.09.2024.

В соответствии с пунктом 5.4 договора фактической датой окончания работ на объекте по элементу многоквартирного дома (виду работ) является дата подписания акта о приёмке в эксплуатацию.

Как указано в пункте 10.1 договора подрядчик до срока окончания работ по объекту, установленного пунктом 5.1 настоящего договора, обязан письменно уведомить представителя заказчика о завершении работ по настоящему договору и готовности объекта к итоговой проверке и представить заказчику комплект документов: исполнительную документацию, счёт, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.

Пунктом 12.2 договора установлено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней); неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа, в размере 0,2% от стоимости этапа услуг и (или) работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, сроки по которому нарушены.

Дополнительным соглашением № 1 (л.д. 11) стороны изложили пункт 3.1 договора в следующей редакции: «Цена договора определена по результатам электронного аукциона, скорректирована сметным расчетом и составляет 8 840 851 руб. 97 коп.».

Как указывает Фонд, выполненные объёмы работ по актам КС-2 от 06.12.2024 №2 на сумму 1 750 152 руб. 05 коп., от 06.12.2024 №1 на сумму 4 580 385 руб., от 03.10.2023 № 4 на сумму 7 090 699 руб. 92 коп. приняты с нарушением сроков (л.д. 14-88).

Согласно представленному в материалы дела акту приёмки выполненных работ по капитальному ремонту от 19.12.2024 (л.д. 12), фактической датой окончания работ в отношении объекта является 19.12.2024.

Как следует из искового заявления, работы в рамках спорного договора выполнены со стороны Общества с нарушением установленных договором сроков.

С учётом вышеуказанных обстоятельств Фонд произвел начисление неустойки за нарушение сроков выполнения работ в рамках спорного договора за период с 17.09.2024 по 08.11.2024 на сумму 937 130 руб. 31 коп. (с учётом уточнения исковых требований).

Вышеуказанные обстоятельства послужили поводом для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом соблюдения претензионного порядка урегулирования спора).

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт выполнения работ в рамках спорного договора подтверждается представленным в материалы дела акту приёмки выполненных работ по капитальному ремонту от 19.12.2024 (л.д. 12).

В связи с окончанием выполнения работ по капитальному ремонту фасада 19.12.2024 Фондом начислена Обществу неустойка в сумме 937 130 руб. 31 коп. (с учётом уточнения исковых требований).

Таким образом, со стороны ответчика допущено нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома. Рассчитанная истцом неустойка признается судом верной.

Ответчик исковые требования признал в полном объёме.

Частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Проверив расчёт исковых требований, арбитражный суд принимает его как правильный, ответчик расчёт не оспорил.

Суд отклоняет довод ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора, поскольку претензия от 24.12.2024 № 06-16/5403-ЮЛ (л.д. 90) согласно пункту 15.9 договора была направлена по электронному адресу Общества, указанному в разделе 17 договора, претензионный порядок считается соблюдённым.

Ответчик ходатайствовал об уменьшении размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В соответствии с пунктом 77 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7) снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации).

Согласно пункту 73 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ). Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

В пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Установленная договором ставка в размере 73 % годовых (0, 2 % в день) существенно превышает стоимость привлечения кредитных средств. При этом истцом не приведены сведения об убытках либо негативных социальных последствиях, которые бы могли оправдать применение столь значительной неустойки.  

Суд принимает во внимание, что в обычной предпринимательской деятельности устанавливается неустойка в размере, не превышающем 0,1% от суммы неисполненного обязательства в день.

С учётом указанных выше обстоятельств, а также с учетом применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд считает соразмерным последствиям нарушенного обязательства размер неустойки за период с 17.09.2024 по 08.11.2024 в сумме 468 565 руб. 15 коп.

При распределении судебных расходов арбитражный суд учитывает, что при снижении судом неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае подлежат применению разъяснения, данные в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1, то есть судебные издержки относятся на ответчика исходя из признанного правомерным размера неустойки без учёта её снижения по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчик признал исковые требования.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 4 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных расходов не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска) до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины в сумме 15 557 руб. 10 коп. (с учётом признания иска), а излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 37 183 руб. 90 коп. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Коми региональная энергетическая компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в сумме 468 565 руб. 15 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 15 557 руб. 10 коп. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 37 183 руб. 90 коп., уплаченную по платежному поручению от 27.02.2025 № 547.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                                                                                                 Д.А. Кирьянов