1789/2018-245582(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-25170/2018

г. Казань

29 октября 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении  аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного  общества "Казанский маслоэкстракционный завод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Обществу с ограниченной ответственностью "Котельный завод "ЭнергоАльянс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о понуждении исполнить обязательство в натуре, о  взыскании 1 646 335 руб. 60 коп. неустойки, о присуждении судебной неустойки,  

с участием: от истца – представитель, ФИО2, по доверенности от 19.03.2018г.; от ответчика – не явился, извещен; руководствуясь статьями 110, 167- 176 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Котельный завод "ЭнергоАльянс"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 50 дней с даты вступления настоящего  решения в законную силу завершить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по  блочной модульной пеллетной котельной для оптимизации теплопотребления здания  заводоуправления и АТП, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский  район, вблизи с. Усады по договору подряда от № 917/17 от 31.10.2017, а именно:  

- осуществить монтажные работы по устройству вентиляции в помещении котельной в  целях надлежащей работы котельной;  

- выполнить работы по выявлению и устранению причин повышения избыточного  давления в контуре котельной и контуре системы потребления тепла;  

- выполнить работы по выявлению и устранению причин опрокидывания тяги в  дымовой трубе и задымления котельной;  

- выполнить работы по корректировке геометрии короба загрузки топлива бункера, в  целях заполнения бункера топливом в полной мере;  

- обеспечить проведение комплексного опробования блочной модульной пеллетной  котельной (МКУ 1.0 МВт) при условии нормальной и непрерывной работы оборудования в  течение 72 часов. При выявлении дефектов, недоделок, замечаний препятствующих  проведению/завершению комплексного опробования МКУ 1.0 МВт, устранять выявленные  дефекты, недоделки, замечания до момента успешного завершения комплексного опробования  блочной модульной пеллетной котельной;  

- передать АО «Казанский маслоэкстракционный завод» результат выполненных работ  по договору подряда от № 917/17 от 31.10.2017 по Акту рабочей комиссии, с устранением  выявленных замечаний и недостатков во время приемки работ (вручить или направить  оформленный надлежащим образом акт для подписания в адрес истца);  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Котельный завод  "ЭнергоАльянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Казанский маслоэкстракционный завод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму  договорной неустойки за нарушение сроков производства и завершения работ в размере  250 000 руб.  

В случае неисполнения решения суда в части понуждения исполнить обязательства в  натуре, начиная с 51 дня со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему  делу взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Котельный завод  "ЭнергоАльянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Казанский маслоэкстракционный завод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 000 руб.  за каждый день неисполнения решения суда до даты фактического исполнения решения суда в  части понуждения исполнить обязательства в натуре.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Котельный завод  "ЭнергоАльянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества  "Казанский маслоэкстракционный завод" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 35 463  руб. расходов по оплате госпошлины.  

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.  

Судья Ю.С. Мусин