АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

11 декабря 2018 года

Дело № А33-15041/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 04.12.2018.

В полном объёме решение изготовлено 11.12.2018.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Региональные проектно-строительные системы» (ИНН 5503064754, ОГРН 1025500745577, дата государственной регистрации – 16.01.2002, место нахождения - 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24, литер А2, офис 101) к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН 2452026745, ОГРН 1022401421350, дата государственной регистрации – 31.12.2002, место нахождения - 662972, г. Железногорск, ул. Штефана, д. 1) о взыскании основного долга,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика: ФИО1 (член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»), 

в присутствии:

в здании Арбитражного суда Омской области от общества с ограниченной ответственностью «Региональные проектно-строительные системы»: ФИО2, директора общества на основании решения  учредителей от 04.12.2014 (до перерывов 28.11.2018); ФИО3, действующей на основании доверенности от 26.11.2018 (до перерывов 28.11.2018); ФИО4, действующей на основании доверенности от 26.11.2018 (до перерывов 28.11.2018);

в здании Арбитражного суда Красноярского края от федерального государственного унитарного предприятия «Главного военно-строительного управления № 9»: ФИО5, действующего на основании доверенности от 08.08.2018 № 5/1-305д (до перерыва 28.11.2018, 30.11.2018), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО6 (до перерыва 28.11.2018, 30.11.2018), ФИО7 (после перерывов 04.12.2018), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Региональные проектно-строительные системы» (далее – истец, ООО «Региональные проектно-строительные системы») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 9» (далее – ответчик, ФГУП «ГВСУ № 9») о взыскании  основного долга  в размере 33 192 821,41 руб. Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 31.08.2018 возбуждено производство по делу.

В судебном заседании были объявлены перерывы до 30.11.2018, 04.12.2018.

В материалы дела поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которому истец в связи с арифметической ошибкой просит взыскать с ответчика сумму 33 048 306,53 руб. (разница с ранее заявленной суммой в размере 144514,88 руб.- гарантийный депозит). Возражений нет. Заявление об уточнении размера требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Дело рассматривается с учетом принятых уточнений.

Судом 04.12.2018 вынесена резолютивная часть определения об оставлении иска без рассмотрения в части взыскания основного долга в размере 2116327,95 руб.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «Региональные проектно-строительные системы» (субподрядчик) и ФГУП «ГВСУ № 9» (подрядчик) заключен договор субподряда № 14-0907-1 от 09.07.2014 в редакции дополнительного соглашения № 4 от 06.04.2016, согласно которому подрядчик поручил а субподрядчик принял на себя обязательство разработать проектную и рабочую документацию блочно-модульно водогрейной котельной МК-В-20,0 военного городка № 35 г. Омск, п. Светлый.

Согласно пункту 4.1. в редакции дополнительного соглашения договора цена договора составляет 5 180 340 рублей 49 копеек, НДС не облагается в соответствии с положениями статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, согласно Смете №1 (приложение №1 к дополнительному соглашению). Цена договора определяется с применением понижающего коэффициента 0,932993075, полученного путем деления цены, предложенной субподрядчиком в заявке по закупочной процедуре, на начальную (максимальную) цену по закупочной процедуре (без НДС).

Оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в течение 30 рабочих дней с момента перечисления денежных средств от генерального заказчика после подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ  (этапа работ) на основании исполнительских смет, подтверждающих фактически выполненные работы, акта о приемке выполненных работ, оригинала счета, счет-фактуры и накладной на переданную документацию (пункт 5.2. договора).

В соответствии с пунктом 5.7. договора оплата производится до предела не превышающего 95 % от цены договора. Оставшаяся часть цены договора будет выплачена субподрядчику при окончательном расчете. 

Окончательный расчет по договору производится по исполнительным сметам в размере не превышающем цену договора в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 2 к договору, и получения от субподрядчика акта сверки расчетов, счета и счета-фактуры (пункт 5.8. договора).

В пункте 5.13. договора стороны установили, что за оказываемые подрядчиком услуги, субподрядчик производит отчисления в размере 6 (шесть) % от стоимости выполненных работ. Ежемесячно подрядчик в течение 2-х рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ за отчетный период направляет субподрядчику акт об оказании генподрядных услуг (приложение № 3 к договору). Субподрядчик в течение 2-х рабочих дней должен подписать акт об оказании генподрядных услуг и направить его подрядчику. Счета-фактуры за оказанные подрядчиком услуги предоставляются подрядчиком ежемесячно в срок не позднее 5 (пяти) дней после подписания сторонами акта об оказании генподрядных услуг, при этом в акте об оказании генподрядных услуг и счете-фактуре указывается номер и дата договора. Оплата за оказанные подрядчиком услуги производится Субподрядчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней после получения денежных средств от подрядчика за выполненные субподрядчиком работы, подписания акта об оказании генподрядных услуг и выставления подрядчиком счета на оплату за оказанные генподрядные услуги.

По накладным № 29 от 03.06.2015, № 30 от 03.06.2015, № 61 от 22.09.2015, № 64 от 24.09.2015, № 90 от 14.12.2015 техническая  документация передана подрядчику.

Сторонами подписаны акты № 5 от 14.03.2016 на сумму 3 432 228,40 руб., № 9 от 04.07.2016 на сумму 1 748 112,09 руб. и итоговый акт приемки выполненных работ от 04.07.2016 на сумму 5 180 340,49 руб.

Задолженность по акту № 5 от 14.03.2016 на сумму 3 432 228,40 руб. оплачена полностью платёжным поручением № 211 от 25.03.2015 на сумму 1 083 861,60 руб., № 107 от 23.03.2015 на сумму 782 276,80 руб., № 146 от 04.08.2014 на сумму 1 083 861,60 руб., № 158883 от 30.11.2015 на сумму 482 228,40 руб.

Задолженность по акту № 9 от 04.07.2016 погашена частично путем зачета актами за услуги генподряда № 20У00000011 от 31.03.2016 на сумму 243 001,77 руб., № 16С00000008 от 01.10.2016 на сумму 123 766,34 руб.

Таким образом, задолженность по акту № 9 от 04.07.2016 составляет 1 381 343,98 руб. (1748112,09 - 243001,77 - 123766,34).

Сторонами подписан акт сверки 20.12.2017.

Между ООО «Региональные проектно-строительные системы» (субподрядчик) и ФГУП «ГВСУ № 9» (подрядчик) заключен договор субподряда № 15-0109-2 от 01.09.2015 в редакции дополнительного соглашения № 2 от 06.04.2016, согласно пункту 2.1. которого подрядчик поручил, а субподрядчик обязался выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию гаража для медицинской техники инв. №997 на Объекте «Военный городок № 35 г. Омск, п. Светлый, в соответствии с разделом 17 договора и другими исходными данными, необходимыми для выполнения субподрядчиком работ.

На основании пункта 4.1. договора в редакции дополнительного соглашения цена договора составляет 1 159 205 руб., согласно смете № 1. 

Пунктом 5.2. договора установлено, что оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения денежных средств от заказчика и после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (этапа работ) на основании исполнительских смет, подтверждающих фактически выполненные работы, акта о приемке выполненных работ (услуг) (приложение № 4 к договору), оригинала счета, оформленного субподрядчиком на основании первичной учетной документации, счета-фактуры и накладной на переданную документацию.

В соответствии с пунктом 5.7. договора оплата производится до предела не превышающего 95 % от цены договора. Оставшаяся часть цены договора будет выплачена субподрядчику при окончательном расчете. 

Окончательный расчет по договору производится по исполнительным сметам в размере не превышающем цену договора в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 2 к договору, и получения от субподрядчика акта сверки расчетов, счета и счета-фактуры (пункт 5.8. договора).

В пункте 5.13. договора стороны установили, что за оказываемые подрядчиком услуги, субподрядчик производит отчисления в размере 6 (шесть) % от стоимости выполненных работ. Ежемесячно подрядчик в течение 2-х рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ за отчетный период направляет субподрядчику акт об оказании генподрядных услуг (приложение № 3 к договору). Субподрядчик в течение 2-х рабочих дней должен подписать акт об оказании генподрядных услуг и направить его подрядчику.

По накладным № 62 от 22.09.2015, № 65 от 24.09.2015,  № 90 от 14.12.2015 техническая документация передана подрядчику.

Сторонами подписаны акты № 4 от 14.03.2016 на сумму 758 317,55 руб., № 10 от 04.07.2016 на сумму 400 887,45 руб. и итоговый акт приемки выполненных работ от 04.07.2016 на сумму 1 159 205 руб.

Задолженность по акту № 4 от 14.03.2016 оплачена ответчиком полностью платежными поручениями № 158849 от 27.11.2015 на сумму 350 000 руб., № 158882 от 30.11.2015 на сумму 408 317,55 руб.

Задолженность по акту № 10 от 04.07.2016 погашена ответчиком частично путем зачета по актам за услуги генподряда № 20У00000010 от 31.03.2016 на сумму 53 688,88 руб., № 16С00000009 от 01.10.2016 на сумму 28 382,84 руб. 

Таким образом, задолженность ответчика по акту № 10 от 04.07.2016 составила 318 815,73 руб. (400887,45 – 53688,88 – 28382,84).

Сторонами подписан акт сверки 20.12.2017.

Кроме того, сторонами заключен договор субподряда № 15-2801-1 от 28.01.2015 в редакции дополнительного соглашения № 3 от 21.09.2016, согласно которому подрядчик поручил, а субподрядчик обязался выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации на наружные сети и объекты инженерного обеспечения, в том числе исследование существующих кабельных коммуникаций на объекте: «Военный городок № 35 г. Омск, п. Светлый», в соответствии с разделом 17 договора и другими исходными данными, необходимыми для выполнения субподрядчиком работ.

Стороны установили в пункте 3.2., что датой выполнения всех обязательств по договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания итогового акта приемки работ.

Пунктом 4.1. договора в редакции дополнительного соглашения установлено, что цена договора составляет 53 538 371,73 руб., НДС не облагается.   

На основании пунктов 5.1., 5.2. договора оплата за фактически выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счёт субподрядчика с расчетного счета подрядчика. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета подрядчика. Оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (этапов работ, выполненных в соответствии с п. 3.1 договора и разделом 17 Договора) на основании исполнительных смет, подтверждающих фактически выполненные работы, акта о приемке выполненных работ (услуг), оригинала счета, оформленного субподрядчиком на основании первичной учетной документации, счета-фактуры и накладной на переданную документацию.

В соответствии с пунктом 5.7. договора оплата производится до предела не превышающего 95 % от цены договора. Оставшаяся часть цены договора будет выплачена субподрядчику при окончательном расчете. 

Окончательный расчет по договору производится по исполнительным сметам в размере не превышающем цену договора в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента подписания итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной приложением № 2 к договору, и получения от субподрядчика акта сверки расчетов, счета и счета-фактуры (пункт 5.8. договора).

В пункте 5.13. договора стороны установили, что за оказываемые подрядчиком услуги, субподрядчик производит отчисления в размере 6 (шесть) % от стоимости выполненных работ. Ежемесячно подрядчик в течение 2-х рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ за отчетный период направляет субподрядчику акт об оказании генподрядных услуг (приложение № 3 к договору). Субподрядчик в течение 2-х рабочих дней должен подписать акт об оказании генподрядных услуг и направить его подрядчику.

По накладным № 27 от 28.05.2015, № 28 от 28.05.2018, № 31 от 04.06.2015, № 33 от 17.06.2015, № 36 от 24.06.2015, № 48 от 13.08.2015, № 61 от 22.09.2015, № 64 от 24.09.2015, № 90 от 14.12.2015 техническая документация передана подрядчику.

Сторонами подписаны акты № 6 от 22.05.2015 на сумму 19 752 394,20 руб., № 6 от  14.03.2016 на сумму 2 500 000 руб., № 17 от 29.11.2017 на сумму 31 285 977,53 руб. и итоговый акт приемки выполненных работ от 29.11.2017 на сумму 53 538 371,73 руб.

Задолженность по акту № 6 от 22.05.2015 оплачена ответчиком частично платёжными поручениями № 826 от 27.02.2015 на сумму 2 000 000 руб., № 85 от 23.03.2015 на сумму 950 000 руб., путем зачета по акту за услуги генподряда № 000240 от 26.05.2015 на сумму 1 398 469,51 руб., платёжными поручениями № 904 от 29.05.2015 на сумму 7 000 000 руб., № 806 от 23.07.2015 на сумму 5 000 000 руб., № 853 от 04.08.2015 на сумму 1 287 596,74 руб.

Таким образом, задолженность ответчика по акту № 6 от 22.05.2015 составила 2 116 327,95 руб. (19 752 394, 20 – 2 000 000 – 950 000 – 1398469,51 – 7000 000 – 5 000 000 – 1287596,74).

Задолженность по акту № 6 от 14.03.2016 оплачена ответчиком полностью платежными поручениями № 125 от 14.01.2016 на сумму 2 000 000 руб., № 12051 от 19.02.2016 на сумму 500 000 руб. 

Задолженность по акту № 17 от 29.11.2017 погашена ответчиком частично зачетом по акту за услуги генподряда № 20У00000172  от 29.11.2017 на сумму 1 877 158,66 руб., № 20У00000012 от 14.03.2016 на сумму 177 000 руб.

Таким образом, задолженность ответчика по акту № 17 от 29.11.2017 составила 29 231 818,87 руб. (31 285 977,53 – 1877 158,66 – 177 000).

Сторонами подписан акт сверки 20.12.2017.

В материалы дела представлены копии платежных поручений, актов об оказании услуг генподряда, счетов, уведомлений о зачете.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что не оспаривает бухгалтерское разнесение платежей.

Претензиями от 07.07.2016 № 161, от 15.08.2016 № 206, от 11.05.2018 № 165 истец обращался к ответчику с требованием об оплате долга.

В связи с тем, что претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, заявив довод о прекращении производства по делу в части требований по договору № 14-09071 от 09.07.2014 по акту № 5 от 14.03.2016 на сумму 3 432 228,40 руб., по договору № 15-0109-2 от 01.09.2015 по акут № 4 на сумму 758 317,55 руб., по договору № 15-2801-1 от 28.01.2015 по акту № 6 от 22.05.2015 на сумму 19 752 394,20 руб., по акту № 6 от 14.03.2016 на сумму 2 500 000 руб. в связи с тем, что обязанность ответчика по оплате по актам возникла до возбуждения дела о несостоятельности № А33-13756/2016 и требования являются реестровыми.

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что считает, что предъявленная задолженность не является текущей, поскольку согласно письмам истца № 17 от 04.02.2016, № 161 от 07.07.2016, № 120 от 01.06.2015 истец требовал оплаты работ в феврале, июле 2016 г. Кроме того, представитель ответчика указал, что экспертные заключения документации составлены в 2015 году, накладные о передаче технической документации также составлены в 2015 г.

Истец настаивал на том, что работы сдавались по итоговым актам, поэтапная сдача работ не предусмотрена договорами, а все итоговые акты подписаны после 10.06.2016, что подтверждает, что задолженность является текущей.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Между истцом и ответчиком заключены договоры, являющиеся по своей правовой природе договорами подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации  По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно статье 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Факт выполнения истцом работ по спорным договорам подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ. Оплата выполненных работ ответчиком произведена частично. Согласно расчету истца сумма задолженности ответчика перед истцом по договорам составляет 33 048 306,53 руб. 

Доказательств оплаты указанной суммы задолженности ответчик в материалы дела не представил, факт наличия указанной задолженности не оспорил, контррасчет не представлен. Представитель ответчика в судебном заседании арифметику расчета не оспаривал, разнесение истцом платежей не оспаривал.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Заявленная ко взысканию в рамках настоящего дела сумма задолженности в размере 30 931 978,58 руб. возникла в связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате работ по актам № 9 от 04.07.2016 в размере 1 381 343,98 руб., № 10 от 04.07.2016 в размере 318 815,73 руб., № 17 от 29.11.2017 в размере 29 231 818,87 руб., выполненных после даты принятия заявления о признании ответчика банкротом (10.06.2016), и относится к текущим платежам, подлежащим взысканию в порядке искового производства.

В остальной части исковые требования оставлены судом без рассмотрения, о чем вынесена резолютивная часть определения.

При этом доводы ответчика о том, что предъявленные требования в полном объеме подлежат рассмотрению в деле о банкротстве подлежат отклонению, поскольку само по себе наличие писем истца о ходе выполнения работ, согласно которым истец требовал оплаты работ в феврале, июле 2016 г., не свидетельствует о сдаче этапа работ заказчику и возникновения обязательства по оплате. 

Представленные в дело копии заключений государственной экспертизы и накладные о передаче технической документации также не подтверждают выполнение и сдачу результата этапа работ заказчику в согласованном сторонами порядке до даты принятия к производству заявления о признании должника банкротом.

Согласно условиям представленных договоров результат работ – проектная документация, выполненная в соответствии с техническим заданием и другими условиями договора и получившая положительное заключение государственной экспертизы, а также согласованная со всеми заинтересованными организациями рабочая документация, разработанная на основании проектной документации (пункт 1.20 договора № 14-0907-1, пункт 1.16 договора  № 15-0109-2, пункт 1.16 договора № 15-2801-1).

Условиями указанных договоров предусмотрено поэтапное выполнение работ.

Согласно пункту 1.19 договора № 15-2801-1 (пункту 1.18 договора № 15-0109-2, пункту 1.23 договора № 14-0907-1) этап работ – оговоренный сторонами технически и технологически законченный объем работ, выделяемый в настоящем договоре. Приемка этапа работ осуществляется по акту приемки выполненного этапа работ.

Составление накладных о передаче технической документации не подтверждает сдачу этапа работ заказчику как технически и технологически законченного объема работ.

При этом из пунктов 5.2. договора № 14-0907-1, договора № 15-2801-1, договора № 15-0109-2 следует, что оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (этапов работ) на основании исполнительных смет, подтверждающих фактически выполненные работы, акта о приемке выполненных работ (услуг), оригинала счета, оформленного субподрядчиком на основании первичной учетной документации, счета-фактуры и накладной на переданную документацию.

Таким образом, стороны закрепили в договорах порядок сдачи этапов работ и оплаты этапа выполненных работ – после подписания акта о приемке выполненных работ (этапов работ). 

Согласно пункту 1.1. указанных договоров акт о приемке выполненных работ (этапа работ) – документ, оформленный субподрядчиком, проверенный и подписанный подрядчиком, подтверждающий выполнение этапа работ субподрядчиком. Сторонами акты о приемке этапов выполненных работ подписаны без замечаний. 

Подписание же итогового акта является основанием для окончательного расчета по договору (пункт 5.8. договоров). Также, условиями указанных договоров установлено, что итоговый акт приёмки выполненных работ – документ, подтверждающий выполнение субподрядчиком всех обязательств по договору, в том числе разработку и согласование проектной и рабочей документации, а также оказание установленных договором услуг, являющийся основанием для окончательного расчета по договору.

Составление накладных на передачу технической документации не подтверждает сдачу этапа работ как технически и технологически оконченного.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Исходя из условий договоров следует, что сдача технически и технологически оформленного этапа работ осуществляется путем подписания актов о приемке выполненных работ (этапов).

Таким образом, условиями договора предусмотрена поэтапная сдача работ и их оплата. При этом этапы выполненных работ оформлены актами сдачи-приемки работ.

Доводы истца о том, что обязательства ответчика по оплате возникли после подписания итогового акта также подлежат отклонению, как противоречащие условиям договоров.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в размере 30 931 978,58 руб. 

Государственная пошлина за рассмотрение исковых требований в размере 30 931 978,58 руб. составляет 177660 руб., истцом оплачено 188 964 руб. платёжными поручениями № 113 от 22.05.2018, № 114 от 23.05.2018, № 182 от 23.07.2018.

На основании статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 177 660 руб. судебных расходов на уплату государственной пошлины, истцу из бюджета 11 304 руб. государственной пошлины подлежит возврату.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Региональный проектно-строительные системы" (ИНН 

<

***>) 30931978,58 руб. основного долга, 177660 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Региональные проектно-строительные системы» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета на основании настоящего определения 11304  руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 22.05.2018 № 113.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.В. Сысоева