АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-7727/2024

г. Белгород

18 марта 2025 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Кобзевой В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) к ООО "ТомСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств, в судебном заседании участвуют представители:  

от истца: не явился, извещен надлежащим образом; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.  

Обязать ООО "ТомСтрой" в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента  

вступления в законную силу решения Арбитражного суда Белгородской области  

устранить недостатки и дефекты выполненных работ по договору от 05.03.2021 № 1 Зс/20  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» Алексеевского городского округа», а именно: - восстановить разрушенный пандус центрального входа (фасад, накрывочный  

камень, кирпичная кладка); - очистить окна (126 шт.) от монтажной пленки; 

- устранить трещины на фасаде здания и отслоение декоративного покрытия фасада; - устранить протекание кровли на 3 этаже основного здания около кабинета № 304;  

- устранить протекание кровли в помещении вентиляционной камеры на 2 этаже; 

- закрыть примыкание окна и стены герметизирующей лентой на кровле над  

помещением тренажерного зала; - восстановить кровельное покрытие на парапетах в 4-х местах (отслоение); - закрепить металлический парапет в 2-х местах; - заменить ливневую воронку над помещениями кладовой тренажерного зала; 

 - устранить повреждения внутренней отделки в помещении кладовой тренажерного  

зала в связи с протеканием кровли; 

- устранить следы протеканий около ливневой канализации в туалете подвала  

эвакуационного пункта. Взыскать с ООО "ТомСтрой" в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области. 

Судья Ю.Ю. Дробышев