Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

30 марта 2021 года                                      Дело № А40-246571/20-126-1765

Резолютивная часть решения объявлена                  23 марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен                            30 марта 2021 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь Остроушко В.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ФКР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>) 

к ООО "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОНЭКС" (141701, 

<

...> ВЛД 26, ЭТ/ПОМ 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2008, ИНН: 

<

***>) 

о взыскании неустойки 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1, доверенность от 12.12.2019 

от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ФКР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ООО "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОНЭКС" о взыскании неустойки по договору от 08.05.2019 №ПЗЛ-000223-19 за период с 14.10.2019 по 27.12.2019 в размере 2 215 761 руб. 45 коп.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела 08.05.2019 между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (Заказчик) и ООО «ТК «КОНЭКС» (Генподрядчик) заключен договор №ПЗЛ-000223-19 на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтов и по замене лифтов в следующих многоквартирных домах: 

<

...> пр-кт. Ленинский, д. 69, корп. 2, согласно которого Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему Договору) своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий 2 и оборудования выполнить весь комплекс работ по разработке проектной документации на замену лифтов и выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах на Объектах (далее «Работы»), по адресам, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу каждого Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по разработке проектной документации на замену лифтов. Акту приемки выполненных работ по замене лифта, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Генподрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ (далее по тексту - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Пунктом 3.1 Договора в редакции дополнительного соглашения от 09.09.2020 №1 цена Договора определяется на основании Сметы (Приложение № 4.1-4.31.), Адресного перечня (Приложение № 2), которым определена предельная стоимость выполнения работ по замене лифтов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.02.2015 №86-ПП с учетом процента снижения, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации на замену лифтов и по замене лифтов в многоквартирных домах по 31 адресу: ЗАО - 2; САО - 3; СВАО - 4; ЦАО - 6; ЮВАО - 5; ЮЗАО - 7; ЮАО - 4 (протокол №027300000011900454 от «19» апреля 2019 г.) составляет 57 418 509,46 руб. 

Согласно статье 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

По условиям пункта 4.1. Договора Генподрядчик обязуется выполнить Работы по Договору, как в целом, так и по отдельным Объектам работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Графиком продолжительности выполнения работ по замене лифтов (Приложение № 3 к настоящему Договору). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Генподрядчика о продлении сроков выполнения работ по Объекту (-ам), за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.

В соответствии с Адресным перечнем, графиком производства работ по замене лифтового оборудования и стоимости работ по замене лифтового оборудования и разработке проектной документации на замену лифтового оборудования (Приложение № 2 к Договору) в редакции дополнительного соглашения от 09.09.2020 №1 предусмотрены следующие сроки выполнения работ: 

- замена лифтов в многоквартирных домах по адресу: г. Москвы, ул. Красного Маяка, д. 8, корп. 1, ул. Островитянова, д. 41, корп. 1 в период с 11.09.2019 по 25.10.2019; 

- замена лифта в многоквартирном доме по адресу: ул. Красных Зорь, д. 41 в период с 12.08.2018 по 30.09.2019. 

- замена лифта в многоквартирном доме по адресу: пр-кт. Ленинский, д. 69, корп. 2 в период с 11.09.2019 по 30.10.2019.

По Актам открытия работ по Объектам от 12.08.2019 и 11.09.2019 по Договору Заказчик передал, а Генподрядчик принял Объекты для выполнения работ по замене лифтов. 

Пунктом 6.1.10. Договора предусмотрена обязанность Генподрядчика выполнить и сдать Работы в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать законченные работы по Актам приемки выполненных работ по разработке проектной документации на замену лифтов, по Актам приемки выполненных работ по замене лифтов. 

Пунктом 7.3. Договора закреплено условие, согласно которому в период проведения работ отдельно по каждому Объекту осуществляется приемка: 

- завершенных работ по каждому из элементов (системы) здания согласно проектной и сметной документации (работы принимаются комиссионно, составляется Акт приемки выполненных работ по элементу (системе) здания согласно проектной и сметной документации); 

- выполненных в полном объеме работ на Объекте (работы принимаются комиссионно, составляется Акт приемки выполненных работ по Объекту согласно проектной и сметной документации).

Согласно пунктам 7.11. и 7.12 Договора работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после комиссионной приемки выполненных в полном объеме работ на Объектах по Актам приемки выполненных работ по замене лифтов по адресам согласно Приложения № 2 к настоящему Договору и подписания Сторонами оформленных Актов приемки Объекта, Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), представления Генподрядчиком исполнительной документации. Приемка выполненных работ осуществляется на соответствие качества и установленного объема. При этом для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

В комиссию по приемке выполненных работ входят уполномоченные представители Заказчика, в том числе представитель строительного контроля. Генподрядчика, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, организации осуществляющей техническое обслуживание лифта, управы района города Москвы или префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (по территориальной принадлежности многоквартирного дома), собственников помещений многоквартирного дома), а также уполномоченный депутат. 

По результатам приемки работ комиссией оформляется Акт приемки выполненных работ по замене лифта (Приложение № 12 к настоящему договору) в количестве, необходимом для предоставления каждому члену комиссии.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства и условий Договора Генподрядчик выполнил работы по замене лифтов с нарушением сроков, предусмотренных Адресным перечнем, графиком производства работ по замене лифтового оборудования и стоимости работ по замене лифтового оборудования и разработке проектной документации на замену лифтового оборудования (Приложение № 2 к Договору) в редакции дополнительного соглашения №1 к Договору, что подтверждается Актами приемки объектов.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 12.4. Договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору), Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Графиком продолжительности выполнения работ по замене лифтов (Приложение № 3 к настоящему Договору), Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере: 

- 0,1% от стоимости работ по замене лифтов по каждому Объекту, за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 дней); 

- 0,2% от стоимости соответствующих работ по каждому Объекту, за каждый день просрочки (в случае просрочки продолжительностью свыше 10 дней). 

При этом, размер неустойки увеличивается до 0,2% начиная с 11-го дня просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

Истец просит взыскать начисленную неустойку, согласно представленного расчета, за период с 14.10.2019 по 27.12.2019 в размере 2 215 761 руб. 45 коп. в судебном порядке, поскольку направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Сумма неустойки судом проверена и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине в сумме 34 079 руб. 00 коп. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 330, ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд          

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОНЭКС" (141701, 

<

...> ВЛД 26, ЭТ/ПОМ 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 24.10.2008, ИНН: 

<

***>) в пользу ФОНДА КАПИТАЛЬЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ (129090, 

<

...>, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 

<

***>) 2 215 761 (два миллиона двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 45 коп. неустойки, а также 34 079 (тридцать четыре тысячи семьдесят девять) руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                  М.С. Новиков