Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-112374/2018

26 февраля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  21 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  26 февраля 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СК ОСНОВАНИЯ МОСТОВ" (адрес:  Россия 125212, г МОСКВА, г МОСКВА, б-р КРОНШТАДТСКИЙ 7А/2/13, ОГРН:  1157746583455);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГИДРОМОНТАЖ" (адрес:  Россия 196084, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ЗАОЗЁРНАЯ 1/Б, ОГРН:  1167847128382);

о взыскании 5 290 857 руб. 76 коп.

при участии

- от истца: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СК ОСНОВАНИЯ МОСТОВ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ООО "СПЕЦГИДРОМОНТАЖ" о взыскании о взыскании 5 290 857 руб. 76 коп., составляющих: 3 858 992 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 41 677 руб. 11 коп. неустойки за просрочку платежа за период с 27.02.2018 по 14.06.2018 на основании договора №34/16 от 08.08.2016, 1 263 807 руб. 86 коп. задолженности по оплате поставленного товара и 126 380 руб. 79 коп. неустойки за просрочку платежа за период с 19.07.2017 по 14.06.2018 на основании договора №91ПСТ/17 от 01.06.2017.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Истец заявил ходатайство о рассмотрении дела без его участия.

Судом установлено:

Между сторонами были заключены два договора №34/16 от 08.08.2016 и №91ПСТ/17 от 01.06.2017.

8 августа 2016 года между ООО «Спецгидромонтаж» - субсубподрядчик и ООО «СК Основания мостов» - субсубсубподрядчик был заключен договор субсубсубподряда №34/16, в соответствии с которым ответчик поручил, а истец обязался выполнить на свой риск, собственными и (или) по согласовании. С ответчиком привлеченными силами, работы по устройству буронабивных свай на Объекте «Путепровод через железную дорогу Витебского направления на км 6753+10 по адресу: г. Санкт-Петербург, км 6753+10, сдать результат работ ответчику, а ответчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренным вышеуказанным договором.

В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 договора, срок начала работ - 25 августа 2016 года, срок завершения работ - 25 ноября 2016 года. Срок выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

В соответствии с пунктом 6.1 договора в соответствии со сметным расчетом цена составляет 49 851 200 руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 7 604 420 руб. 34 коп.

В соответствии с пунктом 7.1 договора ответчик в течение 20 календарных дней после подписания договора обязался перечислить аванс в размере 2 000 000  руб. 00 коп., в том числе НДС - (18%) 305 084 руб. 75 коп. на основании полученного от истца счета. Авансовый платеж засчитывается пропорционально выплаченному авансу в счет каждого выполнения до полного погашения авансового платежа.

В соответствии с пунктом 11.1 истец вправе, за неисполнение ответчиком обязательств по оплате, начислить пени в размере 0,01% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 3% от цены договора.

14 февраля 2017 года между Истцом и Ответчиком было заключено дополнительное соглашение №1 к договору субсубсубподряда №34/16 от 08 августа 2016 года, в соответствии с которым стороны решили внести в договор следующие изменения:

 Цена Договора в соответствии со сметным расчетом составляет 50 921 600 руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 7 762 701 руб. 70 коп.

24 февраля 2017 года между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №2 к договору субсубсубподряда №34/16 от 08 августа 2016 года, в соответствии с которым стороны решили внести в договор следующие изменения:

Цена договора в соответствии со сметным расчетом составляет 22 241 600 руб. 00.коп., в том числе НДС (18%) 3 392 786 руб. 45 коп.

01 июня 2017 года между истцом и ответчиком было подписано Соглашение о расторжении Договора Субсубсубподряда №34/16 от 08.08.2016г.

На основании заключения Соглашения о расторжении договора от 01 июня 2017 года была проведена сверка объемов выполненных работ в соответствии с которой оплате подлежат следующие работы по проекту:

- Опора №4 - 8 (восемь) буронабивных свай диаметром 1500мм;

- Опора №5 - 8 (восемь) буронабивных свай диаметром 1500мм;

- Опора №6 - 10 (десять) буронабивных свай диаметром 1500мм;

Общество с ограниченной ответственностью «Спецгидромонтаж» обязалось произвести оплату выполненных работ по Договору, в том числе, в течение 3-х дней произвести оплату в размере 2 500 000 руб. 00 коп. согласно дополнительному соглашению №1 к договору Субсубсубподряда №34/16 от 08 августа 2016 года.

Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ в наш адрес не поступало.

На момент заключения Соглашения о расторжении договора Обществом с ограниченной ответственностью «Спецгидромонтаж» была произведена частичная оплата выполненных работ, однако в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации до настоящего времени оплата в полном объеме так и не была произведена.

Согласно п. 11.1 Договора Субсубсубподрядчик вправе, за неисполнение Субсубподрядчиком обязательств по оплате начислить пени в размере 0,01% от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 3% от Цены договора.

На момент составления искового заявление за Обществом с ограниченной ответственностью «Спецгидромонтаж» числится задолженность в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СК Основания мостов» в размере 3 900 669 руб. 11 коп., из которых 3 858 992 руб. 00 коп. - сумма основного долга и 41 677 руб. 11 коп. - пени по договору из расчета на 14.06.18.

01 июня 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СК Основания мостов» - поставщик и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецгидромонтаж» - покупатель был подписан договор поставки №91ПСТ/17, в соответствии с которым ООО «СК Основания мостов» обязалось осуществить поставку строительных материалов и/или конструкций и передать относящиеся к нему документы в собственность ООО «Спецгидромонтаж», а ООО «Спецгидромонтаж» в свою очередь обязалось в обеспечить надлежащую приемку товара и оплатить на условиях, установленных договором.

В соответствии с п.6.2 договора ООО «Спецгидромонтаж» обязалось произвести 100% предоплату на основании предъявленного счета.

В соответствии с п.7.1 договора в случае просрочки оплаты товара ООО «СК Основания мостов» вправе потребовать от ООО «Спецгидромонтаж» уплатить неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

19 июня 2017 года ООО «СК Основания мостов» представило ООО «Спецгидромонтаж» счет-фактуру №14 на сумму 1 263 807 руб. 86 коп.

На данный момент за ООО «Спецгидромонтаж» числится задолженность по договору поставки №91ПСТ/17от 01.06.2017г. в размере 1 390 188 руб. 65 коп., из которых 1 263 807 руб. 86 коп. - сумма основного долга, 126 380 руб. 79 коп. - пени по договору из расчета на 14.06.18.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦГИДРОМОНТАЖ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СК ОСНОВАНИЯ МОСТОВ" 5 290 857 руб. 76 коп., из них: 3 858 992 руб. 00 коп. основного долга и 41 677 руб. 11 коп. неустойки по договору №34/16 от 08.08.2016, 1 263 807 руб. 86 коп. основного долга и 126 380 руб. 79 коп. неустойки по договору №91ПСТ/17 от 01.06.2017, а также 50 225 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.