АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

01 июня 2022 года

Дело № А33-4677/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2022 года.

В полном объеме решение изготовлено 01 июня 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Горбатовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами топливно-энергетического комплекса" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности, 

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, действующей на основании доверенности от 01.06.2021 г. (сроком действия на 1 год), личность удостоверена паспортом, (юридическое образование подтверждено дипломом),

от ответчика: ФИО2, действующей на основании доверенности № 183 от 01.10.2021 г. (сроком действия по 01.10.2023 г.), личность удостоверена паспортом, (юридическое образование подтверждено дипломом),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, с использованием средств системы аудиозаписи, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью " Центр управления проектами топливно-энергетического комплекса " (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (далее – ответчик) о взыскании 13 573 758,26 рублей задолженности (с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ).

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 03.03.2022  возбуждено производство по делу. Истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. 

Определением от 26.04.2022 судебное разбирательство по делу отложено судом на 25.05.2022.

25.05.2022 в судебное заседание явились представители сторон.

От ответчика поступили письменные пояснения на исковое заявление с учетом уточнения иска. Документы в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщен к материалам дела.

От истца поступило заявление об уточнении исковых требований,  согласно которому истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 17 503 535,59 рублей.  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение принято судом. Дело рассматривается с учетом уточнения. 

Суд заслушал объяснения лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Решением  Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2020 по делу № А40-195413/19-4-250Б  ООО «ЦУП ТЭК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) признано несостоятельным (банкротом); в отношении ООО «ЦУП ТЭК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.01.2022 по делу № А40-195413/19-4-250Б срок конкурсного производства в отношении должника ООО «ЦУП ТЭК» продлен на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 04.07.2022.

Как следует из иска, в ходе осуществления конкурсным управляющим своих полномочий, предусмотренных Законом о банкротстве, установлено, что в бухгалтерском учете истца за ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" числится задолженность в размере 17 503 535,59 рублей. 

В обоснование наличия у ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" задолженности перед ООО «ЦУП ТЭК» истец ссылается на следующие обстоятельства.

1) Между ООО «ЦУП ТЭК» (подрядчик) и ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) заключен договор от 19.06.2018 № В042118/0811Д (далее – договор 1), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Вертолетная площадка в районе ВЖК» (обустройство)», в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п. 2.1 договора 1)

Согласно п. 3.1 договора 1 (в редакции дополнительного соглашения № 4 от 14.03.2019 к договору) цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 25 878 991,20 руб., в т.ч. НДС (20%) 4 313 165,20 руб.

В соответствии с п. 4.1 договора 1 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ порядке, установленном ст. 6 договора с учетом требований приложения № 10 к договору.

Согласно п. 4.2 договора 1 заказчик производит гарантийные удержания в размере 10 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2 договора.

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии со ст. 6 договора актов сдачи-приемки (п. 4.4 договора).

Пунктом 6.2.4 договора 1 предусмотрено, что приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В силу п. 22.1 договора 1 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в проектной и рабочей документации показателей  и возможность эксплуатации объекта, а также за свой счет выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.3 договора 1 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 3 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст. 22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (п. 23.1.1 договора 1). 

В силу п. 23.2.1 договора 1 заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков  и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком  у заказчика в порядке, указанном в приложении № 6.

Согласно п. 23.2.2 договора 1 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст. 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением №6.

Из пункта 23.2.3 договора 1 следует, что в случае непредоставления гарантии, указанной в ст. 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в ст. 4.4 договора.

Истцом в материалы дела представлены: дополнительное соглашение № 1 от 08.08.2018 к договору, дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2018 к договору; дополнительное соглашение № 4 от 14.03.2019 к договору, дополнительное соглашение № 5 от 25.05.2019 к договору; дополнительное соглашение № 6 от 28.08.2019 к договору; дополнительное соглашение № 7 от 10.10.2019 к договору.

В подтверждение факта выполнения работ по договору 1 истцом в материалы дела представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.04.2019 на сумму 422 865,38 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.04.2019 на сумму 469 850,42 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 25.06.2019 на сумму 843 011,99 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) №2 от 25.06.2019 на сумму 30 342,00 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 25.06.2019 на сумму 906 337,99 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 25.07.2019 на сумму 341 212,25 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 4 от 25.07.2019 на сумму 58 765,39 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 5 от 25.07.2019 на сумму 217 023,61 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 6 от 25.07.2019 на сумму 28 449,91 руб.,  акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 7 от 25.07.2019 на сумму 74 885,81 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 25.08.2019 на сумму 2 430 624,19 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 8 от 25.08.2019 на сумму 246 940,64 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 9 от 25.08.2019 на сумму 2 453 752,90 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 25.09.2019 на сумму 4 477 840,90 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 10 от 25.09.2019 на сумму 455 986,56 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 11 от 25.09.2019 на сумму 2 491 520,76 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 12 от 25.09.2019 на сумму 32 796,10 руб.,  акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 13 от 25.09.2019  на сумму 60 261,30 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 14 от 25.09.2019 на сумму 15 448,58 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2)  № 15 от 25.09.2019 на сумму 1 919 365,48 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 25.11.2019 на сумму 3 031 175,12 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 16 от 25.11.2019 на сумму 3 367 972,36 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 7 от 25.12.2019 на сумму 349 907,74 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) №  17 от 25.12.2019 на сумму 137 595,77 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 18 от 25.12.2019 на сумму 191 190,61 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 8 от 25.01.2020 на сумму 389 390,04 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 19 от 25.01.2020 на сумму 121 119,17 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2)  № 20 от 25.01.2020 на сумму 311 536,43 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 9 от 25.02.2020 на сумму 1 519 702,23 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 21 от 25.02.2020 на сумму 1 516 807,75 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 22 от 25.02.2020 на сумму 138 916,28 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 23 от 25.02.2020 на сумму 6 701,00 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 24 от 25.02.2020 на сумму 7 831,00 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 25 от 25.02.2020 на сумму 15 395,59 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 10 от 25.03.2020 на сумму 751 563,59 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 26 от 25.03.2020 на сумму 116 225,24 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 27 от 25.03.2020 на сумму 50 911,49 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 28 от 25.03.2020 на сумму 537 479,53 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 29 от 25.03.2020 на сумму 130 454,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 11 от 25.04.2020 на сумму 430 019,29 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 30 от 25.04.2020 на сумму 121 696,80 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 31 от 25.04.2020 на сумму 288 640,80 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 32 от 25.04.2020 на сумму 67 461,61 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 12 от 25.05.2020 на сумму 110 668,47 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 33 от 25.05.2020 на сумму 93 939,60 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 34 от 25.05.2020 на сумму 22 017,60 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 35 от 25.05.2020 на сумму 451,20 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 36 от 25.05.2020 на сумму 6 556,57 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 13 от 25.06.2020 на сумму 879 814,28 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 37 от 25.06.2020 на сумму 39 570,00 руб.,  акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 38 от 25.06.2020 на сумму 4 038,42 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 39 от 25.06.2020 на сумму  933 963,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 14 от 25.07.2020 на сумму 146 496,86 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 40 от 161 007,48 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 41 от 25.07.2020 на сумму 1 766,81 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 15 от 25.08.2020 на сумму 45 985,10 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 42 от 25.08.2020 на сумму 45 295,20 руб., акт о приемке выполненных работ и затрат (КС-2) № 43 от 25.08.2020 на сумму 5 799,36 руб.

К оплате истцом выставлены счета-фактуры: счет-фактура № 27/1 от 25.06.2019 на сумму 936 679,99 руб., счет-фактура № 31/1 от 25.07.2019 на сумму 379 124,72 руб., счет-фактура № 38/1 от 25.09.2019 на сумму 4 975 378,78 руб., счет-фактура № 35/1 от 26.08.2019 на сумму 2 700 693,54 руб., счет-фактура № 46/1 от 25.11.2019 на сумму 3 367 972,36 руб., счет-фактура № 51/1 от 25.12.2019 на сумму 388 786,38 руб., счет-фактура № 2/1 от 25.01.2020 на сумму 432 655,60 руб., счет-фактура № 4/1 от 25.02.2020 на сумму 1 688 558,03 руб., счет-фактура № 6/1 от 25.03.2020 на сумму 835 070,66 руб., счет-фактура № 9/1 от 25.04.2020 на сумму 477 799,21 руб., счет-фактура № 14/1 от 25.05.2020 на сумму 122 964,97 руб., счет-фактура № 15/1 от 25.06.2020 на сумму 977 571,42 руб., счет-фактура № 18/1 от 25.07.2020 на сумму 162 774,29  руб., счет-фактура № 21/1 от 25.08.2020 на сумму 51 094,56 руб., 

В письме исх.№ 217-цуп от 20.11.2020, направленном в адрес ответчика, истец просил оплатить задолженность в размере 1 791 588,04 руб., возникшую из договора подряда №В042118/0811Д от 19.06.2018.

Письмом от 07.12.2020 № 22486 ответчик отклонил  требование истца об оплате указанной задолженности.

В письме от 28.12.2020 № 24121 ответчик уведомил истца об одностороннем расторжении договора, приложив ведомость № 1 от 14.09.2019 дефектов и замечаний, выявленных комиссией при определении готовности объекта к вводу в эксплуатацию. 

Письмом исх.№ 27/01 от 27.01.2021 ООО «ЦУП ТЭК» сообщило ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», что работы были приостановлены и не могут быть продолжены по причине отсутствия технического решения по демонтажу-монтажу служебно-пассажирского здания. Данный вопрос находится в зоне ответственности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». До настоящего времени вопрос не решен. А также ООО «ЦУП ТЭК» просило расторгнуть договор № 042118/0811Д от 19.06.2018 по соглашению сторон с выплатой гарантийных удержаний.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 1495 от 13.04.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0811Д от 19.06.2018 по состоянию на 31.03.2021 составляет 1 716 697,50 руб. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 3006 от 09.07.2021, подписанному ответчиком, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0811Д от 19.06.2018 по состоянию на 30.06.2021 составляет 1 716 697,50 руб. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 336 от 13.01.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0811Д от 19.06.2018 по состоянию на 31.12.2021 составляет 1 716 697,50 руб. 

На основании изложенного, истец числит за ответчиком задолженность по договору № В042118/0811Д от 19.06.2018 в размере 1 716 697,50 руб.

2) Между ООО «ЦУП ТЭК» (принципал) и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (агент) заключен агентский договор № В041018/0128Д от 29.01.2018 (далее - договор 2), по условиям которого агент обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет принципала указанные в п. 1.2 договора юридические и иные действия  с целью предоставления принципалу права проезда транспортных средств принципала  по вдольтрассовым и технологическим проездам, принадлежащим ООО «Транснефть-Восток» (объект) и состоящих из участка проезда (тарифных участков), указанных в приложении № 1 к договору (п. 1.1 договора 2).

В силу п. 1.2 договора 2 агент обязуется совершить следующие действия: 

- заключить договоры оказания услуг на предоставления права пользования объектом с владельцем – ООО «Транснефть-Восток»;

- оформить документы, дающие право на проезд транспортных средств принципала. Получить у ООО «Транснефть-Восток» разрешение на проезд установленной формы.

Согласно п. 5.1 договора возмещение агенту суммы расходов во исполнение поручения, предусмотренного п. 1.1 договора, производится путем перечисления принципалом денежных средств в рублях РФ на расчетный счет агента, указанный в разделе 14. Агент организует оказание услуг на условиях 100% предоплаты и перевыставляет принципалу все фактически понесенные им в связи с выполнением поручения расходы.

В обоснование заявленных требований истцом представлены копии страниц выписки по расчетному счету.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 3172 от 16.07.2020, подписанному сторонами, задолженность  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018 по состоянию на 30.06.2020 составляет 156 211,45 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 4231 от 12.10.2020, подписанному ответчиком, задолженность  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018 по состоянию на 30.09.2020 составляет 128 073,91 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 5252 от 12.11.2020, подписанному ответчиком, задолженность  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018 по состоянию на 31.10.2020 составляет 128 073,91 руб.

Согласно акту сверки взаимных расчетов № 1491 от 13.04.2021, подписанному ответчиком, задолженность  ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018 по состоянию на 31.03.2021 составляет 128 073,91 руб.

Письмом от 09.04.2021 № 6823 ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» уведомило ООО «ЦУП ТЭК» о намерении расторгнуть договор № В041018/0128Д от 29.01.2018 и просило предоставить реквизиты для погашения задолженности.

Письмом исх.№ 74-цуп от 21.05.2021 обществом «ЦУП ТЭК» направлены реквизиты для оплаты задолженности.

Письмом исх. № 152-цуп от 07.10.2021 обществом «ЦУП ТЭК» повторно направлены реквизиты для оплаты задолженности.

Ссылаясь на отсутствие оплаты по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018, истец, согласно исковому заявлению, числит за ответчиком задолженность  в размере 128 073,91 руб.

В ходе рассмотрения дела ответчиком оплачена задолженность по  договору №В041018/0128Д от 29.01.2018 в размере 128 073,91 руб. платежными поручениями № 7205 от 17.03.2022 № 7209 от 24.03.2022.

С учетом оплаты истец уточнил исковые требования. 

3) Между ООО «ЦУП ТЭК» (подрядчик) и ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) заключен договор от 02.03.2018 № В042118/0293Д (далее – договор 3), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Водовод высокого давления «ЦПС-Куст 4» (расчистка от леса)», в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п. 2.1 договора 3 в редакции дополнительного соглашения № 9 от 27.04.2021 к договору).

Согласно графику производства работ, являющемуся приложением № 4 к дополнительному соглашению № 9 от 27.04.2021, приложением № 4 к договору № В042118/0293Д от 02.03.2018, техническому заданию, являющемуся приложением № 5 к договору № В042118/0293Д от 02.03.2018, окончательный срок выполнения работ – 11.07.2020.

Согласно п. 3.1 договора 3 (в редакции дополнительного соглашения № 9 от 27.04.2021 к договору 3) цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 37 203 224,53 руб., в т.ч. НДС  5 921 680,07 руб.

В соответствии с п. 4.1 договора 3 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ в порядке, установленном ст. 6 договора с учетом требований приложения № 10 к договору.

Согласно п. 4.2 договора 3 заказчик производит гарантийные удержания в размере 10% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2 договора.

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии со ст. 6 договора актов сдачи-приемки (п. 4.4 договора).

Пунктом 6.2.4 договора 3 предусмотрено, что приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В силу п. 22.1 договора 3 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта, а также за свой счет выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.3 договора 3 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 3 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст. 22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (п. 23.1.1 договора 3). 

В силу п. 23.2.1 договора 3 заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком  у заказчика в порядке, указанном п приложении № 6.

Согласно п. 23.2.2 договора 3 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст. 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением №6.

Из пункта 23.2.3 договора 1 следует, что в случае непредоставления гарантии, указанной в ст. 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в ст. 4.4 договора.

Истцом в материалы дела представлены: дополнительное соглашение № 1 от 15.05.2018 к договору, дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2018 к договору, дополнительное соглашение № 3 от 26.11.2018 к договору, дополнительное соглашение № 4 от 22.04.2019 к договору; дополнительное соглашение № 5 от 25.05.2019 к договору; дополнительное соглашение № 6 от 28.08.2019 к договору, дополнительное соглашение № 7 от 10.10.2019 к договору, дополнительное соглашение № 9 от 27.04.2021 к договору.

В соответствии с приложением №2 к дополнительному соглашению №9 от 27.04.2021 возврат резерва в размере 3 720 322 ,45 руб. осуществляется в июне 2022 года.

В подтверждение факта выполнения работ по договору 3 истцом в материалы дела представлены:  справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.06.2018 на сумму 2 228 896,93 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.06.2018 на сумму 2 476 552,14 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 25.07.2018 на сумму 6 711 887,79 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 25.07.2018 на сумму 6 909 445,16 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 25.07.2018 на сумму 548 207,94 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 25.09.2018 на сумму 8 828 005,63 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 4 от 25.09.2018 на сумму 8 834 082,98 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 25.09.2018 на сумму 974 812,16 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 25.02.2019 на сумму 5 748 472,80 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 25.02.2019 на сумму 6 387 192,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 25.03.2019 на сумму 3 229 157,88 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 25.03.2019 на сумму 3 587 953,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 25.04.2019 на сумму 1 850 565,96 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 25.04.2019 на сумму 2 056 184,40 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 7 от 25.05.2019 на сумму 2 317 471,56 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 25.05.2019 на сумму 2 574 968,40 руб., 

К оплате истцом выставлены счета-фактуры: счет-фактура № 50/1 от 25.06.2018 на сумму 2 476 552,14 руб., счет-фактура № 64/1 от 25.07.2018 на сумму 7 457 653,10 руб., счет-фактура № 88/1 от 25.09.2018 на сумму 9 808 895,14 руб., счет-фактура № 3/1 от 25.02.2019 на сумму 6 387 192,00 руб., счет-фактура № 7/1 от 25.03.2019 на сумму 3 587 953,20 руб., счет-фактура № 13/1 от 25.04.2019 на сумму 2 056 184,40 руб., счет-фактура № 18/1 от 27.05.2019 на сумму 2 574 968,40 руб., счет-фактура № 5/1 от 25.03.2020 на сумму 258 038,40 руб.

Согласно представленному акту сверку взаимных расчетов № 335 от 13.01.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0293Д от 02.03.2018 по состоянию на 31.12.2020 составляет 3 720 322,45 руб.

Согласно представленному акту сверку  взаимных расчетов № 1494 от 13.04.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0293Д от 02.03.2018 по состоянию на 31.03.2021 составляет 3 720 322,45 руб.

Согласно представленному акту сверку  взаимных расчетов № 3005 от 09.07.2021, подписанному ответчиком, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по договору № В042118/0293Д от 02.03.2018 по состоянию на 30.06.2021 составляет 3 720 322,45 руб.

Письмом исх.№ 74-цуп от 21.05.2021 истцом направлены ответчику банковские реквизиты для оплаты задолженности по договору.

Письмом исх.№ 152-цуп от 07.10.2021 истцом повторно направлены ответчику банковские реквизиты для оплаты задолженности по договору.

В письме исх.№157-цуп от 15.10.2021 истец повторно просил оплатить имеющуюся задолженность.

Из иска следует, что указанная задолженность ответчиком не погашена.

На основании изложенного, истец числит за ответчиком задолженность по договору №В042118/0293Д  от 02.03.2018 в размере 3 720 322,45 руб.

4) Между ООО «ЦУП ТЭК» (подрядчик) и ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) заключен договор от 20.02.2018 № В042118/0247Д (далее – договор 4), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта «Водовод «Водозабор – ЦПС – ВЖК, ОБП, ремонтно-эксплуатационная база сервисных предприятий», в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п. 2.1 договора 4).

Согласно п. 3.1 договора 4 (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 19.11.2018 к договору) цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 148 022 216,08 руб., в т.ч. НДС (18%) 22 579 660,08 руб.

В соответствии с п. 4.1 договора 4 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ порядке, установленном ст. 6 договора с учетом требований приложения № 10 к договору.

Согласно п. 4.2 договора 4 заказчик производит гарантийные удержания в размере 10% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2 договора.

В силу п. 4.4 договора 4 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 10.07.2018 к договору) оплата выполненных работ производится заказчиком:  

- с 20.02.2018 по 30.06.2018 в срок не ранее 45 дней, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии со ст. 6 договора актов сдачи-приемки;

- с 01.07.2018 в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии со ст. 6 договора актов сдачи-приемки.

В силу п. 5.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 19.11.2018 к договору) срок окончания выполнения работ 25.02.2019.

Пунктом 6.2.4 договора 4 предусмотрено, что приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В силу п. 22.1 договора 4 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта, а также за свой счет безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.3 договора 4 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 3 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст. 22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (п. 23.1.1 договора 4). 

В силу п. 23.2.1 договора 4 заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком  у заказчика в порядке, указанном в приложении № 6.

Согласно п. 23.2.2 договора 4 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст. 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением №6.

Из пункта 23.2.3 договора 4 следует, что в случае непредоставления гарантии, указанной в ст. 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в ст. 4.4 договора.

Истцом в материалы дела представлены: дополнительное соглашение № 1 от 10.07.2018 к договору, дополнительное соглашение № 2 от 10.10.2018 к договору, дополнительное соглашение  № 3 от 19.11.2018 к договору, дополнительное соглашение № 4 от 26.11.2018 к договору, дополнительное соглашение № 5 от 20.05.2019 к договору, дополнительное соглашение № 6 от 28.08.2019 к  договору, дополнительное соглашение № 7  от 10.10.2019 к договору, дополнительное соглашение № 8 от 01.06.2020 к договору.

В подтверждение факта выполнения работ по договору 4 истцом в материалы дела представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 25.05.2018 на сумму 1 584 477,45 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.05.2018 на сумму 1 760 530,50 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 2 от 25.06.2018 на сумму 228 974,63 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 25.06.2018 на сумму 254 416,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 3 от 25.07.2018 на сумму 23 921 722,88 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3 от 25.07.2018 на сумму 26 549 571,41 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 3-1 от 25.07.2018 на сумму 30 120,68 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 4 от 25.08.2018 на сумму 2 781 489,46 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5 от 25.08.2018 на сумму 3 084 017,27 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 5.1 от 25.08.2018 на сумму 6 526,58 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 5 от 25.09.2018 на сумму 4 693 645,74 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 25.09.2018 на сумму 5 215 161,93 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 6 от 25.10.2018 на сумму 4 501 661,24 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 6 от 25.10.2018 на сумму 5 001 845,82 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 7 от 25.11.2018 на сумму 3 905 929,23 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 7 от 25.11.2018 на сумму 4 339 921,37 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 8 от 25.12.2018 на сумму 4 076 198,60 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 8 от 25.12.2018 на сумму 4 529 109,56 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 9 от 25.02.2019 на сумму 5 435 398,08 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 9 от 25.02.2019 на сумму 1 218 321,60 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 10 от 25.02.2019 на сумму 4 821 009,60 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 10 от 25.03.2019 на сумму 10 450 568,16 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 11 от 25.03.2019 на сумму 6 138 148,80 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 12 от 25.03.2019 на сумму 5 473 593,60 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 11 от 25.04.2019 на сумму 5 848 117,07 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 13 от 25.04.2019 на сумму 937 385,03 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 14 от 25.04.2019 на сумму 455 296,28 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 15 от 25.04.2019 на сумму 1 375 511,42 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 16 от 25.04.2019 на сумму 3 729 715,13 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 12 от 25.05.2019 на сумму 12 613 992,99 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 17 от 25.05.2019 на сумму 7 760 393,90 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 18 от 25.05.2019 на сумму 1 038 335,28 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 25.05.2019 на сумму 405 802,59 руб.,  акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 20 от 25.05.2019 на сумму 1 849 610,00 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 21 от 25.05.2019 на сумму 2 961 406,00 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 13 от 25.06.2019 на сумму 5 629 933,76 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 22 от 25.06.2019 на сумму 4 460 603,20 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 23 от 25.06.2019 на сумму 439 628,17 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 24 от 25.06.2019 на сумму 940 779,02 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 25 от 25.06.2019 на сумму 414 471,56 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 14 от 25.07.2019 на сумму 2 222 374,81 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 26 от 25.07.2019 на сумму 327 905,18 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 27 от 25.07.2019 на сумму 771 632,63 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 28 от 25.07.2019 на сумму 648 702,64 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 29 от 25.07.2019 на сумму 317 573,66 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 30 от 25.07.2019 на сумму 403 491,26 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 15 от 25.08.2019 на сумму 4 555 853,51 руб.,  акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 31 от 25.08.2019 на сумму 2 439 908,60 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 32 от 25.08.2019 на сумму 2 622 150,85 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 16 от 25.09.2019 на сумму 3 250 860,05 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 33 от 25.09.2019 на сумму 1 047 085,45 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 34 от 25.09.2019 на сумму 2 564 981,27 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 17 от 25.10.2019 на сумму 3 305 396,72 руб.,  акт о приемке выполненных работ (КС-2) №35 от 25.10.2019 на сумму 116 859,59 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 36 от 25.10.2019 на сумму 616 146,00 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 37 от 25.10.2019 на сумму 26 070,88 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 38 от 25.10.2019 на сумму 65 427,18 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 39 от 25.10.2019 на сумму 2 350 232,76 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 40 от 25.10.2019 на сумму  269 325,42 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 41 от 25.10.2019 на сумму 228 601,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 26 от 25.07.2020 на сумму 7 251,06 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 63 от 25.07.2020 на сумму 8 056,73 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 25 от 25.06.2020 на сумму 195 860,92 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 62 от 25.06.2020 на сумму 217 623,25 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 24 от 25.05.2020 на сумму 497 511,28 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 61 от 552 790,31 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 23 от 25.04.2020 на сумму 1 538 019,89 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 56 от 25.04.2020 на сумму 1 327 546,80 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 57 от 25.04.2020 на сумму 171 697,20 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 58 от 25.04.2020 на сумму 10 049,10 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 59 от 25.04.2020 на сумму  199 308,29 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 60 от 25.04.2020 на сумму 309,6 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 22 от 25.03.2020 на сумму 307 654,78 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 55 от 25.03.2020 на сумму  341 838,65 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 21 от 25.02.2020 на сумму 469 934,85 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 52 от 25.02.2020 на сумму 217 317,60 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 53 от 25.02.2020 на сумму 5 869,80 руб., реестр распределения вахтовых затрат по КС-2 № 53 от 25.02.2020 на сумму 4 891,50 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 54 от 25.02.2020 на сумму 298 962,43 руб.,  реестр распределения вахтовых затрат по КС-2 № 54 от 25.02.2020 на сумму 249 135,36 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 20 от 25.01.2020 на сумму 1 039 595,94 руб., реестр актов выполненных работ КС-2 за период 26.12.2019-25.01.2020 на сумму 1 155 106,60 руб.,  акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 51 от 25.01.2020 на сумму 111 021,40 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 50 от 25.01.2020 на сумму 1 044 085,20 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 19 от 25.12.2019 на сумму 773 954,64 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 47 от 25.12.2019 на сумму 378 226,63 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 48 от 25.12.2019 на сумму 200 289,54 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 49 от 25.12.2019 на сумму 281 433,43 руб., справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 18 от 25.11.2019 на сумму 5 351 919,93 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 42 от 25.11.2019 на сумму 355 200,35 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 43 от 25.11.2019 на сумму 2 724 607,84 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 44 от 25.11.2019 на сумму 2 666 357,96 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 45 от 25.11.2019 на сумму 68 149,30 руб., акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 46 от 25.11.2019 на сумму 132 262,26 руб.

К оплате истцом выставлены счета-фактуры: счет-фактура № 42/1 от 25.05.2018 на сумму 1 760 530,50 руб., счет-фактура № 52/1 от 25.06.2018 на сумму 254 416,26 руб., счет-фактура № 62/1 от 25.07.2018 на сумму 26 579 692,09 руб.,  счет-фактура № 85/1 от 25.08.2018 на сумму 3 090 543,85 руб., счет-фактура № 89/1 от 25.09.2018 на сумму 5 215 161,93 руб., счет-фактура № 99/1 от 25.10.2018 на сумму 5 001 845,82 руб., счет-фактура № 111/1 от 25.11.2018 на сумму 4 339 921,37 руб., счет-фактура № 115/1 от 25.12.2018 на сумму 4 529 109,56 руб.,  счет-фактура № 4/1 от 25.02.2019 на сумму 6 039 331,20 руб., счет-фактура № 6/1 от 25.03.2019 на сумму 11 611 742,40 руб., счет-фактура № 14/1 от 25.04.2019 на сумму 6 497 907,86 руб.,  счет-фактура № 19/1 от 27.05.2019 на сумму 14 015 547,77 руб., счет-фактура № 26/1 от 25.06.2019 на сумму 6 255 481,96 руб.,  счет-фактура № 30/1 от 25.07.2019 на сумму 2 469 305,35 руб., счет-фактура № 34/1 от 26.08.2019 на сумму 5 062 059,46 руб., счет-фактура № 37/1 от 25.09.2019 на сумму  3 612 066,72 руб., счет-фактура № 45/1 от 25.10.2019 на сумму 3 672 663,02 руб.,  счет-фактура № 19/1 от 25.07.2020 на сумму 8 056,73 руб., счет-фактура № 16/1 от 25.06.2020 на сумму 217 623,25 руб., счет-фактура № 13/1 от 25.05.2020 на сумму 552 790,31 руб., счет-фактура № 10/1 от 25.04.2020 на сумму 1 708 910,99 руб., счет-фактура № 7/1 от 25.03.2020 на сумму  341 838,65 руб., счет-фактура № 3/1 от 25.02.2020 на сумму 522 149,83 руб., счет-фактура № 1/1 от 25.01.2020 на сумму 1 155 106,60 руб., счет-фактура № 50/1 от 25.12.2019 на сумму 859 949,60 руб., счет-фактура  № 47/1 от 25.11.2019 на сумму 5 946 577,70 руб.

Письмом исх. № 214-цуп от 20.11.2020 истец просил ответчика оплатить задолженность по договору № В042118/0247Д в размере 12 132 033,11 руб.

Письмом от 09.12.2020 № 22613 ответчик отклонил требование истца об оплате.

Письмом от 28.12.2020 № 24121 ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» уведомило истца об одностороннем расторжении договора, приложив ведомость № 1 от 14.09.2019 дефектов и замечаний, выявленных комиссией при определении готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

В письме исх.№ 27/01 от 27.01.2021 ООО «ЦУП ТЭК» сообщило ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» о том, что все замечания, кроме п.№ 3 устранены, ПНР выполнены в полном объеме, работы по пункту 3 выполнены быть не могут, так как датчики, запрошенные подрядчиком письмом исх.№ 0606-К от 07.11.2018, для монтажа температурных датчиков заказчиком выданы не были, в связи с чем, по данному пункту работы были приостановлены.  Указанным письмом истец также просил расторгнуть договор № 042118/0247Д по соглашению сторон с выплатой гарантийных удержаний.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 333 от 13.01.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 31.12.2020 составляет 12 052 033,11 руб.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 1492 от 13.04.2021, подписанному сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 31.03.2021 составляет 12 052 033,11 руб.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 3003 от 09.07.2021, подписанному ответчиком, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 30.06.2021 составляет 12 052 033,11 руб.

Письмом исх.№ 152-цуп от 07.10.2021 истцом направлены ответчику банковские реквизиты для оплаты задолженности по договору.

В письме исх.№157-цуп от 15.10.2021 истец повторно просил оплатить имеющуюся задолженность.

Из иска следует, что указанная задолженность ответчиком не погашена.

На основании изложенного, истец числит за ответчиком задолженность по договору №В042118/0247Д  от 02.03.2018 в размере 12 052 033,11 руб.

5) Между ООО «ЦУП ТЭК» (подрядчик) и ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (заказчик) заключен договор от 20.02.2018 № В042118/0249Д (далее – договор 5), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Водовод высокого давления «ЦПС-Куст 4», в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его (п. 2.1 договора 5).

Согласно п. 3.1 договора 5 цена договора в соответствии с расчетом цены договора (приложение № 2) не превысит 149 584 324,86 руб., в т.ч. НДС (18%) 22 817 947,86 руб.

В соответствии с п. 4.1 договора 5 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов, надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст. 13, и только после приемки работ порядке, установленном ст. 6 договора с учетом требований приложения № 10 к договору.

Согласно п. 4.2 договора 5 заказчик производит гарантийные удержания в размере 10 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2 договора.

Оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст. 13 договора и подписания в соответствии со ст. 6 договора актов сдачи-приемки (п. 4.4 договора 5).

Пунктом 6.2.4 договора 5 предусмотрено, что приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В силу п. 22.1 договора 5 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в проектной и рабочей документации показателей  и возможность эксплуатации объекта, а также за свой счет выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.3 договора 5 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 3 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст. 22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (п. 23.1.1 договора 5). 

В силу п. 23.2.1 договора 5 заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков  и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком  у заказчика в порядке, указанном в приложении № 6.

Согласно п. 23.2.2 договора 5 зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст. 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением №6.

Из пункта 23.2.3 договора 5 следует, что в случае непредоставления гарантии, указанной в ст. 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в ст. 4.4 договора.

Истцом в материалы дела представлено дополнительное соглашение № от 10.10.2018 к договору. 

В подтверждение факта выполнения работ по договору 5 истцом в материалы дела представлены: справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.01.2019 на сумму 130 342,79 руб., акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.01.2019 на сумму 140 535,44 руб.

К оплате истцом выставлен счет-фактура № 1/1 от 25.01.2019 на сумму 144 825,32 руб.

Письмом исх.№ 215-цуп от 20.11.2020 истец просил ответчика оплатить задолженность по договору подряда № В042118/0249Д от 20.02.2018.

Письмом от 07.12.2020 № 22484 ответчик отклонил требование истца об оплате.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 334 от 13.01.2021, подписанному  сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 31.12.2020 составляет 14 482,53 руб.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 1493 от 13.04.2021, подписанному  сторонами, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 31.03.2021 составляет 14 482,53 руб.

Согласно представленному акту сверки взаимных расчетов № 3004 от 09.07.2021, подписанному  ответчиком, задолженность ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» перед ООО «ЦУП ТЭК» по состоянию на 30.06.2021 составляет 14 482,53 руб.

Письмом исх.№ 152-цуп от 07.10.2021 истцом направлены ответчику банковские реквизиты для оплаты задолженности по договору.

В письме исх.№157-цуп от 15.10.2021 истец повторно просил оплатить имеющуюся задолженность.

Из иска следует, что указанная задолженность ответчиком не погашена.

На основании изложенного, истец числит за ответчиком задолженность по договору №В042118/0249Д  от 20.02.2018 в размере 14 482,53 руб.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В материалы дела также представлено письмо от 02.02.2022 № 2089, которым  заказчик уведомил подрядчика об уменьшении (сальдировании) в дату уведомления требований подрядчика по договору № В042118/0811Д от 19.06.2018 на сумму 689 388,39 руб. с НДС, по договору № В042118/0247Д от 20.02.2018 на сумму 3 528 117,49 руб. с НДС; акт сверки по давальческим материалам от 01.10.2021, претензия от 22.12.2021 № 23849, расчет стоимости переданных и подлежащих возврату давальческих материалов ООО «ЦУП ТЭК» (приложение № 3 к уведомлению о сальдировании № 2089 от 02.02.2022).

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик представил в материалы дела отзыв на иск, в котором указал:

1) По договору № В042118/0811Д от 10.06.2018 зарезервированная сумма по договору составляет 1 716 697,50 руб. Поскольку обязательства по договору в полном объеме не были выполнены подрядчиком, объект строительством не был завершен. Договор расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в соответствии со ст. 715 ГК РФ, п. 27.4 договора (уведомление исх. № 24121 от 28.12.2020). Заказчиком для выполнения завершения строительства объекта была привлечена подрядная организация ООО «Совспецстрой», которая по настоящий момент выполняет обязательства по строительству объекта, акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) не подписан сторонами. Таким образом, оснований для выплаты подрядчику резервированной суммы не имеется.

2) Согласно акту сверки взаимных расчетов от 13.01.2021, агент имеет перед принципалом задолженность по договору № В041018/0128Д от 29.01.2018  в размере 128 073 руб. 91 коп.  Указанная задолженность образовалась по причине переплаты принципала агенту и оплачена истцу платежными поручениями № 7205 от 17.03.2022, № 7209 от 24.03.2022. Таким образом, требования истца по агентскому договору являются необоснованными.

3) Зарезервированная сумма по договору № В042118/0293Д от 02.03.2018 составляет           3 720 322 руб. 45 коп. Согласно Приложению №2.1. к договору в редакции дополнительного соглашения №9, выплата зарезервированной суммы установлена в июне 2022 года. Таким образом, в настоящий момент оснований для выплаты подрядчику резервированной суммы не имеется.

4)  Зарезервированная сумма по договору  № В042118/0247Д от 20.02.2018 составляет            12 052 033 руб. 11 коп. Обязательства по договору в полном объеме не были выполнены подрядчиком, замечания, выданные подрядчику при определении готовности объекта к вводу в эксплуатацию, не устранены.  Заказчиком в одностороннем порядке расторгнут договор в соответствии со ст. 715 ГК РФ, п. 27.4 договора (уведомление исх. № 24121 от 28.12.2020). Акт приемки законченного строительством объекта был подписан сторонами с замечаниями - 31.12.2019. Подрядчиком гарантии, указанные в п. 23.1 договора предоставлены не были, в связи с чем сумма резервирования подлежит выплате подрядчику по истечению гарантийного срока, а именно по истечении 31.12.2022 года. Таким    образом,    в    настоящий    момент    оснований    для    выплаты   подрядчику резервированной суммы не имеется.

5) Зарезервированная сумма по договору № В042118/0249Д от 20.02.2018 составляет             14 482 руб. 53 коп. Согласно соглашению между сторонами о расторжении договора от 13.02.2019, подрядчик обязуется прекратить выполнение работ на объекте и в срок до 28.02.2019 передать заказчику по акту приемки-передачи (форма №22 к приложению №1 к договору) результат выполненных на дату подписания соглашения работ.  Подрядчиком гарантии, указанные в п. 23.1 договора, предоставлены не были. Заказчиком для выполнения завершения строительства объекта была привлечена подрядная организация ООО «Стройконтракт», акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) был подписан сторонами 30.09.2019. Следовательно, сумма резервирования подлежит выплате подрядчику по истечении гарантийного срока, а именно по истечении 30.09.2022 года. Таким образом, в настоящий момент оснований для выплаты подрядчику резервированной суммы не имеется.

Истец возражения ответчика на исковое заявление отклонил, пояснив, что срок выплаты резерва по договорам подряда наступил. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, в том числе из договоров и иных сделок.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу положений статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По общему правилу каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (часть 1 статья 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частями 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Бремя доказывания тех или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 N 309-ЭС15-13978).

Между сторонами заключен договор № В041018/0128Д от 29.01.2018 (договор 2), являющийся агентским договором отношения по которому регулируются главой 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации, по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

В соответствии с абзацем 1 статьи 1006 Гражданского кодекса Российской Федерации принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1008 Гражданского кодекса Российской Федерации, в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.

Ссылаясь на расторжение договора и переплату по договору в размере 128 073,91 руб. истец обратился в суд с настоящим иском. 

Согласно представленному в материалы дела отзыву на иск ответчик факт  переплаты по агентскому договору  не оспорил, представил доказательства  возврата истцу денежных средств  в размере 128 073,91 руб. (платежные поручения № 7205 от 17.03.2022 № 7209 от 24.03.2022).

С учетом возврата суммы переплаты истец уточнил исковые требования  в части взыскания 128 073,91 руб. долга  по договор № В041018/0128Д от 29.01.2018, по указанному договору истец требования не предъявляет. 

Правоотношения сторон, возникшие из договоров № от 19.06.2018 № В042118/0811Д (далее – договор 1), от 02.03.2018 № В042118/0293Д (далее – договор 3), от 20.02.2018 №В042118/0247Д (далее – договор 4), от 20.02.2018 № В042118/0249Д (далее – договор 5), являющихся по своей правовой природе договором строительного подряда, регламентированы нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из содержания вышеприведенного положения пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что по итогам проведенной в рамках договора подряда работы происходит обязательная передача и прием результата выполненной работы, опосредуемая составлением и подписанием соответствующего документа приема-передачи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В качестве подтверждения выполнения работ по договорам подряда в материалы дела представлены акты КС-2, справки КС-3. 

Из пояснений сторон следует, что предъявленная истцом к взысканию сумма долга по договорам (№ от 19.06.2018 № В042118/0811Д (договор 1) в размере 1 716 697,50 руб., от 02.03.2018 № В042118/0293Д (договор 3) в размере 3 720 322,45 руб., от 20.02.2018 №В042118/0247Д (договор 4) в размере 12 052 033,11 руб., от 20.02.2018 № В042118/0249Д (договор 5) в размере 14 482,53 руб.) является суммой гарантийного удержания. 

Согласно статье 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (статья 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 6.2.4 договоров предусмотрено, что приемка законченного строительством объекта производится по акту приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В силу п. 22.1 договоров подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в проектной и рабочей документации показателей  и возможность эксплуатации объекта, а также за свой счет выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.3 договоров продолжительность гарантийного срока на объект составляет 3 года от даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

Подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст. 22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) (п. 23.1.1 договора 1). 

В силу п. 23.2.1 договоров заказчик резервирует 10% стоимости фактически выполненных работ, включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно у поставщиков  и приобретаемых подрядчиком у поставщиков, согласованных с заказчиком, до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком  у заказчика в порядке, указанном п приложении № 6.

Согласно п. 23.2.2 договоров зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11), предоставления гарантии в соответствии с условиями ст. 23.1 договора и возврате материально-технических ресурсов заказчика в соответствии с приложением №6.

Из пункта 23.2.3 договоров следует, что в случае непредоставления гарантии, указанной в ст. 23.1 договора сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии в сроки, указанные в ст. 4.4 договора.

Вместе с тем, по договору от 02.03.2018 № В042118/0293Д (договор 3) сторонами подписано дополнительное соглашение №9 от 27.04.2021, в приложении №2 к которому стороны согласовали, что возврат резерва в размере 3 720 322,45 руб. производиться в июне 2022 года.

Из пояснений  ответчика следует, что с учетом редакции дополнительного соглашения №9 срок выплаты резерва по указанному договору наступит 30.06.2022. 

Истец данное обстоятельство подтвердил, пояснив, что срок выплаты резерва наступит не ранее 30.06.2022.

Таким образом, на дату обращения истца в суд с настоящим требованием, а равно на дату   рассмотрения спора срок выплаты резерва по договору от 02.03.2018 №В042118/0293Д (договор 3) не наступил, в связи с чем, требование истца в данной части удовлетворению не подлежит.

Как следует из материалов дела, обязательства по договорам от 19.06.2018 №В042118/0811Д (договор 1), от 20.02.2018 №В042118/0247Д (договор 4), от 20.02.2018 №В042118/0249Д (договор 5) в полном объеме подрядчиком не выполнены, объекты строительством не завершены.

При этом договоры от 19.06.2018 №В042118/0811Д (договор 1) и от 20.02.2018 №В042118/0247Д (договор 4) расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке (письмо от 28.12.2020 № 24121).

Из пояснений ответчика и представленных материалов дела следует, что заказчиком для выполнения завершения строительства объекта по договору от 19.06.2018 №В042118/0811Д (договор 1) была привлечена подрядная организация ООО «Совспецстрой», с которой  заключен договор от 04.08.2021 № В042121/0879Д. По настоящий момент строительство объекта не завершено, акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) не подписан сторонам.

По договору от 20.02.2018 №В042118/0247Д (договор 4) сторонами подписан с замечаниями акт КС-11 от 31.12.2019 № 122 приемки законченного строительством объекта.

По договору от 20.02.2018 №В042118/0249Д (договор 5) работы завершены иным подрядчиком,  подписан акт КС-11  от 30.09.2021 № 86 приемки законченного строительством объекта.

Доказательства предоставления по указанным договорам истцом ответчику гарантии, как то предусмотрено разделом 23 договоров, суду не представлены. Ответчик пояснил, что гарантии не предоставлялись. 

Из указанных выше условий договоров (п.22.1, 22.3, 23.2.1, 23.2.2, 23.1.1, 23.2.3)  следует, что отложенный платеж выполняет обеспечительную функцию, в части исполнения подрядчиком гарантийных обязательств в отношении выполненных по договору работ, в том числе поставленных материалов и оборудования. Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ.

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

С учетом изложенных обстоятельств, а также условий договора, суд приходит к выводу о том, что ввиду отсутствия доказательств предоставления банковской гарантии срок на оплату окончательного платежа наступает по истечении гарантийного срока – 3 года с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).

Поскольку  по договору от 19.06.2018 №В042118/0811Д (договор 1) объект строительством не завершен, работы ведутся иным подрядчиком, акт приемки законченного строительством объекта сторонами не подписан, а по договорам от 20.02.2018 №В042118/0247Д (договор 4), от 20.02.2018 №В042118/0249Д (договор 5) с момента подписания актов КС-11  трехлетний гарантийный срок, установленный п. 22.3 договора, не истек, суд приходит к выводу об отсутствии в настоящее время оснований для выплаты подрядчику зарезервированной суммы.  

Ссылка истца на то, что гарантийный срок должен исчисляться с даты подписания КС-2, противоречит условиям договоров и цели гарантийного удержания.  

Кроме того, суд также учитывает, что законодательством о банкротстве не предусмотрены положения, предоставляющие конкурсному управляющему право требовать досрочной выплаты гарантийного удержания.

Частью конкурсной массы являются не денежные средства гарантийного удержания, а право требования истца к ответчику о возврате суммы гарантийных удержаний, которое может возникнуть только после истечения гарантийного срока на результат работ.

Положения части 1 статьи 126 Федерального закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" не являются основанием для досрочного возврата суммы гарантийных удержаний, поскольку они применяются только к обязательствам должника, в отношении которого открылось конкурсное производство. Поскольку в отношении ответчика конкурсное производство не открывалось, ответчик таким должником не является. Последствия введения конкурсного производства в виде наступления срока денежного обязательства относятся к должнику, а не к третьим лицам.

Нормы указанного закона не содержат положений, прекращающих установленные Гражданским кодексом Российской Федерации гарантийные обязательства, и на основании которых конкурсный управляющий мог бы потребовать досрочного исполнения возврата суммы гарантийного удержания, сославшись на открытие конкурсного производства.

Согласно пункту 1 статьи 131 Федерального закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляют конкурсную массу.

К конкурсной массе относятся не денежные средства как таковые, а право требования возврата гарантийного удержания, которое должно быть исполнено после истечения согласованного сторонами гарантийного срока, при условии, что удержанные денежные средства не будут использованы на устранение недостатков работ по договору.

Исходя из вышеизложенного, основания для удовлетворения требований истца отсутствуют.

Доводы истца о сальдировании (уведомление ООО «Славнефть-Краасноярскнефтегаз» от 02.02.2022 №2089) правового значения в настоящем случае не имеют, поскольку срок выплаты гарантийного удержания по спорным договорам (1,3,4,5) не наступил.

Согласно части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца.

Поскольку определением от 03.03.2022 истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Центр управления проектами топливно-энергетического комплекса" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 110 518 рублей государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.А. Горбатова