АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-4563/23

г. Уфа

11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  "ГЕОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Администрации сельского  

поселения Кармановский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о внесении  изменений:  

1. Внести изменения в муниципальный контракт № 0101300059021000006_254702  от 22.11.2021 года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу  с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не  позднее 20 апреля 2023 года.  

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.05.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.07.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.09.2022;  

4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023».  

2. Внести изменения в муниципальный контракт № 0101300059021000007_254702  от 22.11.2021 года следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу  с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не  позднее 20 апреля 2023 года.  

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  

контрактов: 

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.05.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.07.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.09.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

3. Внести изменения в муниципальный контракт № 0101300059021000009_254702  от 22.11.2021 года, следующего содержания:  

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает в силу  с момента заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, но не  позднее 20 апреля 2023 года.  

График завершения этапов работ, предусмотренных к оплате п.3.4., п. 5.1.  контрактов:  

1 этап - более 25% готовности объекта - не позднее 01.05.2022;  2 этап - более 50% готовности объекта - не позднее 01.07.2022;  3 этап - более 85% готовности объекта - не позднее 01.09.2022;  4 этап - передача квартир, подписание Сторонами Акта приема-передачи  

жилых(ого) помещений(я) - не позднее 10.04.2023». 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  "Специализированный застройщик "ГЕОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

 Взыскать с Администрации сельского поселения Кармановский сельсовет  муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Специализированный застройщик "ГЕОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева