Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело  № А64-3208/2024

30 мая 2024 года

г. Тамбов

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 30 мая 2024 года.

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Яковлевой В.А.,           рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к 

акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52», Знаменский район, Тамбовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности

 

при участии в заседании: 

от истца – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

 

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция городских дорог» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» с требованием о  взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту №131 на ремонт автодороги по ул.Чичканова на участке от дома №1А до ул.Мичуринской в городе Тамбове от 13.12.2022 в размере 3 491 988,29 руб.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 10.04.2024 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу № А64-3208/2024.

Представители истца и ответчика в предварительное судебное заседание не явились, о месте и времени предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом.

С учетом ст. 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд счел возможным провести предварительное судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей.

В силу ч.4 статьи 137 АПК РФ, п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 №65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

В отсутствие возражений против перехода из предварительного в основное судебное заседание, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел в судебное заседание по первой инстанции.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 20 мая 2024 года до 15 часов 40 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено в порядке статей 123, 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся представителей сторон.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, каких-либо ходатайств не заявил.

В соответствии с ч.1 ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Согласно ч. 4 ст. 131 АПК РФ, в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Дело рассматривается по имеющимся доказательствам.

Как следует из материалов дела, 13.12.2022 между муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция городских дорог» (заказчик) и акционерным обществом «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» (подрядчик) был заключен муниципальный контракт №131 на ремонт автодороги по ул.Чичканова на участке от дома №1А до ул.Мичуринской в городе Тамбове Идентификационный код закупки: 223682907565868290100100700024211244 (далее – контракт).

Согласно п. 1.1. контракта Подрядчик обязуется по. заданию Заказчика выполнить ремонт автодороги по ул.Чичканова на участке от дома №1А до ул. Мичуринской в городе Тамбове в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложения №10 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с п. 2.5 Контракта.

В соответствии с п. 2.1. контракта (в редакции дополнительного соглашения № 14 от 25.12.2023) Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 72 407 689 (семьдесят два миллиона четыреста семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 57 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов – 12 067 948 (двенадцать миллионов шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 26 копеек.

Пунктом 5.2. контракта установлены сроки выполнения работ: с 20.04.2023 г. по 27.10.2023 г. (указанный срок включает в себя срок, установленный для принятия результатов исполнения Контракта, подписания и размещения в ЕИС документа о приемке в соответствии с п. 8.5-8.9 Контракта). 

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №10 к Контракту).

Согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ, являющихся приложением №10 и неотъемлемой частью Контракта: 

- срок исполнения 1 этапа контракта и комплекса работ и (или) вида работ «Разборка дорожной одежды и устройство выравнивающего слоя» с 20.04.2023 по 31.05.2023, на основании дополнительного соглашения №4 от 02.06.2022 срок исполнения 1 этапа был перенесен до 29.06.2023, 

- срок исполнения 2 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Установка бортового камня» с 01.05.2023 по 30.06.2023, 

- срок исполнения 3 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Технический тротуар» с 20.05.2023 по 10.06.2023, 

- срок исполнения 4 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Вырубка деревьев и кустарников, попадающих в зону производства работ» с 10.06.2023 по 20.07.2023, 

- срок исполнения 5 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Тротуары» с 01.06.2023 по 31.07.2023, 

- срок исполнения 6 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Устройство верхнего слоя дорожной одежды и замена люков» с 10.06.2023 по 10.08.2023, 

- срок исполнения 7 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Пересечения, примыкания, съезды, парковки, заездные карманы общественного транспорта» с 10.06.2023 по 09.10.2023, 

- срок исполнения 8 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Устройство тактильной плитки на тротуарах, обустройство дороги и безопасность дорожного движения, дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, монтаж наружного освещения, восстановление благоустройства» с 10.06.2023 по 10.10.2023.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2023 по исполнению 1 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 15 531 148,75 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 10.08.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 11.08.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №2 от 22.09.2023 по исполнению 2 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 5 387 401,99 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 22.09.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 26.09.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №3 от 12.10.2023 по исполнению 3 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 1904 877,96 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 12.10.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 13.10.2023.

Акт о приемке выполненных работ №4 от 12.10.2023 по исполнению 4 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 8 905,56 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 12.10.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 16.10.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №5 от 23.11.2023 по исполнению 5 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 11 416 757,36 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 23.11.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 24.11.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №6 от 05.12.2023 по исполнению 6 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 25 926 630,19 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 05.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 05.12.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №7 от 22.12.2023 по исполнению 7 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 9098 899,60 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 22.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 25.12.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №8 от 26.12.2023 по исполнению 8 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 3 133 068,16 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 26.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 27.12.2023.

На основании пункта 8.12. Контракта датой приемки выполненных работ считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Таким образом, обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту исполнены с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

Согласно пункту 10.3. контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком.

В связи нарушением подрядчиком сроков выполнения работ заказчиком начислены пени в сумме 3 491 988,29 руб.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция городских дорог» направило в адрес акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52» претензию от 16.01.2024 о необходимости уплаты неустойки в установленный срок. Данное требование оставлено ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог» в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил.

Исследовав материалы дела, изучив представленные по делу доказательства, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

При этом суд руководствовался следующим.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – Гражданский кодекс РФ, ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса РФ  в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований  – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В настоящем споре обязательства сторон возникли из муниципального контракта №131 на ремонт автодороги по ул.Чичканова на участке от дома №1А до ул.Мичуринской в городе Тамбове Идентификационный код закупки: 223682907565868290100100700024211244 от 13.12.2022.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из договора, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации – «Подряд», а также Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В силу части 1 статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 названного закона. 

В связи с этим при разрешении споров, вытекающих из государственных (муниципальных) контрактов, необходимо руководствоваться нормами Закона о контрактной системе, толкуемыми во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а при отсутствии специальных норм - непосредственно нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные § 1 Гл. 37 Гражданского кодекса РФ «Общие положения о подряде», применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса об этих видах договоров (ч. 2 ст. 702 Гражданского кодекса РФ). 

В силу ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с ч.1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 768 ГК РФ к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Пунктом 5.2. контракта установлены сроки выполнения работ: с 20.04.2023 г. по 27.10.2023 г. (указанный срок включает в себя срок, установленный для принятия результатов исполнения Контракта, подписания и размещения в ЕИС документа о приемке в соответствии с п. 8.5-8.9 Контракта). 

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение №10 к Контракту).

Согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ, являющихся приложением №10 и неотъемлемой частью Контракта: 

- срок исполнения 1 этапа контракта и комплекса работ и (или) вида работ «Разборка дорожной одежды и устройство выравнивающего слоя» с 20.04.2023 по 31.05.2023, на основании дополнительного соглашения №4 от 02.06.2022 срок исполнения 1 этапа был перенесен до 29.06.2023, 

- срок исполнения 2 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Установка бортового камня» с 01.05.2023 по 30.06.2023, 

- срок исполнения 3 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Технический тротуар» с 20.05.2023 по 10.06.2023, 

- срок исполнения 4 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Вырубка деревьев и кустарников, попадающих в зону производства работ» с 10.06.2023 по 20.07.2023, 

- срок исполнения 5 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Тротуары» с 01.06.2023 по 31.07.2023, 

- срок исполнения 6 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Устройство верхнего слоя дорожной одежды и замена люков» с 10.06.2023 по 10.08.2023, 

- срок исполнения 7 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Пересечения, примыкания, съезды, парковки, заездные карманы общественного транспорта» с 10.06.2023 по 09.10.2023, 

- срок исполнения 8 этапа контракта и комплекс работ и (или) вида работ «Устройство тактильной плитки на тротуарах, обустройство дороги и безопасность дорожного движения, дорожные знаки, горизонтальная дорожная разметка, монтаж наружного освещения, восстановление благоустройства» с 10.06.2023 по 10.10.2023.

Акт о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2023 по исполнению 1 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 15 531 148,75 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 10.08.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 11.08.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №2 от 22.09.2023 по исполнению 2 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 5 387 401,99 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 22.09.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 26.09.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №3 от 12.10.2023 по исполнению 3 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 1904 877,96 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 12.10.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 13.10.2023.

Акт о приемке выполненных работ №4 от 12.10.2023 по исполнению 4 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 8 905,56 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 12.10.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 16.10.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №5 от 23.11.2023 по исполнению 5 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 11 416 757,36 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 23.11.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 24.11.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №6 от 05.12.2023 по исполнению 6 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 25 926 630,19 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 05.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 05.12.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №7 от 22.12.2023 по исполнению 7 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 9098 899,60 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 22.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 25.12.2023. 

Акт о приемке выполненных работ №8 от 26.12.2023 по исполнению 8 этапа выполнения работ по Контракту на сумму 3 133 068,16 руб. размещен Подрядчиком в ЕИС 26.12.2023 и подписан Заказчиком в ЕИС 27.12.2023.

Таким образом, обязательства Подрядчика по выполнению работ по Контракту исполнены с нарушением вышеуказанных сроков.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика пени в сумме 3 491 988,29 руб.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно статье 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7).

При этом допускается как применение нескольких неустоек в указанных формах (пени или штраф), начисляемых независимо друг от друга за различные нарушения, так и применение комбинации штрафа и пени как способа определения размера неустойки, применяемой за одно нарушение. Природа установленной в договоре либо законе неустойки и ее цели (покрытие возможных убытков кредитора или наказание должника) устанавливаются путем толкования соответствующих положений. 

Если заявлены требования о взыскании неустойки, установленной в виде сочетания штрафа и пени за одно нарушение, а должник просит снизить ее размер на основании статьи 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств исходя из общей суммы штрафа и пени (пункт 80 постановления Пленума № 7).

На основании части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Согласно пункту 7 статьи 34 Закона о контрактной системе пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

Согласно пункту 10.3. контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком.

Факт нарушения сроков выполнения работ в рамках исполнения вышеуказанного контракта подтвержден материалами дела.

Представленный истцом расчет неустойки признан судом арифметически верным.

Ответчиком контррасчет неустойки не представлен, доказательства оплаты в материалах дела отсутствуют.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 АПК РФ, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. 

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Исследовав обстоятельства дела, оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика.

В силу ч.1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 52», Знаменский район, Тамбовская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городских дорог», г.Тамбов (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени в размере 3 491 988,29 руб., начисленные за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту №131 на ремонт автодороги по ул.Чичканова на участке от дома № 1А до ул.Мичуринской в городе Тамбове от 13.12.2022, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 460 руб.

2. После вступления решения в законную силу истцу по заявлению выдать исполнительный лист.

3. Копии решения на бумажном носителе выдаются лицам, участвующим в деле, по заявлению. 

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                                                    А.В. Истомин