Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-160025/18-12-1100

г. Москва

04 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2018 года

Решение изготовлено в полном объеме 04 декабря 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен помощником судьи Кузнецовой Н.А.

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению 

ООО "Перспектива" (ИНН 7728883629, ОГРН 1147746767178) 

к ответчику: ООО "СМ-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 3.991.343,48 рублей, неустойки в размере 18.005.850,55 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4.756,81 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательства,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Перспектива" (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "СМ-Строй" (далее – ответчик) в пользу истца суммы неосновательного обогащения в размере 3.991.343,48 рублей, неустойки в размере 18.005.850,55 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 4.756,81 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательства.

Заявление мотивировано тем, что ответчик не выполняет обязательства по возврату денежной суммы, в связи с неисполнением договорных обязательств.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

ООО "СМ-Строй" представителей в судебное заседание не направил, о времени и месте проведения судебного разбирательства извещен надлежащим образом, отзыв не представил, в связи, с чем суд в порядке ст.ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчика. 

В силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации последствия.

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Перспектива»  (далее – Истец, Генподрядчик) и ООО «СМ-Строй» (далее – Ответчик, Подрядчик) были заключены следующие договоры подряда на выполнение работ на объекте Генподрядчика, находящегося по адресу: Московская область, Истринский район, Павло-Слободское с/поселение, с. Павловская Слобода, ул. Красная д. 9:  № 01/09-16-35 от «01» сентября 2016 года - по выполнению комплекса работ по монтажу кровельной системы из цементно-песчаной черепицы дома №35 (далее – Договор-1); № 01/09-16-37 от «01» сентября 2016 года - по выполнению комплекса работ по монтажу кровельной системы из цементно-песчаной черепицы дома №37 (далее – Договор-2); № 28/09-16-38 от «28» сентября 2016 года - по выполнению комплекса работ по монтажу кровельной системы из цементно-песчаной черепицы дома №38 (далее – Договор-3); № 01/02-17-53 от «01» февраля 2017 года - по выполнению комплекса работ по монтажу кровельной системы из цементно-песчаной черепицы дома №53 (далее – Договор-4); № 15/05-17-57 от «19» мая 2017 года - по выполнению комплекса работ по монтажу кровельной системы из цементно-песчаной черепицы дома №57 (далее – Договор-5) (далее совместно именуемые «Договоры»). 

ООО «СМ-Строй» в ходе исполнения обязательств по Договорам выполняло работы с нарушением сроков выполнения работ.

Полностью работы Подрядчиком были не выполнены и, соответственно, не сданы Генподрядчику.

По Договору-1:

В соответствии п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ не позднее 5 дней с даты подписания Договора, выполнить их и передать результаты работ Генподрядчику не позднее 70 календарного дня с даты начального срока выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике производства работ (п. 2.2. Договора). 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан был выполнить работы и сдать результаты работ в полном объеме не позднее «13» ноября 2016 года. 

Подрядчик свои обязательства не выполнил в срок, что подтверждается актами, подписанными сторонами – последнее принятие работ датировано 15.11.2017. 

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 175 430,72 рублей (семь миллионов сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 72 копеек) в т. ч. НДС-18%.

Общий срок задержки выполнения и сдачи работ на «26» мая 2018 года (дата расторжения Договора) от даты начала задержки выполнения работ «14» ноября 2016 года составляет 558 (пятьсот пятьдесят восемь) дней. 

По договору-2: 

В соответствии п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ не позднее 5 дней с даты подписания Договора, выполнить их и передать результаты работ Генподрядчику не позднее 70 календарного дня с даты начального срока выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике производства работ (п. 2.2. Договора). 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан был выполнить работы и сдать результаты работ в полном объеме не позднее «13» ноября 2016 года. 

Подрядчик свои обязательства не выполнил в срок, что подтверждается актами, подписанными сторонами – последнее принятие работ датировано 30.11.2017. 

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 8 082 588,07 рублей (восемь миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей 07 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №2 от «19» июля 2017 года к Договору.

Общий срок задержки выполнения и сдачи работ на «26» мая 2018 года (дата расторжения Договора) от даты начала задержки выполнения работ «14» ноября 2016 года составляет 558 (пятьсот пятьдесят восемь) дней. 

По Договору-3:

В соответствии п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ не позднее 5 дней с даты подписания Договора, выполнить их и передать результаты работ Генподрядчику не позднее 76 дней с даты начального срока выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике производства работ (п. 2.2. Договора). 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан был выполнить работы и сдать результаты работ в полном объеме не позднее «18» декабря 2016 года. 

Подрядчик свои обязательства не выполнил в срок, что подтверждается актами, подписанными сторонами – последнее принятие работ датировано 15.11.2017.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 842 695,35 рублей (семь миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 35 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от «14» июля 2017 года к Договору.

Общий срок задержки выполнения и сдачи работ на «26» мая 2018 года (дата расторжения Договора) от даты начала задержки выполнения работ «19» декабря 2016 года составляет 523 (пятьсот двадцать три) дня. 

По Договору-4: 

В соответствии п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ не позднее 5 дней с даты подписания Договора, выполнить их и передать результаты работ Генподрядчику не позднее 70 календарного дня с даты начального срока выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике производства работ (п. 2.2. Договора). 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан был выполнить работы и сдать результаты работ в полном объеме не позднее «16» апреля 2017 года.

Подрядчик свои обязательства не выполнил в срок, что подтверждается актами, подписанными сторонами – последнее принятие работ датировано 31.10.2017. 

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 868 142,37 рублей (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок два рубля 37 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от «19» июля 2017 года к Договору.

Общий срок задержки выполнения и сдачи работ на «26» мая 2018 года (дата расторжения Договора) от даты начала задержки выполнения работ «17» апреля 2017 года составляет 405 (четыреста пять) дней. 

По Договору-5:

В соответствии п. 2.1. Договора Подрядчик обязался начать выполнение работ не позднее 4 дней с даты подписания Договора, выполнить их и передать результаты работ Генподрядчику не позднее 68 календарного дня с даты начального срока выполнения работ.

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются сторонами в Графике производства работ (п. 2.2. Договора). 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с Графиком выполнения работ, Подрядчик обязан был выполнить работы и сдать результаты работ в полном объеме не позднее «29» июля 2017 года. 

Подрядчик свои обязательства не выполнил в срок, что подтверждается актами, подписанными сторонами – последнее принятие работ датировано 31.10.2017. 

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 6 484 037,36 рублей (шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи тридцать семь рублей 36 копеек) в т. ч. НДС-18%.

Общий срок задержки выполнения и сдачи работ на «26» мая 2018 года (дата расторжения Договора) от даты начала задержки выполнения работ «30» июля 2017 года составляет 300  (триста) дней.

Согласно п. 2.3. Договора в случае нарушения Подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, он обязан уплатить Генподрядчику неустойку, а также возместить сверх неустойки убытки, вызванные просрочкой.

Пунктом 2.4. Договора установлено, в случае нарушения Подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, Генподрядчик, кроме применения санкций, предусмотренных п. 2.3, вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору и расторгнуть его в одностороннем порядке. 

Исходя из вышеизложенного, реализуя право, предусмотренное пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, а также п. 2.4, п. 6.2. Договора, в рамках применения ст. 450.1. ГК РФ, расторгнул указанные Договоры путем направления уведомления об отказе от исполнения Договоров, начислении неустойки за просрочку исполнения обязательств по Договорам и возврате суммы неосновательного обогащения (исх. №№ 27, 28, 29, 30, 31 от «25» мая 2018 года   соответственно) (далее – Уведомления).

В соответствии с п. 2.3 Договоров - 1, 2, 3, 5, стороны установили, что в случае нарушения Подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, он обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки, а также возместить сверх неустойки убытки, вызванные просрочкой.

В соответствии с п. 2.3 Договора-4 стороны установили, что в случае нарушения Подрядчиком начального, конечного или промежуточных сроков выполнения работ, он обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по Договору, а также возместить сверх неустойки убытки, вызванные просрочкой.

По Договору-1: 

Общая стоимость работ по Договору до подписания Дополнительного соглашения №2 от 13.11.2017 года: 8 887 151,76 рублей;

Количество дней просрочки до подписания Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года: 363 дней;

Размер начисленной неустойки до 12.11.2017 года: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 887 151,76 рублей х 0,1% х 363 =  3 226 036,09 рублей.

Общая стоимость работ по Договору после подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года: 8 563 151,76 рублей;

Количество дней просрочки после подписания сторонами Дополнительного соглашения №2 от 13.11.2017 года до даты расторжения договора - 26.05.2018: 195 дней; 

Размер начисленной неустойки после 13.11.2017 года: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 563 151,76  рублей х 0,1% х 195 =  1 669 814,59 рублей.

Итого размер начисленной неустойки по Договору-1 составляет 4 895 850,68 рублей (четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 68 копеек).

По договору-2: 

Общая стоимость работ по Договору: 8 887 151,76 рублей;

Количество дней просрочки до даты расторжения договора - 26.05.2018: 558 дней;

Размер начисленной неустойки: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 887 151,76 рублей х 0,1% х 558 =  4 959 030,68 рублей (четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч тридцать рублей 68 копеек).

По Договору-3:

Общая стоимость работ по Договору до подписания Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года: 8 887 151,76 рублей;

Количество дней просрочки до подписания Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года: 328 дней;

Размер начисленной неустойки до 12.11.2017 года: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 887 151,76 рублей х 0,1% х 328 =  2 914 985,78 рублей.

Общая стоимость работ по Договору после подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года: 8 563 151,76 рублей;

Количество дней просрочки после подписания сторонами Дополнительного соглашения №3 от 13.11.2017 года до даты расторжения договора - 26.05.2018: 195 дней; 

Размер начисленной неустойки после 13.11.2017 года: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 563 151,76  рублей х 0,1% х 195 =  1 669 814,59 рублей.

Итого размер начисленной неустойки по Договору-3 составляет 4 584 800,37 рублей (четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот рублей 37 копеек).

По Договору-4:

Стоимость работ по Договору: 8 999 252,54 рублей;

Стоимость частично выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ по Договору: 7 664 872,07 рублей;

Количество дней просрочки: 405 дней;

Размер начисленной неустойки (в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по Договору) по Договору-4 составляет 899 925,25 рублей (восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать пять рублей 25 копеек).

По Договору-5:

Общая стоимость работ по Договору: 8 887 478,56 рублей;

Количество дней просрочки: 300 дней;

Размер начисленной неустойки: общая стоимость работ по договору х 0,1% (неустойка п. 2.3. Договора) х (количество дней просрочки) = 8 887 478,56 рублей х 0,1% х 300= 2 666 243,57 рублей (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок три рубля 57 копеек).

Итого Истцом рассчитаны неустойки по причине ненадлежащего исполнения обязательств (в частности, просрочки исполнения обязательств) по условиям Договоров в следующем размере 18 005 850,55 рублей (восемнадцать миллионов пять тысяч восемьсот пятьдесят рублей 55 копеек).

В соответствии с п. 3.5. Договоров, и в силу п.2, 3 ст. 745 ГК РФ стоимость услуг Генподрядчика определяется в размере 5 (пять) % от стоимости работ (за вычетом стоимости оборудования и материалов).

В случае досрочного прекращения действия Договора стоимость услуг Генподрядчика, подлежащая оплате Подрядчиком определяется из расчета 5 (пять) % от стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком работ на дату прекращения Договора.   

Услуги Генподрядчика ежемесячно подтверждаются Актом об оказании услуг, который предъявляется Генподрядчиком Подрядчику в двух, подписанных со своей стороны экземплярах, не позднее 2(двух) дней после подписания КС-2, КС-3. Подрядчик в течение 2(двух) дней с даты получения акта об оказании услуг рассматривает, подписывает и возвращает один экземпляр акта Генподрядчику, либо в тот же срок направляет Генподрядчику мотивированный отказ от его подписания. В случае, если в указанный срок Подрядчик не направит в адрес Генподрядчика подписанный со своей стороны экземпляр акта, либо откажется от подписания акта по причинам, которые Генподрядчик сочтет необоснованными, такой акт подписывается Генподрядчиком в одностороннем порядке и имеет полную юридическую силу для обеих Сторон.

Оплата услуг, оказанных Генподрядчиком Подрядчику, может производится путем зачета встречных однородных требований сторон, который оформляет Генподрядчик и предоставляет Подрядчику вместе с актом об оказании услуг и счетом-фактурой. 

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соглашения о зачете подписывает и возвращает один экземпляр соглашения Генподрядчику. В случае, если в указанный выше срок Подрядчик не направит в адрес Генподрядчика подписанный со своей стороны экземпляр соглашения о зачете, либо откажется от подписания соглашения по причинам, которые Генподрядчик сочтет необоснованными, такое соглашение подписывается Генподрядчиком в одностороннем порядке и имеет полную юридическую силу для обеих Сторон.

В случае не проведения зачета встречных однородных требований Подрядчик обязан оплатить оказанные услуги не позднее 5 (пяти) дней с даты выставления ему Генподрядчиком счета-фактуры и акта об оказании услуг.

Ответчик, в силу вышеуказанного условия, а также в силу разницы между перечисленными Истцом денежными средствами и стоимости частично выполненных Ответчиком и принятых Истцом работ, имеет следующие задолженности перед Истцом (данные задолженности отражены в актах сверок взаимных расчетов по данным бухгалтерского учета ООО «Перспектива»):

По Договору-1:

По Договору Генподрядчиком был выплачены авансы, а также произведены оплаты за выполненные работы в размере 7 641 912,43 рублей (семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча девятьсот двенадцать рублей 43 копеек) в т.ч. НДС-18%.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 175 430,72 рублей (семь миллионов сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 72 копеек) в т. ч. НДС-18%.

Генподрядчиком в адрес подрядчика были выставлены документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг на сумму 157 533,77 рублей (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 77 копеек) в т. ч. НДС-18%.

С учетом образовавшейся задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» в размере  466 481,71 рублей (четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят один рубль 71 копеек), а также в размере стоимости оказанных генподрядных услуг в размере 157 533,77 рублей (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать три рубля 77 копеек). 

Итого ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» по Договору-1 в размере 624 015,48 рублей (шестьсот двадцать четыре тысячи пятнадцать рублей 48 копеек).

По Договору-2:

По Договору Генподрядчиком был выплачены авансы, а также произведены оплаты за выполненные работы в размере 8 387 672,78 рублей (восемь миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 78 копеек) в т.ч. НДС-18%.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 8 082 588,07 рублей (восемь миллионов восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей 07 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №2 от «19» июля 2017 года к Договору.

Генподрядчиком в адрес подрядчика были выставлены документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг на сумму 172 081,63 рублей (сто семьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 63 копеек) в т. ч. НДС-18%.

С учетом образовавшейся задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» в размере  305 084,71 рублей (триста пять тысяч восемьдесят четыре рубля 71 копеек) , а также в размере стоимости оказанных генподрядных услуг в размере 172 081,63 рублей (сто семьдесят две тысячи восемьдесят один рубль 63 копеек). 

Итого ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» по Договору-2 в размере 477 166,34 рублей (четыреста семьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть рублей 34 копеек).

По Договору-3:

По Договору Генподрядчиком был выплачены авансы, а также произведены оплаты за выполненные работы в размере 7 968 332,03 рублей (семь миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста тридцать два рубля 03 копеек) в т.ч. НДС-18%.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 842 695,35 рублей (семь миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот девяносто пять рублей 35 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от «14» июля 2017 года к Договору.

Генподрядчиком в адрес подрядчика были выставлены документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг на сумму 168 656,91 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 91 копеек) в т. ч. НДС-18%.

С учетом образовавшейся задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» в размере  125 636,68 рублей (сто двадцать пять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 68 копеек), а также в размере стоимости оказанных генподрядных услуг в размере 168 656,91 рублей (сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 91 копеек). 

Итого ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» по Договору-3 в размере 294 293,59 рублей (двести девяносто четыре тысячи двести девяносто три рубля 59 копеек).

По Договору-4:

По Договору Генподрядчиком был выплачены авансы, а также произведены оплаты за выполненные работы в размере 8 460 181,71 рублей (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч сто восемьдесят один рубль  71 копеек) в т.ч. НДС-18%,.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 7 868 142,37 рублей (семь миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто сорок два рубля 37 копеек) в т. ч. НДС-18%.

В данный объем работ также входят и дополнительные работы, выполненные ООО «СМ-Строй» в соответствии с Дополнительным соглашением №3 от «19» июля 2017 года к Договору.

Генподрядчиком в адрес подрядчика были выставлены документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг на сумму 172 078,38 рублей (сто семьдесят две тысячи семьдесят восемь рублей 38 копеек) в т. ч. НДС-18%.

С учетом образовавшейся задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» в размере  592 039,34 рублей (пятьсот девяносто две тысячи тридцать девять рублей 34 копеек) , а также в размере стоимости оказанных генподрядных услуг в размере 172 078,38 рублей (сто семьдесят две тысячи семьдесят восемь рублей 38 копеек). 

Итого ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» по Договору-4 в размере 764 117,72 рублей (семьсот шестьдесят четыре тысячи сто семнадцать рублей 72 копеек).

По Договору-5:

По Договору Генподрядчиком был выплачены авансы, а также произведены оплаты за выполненные работы в размере 8 170 793,54 рублей (восемь миллионов сто семьдесят тысяч семьсот девяносто три рубля 54 копеек) в т.ч. НДС-18%,.

Подрядчиком частично были выполнены, а Генподрядчиком приняты работы на следующие стоимостные показатели 6 484 037,36 рублей (шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи тридцать семь рублей 36 копеек) в т. ч. НДС-18%.

Генподрядчиком в адрес подрядчика были выставлены документы, подтверждающие оказание генподрядных услуг на сумму 144 994,17 рублей (сто сорок четыре тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 17 копеек) в т. ч. НДС-18%.

С учетом образовавшейся задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» в размере  1 686 756,18 рублей (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 18 копеек) , а также в размере стоимости оказанных генподрядных услуг в размере 144 994,17 рублей (сто сорок четыре тысячи девятьсот девяносто четыре рубля 17 копеек). 

Итого ООО «СМ-Строй» имеет задолженность перед ООО «Перспектива» по Договору-5 в размере 1 831 750,35 рублей (один миллион восемьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 35 копеек).

Итого сумма задолженности, составляющей разницу между перечисленными Генподрядчиком денежными средствами и стоимости выполненных подрядчиком работ, а также сумма начисленных генподрядных услуг по Договорам у Ответчика перед Истцом в размере 3 991 343,48 рублей (три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча триста сорок три рубля 48 копеек).

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

26.05.2018 года  Ответчик должен был получить Уведомления, что подтверждается отчетами об отслеживании отправлений, соответственно с указанной даты Ответчик должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

В самих уведомлениях, Истцом были установлены сроки возврата денежных средств в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомлений.

Исходя из вышеизложенного последний день возврата суммы неосновательного обогащения 26.06.2018 года.

Сумма процентов за пользование чужими денежными средствами на дату подачи искового заявления на сумму неосновательного обогащения составляет 4 756,81 рублей (четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 81 копеек).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно ч. 3 ст. 1103 ГК РФ, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Ответчиком не представлено доказательств выполнения работ.

Факт невыполнения ответчиком обязательств по возврату денежных средств, в связи с неисполнением обязательств по договору подтверждается материалами дела, доказательств оплаты задолженности суду не представлены.

Пунктом 3 вышеуказанной статьи установлено, что если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Таким образом, вышеуказанные нормы предусматривают возможность одностороннего отказа от  договора.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Доказательств выполнения указанных объемов работ ответчиком не представлено. 

Оснований для удержания ответчиком спорной денежной суммы, установленные договором, отсутствуют.

Факт невыполнения ответчиком обязательств по возврату денежных средств, в связи с неисполнением обязательств по договору подтверждается материалами дела, доказательств оплаты задолженности суду не представлены.

В связи с изложенным судом признаются обоснованными требования истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 3.991.343,48 руб.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен истцом на условиях ст. 395 ГК РФ, проверен судом и признан правильным.

Кроме этого, также подлежит удовлетворению требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.07.2018 г. до даты фактического погашения задолженности от суммы долга.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиком доказательств, подтверждающих возврат денежных средств, суду не представлено. 

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, при этом, ответчик не представил достаточных и допустимых доказательств явной несоразмерности неустойки.

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму долга, пени и процентов, поскольку исполнитель не исполнил свои обязательства в установленный срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 ГК РФ.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 395, 1102, 1103 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМ-Строй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму неосновательного обогащения в размере 3.991.343 (три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча триста сорок три) руб. 48 коп., неустойку в размере 18.005.850 (восемнадцать миллионов пять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 55 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 4.756 (четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 81 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами с 03.07.2018 г. до момента фактического исполнения обязательства и государственную пошлину в размере 133.010 (сто тридцать три тысячи десять) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья: А.С.Чадов