АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432970 

Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

22 июля 2021 года Дело № А72-6053/2021  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Страдымовой М.В. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стандартэнергомонтаж» в  течении месяца после вступления в законную силу решения суда устранить недостатки  выполненных работ по текущему ремонту полов коридоров, вестибюля, лестничных  площадок и маршей административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: по позициям сметы № 32,79,137,183 -  выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, провести усиление металлического каркаса,  восстановление покрытия из листов ГВЛ и плитки; по позициям сметы № 39,86,144,190 -  выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, монтаж листов ГВЛ с правильным  креплением саморезами, восстановить покрытия из плитки; по позициям сметы №  39,86,144,190 - выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ в местах образования трещин,  выполнить монтаж новых листов ГВЛ, восстановить покрытия из плитки; по позициям  сметы № 56,98,104,156,162,167,208 - выполнить демонтаж плитки, снятие клея,  устройство покрытия из плитки с использованием клея ЕК Titan4000; по позициям сметы   № 37, 84, 142, 188 - выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, оклейку металлических  лаг лентой «Дихтунгсбанд», восстановить покрытия из листов ГВЛ и плитки; по позиции   № 9 сметы - выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, уборку строительного мусора,  восстановление покрытия из листов ГКЛ и плитки; по позициям сметы № 35, 82, 140,  186 - выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, огрунтовку и покраску 2 слоя  металлического каркаса, восстановить покрытия из листов ГКЛ и плитки; по позициям  сметы № 36, 83, 141, 187 - выполнить демонтаж плитки и листов ГВЛ, покраску 2 слоя  металлического каркаса, восстановить покрытия из листов ГКЛ и плитки; по позициям  сметы № 44, 51, 70, 91, 99, 149,157,195, 203 – выполнить замену треснувшей плитки и  листов ГКЛ на новые; по позициям сметы № 44, 51, 70, 91, 99, 149,157,195,203 –  выполнить демонтаж плитки в местах с уступами, наклеить плитку заново; по позициям  сметы № 49, 57, 77, 97, 105, 140, 155,163, 172, 201, 218 - выполнить демонтаж плитки и  клея, покрыть поверхности листов ГКЛ грунтовкой «Бетон-контакт», восстановить  покрытия из плитки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стандартэнергомонтаж»  в пользу Областного государственного казённого учреждения «Управление делами  Ульяновской области» штраф за ненадлежащее исполнение контракта в размере  1 076 545 руб. 62 коп.; взыскать 89 733 руб. 60 коп. – возмещение расходов по  исследованию качества выполненных подрядчиком работ; государственную пошлину в  размере 29 765 руб. 00 коп.  

Возвратить Областному государственному казённому учреждению «Управление  делами Ульяновской области» из федерального бюджета по справке государственную  пошлину в размере 898 руб. 79 коп.  

 Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца с момента его  принятия.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  порядке и сроки, установленные ст.ст.257-260 АПК РФ, а также в арбитражный суд  кассационной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст.273-276 АПК РФ.  

. 

Судья М.В. Страдымова