Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-101350/2021

21 февраля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 февраля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  21 февраля 2022 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Стрельчук У.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (адрес: Россия 188653, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Участок Строительно-Монтажных Работ - 288 СПб» (адрес: 196601, Санкт-Петербург, 

<

...>, литер А, пом. 12-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2, дов. от 21.07.2021

- от ответчика: не явился, извещен

установил:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Участок Строительно-Монтажных Работ - 288 СПб» (далее - ответчик) 2 746 190,11 руб. неустойки по договору от 03.05.2018 № 2018-88; 950 000 руб. штрафа по пунктам 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.12, 4.2.15 договора от 03.05.2018 № 2018-88.

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, представителя для участия в судебном заседании не направил; отзыв на исковое заявление не представил.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие ответчика.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что между сторонами заключен договор от 03.05.2018 № 2018-88 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области по адресам, указанным в Адресном перечне и расчете стоимости выполнения работ в Приложении № 2 к Договору, в том числе работы по ремонту по капитальному ремонту в следующих многоквартирных домах:

- 

<

...>. работы по ремонту фасада;

- 

<

...>, работы по ремонту фасада и ремонту кровли;

- 

<

...>, работы по ремонту фасада и ремонту кровли.

За нарушение срока выполнения работ истец начислил ответчику, предусмотренную пунктом 8.2 договора неустойку, размер которой составил 2 746 190,11 руб.

В связи с нарушением обязательств по договору, предусмотренных пунктам 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.12, 4.2.15 договора, истец начислил ответчику штраф в общей сумме 950 000 руб.

Поскольку ответчик досудебную претензию оставил без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 В соответствии с положениями статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств можно обеспечивать неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается, нарушение сроков выполнения работ и обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.12, 4.2.15 договора, в связи с чем у истца возникло право на взыскание штрафных санкций. 

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, рассчитанным в соответствии с условиями договора и подлежащим применению.

Ответчик расчет не оспорил; доводы истца не опроверг, ходатайство о снижении штрафных санкций на статьи 333 ГК РФ не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как следует из материалов дела, ответчик возражений по размеру неустойки в нарушение требований 65 статьи АПК РФ, не представил. Данное бездействие со стороны ответчика свидетельствует о фактическом признании тех обстоятельств, которые заявлены истцом в обоснование исковых требований.

В силу статей 9, 41, 65 АПК РФ участвующие в деле лица самостоятельно осуществляют свои процессуальные права и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, обязаны своевременно представлять доказательства в подтверждение своих доводов.

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворении в полном объеме с отнесением на ответчика расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Участок Строительно-Монтажных Работ - 288 СПб» в пользу Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области 2 746 190,11 руб. неустойки по договору от 03.05.2018 № 2018-88; 950 000 руб. штрафа по пунктам 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.12, 4.2.15 договора от 03.05.2018 № 2018-88; 41 481 руб. в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Стрельчук У.В.