2 

17/2023-138718(3) 2 

 д е к 

 

а 

б р 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;   

http://ryazan.arbitr.ru; 2

 0 

Именем Российской Федерации 2

 3

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 г

г. Рязань Дело № А54-6254/2023 о 

20 декабря 2023 года д 

 а  

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Котовой А.С. ,  руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1. Обязать к общество с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА"  

(390029, 

<

...>, ОФИС  

30,32, ОГРН: 

<

***>) в срок не позднее 01 мая 2022 года со дня вступления  

решения суда в законную силу своими силами, средствами и за свой счет, с  

использованием материалов, качество которых не ниже качества материалов,  

указанных в техническом задании к договору, устранить недостатки (дефекты)  

выполненных на основании договора № 08-10/0716/215 от 18.07.2016 работ по  

капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.  

Рязань, Первомайский пр-т, д. 47/1, зафиксированные в рекламационном акте от  

22.09.2022, с учетом акта осмотра от 31.03.2023, путем выполнения следующих видов и  

объемов работ в следующей последовательности: 1) По ремонту балконных плит: • Отбивка штукатурки - 2 м2; 

• Покрытие поверхностей плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз - 52  

м2 (под штукатурку); 

• Штукатурка поверхностей балконных плит смесью БИРСС - 52 м2;  

• Покрытие поверхностей плит грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз - 52  

м2 (под окраску); • Окраска балконных плит акриловыми составами за 2 раза - 52 м2. 2) По ремонту фасада: 

• Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз - 25  

м2 (под окраску); 

• Окраска стен акриловыми составами за 2 раза - 25 м2;  • Отбивка штукатурки - 4 м2;  

• Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз - 91  

м2 (под штукатурку); 

• Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону по  

сетке фасадной цементно-известковым раствором - 91 м2; 

• Окраска стен акриловыми составами за 2 раза - 91 м2.  3) По ремонту наружных оконных откосов:  

• Отбивка штукатурки - 0,1 м2; 

• Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  (под штукатурку) - 2,6 м2;  

• Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по сетке фасадной  цементно-известковым раствором - 2,6 м2;  

• Покрытие поверхностей откосов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  (под окраску) - 2,6 м2;  

• Окраска откосов акриловыми составами за 2 раза - 2,6 м2. 4) Выполнить погрузку и вывезти строительный мусор - т/факт. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЕРСПЕКТИВА"  (390029, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных  домов Рязанской области (390046, 

<

...> СТР3, ОГРН: 

<

***>) расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской  области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской  области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки,  установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья А.С. Котова